업무연락전
작 성 자	이정국	작성일자	2014-11-25	문서번호	도시기반시설본부-14-45539
대상현장	[신림2 빗물펌프장 설치공사](주)도화엔지니어링
제 목	기존 자전거 도로포장 변경 등 실정보고 승인 통보
내 용
1. 신림감 제2014-376호(2014.11.10.)와 관련입니다. 2. 귀 감리단에서 수행 주인 『신림2 빗물펌프장 설치공사』 관련 실정보고한 “기존 자전거 도로포장 변경 외(4건)” 에 대하여 다음과 같이 승인 통보하오니 감리업무 수행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다. 가. 상기 실정보고는 현장여건상 적정하다고 판단되어 승인하나 구조물에 설치하는 난간의 경우 변경 난간살 간격(333mm)은 안전 확보를 위하여 재 검토 후 규정에 맞는 간격으로 설치함이 타당하다고 판단됨.
붙임 : 실정보고 방침서(기존 자전거 도로 포장변경 등 검토보고) 1 부. 끝.

서울특별시