문서번호	방재시설부-12113
결재일자	2014.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	방재시설과장	방재시설부장

“신림2 빗물펌프장 설치공사”

기존 자전거 도로 포장변경 등 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

도시기반시설본부

방재시설부

기존 자전거 도로포장 변경 등 검토보고

도림천 둔치(좌안)에 기 설치된 자전거도로 포장변경(투수콘→아스콘), 난간 및 사다리, 조경석 쌓기 및 헐기, 가로등 이설 및 철거 등에 대한 수량 조정(증ㆍ감) 검토 보고임.

□ 관련근거

○ 신림감2014-376호(2014.11.10)

- 기존 자전거 도로포장 변경외(4건) 실정보고

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 신림2 빗물펌프장 설치공사

○ 공사규모 : 집수정 V=5,300㎥ / 토출관로 W2.5×H1.0 × 3련

○ 공사기간 : 2013. 01. 04. ~ 2014. 12. 15

○ 도 급 비 : 6,626백만원

○ 시 공 사 : 임원개발(주)외 1

○ 감 리 사 : ㈜도화 외 1

□ 보고내용

○ 기존 자전거도로 포장 변경 및 연장조정

- 기존 자전거 도로 포장변경(투수콘→아스콘) 및 연장조정(110m→154m)

☞ 관악구청 요구사항임

○ 조경(갯버들, 조경석 쌓기 및 헐기) 수량 변경

- 갯버들 식재 수량산출 착오 정정(11,706본⇒1,363본)

- 조경석 헐기 설계수량(295톤) 산출근거 불명확 수량 정정

- 조경석 헐기 및 쌓기 불가구간(교량 접속부분) 삭제

○ 난간, 사다리 및 자바라(대문) 설치 변경

- 난간 설치 조정

☞ 난간 간격(간살)은 안전를 위해 간격 조정(700mm→333mm)

☞ 정문(대문) 자바라 추가설치(관악구 협의 후 형식 최종 결정 예정)

< 평 면 도 >

당 초	변 경
< 수량산출서 근거한 개념도 >	< 실제 시공예정 단면도 >

- 사다리 설치 조정

☞ 사다리 진출입시 추락방지 예방을 위한 안전난간(등받이) 추가설치

☞ 흡수정, 방류ㆍ유입수문, 펌프실 등 출입사다리 수량조정

당 초	변 경
< 수량산출서 근거한 개념도 >	< 실제 시공예정 단면도 >

○ 1차, 2차 분리시공에 따른 임시 가설도로의 가로등 이설 및 철거수량 정산

- 1차, 2차 분리시공에 따라 설치한 우회도로의 가로등 이설(재설치) 수량조정

- 2차분 공사에 따른 기존 자전거도로 가로등 이설(재설치) 수량조정

- 당초 6개소 ⇒ 변경 12개소

가로등 재설치 평면도
당초
변경

○ 수방기간 중 도림천 법면부 유실방지 등을 위한 전석쌓기 및 철거

- 자재 및 장비 진출입로측, 자연방류수로측 제방 전석쌓기 및 철거

- 임시펌핑 하부 유실방지를 위한 전석쌓기 및 철거

전석 쌓기 위치도	설치 현황

○ U형 측구 삭제(최소화)

- 순간 강우시 오수 월류방지를 위한 당초 보조관로(U형 측구)를 삭제하고 차집관거 맨홀에 연결관(L=30m, D=450mm) 부설

당 초	변 경
U형 측구 : L=103m, B=400mm	연결관 : L=30m, D=450mm

○ 물량 증ㆍ감 현황

공 종		규 격	단 위	수 량			비 고
				당 초	변 경	증 , 감
1. 기존자전거도로 변경외
- 난간 및 사다리			m	58	114	증) 56
- 자바라 대문			m	0	10	증) 10
- 조경석 쌓기			㎡	1,852	943	감) 909
- 자전거 도로 포장			㎡	101	941	증) 840
- 갯버들 식재			본	11,706	1,363	감)10,343
- U형 측구			m	103	0	감) 103
- 전석쌓기 및 헐기			㎡	0	132.7	증) 132.7
- 조경석 헐기			TON	295	788	증) 493
- 가로등 이설 및 재설치			m	170	455	증) 285
관급자재	아 스 콘		TON	0	224	증) 224

○ 공사비 증ㆍ감 현황

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 . 감	비 고
1. 기존자전거도로 변경외
- 난간 및 사다리	2,497	16,990	증)14,493
- 자바라 대문	0	3,620	증) 3,620
- 기존자전거도로공	154,640	98,721	감)55,919
- U형측구	18,584	0	감)18,584
- 조경석(전석) 헐기 등	16,775	44,810	증)28,035
- 혼합골재	0	4,192	증) 4,192
- 가로등이설 재설치	16,591	29,484	증)12,893
- 직접공사비	209,087	197,822	감)11,265
- 제경비	109,496	108,419	감) 1,077
- 도급공사비	318,583	306,241	감)12,342
- 관급자재비	0	17,594	증)17,594
총사업비	318,583	323,835	증) 5,252

○ 책임감리원 검토의견

- 난간 및 사다리는 안전을 확보하기 위하여 간격조정 및 안전난간 설치.

- 기존 자전거도로의 포장 변경은 관악구청 요구사항으로 기존 포장(콘크리트)도 아스콘 포장으로 변경 중에 있음.

- 가로등 이설 및 철거는 수량 정산임.

□ 조치의견

○ 상기 책임감리원 보고내용과 같이 기존 자전거도로 포장변경, 조경(갯버들, 조경석, 전석) 변경, 구조물에 설치하는 난간, 사다리 및 가로등 수량 조정, U형 측구 삭제 등은 현장 여건을 감안할 때 적정하다고 판단되므로 승인코자 함.

○ 다만, 난간설치의 경우 변경코자 하는 난간살 간격(333mm)은 적정한지 재검토 후 규정에 맞는 간격으로 설치토록 업무지시코함.

첨부 : 책임감리원 검토의견서 1 부. 끝.