저소득층 기초소방시설 설치․보급

서울소방재난본부

□ 기    간 : 2014. 7월 ~ 11월 (5개월)

* 계약(설치) 업체 ⇨ ㈜케이텔(☏ 031-852-7372, *************)  //  계약일(‘14. 6. 12.)

□ 품    명 : 단독경보형감지기 (배터리 10년형)

□ 설치수량 : 총 18,000세대 → 29,000개

※ 단가계약 체결 이후 낙찰차액 활용 동일 금액으로 추가 설치 추진(11월 이후)

□ 세부일정

추진월	소 방 서	수량(개)	추진율(%)
7월	종로, 중부, 은평, 마포, 서대문	4,930	10
8월	동대문, 광진, 성북, 도봉	5,630	40
9월	노원, 중랑, 강북, 영등포	5,860	60
10월	강서, 양천, 구로, 관악, 동작	7,410	80
11월	용산, 강남, 서초, 강동, 송파	5,170	100
계	-	29,000	-

※ 월별 설치계획은 소방서 기타 사유 및 계약업체 진행률에 따라 변동 가능

[ 사 업 개 요]

▪ 사 업 명: 단독경보형감지기 및 소화기(1.5㎏) 무료 설치․보급 단가계약

▪ 사업기간: ‘14. 4월 ~ ’15. 1월 (10개월)

▪ 사업대상

- 기초생활수급자 등 : 서울시 통계자료와 구청 등 자치단체의 협조 현장 확인 후 선별

- 소방차 통행곤란지역(영세밀집) : 48개 지역 우선 설치 (본부 재난대응과)

▪ 사업예산: 803백만원 (단독경보형감지기 설치비 포함)

▪ 계약방법: 입찰에 의한 계약(제한경쟁) / 단가계약

▪ 예정수량: 소화기(1.5㎏) 18,000개 / 단독경보형감지기(배터리 10년형) 29,000개

▪ 설치방법: 단독경보형감지기(계약업체 설치), 소화기(소방공무원 보급과 동시에 감지기 설치상태 검수)

(설치대상 18,000세대) - 홀몸노인, 소년소녀․한부모 가정, 기초생활수급자 등

※ 단가계약 체결 금액 대비 설치 세대수, 예정수량(설치개수)는 변동 될 수 있음

☞ 중증장애 또는 거동불편 세대의 구획된 거실에 감지기 1개 추가 설치(11,000세대)

□ 설치 ․ 보급 및 검사(수) 방법

○ 업무 프로세스

설치 예정대상 선정 (‘14. 5~6월)	⇨	납 품 요 구 (‘14. 7~11월)	⇨	설치 및 보급 (‘14. 7~11월)	⇨	검 수 및 대가 지급 (‘14. 7~’15.1월)
소방서		소방서 → 계약업체		계약 업체		소방서

○ 단독경보형감지기 설치 ․ 납품 요구는 문서(서면)로 함을 원칙으로 하되

긴급 시 메일 또는 전화로 가능

○ 각 소방서별 납품요구한 날로부터 45일 이내 설치 ․ 보급 추진

○ 각 소방서별 예산 배정 후 지방재정관리시스템(e - 호조) 지출 품의 등록

○ 물품 검수는 계약업체에서 설치 완료 요청일로부터 14일 이내 추진

○ 물품 검수 완료 후 지방재정관리시스템(e - 호조) 등록

○ 설치완료 후 세대 정보 및 설치사진을 소방서에 제출 (계약업체 → 소방서)

○ 추진 대상은 반드시 소방서별 해당 세대 설치 또는 해당 세대 이상 추진 (계약업체)

예) 종로소방서 400세대 설치 시 반드시 400세대 또는 400세대 이상 설치토록 추진

□ 행정사항

○ 설치세대의 관계인 부재, 연락처 오기, 연락두절, 기타사유 등으로          인하여 추가대상 필요시 계약(설치) 업체에 추가 대상 신속히 제공

○ 소방서별 우선 설치세대는 계약업체와 협의하여 우선 설치추진

○ 각 소방서별 최종 결과(대가지급 금액, 세대별 설치수량, 검수 완료 현황 등)는        완료 후 5일 이내 제출 – “제출서식 별도 시달”

(보조자료 1)

소방서	설치세대	설치수량(개)	단 가	배정예산(원)	비 고 (설치월별)
종 로	400	640	15,360	9,830,400	7월
중 부	400	640	〃	9,830,400	7월
광 진	1,100	1,770	〃	27,187,200	8월
용 산	600	970	〃	14,899,200	11월
동대문	1,000	1,610	〃	24,729,600	8월
영등포	800	1,290	〃	19,814,400	9월
성 북	900	1,450	〃	22,272,000	8월
은 평	900	1,450	〃	22,272,000	7월
강 남	600	970	〃	14,899,200	11월
서 초	600	970	〃	14,899,200	11월
강 서	1,000	1,610	〃	24,729,600	10월
강 동	600	970	〃	14,899,200	11월
마 포	600	970	〃	14,899,200	7월
도 봉	500	800	〃	12,288,000	8월
구 로	900	1,450	〃	22,272,000	10월
노 원	800	1,290	〃	19,814,400	9월
관 악	900	1,450	〃	22,272,000	10월
송 파	800	1,290	〃	19,814,400	11월
양 천	1,000	1,610	〃	24,729,600	10월
중 랑	900	1,450	〃	22,272,000	9월
동 작	800	1,290	〃	19,814,400	10월
서대문	700	1,230	〃	18,892,800	7월
강 북	1,200	1,830	〃	28,108,800	9월
계	18,000	29,000	-	445,440,000	-

※ 월별 설치계획은 소방서 기타 사유 및 계약업체 설치 진행률에 따라 변동 가능