건강부문	3 - 1.	건강한 물순환 시스템 도입

자체 평가	()목표달성, (√)정상추진, ()부진, ()사업중단 사업진도율 : %	담당	물관리정책과 물순환정책팀
			팀장 : 손경철 주무관 : 이두환 ☎ 2133-3761

적응대책상의 사업계획 개요

공공 및 민간시설에 분산식 빗물관리시설 설치

-  총 목표량 : 599만톤

-  유역별 및 시설별 단위 대책량

∙ ‘11.3 ~ ’13.2 : 빗물관리시설 설치 기본계획 용역 시행중

▹ 1단계 (‘11.3~’13.6) : 중랑천 권역

▹ 2단계 (‘12.4~’13.3) : 안양천, 탄천, 홍제천

-  2020년 목표 : ‘11년 9.7만톤(2.4%) ⇒ ’20년 40만톤(10.0%)

정기적인 빗물관리시설 관리실태 지도 및 점검

-  빗물관리시설 413개소 지도·점검 실시

'13년 추진실적

공공 및 민간시설에 분산식 빗물관리시설 설치

○ 서울형 자연배수 시스템의 개발·보급을 위한 관련 제도정비 실적

- 물재이용 관리계획 수립 (환경부 승인, ‘13. 9)

∙2020년 서울시 물재이용 목표량을 208,820천㎥/년으로 설정하여

2010년(50,495천㎥/년) 대비 약 4.1배 증가

- 서울특별시 빗물관리 기본계획 수립완료 (’13. 7)

∙’50년까지 연평균 강우량의 40%인 620㎜를 저류·침투 관리

∙시설별 빗물관리 분담량 기준 및 제시

- 다양한 시설지원 등 민간 보급 확대를 위한 지원방안 마련

∙빗물관리시설의 설치 및 지원에 관한 지침 개정(’13.3.26)

∙빗물관리시설 설치·관리의 활성화를 위해 민간 전문가, 경험자 등으로 구성된 빗물이용 주치의 프로그램 운영(‘13.6~)

- 건강한 물순환 도시 조성 종합계획 수립(’13.10.7)

∙5개 분야 42개 세부 실행계획

- 전문기관과의 상호협력체계 구축 및 추진을 위한 MOU 체결(’13.10.11)

∙도시물순환 인프라의 저영향개발 구축·운영 기술단 (부산대,건기연,LH)

○ 분산식 빗물관리 시범사업 추진 실적

- 빗물마을 시범단지조성

∙도봉구 새동네(‘13.12.12 공사착공), 응암동 산골마을, 기자촌(설계 중)

∙마곡지구 물순환 도시 추진 (설계 중)

- ‘13년 빗물관리시설 확충 시범사업 추진 실적

∙공공시설(기관) 빗물관리시설 확충

▹ (시립미술관) 빗물침투시설 2개소(‘13.4 완료)

▹ (시립대) 학생회관 등 4개 건물 : 빗물저장량 120㎥(‘13.5 완료)

▹ (서소문청사) Blue roof 시범설치(‘13.5 완료)

▹ (성동, 서부도로사업소) 빗물이용시설 80㎥ (‘13.11 완료)

▹ (중랑물재생센터) 투수블록포장 659㎡ (‘13.11 완료)

▹ (노원구 동일로) 투수블록포장 3,900㎡(‘13.11 완료)

〈학 생 회 관〉          〈서소문청사 Blue roof〉       〈시립미술관 빗물침투시설〉

∙빗물침투 시설 시범사업 추진(종로구 효자배수분구 3개소)

※ 침투형 빗물받이 108개소, 침투배수로 등 275m,  침투형 저류조 214㎥

청운중학교 옥상 블루루프 285.5㎡

∙망우산 빗물 저류조 내 이용시설 설치(청소용수) 8,000㎥

∙자치구 및 민간 빗물관리시설 설치비 보조

▹(자치구) 도봉구 둘리뮤지엄(어린이도서관 및 문화시설) 등 9개소 265㎥

▹(민  간) 송파구 석촌동 등 31개소 35㎥

※ 민간보조 빗물이용시설 일제 전수조사 실시(‘13.4.1 ∼4.8, 95개소)

∙하수관거 정비사업 병행 추진

· 25개 자치구 침투형 빗물받이 786개소㎥ / 침투트랜치 320m

· 공단배수분구 종합정비 투수블록 설치 4,608㎡

정기적인 빗물관리시설 실태 지도 및 점검

○ 민간 빗물이용시설 점검 실시

- 기간 및 대상 :  ‘13.4.1~ 4.5 / 민간 빗물이용시설 90개소

○ 공공기관 빗물이용시설 점검 실시

- 기간 및 대상 : ‘13.9.30 ~ 10.11 / 공공기관 빗물이용시설 157개소

´13년 예산 집행현황

(금액단위 : 백만원)

단위사업명	예산액	집행액	집행률
빗물관리시설 기본계획 수립	257	256	99.6%
빗물관리 관리시설 확충	1,211	1,186	97.9%
빗물관리시설 실태점검	비예산	비예산	-

'14년 이후 추진계획

연차별 추진목표

-  자연물순환 복원을 위한 빗물유출 저감

∙ ‘50년까지 연평균 강우량 1,550㎜의 40%인 620㎜를 저류·침투

-  버려지는 물의 재이용 활성화

∙ ‘20년까지 빗물, 중수도, 하수처리수 2.09억㎥ 재이용

예산 확보현황(계획)

(금액단위 : 백만원)

단위사업명	2014년	2015년	2016년	비 고
빗물관리시설 확충	2,179	2,476	2,500	당초 : 예산사업
그린빗물인프라 시설 구축	300	300	300

물관리부문	3 - 2.	지하수의 적절한 개발·이용과 효율적인 보전·관리

자체 평가	()목표달성, (√)정상추진, ()부진, ()사업중단 사업진도율 : %	담당	물관리정책과 토양지하수팀
			팀장 : 김기윤 주무관 : 윤 정 ☎ 2133-3777

적응대책상의 사업계획 개요

지하수의 체계적 개발·이용과 효율적인 보전·관리를 위한 서울시 지하수관리계획 수립

-  지하수의 부존특성 및 개발 가능량 산정, 수질관리 계획 등을 수립하여 우리시 특성에 적합한 지하수 수량 및 수질관리 추진

지하수 오염방지 체계 강화

-  지하수 잠재오염원의 체계적 관리, 지하수 개발·이용시설에 대한 오염방지 시설 설치 준수, 지하수 수질자료의 체계적 관리 추진

보조지하수 관측망 운영을 통한 지하수위 감시

-  보조지하수 관측망 운영을 통한 지하수 수위변동 실태 감시로 수위저하 수원고갈 등 지하수 장애를 사전 예방

서울시 토양·지하수 환경정보시스템 구축·운영

- 서울시 토양·지하수를 체계적이고 과학적으로 관리하기 위하여 서울시 토양·지하수 환경정보시스템을 구축하여 다양한 정보를 제공

'13년 추진실적

지하수의 체계적 개발·이용과 효율적인 보전·관리를 위한 서울시   지하수관리계획 수립

-  ‘서울특별시 지하수관리계획 수립 용역’ 계약 (‘13.5.27)

∙계약상대자 : 한국지질자원연구원 컨소시엄

∙계약기간   :  ‘13.5.27 ~ ’15.1.26(총차)

※ 1차 : ‘13.5.27~’14.3.26, 2차 : ‘14.3.27~’15.1.26

- 용역 추진실적(1차 년도)

∙서울특별시 지하수 관리 방안 제시를 위한 기존 자료 수집·분석

∙서울특별시 지하수 과거 관측 관련 자료 수집 및 분석

∙관리 비전 및 목표 설정을 위한 전문가 설문 조사

∙서울특별시 지하수 평가 기법 적용성 평가

∙서울특별시 지하수 특성에 적합한 관리 방안 제시를 위한 현장 조사

지하수 오염방지 체계 강화

- 정기수질검사, 수질측정망 등을 통한 지하수 오염 감시

∙검사대상 : 정기 631개소, 수질측정망 100개소

∙검사기간 : ‘13.1 ~ 12월

∙검사주기 : 정기 2~3년 1회, 수질측정망 년 2회

∙검사결과 : 기준초과 14개소(정기 9, 측정망 5) 이용중지명령

시설 개선 후 재검사결과에 따라 조치(기준초과시 원상복구, 용도변경 권고)

- 오염취약시설 중점관리로 오염 사전 예방

∙오염취약시설 전수조사 후 중점관리대상 296개소 선정

(단위 : 개소)

구 분		계	지 하 저장탱크	공 장	공사장	세차장 등	폐기물 야적장 등	재래시장 등 기타
오염취약시설		950	287	64	88	205	41	265
	중점관리대상	296	121	14	19	68	15	59

∙관리방법 : 수질검사(년 2회)와 시설물점검(년 4회) 병행

※ 공업용수 : 시설 특성을 감안하여 유류성분(4개 항목) 추가 검사

∙검사결과 : 기준초과 27개소(상반기 11, 하반기 16) 이용중지명령

시설개선 후 재검사결과에 따라 조치(기준초과시 익년 토양 오염실태조사 대상에 포함)

보조지하수 관측망 운영을 통한 지하수위 감시

- 보조관측망 현황

∙시설별 현황

계	지하수위 분석 대상(개소)					분석제외 (개소)
	소 계	전용시설	민방위시설	공공시설	민간시설
218	214	12	115	42	45	4

※ 분석제외 : 대형굴착공사 2, 이용과다 1, 고지대 1

∙관측방법

□자동관측 : 159개소 (24시간 연속관측)

□수동관측 :  59개소(월 2회 인력에 의한 측정)

- 지하수위 분석

∙2013년 지하수위 : 지하철 지역은 주택·상업, 하천변, 녹지 지역에 비해 지하수위가 낮으며, 녹지지역 등 개발정도가 낮은 지역은 수위가 높게 나타남

구 분	평균	지하철	주택․상업	하천변	녹지지역
수 위(m)	7.9	9.8	7.8	8.2	5.5
관측망(개소)	214	68	72	22	52

∙연도별 지하수위 변동실태 : 대체로 지하수 수위는 지하철, 주택·상업, 하천 지역 경우 하강 추세를 보이나 녹지지역 경우 수위가 상승 추세임

서울시 토양·지하수 환경정보 시스템 구축·운영

- 운 영 : 2013년(하자보수기간으로 프로그램 유지보수 지원)

※ 시스템 구축 : ‘12.4.25. ~ 11.20.

- 내  용

∙토양·지하수 오염지역 공간DB 및 토양오염조사 결과 자료 관리

∙지하수 이용실태 및 수질관리 공간DB 자료 관리

´13년 예산 집행현황

(금액단위 : 백만원)

단위사업명	예산액	집행액	집행률
서울시 지하수 관리계획 수립	400	339	85%
지하수 오염방지 체계강화	비예산	비예산	-
보조지하수 관측망 운영	비예산	비예산	-
서울시 토양·지하수 환경정보시스템 구축·운영	비예산 (하자보수기간)		-

'14년 이후 추진계획

연차별 추진목표 : 사업목표 변경없음

예산 확보현황(계획)

(금액단위 : 백만원)

단위사업명	2014년	2015년	2016년	비 고
서울시 지하수 관리계획 수립	311	-	-	연도별 예산액 변경
서울시 토양·지하수 환경정보 시스템 구축·운영	22	20	20	연도별 예산액 변경

물관리부문	3 - 3.	하수처리수 재이용 및 중수도시설 확대

자체 평가	()목표달성, (√)정상추진, ()부진, ()사업중단 사업진도율 : 45 %	담당	물관리정책과 물재이용관리팀
			팀장 : 이웅희 주무관 : 정수형 ☎ 2133-3854

적응대책상의 사업계획 개요

서울특별시 물재이용 관리계획 수립

-  물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 제6조에 따른 법정계획(환경부 승인)

-  국가의 물재이용 기본계획에 따라 `20년까지 물재이용 관리계획 수립

∙물 재이용 수요량 전망

∙물의 재이용 목표량 및 용도별 보급계획

∙물의 재이용 사업에 드는 비용의 산정 및 재원조달계획 등

마곡지구내 재생수 공급

-  하수처리수 재처리시설(20,000㎥/일) 설치 : 도시기반시설본부 대행

-  재처리수 공급관로(연장32km) 설치 : SH공사 대행

※ 사업기간 : 2009.12 ~ 2016.06(사업비 227억원)

중수도시설 확대 보급

-  물재이용 관리계획 수립에 의한 중수도 목표량 설정

- 물재이용 목표량 설정에 따른 각 단계별 중수도 시설 확대

'13년 추진실적

서울특별시 물재이용 관리계획 수립

-  물재이용 관리계획 환경부 승인(`13.9월)

-  물 재이용 목표량 설정 : `20년 2억9백만㎥/년(재이용률:14.4%)

∙빗물이용시설 관리계획          :    2,400천㎥/년

∙중수도 관리계획                :  18,351천㎥/년

∙하수처리수 재처리시설 관리계획 : 188,069천㎥/년

마곡지구내 재생수 공급

-  마곡도시개발계획 변경에 따른 사업기간 연장

∙ 당초 `14.10 → 변경 `16.06

∙ 재처리수 공급관로 재설계(21.7km → 32km 변경)

-  마곡지구내 재생수 공급사업 공정률 : 45%

중수도시설 확대 보급

-  중수도 시설 확대 개소 : 7개(시설용량 : 1020㎥/일)

´13년 예산 집행현황

(금액단위 : 백만원)

단위사업명	예산액	집행액	집행률
물재이용 관리계획 수립	160	151	94.3
마곡지구내 재생수 공급사업	10,500	3,765	35.8
중수도시설 확대 보급	비예산	비예산	-

'14년 이후 추진계획

마곡지구내 재생수 공급

- 하수처리수 재처리시설 토목, 조경공사 완료 : `14.06

- 재처리수 공급관로 설치 완료               : `14.12

- 재처리수 공급시설 시운전 및 준공          : `16.06

예산 확보현황(계획)

(금액단위 : 백만원)

단위사업명	2014년	2015년	2016년	비 고
마곡지구내 재생수 공급사업	1,650	4,500	300

물관리부문	3 - 5.	한강 및 지천 수질의 실효성 있는 개선대책 마련

자체 평가	()목표달성, (√)정상추진, ()부진, ()사업중단 사업진도율 : %	담당	물관리정책과 오염총량팀
			팀장 : 윤맹진 주무관 : 김성영 ☎ 2133-3771

적응대책상의 사업계획 개요

물재생센터내 초기우수처리시설 건설

-  사업기간 : '12년 ∼ '21년

-  시설용량 : 1,227만㎥(중랑 396, 탄천 239, 난지 210, 서남 382)

- 사 업 비 : 399,200백만원

수질오염총량제 추진

-  수질오염총량관리 기본계획 수립 학술용역 실시 : '11.3.16 발주

∙용역기간 : '11. 3월 ∼ '12. 7월, 서울연구원

∙용역기관 : 서울연구원(용역비 514 백만원)

∙주요내용 : 오염원조사, 목표수질 설정, 유역별 오염물질 할당부하량 결정

-  수질오염총량관리 시행계획 수립 학술용역 실시 : '12. 5월초 발주예정

∙용역기간 : '12. 7월 ∼ '13. 3월

∙용역기관 : 서울연구원(용역비 95백만원)

∙주요내용 : 년도별 할당부하량 배분, 지역개발 및 오염삭감계획 결정

-  이행평가 : '14년

∙목표수질 달성여부 평가

∙할당오염부하량 및 오염삭감계획 준수 여부 등

합류식하수도월류수(CSOs) 저감 저류조 건설

∙사업기간 : '10년 ∼ '19년

∙사 업 비 : 1,548억원

∙대상지역 및 시설용량

구 분		추진기간	대상유수지	시설용량(㎥)
계			8개소	32만
시범사업		'10년∼'13년	가양·새말	1만
본사업	1단계	'13년∼'16년	응봉·휘경·탄천	16만
	2단계	'16년∼'19년	잠실·신도림·양평	15만

'13년 추진실적

물재생센터내 초기우수처리시설 건설

-  중랑, 서남 시설현대화 사업에 포함 신설 : 중랑 50만㎥/일,서남 72만㎥/일

구 분	총공사비 (백만원)	‘13년도		‘14년도		‘15년도		비고
		공사비	공정률 (%)	공사비	공정률 (%)	공사비	공정률 (%)
중 랑	12,320	6,000	48.70%	4,970	89.04%	1,350	100%
서 남	15,372	-	-	-	-	45	0.29%	2018년 완료예정

수질오염총량제 추진

-  수질오염총량관리 전문위원(박사급-기간제근로자) 채용('13. 2.25)

-  수질오염총량관리 기본계획 환경부 승인('13. 9.12)

∙수질오염총량관리 맞춤형 기술지원 및 교육실시 : '13. 9.30

∙수질오염총량관리 기본계획 설명회 개최 : '13.10.22

-  수질오염총량관리 시행계획 수립 및 한강유역환경청 승인신청('13.11.28)

-  수질오염총량관리 배출·삭감시설 수질모니터링 용역 실시

∙용역기간 : '13. 6 ∼ '13. 12

∙조사지점 : 4개 물재생센터 8개 방류구

∙조사항목 : BOD5, CODMn, SS, T-N, T-P

∙조사주기 : 6일 간격 30회

-  수질오염총량관리 대상 지역개발사업 수질오염물질 배출 할당 : 22건

합류식하수도월류수(CSOs) 저감 저류조 건설

-  타당성 조사 및 기본계획 용역 실시

∙타당성 조사 : 양평, 응봉, 휘경, 잠실, 신도림, 탄천 유수지

∙기본계획 : 양평, 응봉, 휘경유수지

∙시범사업평가 : 가양, 새말유수지

∙사업기간 : '13. 7. 4 ∼ '14. 7. 3

∙사 업 비 : 488백만원

´13년 예산 집행현황

(금액단위 : 백만원)

단위사업명	예산액	집행액	집행률
물재생센터내 초기우수처리시설 건설	6,000	6,000	100%
수질오염총량제 추진	136	120	88.2%
CSOs 저감 저류조 건설	488	414	92.4%

'14년 이후 추진계획

연차별 추진목표 : 합류식하수도월류수(CSOs) 저감 저류조 건설 목표 변경

구 분		추진기간	대상유수지	시설용량(㎥)
계			8개소	23만
시범사업		'10년∼'14년	가양·새말	1만
본사업	1단계	'14년∼'16년	양평, 응봉	5만
	2단계	'16년∼'19년	휘경, 신도림, 잠실, 탄천	17만

※ 유수지 상부 활용계획 등에 의거 변경

예산 확보현황(계획)

(금액단위 : 백만원)

단위사업명	2014년	2015년	2016년	비 고
물재생센터내 초기우수처리시설 건설	4,970	1,395	5,100
수질오염총량제 추진	169	180	180
CSOs 저감 저류조 건설	1,000	1,900	28,617