대책 1-8		하수관거의 체계적 유지관리

자체 평가	(√)목표달성, (√)정상추진, ()부진, ()사업중단 사업진도율 : %	담당	물재생계획과 하수관리팀 하수정보팀
			팀장 : 최승각 주무관 : 배원영 ☎ 3790 이승원 조순연 ☎ 3812

□ 추진방향

○  GIS 정확도를 개선하고, 저지대 상습침수지역의 침수를 해소하기 위해 통수능 부족 및 노후 불량한 하수관로를 정비하여 통수능력 향상을 통한 침수 및 안전사고 예방

□ 사업개요

○  GIS 정확도 개선

- 기     간 : 2014～2026

- 대    상 : 기존하수관로, 도로개설, 재개발 등 각종 하수관련 공사 시행에 따른 현장과 불일치 지역, 관경불합치 지역

- 주요내용 : 절대측량, 하수시설물 현황조사, 공공측량 성과심사 취득, 서버탑재

․ 정확도 개선물량 : 2,278km(‘14년 277㎞)

○  하수관로 통수능력 향상 및 노후관로 정비

- 기    간 : 2011 ~ 2021

- 대    상 : 저지대 침수지역 등 통수능 부족관로 및 노후불량 하수관로

- 주요내용 : 통수능 부족관로(618km) 및 노후 하수관로 정비(932km)

․ 정비연장 : 1,550km

․ 사 업 비 : 2조 2,855억원

※ 사업내용 중 변경된 사항 등은 현재 계획을 반영하여 수정요청(파란색으로 수정)

□ 2014년 추진실적

○ GIS 정확도 개선 277km

- 기    간: 2014.3.31.~2015.2.28

- 실    적: 하수시설물 현황조사·탐사(300km), 4급 기준점 설치(340점), 맨홀 절대좌표 측량(277km), 정위치·구조화편집, 공공측량 성과심사 획득, 서버탑재완료(277km)

○  하수관로 통수능력 향상 및 노후관로 정비

- 기    간 : 2014.3.31.~2014.12.31.

- 실    적 : 하수관로 통수능력 향상 L=40km

노후불량 하수관로 정비 L=64km

※ 2015년  추진계획

○ GIS 정확도 개선

- 재개발, 재건축 등 현장과 불일치 지역 기존 하수관망도 GIS DB 정확도 개선(`15년 343km)

○  하수관로 통수능력 향상 및 노후관로 정비

- 하수관로 통수능력 향상 L=32km

- 노후불량 하수관로 정비 L=90km

□ 목표달성도 및 향후계획

사 업 명	2014		2015	2016
	목 표	실 적
GIS 정확도 개선	277㎞	277km	343㎞	500㎞
하수관로 통수능력 향상 및 노후관로 정비	104㎞	104km	122㎞	122㎞

□ 소요예산

(단위 : 백만원)

사 업 명	2014		2015	2016
	에산액	집행액
GIS 정확도 개선	1,274	1,197	1,724	3,500
하수관로 통수능력 향상 및 노후관로 정비	117,500	117,500	203,400	203,400