부문	과제번호	세부사업명	사업유형	기간	담당자 (연락처)
물관리	Ⅰ-1-2	하수관로 종합정비사업 추진	기존보완	2017년~	문예원 (2133-3795)

사 업 명

[Ⅰ-1-2] 하수관로 종합정비사업 추진

주관부서

(협조부서)

물재생계획과

담당자

문예원

연락처

2133-3795

적응부문

☑ 물관리 ☐ 생태계 ☐ 시설물 관리 ☐ 건강

사업유형

☐ 기존 ☑ 기존보완 ☐ 신규

사업성격

☑ 구조적(시설설치·조성·정비 등)

☐ 비구조적(모니터링 및 유지관리, 자료 구축·생산, 기술개발 등)

☐ 사회적(법·제도 제정·정비, 교육·홍보 등)

사업기간

2017년 이후

사업예산

3,402,200백만원

(전액시비)

사업개요

□ 추진배경

∘ 노후‧불량 하수관로 정비로 불명수 저감 등 하수 처리효율 증대

∘ 하수관로의 통수능 확보 등을 통하여 재해대응 능력 증진

∘ 배수분구 단위로 전체 하수관거의 현황을 조사‧설계하고 지역전체를 일시에 재정비하여 선진 하수체계 구축

□ 사업개요

【배수분구 하수관로 종합정비사업】

∘ 사 업 명 : 배수분구 하수관로 종합정비사업

∘ 사업규모 : 65개 배수분구 하수관로 정비, L=1,426㎞

∘ 사업기간 : 1995. ~ 2022.

∘ 총사업비 : 16,695억원

【소구역 하수관로 정비사업】

∘ 사 업 명 : 소구역 하수관로 정비사업

∘ 사업규모 : 58개 소구역 하수관로 정비, L=755㎞

∘ 사업기간 : 2022. ~ 2030.

∘ 총사업비 : 17,327억

추진실적

및 성과

(’22년)

□ 추진방법

∘ 배수분구 하수관로 종합정비 및 소구역 정비사업 공사추진(자치구)

∘ 소구역 정비사업 설계(서울시)

□ 추진실적(’22년)

∘ (계속 추진) 배수분구 하수관로 종합정비공사 준공(10개)

- 동교 배수분구 등 10개소 정비 31.8㎞(통수능 3.7㎞, 노후불량 28.7㎞)

∘ 소구역 하수관로 정비 설계용역 추진 및 준공(22개)

- 행당-5 등 11개 준공(’21.3.~’22.12.), 신월1-4 등 11개 추진(’22.3.~’23.12.)

∘ 소구역 하수관로 정비공사 추진(연장 9㎞)

- ’21년도 기본 및 실시설계 용역 완료된 4개 지역(면목3-5, 중곡-1, 장위-4, 군자-2)

□ 추진성과

성과지표명(단위)	2022년 계획(A)	2022년 상반기 성과(B)	달성률(B/A×100)
하수관로 정비(㎞)	41	13	31.7%

자체 성과평가

□ 자체 성과평가

○ 기존 진행중인 배수분구 사업 정상 추진

○ 소구역 공사(4개) 착공 전으로 계획 대비 목표치 미달

□ 미달성 원인

○ 소구역 공사(4개) 사전절차 진행중으로 목표치 미달

□ 향후 보완 및 개선 사항

○ 하반기 배수분구 공사 완료 및 소구역 공사 조속 추진으로 목표치 달성

성공요인

및 극복사항

○「2030 하수도 기본계획」에 따라 토구 중심의 소구역 사업단위 전환으로 진행중인 배수분구 사업은 2022년까지 마무리

- 정비사업간 중복투자를 최소화하기 위해 침수피해 및 도로함몰 예방 사업으로 추진에 따라 이루 정비물량 해소

대외확산·

홍보실적

○ 공사 시행 전 주민홍보(필요시 주민설명회)

관련

증빙자료

노후 하수관 내부	하수관 부설	관상단부 다짐

계획대비

추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2022	하수관로 정비 L=41㎞	하수관로 정비 L=13㎞
2023	하수관로 정비 L=60㎞	-
2024	하수관로 정비 L=117㎞	-
2025	하수관로 정비 L=102㎞	-
2026	하수관로 정비 L=87㎞	-

예산운용

구분

예산계획(단위 : 백만원)(당초 계획과 동일하게 작성)

총계

’22

’23

’24

’25

’26

총계

926,387

67,887

140,000

268,500

252,500

197,500

국비

-

-

-

-

-

-

시비

926,387

67,887

140,000

268,500

252,500

197,500

구비

-

-

-

-

-

-

공사

-

-

-

-

-

-

민자

구분

예산실적(단위 : 백만원)(’22.6.30 기준으로 작성)

총계

’22

’23

’24

’25

’26

총계

23,163

23,163

-

-

-

-

국비

0

-

-

-

-

-

시비

23,163

23,163

-

-

-

-

구비

0

-

-

-

-

-

공사

0

-

-

-

-

-

민자

0

-

-

-

-

-

목표

달성도

(’22년)

□ 목표달성률(%) : 34%

□ 목표달성도 : ☐ 매우 우수 ☐ 우수 ☐ 보통 ☑ 미흡 ☐ 미추진

성과분석

구분

지표명(단위 : ㎞ )

총계

’22

’23

’24

’25

’26

목표

407

41

60

117

102

87

상반기

실적

(’22.6.30)

13

13

-

-

-

-

목표

달성도

(’22년)

□ 목표달성률(%) : 31.7%

□ 목표달성도 : ☐ 매우 우수 ☐ 우수 ☐ 보통 ☑ 미흡 ☐ 미추진

지표

유형

☑ 정량 ☐ 정성 ☐ 혼합 ☐ 기타(        )

측정방식

(산출근거)

하수관로 정비율(%) = 정비연장/계획연장 ×100]

산출근거 : 하수관로 종합정비사업 주보

평가

결과

(’22년)

□ 상반기 평가결과(’22.6.30 기준)

○ 성과 및 효과

- 계획대비 예산 집행률 34%, 실적 31.7% 달성

○ 평가결과

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	하수관로 정비(㎞)
	실적 / 계획	41㎞ / 13㎞
	달성률(%)	31.7%
예산집행 노력	실적 / 계획	67,887 / 23,163 (백만원)
	집행률(%)	34%
추진실적 근거자료		자치구별 하수관로 정비실적 취합
최종평가		미흡

○ 미흡 및 개선·보완사항

- 하반기 배수분구 공사 완료 및 소구역 공사 조속 추진으로 목표치 달성