부문	과제번호	세부사업명	사업유형	기간	담당자 (연락처)
물관리	Ⅰ-1-1	침수취약지역의 하수관로 통수능 확보	기존보완	2010년~	김성대 (2133-3791)

사 업 명

[Ⅰ-1-1] 침수취약지역의 하수관로 통수능 확보

주관부서

(협조부서)

물재생계획과

담당자

김성대

연락처

2133-3791

적응부문

☑ 물관리 ☐ 생태계 ☐ 시설물 관리 ☐ 건강

사업유형

☐ 기존 ☑ 기존보완 ☐ 신규

사업성격

☑ 구조적(시설설치·조성·정비 등)

☐ 비구조적(모니터링 및 유지관리, 자료 구축·생산, 기술개발 등)

☐ 사회적(법·제도 제정·정비, 교육·홍보 등)

사업기간

2017년 이후

사업예산

1,670,500백만원

(국비 990, 시비 1,669,510)

사업개요

□ 추진배경

∘저지대 상습침수지역의 침수를 해소하기 위해 통수능 부족 하수관로를 정비하여 통수능력 향상을 통한 침수 및 안전사고 예방

□ 사업개요

∘ 대    상 : “2030 하수도정비 기본계획” 상 통수능 부족 하수관로

- 정비연장 : 618km

- 사 업 비 : 1조 6,705억원

추진실적

및 성과

(’22년)

□ 추진방법

∘ 저지대, 통수능 부족지역 하수관로 상태조사(자치구) → 예산편성(서울시) → 사업시행(자치구)

□ 추진실적(’22년)

∘ 노후 및 통수능 부족 하수관로 정비 :27㎞

□ 추진성과

성과지표명(단위)	2022년 계획(A)	2022년 상반기 성과(B)	달성률(B/A×100)
하수관로 정비(㎞)	60	28	46.7%

자체 성과평가

□ 자체 성과평가

○ 노후 및 통수능 부족 하수관로 정비사업의 정상 추진

- 당초 계획대비 46.7% 달성

□ 미달성 원인

○ 상반기 계획 대비 정비사업 정상 추진중으로 하반기 준공 시 목표치 달성

□ 향후 보완 및 개선 사항

○ 하반기 준공 예정으로 목표실적 달성 예정

성공요인

및 극복사항

○ 월별 지속적인 공정관리를 통해 이월사업 신속추진

대외확산·

홍보실적

○ 공사 전 시민, 지역구 의원을 대상으로 홍보시행

관련

증빙자료

계획대비

추진실적

구분	당초계획	연차별 추진현황
2022	하수관로 정비 L=60㎞	하수관로 정비 L=28㎞
2023	하수관로 정비 L=68㎞	-
2024	하수관로 정비 L=75㎞	-
2025	하수관로 정비 L=81㎞	-
2026	하수관로 정비 L=86㎞	-

예산운용

구분

예산계획(단위 : 백만원)(당초 계획과 동일하게 작성)

총계

’22

’23

’24

’25

’26

총계

517,785

85,885

110,900

106,500

107,000

107,500

국비

-

-

-

-

-

-

시비

517,785

85,885

110,900

106,500

107,000

107,500

구비

-

-

-

-

-

-

공사

-

-

-

-

-

-

민자

구분

예산실적(단위 : 백만원)(’22.6.30 기준으로 작성)

총계

’22

’23

’24

’25

’26

총계

31,349

31,349

-

-

-

-

국비

0

-

-

-

-

-

시비

31,349

31,349

-

-

-

-

구비

0

-

-

-

-

-

공사

0

-

-

-

-

-

민자

0

-

-

-

-

-

목표

달성도

(’22년)

□ 목표달성률(%) : 36.5%

□ 목표달성도 : ☐ 매우 우수 ☐ 우수 ☐ 보통 ☑ 미흡 ☐ 미추진

성과분석

구분

지표명(단위 : ㎞ )

총계

’22

’23

’24

’25

’26

목표

370

60

68

75

81

86

상반기

실적

(’22.6.30)

28

28

-

-

-

-

목표

달성도

(’22년)

□ 목표달성률(%) : 46.7%

□ 목표달성도 : ☐ 매우 우수 ☐ 우수 ☐ 보통 ☑ 미흡 ☐ 미추진

지표

유형

☑ 정량 ☐ 정성 ☐ 혼합 ☐ 기타(        )

측정방식

(산출근거)

하수관로 정비율(%) = 정비연장/계획연장 ×100]

산출근거 : 하수관로 단위사업 주보(신설개량)

평가

결과

(’22년)

□ 상반기 평가결과(’22.6.30 기준)

○ 성과 및 효과

- 계획대비 예산 집행률 36.5%, 실적 46.7% 달성

○ 평가결과

구분		세부내용
목표달성 노력	지표명(단위)	하수관로 정비(㎞)
	실적 / 계획	60㎞ / 28㎞
	달성률(%)	46.7%
예산집행 노력	실적 / 계획	85,885 / 31,349 (백만원)
	집행률(%)	36.5%
추진실적 근거자료		자치구별 하수관로 정비실적 취합
최종평가		미흡

○ 미흡 및 개선·보완사항

- 하반기 준공 예정으로 목표실적 달성 예정