〔도시안전본부〕

부서명	과(팀)	현원(명)	주요역할 및 업무	2015년 완료․진행(과업)사업 목록
동 부 도 로 사업소	관 리 단속과	22명	- 주요업무계획․인사․감사․교육 - 예산․회계․물품․청사관리 - 운행제한 차량단속
	도 로 보수과	8명	- 아스팔트 포장도로 유지관리 - 도로굴착복구 유지관리 - 도로․교통안전부속물 관리 - 교통안전시설(노면표시) 유지관리 업무 - 시도상 맨홀 유지관리 업무 - 제설대책 계획수립 및 제설작업 시행	- 노후포장도로공사(93%) - 긴급복구 정비공사(90%) - 긴급복구 폐아스콘처리용역(90%) - 포장도로노면표시공사(90%) - 포장도로굴착복구공사(50%) - 포장도로불량맨홀정비공사(60%) - 불량맨홀폐아스콘처리용역(60%) - 도로․교통부속물정비공사(66%) - 교통안전시설(노면표시)공사(70%) - 시행도로정비공사(20%) - 시행도로노면표시공사(20%) - 시행도로폐아스콘처리용역(20%) - 굴착복구건설사업용역(50%) - 굴착복구폐아스콘처리용역(50%)
	시 설 보수과	8명	- 도로시설물(교량, 터널, 지하차도) 유지관리 업무 - 도로시설물 주요사업계획 - 도로부속물 현황 관리 (첨가시설, 시설물 하부 점용) - 풍수해대책 및 재난관련 업무 - 특정관리대상시설 관련 업무 - 도로시설물 내진관련 업무	- 도로시설물 일상유지 보수공사 (연간단가)(60%) - 광평교 보수공사(10%) - 탄천2교 보수공사(10%) - 삼성교 외 7개소 정밀점검용역(70%) - 도로시설물 세척용역(60%) - 헌릉로외 1개소 성능개선 실시설계용역(90%)
	기전과	28명	- 도로기전시설물 유지관리 - 지하차도 수방시설 가동 및 유지관리 - 교통안전시설(교통신호등, 안전표지) 유지관리 - 건설장비 효율화 운영 및 유지관리 -위레터널 민간위탁 운영관리	- 도로기전시설물 유지관리 공사 (연간단가) (80%) - 교통신호기 유지관리공사(연간단가) (70%) - 교통안전표지 유지관리공사(연간단가)(70%) - 대치지하차도 조명시설 개선공사(10%) - 올림픽공원 외 1개소 통합지주 설치공사(10%)

1. 2015년 노후포장도로 정비공사

동부도로사업소	과 장	김환겸	2040-0302
도로보수과	담당자	송광석	2040-0340

□ 사업개요

○ 목    적 : 노후,손상 등의 불량 포장 노면을 적기에 보수하여 차량 주행 시 안전하고                 쾌적한 도로환경 조성으로 대시민 서비스 질을 향상시키고자 함

○ 위    치 : 언주로(영동3교~개포지하차도)외 23개소

○ 규    모 : 절삭재포장 A=2,079a(t=5~7cm)

○ 사업기간 : 2015. 4.10~2015.11.30

○ 총사업비 : 3,701백만원(도급비 1,203, 관급비 2,398, 이전비 100)

○ 누계 공정율(8월31일 기준) : 계획공정 90%, 현재공정 93%, 계획대비 실공정율 103%

- 부진사유 : 정상 추진

□ 예산투자 현황 - 2015. 8.31 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2015							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비) ★	지출액	현잔액	사고이월 예상액★
-	1,542	1,542	3,701	-	3,701	-	1,182	2,519	-	15,309

□ 추진실적

○ 2015. 2. 17 : 예산 재배정

○ 2015. 3. 10 : 공사발주

○ 2015. 4.   6 : 공사계약 체결

○ 2015. 4. 10 : 공사착공

○ 2015. 4. 24 : 아스콘 자재공급원 점검완료

○ 2015. 6. 24 : 언주로(영동3교~개포지하차도) 외 20개소 1,885a 시공완료

□ 향후 추진계획

○ 2015.  9. 3~5 : 잔여구간(구천면길) 포장공사 시행

○ 2015. 10.      : 잔여구간(헌릉로) 포장공사 시행

○ 2015. 11. 30  : 공사준공

□ 특이사항

○ 없음

2. 포장도로 긴급복구 정비공사(연간단가)

동부도로사업소	과 장	김환겸	2040-0302
도로보수과	담당자	탁영우	2040-0344

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 주요 간선도로에 대한 포장불량구간 및 소규모 파손도로에 대하여 신속한

정비를 통한 안전한 도로기능 유지

○ 위    치 : 관내 전체(강동, 송파, 강남, 서초일부)

○ 규    모 : 절삭포장 정비 859a

○ 사업기간 : 2015. 4. 6. ~ 12. 31.

○ 총사업비 : 2,058백만원(도급1,026, 관급1,000, 이전32백만원)

○ 누계 공정율(8월31일 기준) : 계획공정 90%, 현재공정 90%, 계획대비 실공정율 100%

- 부진사유 : 정상 추진

□ 예산투자 현황 - 2015. 8.31 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2015							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)★	지출액	현잔액	사고이월 예상액★
-	1,681	1,681	2,058	-	2,058	-	641	1,417	-	2.500

□ 추진실적

○ 2015.02.17. : 예산 재배정

○ 2015.03.04. : 공사발주

○ 2015.04.06. : 공사착공

□ 향후 추진계획

○ 2015.12.31. : 공사준공

□ 특이사항

○ 없음

3. 포장도로 정비공사 폐아스콘 처리용역

동부도로사업소	과 장	김환겸	2040-0302
도로보수과	담당자	탁영우	2040-0344

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 포장도로 정비공사에서 발생하는 폐아스콘을 운반 및 위탁처리 하여

자원의 재활용 및 포장공사 추진에 만전을 기함

○ 위    치 : 관내 전체(강동, 송파, 강남, 서초일부)

○ 규    모 : 폐아스콘 운반 및 처리 46,123톤

○ 사업기간 : 2015. 3. 27. ~ 12. 31.

○ 총사업비 : 458백만원

○ 누계 공정율(8월31일 기준) : 계획공정 90%, 현재공정 90%, 계획대비 실공정율 100%

- 부진사유 : 정상 추진

□ 예산투자 현황 - 2015. 8.31 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2015							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)★	지출액	현잔액	사고이월 예상액★
-	557	557	458	-	458	-	169	289	-	500

□ 추진실적

○ 2015.02.17. : 예산 재배정

○ 2015.03.05. : 공사발주

○ 2015.03.27. : 공사착공

□ 향후 추진계획

○ 2015.12.31. : 공사준공

□ 특이사항

○ 없음

4. 포장도로 노면표시 도색공사

동부도로사업소	과 장	김환겸	2040-0302
도로보수과	담당자	탁영우	2040-0344

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 포장도로 정비공사 후 노면표시를 신속히 하여 시민들의 불편 및

안전사고를 사전에 예방하여 안전한 도로환경을 조성

○ 위    치 : 관내 전체(강동, 송파, 강남, 서초일부)

○ 규    모 : 차선도색 155,365m

○ 사업기간 : 2015. 3. 24. ~ 12. 31.

○ 총사업비 : 549백만원(도급306, 관급243백만원)

○ 누계 공정율(8월31일 기준) : 계획공정 90%, 현재공정 90%, 계획대비 실공정율 100%

- 부진사유 : 정상 추진

□ 예산투자 현황 - 2015. 8.31 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2015							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)★	지출액	현잔액	사고이월 예상액★
-	643	643	549	-	549	-	98	451	-	550

□ 추진실적

○ 2015.02.17. : 예산 재배정

○ 2015.03.05. : 공사발주

○ 2015.03.24. : 공사착공

□ 향후 추진계획

○ 2015.12.31. : 공사준공

□ 특이사항

○ 없음

5. 포장도로 굴착복구공사

동부도로사업소	과 장	김환겸	2040-0302
도로보수과	담당자	이문희	2040-0352

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 시도상 지하매설물 등을 신설, 개축, 변경 또는 제거 등을 위하여 굴착을 수반하는 공사의 복구 업무 수행

○ 위    치 : 사업소 관내(강동구, 송파구, 강남구, 서초구일부)

○ 규    모 : 굴착복구 706a(굴착복구 148a, 차로단위복구 558a)

○ 사업기간 : 2015. 3. 13. ~ 2015. 12. 31.

○ 총사업비 : 3,950백만원(도급 1,871, 관급 1,800, 기타 279)

○ 누계 공정율(8월31일 기준) : 계획공정 50%, 현재공정 50%, 계획대비 실공정율 100%

- 부진사유 : 정상 추진

□ 예산투자 현황 - 2015. 8.31 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2015							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)★	지출액	현잔액	사고이월 예상액★
-	3,940	3,940	3,950	-	-	-	467	3,483	-

□ 추진실적

○ 2015. 1. 07 : 예산 재배정

○ 2015. 2. 03 : 공사 발주

○ 2015. 3. 10 : 공사 계약 및 착공

○ 2015. 8. 10 : 공사 1차 준공

□ 향후 추진계획

○ 2015. 9. 21 : 공사 2차 준공

○ 2015. 12. 31 : 공사 준공

□ 특이사항

○ 없음

6. 포장도로 불량맨홀 정비공사(연간단가)

동부도로사업소	과 장	김환겸	2040-0302
도로보수과	담당자	정용재	2040-0350

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 주요 간선도로상 각종 맨홀 침하 및 주변 파손, 포장면과 단차가 있는 불량맨홀을 적기에 정비하여 쾌적한 도로교통 환경을 조성 코자 함

○ 위    치 : 동부도로사업소 관할 주요도로

○ 규    모 : 불량맨홀 정비 520개소

○ 사업기간 : 2015.5.19.~ 2015.12.31.

○ 총사업비 : 429,504천원(도급 429,504천원)

○ 계약업체 : ㈜태강디앤씨 대표 최성숙

○ 누계 공정율(8월31일 기준) : 계획공정 50%, 현재공정 60%, 계획대비 실공정율 120%

- 부진사유 : 정상 추진

□ 예산투자 현황 - 2015. 8.31 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2015							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)★	지출액	현잔액	사고이월 예상액★
			495	0	495		41	454

□ 추진실적

○ 2015. 8. 현재 : 올림픽로 697 상수도 등 정비완료(262개소)

□ 향후 추진계획

○ 2015.  9. : 1차 기성

○ 2015. 12. : 준공(정산)

□ 특이사항

○ 각 지자체별 예산부족으로 부과된 정비비 미납발생

7. 관내 불량맨홀 정비공사 폐기물처리용역(연간단가)

동부도로사업소	과 장	김환겸	2040-0302
도로보수과	담당자	정용재	2040-0350

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 주요 간선도로상 불량맨홀 정비 시 발생하는 폐기물을 적기에 반출하여 쾌적한 도로교통 환경을 조성코자 함

○ 위    치 : 동부도로사업소 관할 주요도로

○ 용역기간 : 2015. 5. 22 ~ 2015. 12. 31.

○ 용역규모 : 폐기물처리 및 운반 151톤

○ 용 역 비 : 4,610천원(용역 4,160천원)

○ 계약업체 : ㈜도요이디아이 대표 김상회

○ 누계 공정율(8월31일 기준) : 계획공정 50%, 현재공정 60%, 계획대비 실공정율 120%

- 부진사유 : 정상 추진

□ 예산투자 현황 - 2015. 8.31 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2015							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)★	지출액	현잔액	사고이월 예상액★
			5	0	5			5

□ 추진실적

○ 2015. 8. 현재 : 폐기물 반출 80톤

□ 향후 추진계획

○ 2015. 12. : 용역준공

□ 특이사항

○ 없음

8. 도로·교통 안전부속물 유지보수공사(연간단가)

동부도로사업소	과 장	김환겸	2040-0302
도로보수과	담당자	정용재	2040-0350

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 주요 간선도로 상 노후, 파손 등 및 도로ㆍ교통안전부속물의 시민 불편사항을 신속히 정비함으로서 쾌적한 도로교통 환경을 조성코자 함

○ 위    치 : 동부도로사업소 관할 주요도로

○ 규    모 : 시설물세척 1,900㎡, 중앙분리대 연석도색 250㎡,

도로표지병 설치 11,305개, 무단횡단금지시설 설치 646m 등

○ 사업기간 : 2015.3.21.~ 2015.12.31.

○ 총사업비 : 448,085천원(도급 288,085, 관급 95,000, 이설 65,000)

○ 계약업체 :(주)아이콘이앤씨 대표 이쌍화,정재욱

○ 누계 공정율(8월31일 기준) : 계획공정 60%, 현재공정 66%, 계획대비 실공정율 110%

- 부진사유 : 정상 추진

□ 예산투자 현황 - 2015. 8.31 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2015							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)★	지출액	현잔액	사고이월 예상액★
			500	0	500		76	424

□ 추진실적

○ 2015. 8. 현재 : 고덕로 외 15개 노선 정비완료

(중앙분리대 80m, 무단횡단방지휀스 646m, 양재대로 중앙분리대                    연석도색 1000m 등)

□ 향후 추진계획

○ 2015.  9. : 1차 기성

○ 2015. 12. : 준공(정산)

□ 특이사항

○ 없음

9. 2015년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

동부도로사업소	과 장	김 환 겸	2040-0302
도로보수과	담당자	이 민 호	2040-0342

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 교통안전시설(노면표시)에 대한 체계적인 유지관리로 차량운전자에게                     안전하고 편리한 도로교통 환경 제공

○ 위    치 : 사업소 관내(강남구, 송파구, 강동구, 서초구 일부)

○ 규    모 : 차선도색 및 제거 217,800m

○ 사업기간 : 2015. 3. 26 ~ 2015. 12. 31

○ 총사업비 : 643백만원(도급비 347백만원, 관급비 296백만원)

○ 누계 공정율(8월31일 기준) : 계획공정 70%, 현재공정 70%, 계획대비 실공정율 100%

- 부진사유 : 정상 추진

□ 예산투자 현황 - 2015. 8.31 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2015							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
	606	606	643		643		218	425

□ 추진실적

○ 도곡로등 경찰청 규제 75개소 차선도색 시행

○ 송파대로등 15개노선 퇴색된구간 재도색 시행

□ 향후 추진계획

○ 2005. 12월 : 공사준공 예정

□ 특이사항

○ 없음

10. 2015년 도로굴착복구 시행도로 정비공사

동부도로사업소	과 장	김 환 겸	2040-0302
도로보수과	담당자	이 민 호	2040-0342

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 도로굴착복구 공사 시행후 포장 불량구간에 대하여 정비를 시행하여

시민 불편해소 및 안전한 도로환경 제공

○ 위    치 : 헌릉로외 2개 노선

○ 규    모 : 아스콘절삭 덧씌우기 t=5cm, 면적 567a

○ 사업기간 : 2015. 6. 8 ~ 2015. 10. 30

○ 총사업비 : 928백만원(도급비 264백만원, 관급비 645백만원, 이전비 19백만원)

○ 누계 공정율(8월31일 기준) : 계획공정 20%, 현재공정 20%, 계획대비 실공정율 100%

- 부진사유 : 정상 추진

□ 예산투자 현황 - 2015. 8.31 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2015							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
			928		928		-	928

□ 추진실적

○ 아스콘 자재공급원 현장 조사 및 점검

○ 자재선정시험 완료

□ 향후 추진계획

○ 2005. 10월 : 공사준공 예정

□ 특이사항

○ 없음

11. 2015년 도로굴착복구 시행도로 노면표시공사

동부도로사업소	과 장	김 환 겸	2040-0302
도로보수과	담당자	이 민 호	2040-0342

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 도로굴착복구 시행도로 정비공사 구간내 교통안전시설(노면표시)에 대한                  체계적인 유지관리로 차량운전자에게 안전하고 편리한 도로교통 환경 제공

○ 위    치 : 헌릉로외 2개 노선

○ 규    모 : 차선도색 및 제거 22,189m

○ 사업기간 : 2015. 6. 23 ~ 2015. 10. 30

○ 총사업비 : 81백만원(도급비 48만원, 관급비 33백만원)

○ 누계 공정율(8월31일 기준) : 계획공정 20%, 현재공정 20%, 계획대비 실공정율 100%

- 부진사유 : 정상 추진

□ 예산투자 현황 - 2015. 8.31 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2015							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
			81		81		-	81

□ 추진실적

○ 노면표지용 페인트 구매(부광화학공업(주))

□ 향후 추진계획

○ 2005. 10월 : 공사준공 예정

□ 특이사항

○ 없음

12. 도로굴착복구 시행도로 폐아스콘 처리용역

동부도로사업소	과 장	김 환 겸	2040-0302
도로보수과	담당자	이 민 호	2040-0342

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 도로굴착복구 시행도로 정비공사 구간내 발생하는 폐기물을 적기에                       반출하여 쾌적한 도로교통 환경을 조성코자 함.

○ 위    치 : 헌릉로외 2개 노선

○ 규    모 : 폐아스콘 운반 6,800톤

○ 사업기간 : 2015. 6. 23 ~ 2015. 10. 30

○ 총사업비 : 70백만원

○ 누계 공정율(8월31일 기준) : 계획공정 20%, 현재공정 20%, 계획대비 실공정율 100%

- 부진사유 : 정상 추진

□ 예산투자 현황 - 2015. 8.31 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2015							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
			70		70		-	70

□ 추진실적

○ 건설폐기물 배출자 처리계획 신고(→강동구청) 완료

□ 향후 추진계획

○ 2005. 10월 : 공사준공 예정

□ 특이사항

○ 없음

13. 포장도로 굴착복구공사 건설사업관리용역(강남권역)

동부도로사업소	과 장	김환겸	2040-0302
도로보수과	담당자	이문희	2040-0352

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 시도상 도로굴착복구 및 포장도로정비공사에 대한 철저한 품질관리를 위한 감리용역을 시행하여 시민고객에게 편안하고 안전한 도로환경을 제공

○ 위    치 : 사업소 관내(강동구, 송파구, 강남구, 서초구일부)

○ 규    모 : 도로굴착복구 및 포장도로정비공사

○ 사업기간 : 2015. 4. 15. ~ 2015. 12. 31.

○ 총사업비 : 648백만원(도급 648)

○ 누계 공정율(8월31일 기준) : 계획공정 50%, 현재공정 50%, 계획대비 실공정율 100%

- 부진사유 : 정상 추진

□ 예산투자 현황 - 2015. 8.31 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2015							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)★	지출액	현잔액	사고이월 예상액★
-	587	587	648	-	-	-	352	296	-

□ 추진실적

○ 2015. 3. 09 : 예산 재배정

○ 2015. 3. 10 : 공사 발주

○ 2015. 4. 15 : 공사 계약 및 착공

□ 향후 추진계획

○ 2015. 12. 31 : 공사 준공

□ 특이사항

○ 없음

14. 포장도로 굴착복구 폐아스콘처리용역

동부도로사업소	과 장	김환겸	2040-0302
도로보수과	담당자	이문희	2040-0352

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 시도상 지하매설물에 대한 굴착공사에서 발생하는 폐아스콘처리 용역

○ 위    치 : 사업소 관내(강동구, 송파구, 강남구, 서초구일부)

○ 규    모 : 폐아스콘 운반 12,500톤

○ 사업기간 : 2015. 3. 25. ~ 2015. 12. 31.

○ 총사업비 : 150백만원(도급 128, 기타 22)

○ 누계 공정율(8월31일 기준) : 계획공정 50%, 현재공정 50%, 계획대비 실공정율 100%

- 부진사유 : 정상 추진

□ 예산투자 현황 - 2015. 8.31 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2015							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)★	지출액	현잔액	사고이월 예상액★
-	118	118	150	-	-	-	-	150	-

□ 추진실적

○ 2015. 1. 07 : 예산 재배정

○ 2015. 3. 05 : 공사 발주

○ 2015. 3. 25 : 공사 계약 및 착공

□ 향후 추진계획

○ 2015. 12. 31 : 공사 준공

□ 특이사항

○ 없음

15. 도로시설물 일상유지 보수공사(연간단가)

동부도로사업소	과 장	박용선	2040-0303
시설보수과	담당자	김종범	2040-0377

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 도로시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 등을 통해 발견된 노후손상된

시설물을 적기에 보수.보강하여 내구성을 향상시키고 시민 안전확보를 위함.

○ 위    치 : 강남구, 송파구, 강동구, 서초구 일부

○ 규    모 :

○ 사업기간 : 2015. 2. 27 ~ 2015. 12 .31

○ 총사업비 : 1,953백만원

○ 누계 공정율(8월31일 기준) : 계획공정 60%, 현재공정 60%, 계획대비 실공정율 100%

- 부진사유: 정상 추진

□ 예산투자 현황 - 2015. 8.31 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2015							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)★	지출액	현잔액	사고이월 예상액★
-	1,296	1,277	1,953	-	1,953	-	460	1,493	0	2,580

□ 추진실적

○ 2015. 01. 30 : 공사 발주

○ 2015. 02. 24 : 공사 계약

○ 2015. 02. 27 : 공사 착공

□ 향후 추진계획

○ 2015.09~10 : 삼성교 외 3개소 신축이음장치 보수

○ 2015.10~11 : 가락지하차도 외 3개소 균열 및 단면보수

○ 2015. 09.~12 : 일상점검 사항(정밀점검 사항) 및 긴급사항 정비

□ 특이사항

○ 없음

16. 광평교 보수공사

동부도로사업소	과 장	박용선	2040-0303
시설보수과	담당자	나철흠	2040-0370

□ 사업개요

○ 목    적 : 노후된 교면의 포장을 재포장하여 시민교통편의 제공

○ 위    치 : 강남구 수서동 ~ 송파구 가락동

○ 규    모 : 아스팔트 포장 49a

○ 사업기간 : 2015.7.16.~2015.11.30

○ 총사업비 : 634백만원

○ 누계 공정율 : 계획공정  10 %, 현재공정 10 %, 계획대비 실공정율 100 %

- 부진사유: 정상 추진

□ 예산투자 현황

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2015							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)★	지출액	현잔액	사고이월 예상액★
-	-	-	634	-	634	-	0	634	0	-

□ 추진실적

○ 2015.7.09. : 공사계약

○ 2015.7.16. : 공사착수

○ 2015.8.현재 : 공사착공에 따른 교통처리 협의(수서경찰서)

□ 향후 추진계획

○ 2015.9.1.~9.7 : 기존 아스팔트 포장 평삭작업 및 재포장 시행

○ 2015.9.15.     : 차선도색 및 기타 부대공사 실시

□ 특이사항

○ 없음

17. 탄천2교 보수공사

동부도로사업소	과 장	박용선	2040-0303
시설보수과	담당자	조장호	2040-0372

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 노후 손상된 시설물을 적기에 보수.보강하여 시설물 내구성증진

○ 위    치 : 강남구 대치동78-28 ~ 잠실동234-45

○ 규    모 : 교면포장 및 방수 65a, 신축이음 정비 25m

○ 사업기간 : 2015. 7.15 ~ 2015. 12.11

○ 총사업비 : 934,000천원

○ 누계 공정율(8월31일 기준) : 계획공정 10 %, 현재공정 10%, 계획대비 실공정율 100%

- 부진사유: 정상 추진

□ 예산투자 현황 - 2015. 8.31 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2015							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)★	지출액	현잔액	사고이월 예상액★
-	-	-	934	-	934	-	299	635	0	-

□ 추진실적

○ ‘15.6.18 : 공사발주

○ ‘15.7.10 : 공사계약

○ ‘15.8.18 : 관급자재 품질시험 완료

□ 향후 추진계획

○ ‘15.9 ~ 10. 30 : 교면방수 및 신축이음 정비

○ ‘15.11. : 공사준공 예정

□ 특이사항

○ 없음

18. 삼성교외7개소 정밀점검용역

동부도로사업소	과 장	박용선	2040-0303
시설보수과	담당자	조장호	2040-0372

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 시특법에 의거 시설물의 안정성 및 결함 원인분석 조치방안을 제시하여

시설물의 효용증진과 공공의 안전확보

○ 위    치 : 삼성교외 7개소

○ 규    모 : 삼성교,대곡교,가락지하차도,잠실호수교,헌릉교,장지1교,오륜교,상일2교

○ 사업기간 : 2015. 5.19 ~ 2015. 11.14

○ 총사업비 : 137,080천원

○ 누계 공정율(8월31일 기준) : 계획공정 70 %, 현재공정 70%, 계획대비 실공정율 100%

- 부진사유: 정상 추진

□ 예산투자 현황 - 2015. 8.31 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2015							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)★	지출액	현잔액	사고이월 예상액★
-	-	-	137	-	137	-	50	87	0	-

□ 추진실적

○ ‘15.3.16 : 용역발주

○ ‘15.4.22 : 사업수행능력 평가 완료

○ ‘15.5.07 : 용역계약

□ 향후 추진계획

○ ‘15.09.08 : 중간보고

○ ‘15.10.15 : 최종보고 및 자문회의

○ ‘15.11.10 : 용역준공

□ 특이사항

○ 없음

19. 도로시설물 세척용역

동부도로사업소	과 장	박용선	2040-0303
시설보수과	담당자	한상신	2040-0371

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 차량 동행에 따른 매연, 먼지 등으로 도시미관 및 환경을 저해하는 오염원을

주기적인 세척으로 쾌적한 도로환경을 조성하여 시민공객에게 편의를 제공코자 함.

○ 위    치 : 강남구, 송파구, 강동구, 서초구 일부

○ 규    모 : 터널 2개소, 지하차도 3개소, 램프 1개소

○ 사업기간 : 2015. 3. 27 ~ 2015. 12. 31

○ 총사업비 :

○ 누계 공정율(8월31일 기준) : 계획공정 60%, 현재공정 60%, 계획대비 실공정율 100%

- 부진사유: 정상 추진

□ 예산투자 현황 - 2015. 8.31 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2015							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)★	지출액	현잔액	사고이월 예상액★
-	168	160	317	-	317	-	83	234	0	320

□ 추진실적

○ 2015. 03. 10 : 용역 발주

○ 2015. 03. 27 : 용역 계약

○ 2015. 03. 27 : 용역 착공 및 시행

□ 향후 추진계획

○ 2015. 09. : 8차 작업지시

○ 2015. 10. : 9차 작업지시

○ 2015. 11. : 10차 작업지시 후 완료예정

□ 특이사항

○ 없음

20.  헌릉로외 1개소 성능개선 실시설계용역

동부도로사업소	과 장	박용선	2040-0303
시설보수과	담당자	김종범	2040-0377

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 시설물 노후 및 중차량 노선운행시 과도한 우회 등 중차량 노선의 문제점

개선을 위한 시설물 성능개선 실시설계용역을 통해 시민의 불편을 해소하고자 함.

○ 시 설 물 : 헌릉교, 신내교

○ 사업기간 : 2015. 3. 18 ~ 2015. 09. 17

○ 성능개선 내용 : DB18 → DB24

○ 총사업비 : 95,166천원

○ 누계 공정율(8월31일 기준) : 계획공정 90%, 현재공정 90%, 계획대비 실공정율 100%

- 부진사유: 정상 추진

□ 예산투자 현황 - 2015. 8.31 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2015							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)★	지출액	현잔액	사고이월 예상액★
-	-	-	95	-	95	-	-	95	0	-

□ 추진실적

○ 2015. 02. 17 : 용역 발주

○ 2015. 03. 10 : 용역 계약

○ 2015. 03. 18 : 용역 착수 및 시행

□ 향후 추진계획

○ 2015. 09. : 준공예정

□ 특이사항

○ 없음

21. 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)

동부도로사업소	과 장	남궁영주	2040-0333
기전과	담당자	김 승 곤	2040-0366

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 도로기전시설물의 노후 및 고장시설 신속한 유지보수를 시행하여 민불편사항                  해소 및 전기 안전사고 예방하여 안전한 도로 환경을 제공

○ 위    치 : 강남구, 송파구, 강동구, 서초구 일부

○ 규    모 : 터널(2개소), 지하차도(8개소), 한강상교량(4개소), 교량(21개소), 기타(3개) 등

○ 사업기간 : ’15. 3 .2  ~  ’15. 12. 31

○ 총사업비 : 139백만원

○ 누계 공정율(8월31일 기준) : 계획공정 80 %, 현재공정 80 %, 계획대비 실공정율: 100 %

- 부진사유 : 정상 추진

□ 예산투자 현황 - 2015. 8.31 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2015							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)★	지출액	현잔액	사고이월 예상액★
	172	163	139	-	139	-	82	57	-	160

□ 추진실적

○ 2014년 : 가로등 교체 및 수리 71개 , 글러브 교체 및 세척 1431개, 배선수리 10개소 등

○ 2015년 :  가로등 교체 및 수리 60개 , 글러브 교체 및 세척 1330개, 배선수리 9개소 등

□ 향후 추진계획

○ 한강상교량 내부 점검등 점검 및 수리

○ 지하차도 보도 등 점검 및 수리

○ 지하차도 및 가로등 노후 전선관 배관 교체 등

□ 특이사항

○ 없음

22. 교통신호기 유지보수공사(연간단가)

동부도로사업소	과 장	남궁영주	2040-0333
기전과	담당자	이귀섭	2040-0361

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 교통신호기 신속한 유지보수를 시행하여 시민불편사항 해소 및 안전사고 예방

○ 위    치 : 강남구, 송파구, 강동구, 서초구 일부

○ 규    모 : 신호등, 제어기, 잔여시간 표시기, 음향신호기 등 유지관리

○ 사업기간 : ’15. 3 ~  ’15. 12. 31

○ 총사업비 : 1,419백만원

○ 누계 공정율(8월31일 기준) : 계획공정 70 %, 현재공정 70 %, 계획대비 실공정율:100  %

- 부진사유 : 정상 추진

□ 예산투자 현황 - 2015. 8.31 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2015							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)★	지출액	현잔액	사고이월 예상액★
	1,288	1,288	1,419	-	1,419	-	569	850	-	1,600

□ 추진실적

○ 2014년 : 신호등주 33개 설치, 제어기 18대 잔여표시기 60대, 음향신호기 설치 등

○ 2015년 : 신호등주 31개 설치, 제어기 4대, 잔여표시기 57대, 음향신호기 설치 등

○ 서울지방경찰청 규제사항 처리 등

□ 향후 추진계획

○ 횡단보도 신설에 따른 신호등 설치

○ 소방서 긴급출동 지원 시스템 구축

○ 민원처리(응답소, 신호운여실 등)

□ 특이사항

○ 없음

23. 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)

동부도로사업소	과 장	남궁영주	2040-0333
기전과	담당자	김동현	2040-0362

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 교통안전표지 신속한 유지보수를 시행하여 시민불편사항 해소 및 안전사고 예방

○ 위    치 : 강남구, 송파구, 강동구, 서초구 일부

○ 규    모 : 교통안전표지 12,435매

○ 사업기간 : ’15. 3 ~  ’15. 12. 31

○ 총사업비 : 92,000,000

○ 누계 공정율(8월31일 기준) : 계획공정 70 %, 현재공정 70 %, 계획대비 실공정율:100  %

- 부진사유 : 정상 추진

□ 예산투자 현황 - 2015. 8.31 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2015							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)★	지출액	현잔액	사고이월 예상액★
	90	90	92	-	92	-	-	92	-	100

□ 추진실적

○ 2014년 : 240개소 신설 및 철거 교체

○ 2015년 : 125개소 신설 및 철거 교체

□ 향후 추진계획

○ 주정차 허용구간 표지 설치

○ 경찰청 규제사항 관련 표지 설치

○ 민원처리(응답소, 신호운영실 등)

□ 특이사항

○ 없음

24. 대치지하차도 조명시설 개량공사

동부도로사업소	과 장	남궁영주	2040-0333
기전과	담당자	김현기	2040-0360

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 노후된 조명시설를 개선하여 쾌적한 도로환경 조성 및 안전사고 예방

○ 위    치 : 대치지하차도(강남구 대치동)

○ 규    모 : LED 조명기구 설치, 케이블 및 닥트교체, 분전반 교체 등

○ 사업기간 : ’15. 7 ~  ’15. 11. 20

○ 총사업비 : 160백만원

○ 누계 공정율(8월31일 기준) : 계획공정 10 %, 현재공정 10 %, 계획대비 실공정율:100  %

- 부진사유 : 정상 추진

□ 예산투자 현황 - 2015. 8.31 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2015							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)★	지출액	현잔액	사고이월 예상액★
-	-	-	160	-	160	-	0	160	-	-

□ 추진실적

○ 공사발주, 공사계약 및 착공

○ 현장확인 및 계획수립

○ 자재준비

□ 향후 추진계획

○ 2015.  9 : 노후등기구, 노후덕트, 케이블 철거작업

○ 2015. 10 : 케이블 트레이, 케이블 , LED 등기구 설치

○ 2015. 11 :조도측정 및 절연저항 체크

□ 특이사항

○ 없음

25. 올림픽공원 외 1개소 통합지주 설치공사

동부도로사업소	과 장	남궁영주	2040-0333
기전과	담당자	이귀섭	2040-0361

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 가로변에 기능별로 설치하여 납립된 가로시설물은 신호등 중심으로                       통합하여 보행불편사항 해소 및 쾌적한 도시환경 조성방

○ 위    치 : 올림픽공원사거리, 둔촌사거리

○ 규    모 : 차량보행등주 15본 설치, 신호등이설 40개, 지중화공사 1,671m 등

○ 사업기간 : ’15. 8 ~  ’15. 11. 20

○ 총사업비 : 286백만원

○ 누계 공정율(8월31일 기준) : 계획공정 10 %, 현재공정 10 %, 계획대비 실공정율:100  %

- 부진사유 : 정상 추진

□ 예산투자 현황 - 2015. 8.31 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2014		2015							2016년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)★	지출액	현잔액	사고이월 예상액★
-	-	-	286	-	286	-	0	286	-	-

□ 추진실적

○ 공사발주, 공사계약 및 착공

○ 현장확인 및 계획수립

○ 자재준비

□ 향후 추진계획

○ 2015.  9 : 도로굴착 및 배관, 신호케이블 설치공사

○ 2015. 10 : 신호등주 철거 및 통합지주 설치공사

○ 2015. 11 : 신호운영실 DB설치 및 부대시설 설치공사

□ 특이사항

○ 없음