문서번호	시설과-6575
결재일자	2015.9.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		조경팀장	시설과장
협조

낙산배드민턴장 이전공사 준공기한 연기 검토보고

2015. 9

낙산배드민턴장 이전공사 준공기한 연기 검토보고

낙산배드민턴장 이전공사와 관련하여 민원이 발생함에 따라 준공기한 연기검토한 결과를 보고드림

공사개요

❍ 공 사 명 : 낙산배드민턴장 이전공사

❍ 공사기간 : ‘15. 8. 24. ~ 9. 12.

❍ 도 급 액 : 12,000천원

❍ 도 급 자 : 형진랜드(주)  대표 유진숙

검토사항

❍ 준공기한 연기 사유

- 배드민턴장 설치예정지 인접한 낙산어린이집 원장 및 학부모, 인근주민 등이 현장에서 공사철회 요청 민원을 제기함에 따라 공사가 일시 중단되어,

- 낙산어린이집 등 관련주민 설명회 개최 및 주민 이해·설득, 낙산배드민턴 동호회와의 협의 결과에 따라 조치되어야 할 상황임

[※관련문서 : 시설과-6344(2015.9.4.)호 낙산배드민턴장 이전공사 실정보고]

❍ 준공기한 연기

- 당초 : 2015. 08. 24 ~ 2015. 09. 12.

- 변경 : 2015. 08. 24 ~ 2015. 12. 30.

❍ 연기에 따른 귀책소재 : 중부공원녹지사업소

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과

검토결과

❍ 공사철회 민원이 발생하여 협의 시까지 공사가 일시 중단되어 공기 연장하는 건으로, 상기와 같이 공사기간을 연기하여 공사추진에 철저를 기하고자 함.  끝.