등록번호

청소행정과-3760

주무관

음식물관리팀장

청소행정과장

환경도시국장

부구청장

구청장

등록일자

2016.2.18.

결재일자

2016.2.19.

공개구분

비공개(5)

협  조

정책기획담당관

예산팀장

주무관

난지 음식물류폐기물 자원화시설

증설 및 환경개선 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사업비
	기관․부서․단체명	협의내용	협의결과

서 대 문 구

청소행정과

난지 음식물류폐기물 자원화시설

증설 및 환경개선 계획 보고

노후된 난지 음식물류폐기물자원화시설을 개선 및 증설하여 음식물 처리의 효율성을 극대화하고, 공공처리시설 추가 확충을 통한 음식물쓰레기 처리의 안정적인 운영을 도모코자 함.

Ⅰ		일반현황

시설 운영

위    치 : 고양시 덕양구 대덕로426(현천동673-2)

시설규모 : 대지 5,088㎡, 건물 1,624㎡(지상2층 경량철골조)

소 유 권 : 토지 · 건물(서울시), 설비(서대문구)

처리용량 : 300톤/일(탈수 · 건조 퇴비화)

침출수량 : 240톤/일(난지물재생센타 연계 처리)

운영방식 : 민간위탁{㈜이에이텍 대표 조남춘}

위탁기간 : 2016.01.01. ~ 06.30(6개월)

반입량 및 처리단가

구 분	계	서대문구	고양시	종로구	마포구	은평구	영등포
반입량(톤/일)	325	82	60	75	73	10	25
처리단가(톤/원)		77,500	83,800	96,500	96,500	96,500	96,500

현황사진

본 관	호 퍼 동
시 설 내 부	부 산 물 창 고

주요설비 제원

설 비 명	규 격	수량	비 고
건 조 기	5톤/시간×112Kw	5대	4대 : 노후 교체대상 1대 : `15.11교체(서울시 특별교부금)
탈 수 기	15톤/시간×37Kw	2대	1대 : 노후 교체대상 1대 : `15.12교체(서울시 특별교부금)
파봉선별기	20톤/시간×37Kw/45Kw	2대	노후설비로 교체 대상
투 입 호 퍼	158톤×2조×7.5Kw	2식	〃
중간저장호퍼	16톤×7.5Kw×3set	1개	〃
제품분쇄기	햄머밀×37Kw	1식	〃
탈 취 설 비	10,000㎥	1식	〃

투입호퍼

파봉선별기

탈수기

저장호퍼

현황사진  계획량(톤/일)  처리단가(원)

건조기

이물질선별기

제품분쇄기

저 장

탈취시설

폐열보일러

Recycle

Ⅱ		추진배경

추진경위

`16.01.19 : 음식물쓰레기 공공시설 확충 대책 숙의 회의

- 참석자

· 서울시 : 기후환경본부장, 환경에너지기획관, 생활환경과장 등

· 자치구 : 서대문구, 도봉구, 강동구 청소과장(팀장)

- 주요 회의 안건

· 서울시 공공처리시설 확충 필요성 및 규모, 추진방식 등 논의

`16.01.20 : 서울시와 유선 협의(청소행정과장 – 서울시 음식폐기물관리팀장)

- 난지 음식물류폐기물자원화시설 증설 및 개량사업의 당위성 설명

`16.01.27. : 2016년 서울시 신년 중요사업 보고(기후환경본부장 → 서울시장)

- 서대문구 자원화시설 용량 증설 : 300톤/일 → 500톤/일

`16.02.03 : 서울시 기후환경본부장 난지 음식물자원화시설 방문

- 시설 가동 상태 등 현장 전반 확인 및 증설 계획 보고

`16.02.15 : 서울시 중기재정계획 대상 상정(서울시 생활환경과)

증설 및 환경개선의 필요성

`96년 설립 이후 체계적인 설비 투자가 이루어지지 않아 설비가 매우 노후 되었으며, 각 설비간의 유기적인 연동 운전이 곤란하고 잦은 고장으로 인하여 가동상태가 매우 불안정하므로 전면 개·보수가 조속 요구 됨

우리구 외 5개 자치단체가 위탁 처리하고있는 광역공공처리시설로써 고장으로 인하여 가동이 중단 될 경우 음식물처리 대란으로 막대한 주민불편 사항을 초래할 것으로 예상 됨.

서울시 공공처리시설 추가 확충을 통한 음식물류폐기물의 안정적인 타 지자체 추가 반입 처리 가능(서울시 공공시설 처리율 34.4%)

Ⅲ		증설 및 환경개선 계획(안)

사업개요

추진기간 : 2016.03.01. ~ 2017.12.31

사 업 비 : 약 100억원 추정(국비, 시비 전액지원 추진)

주요내용

- 용량증설 : 300톤/일 → 500톤/일 이상

- 설비보강 : 건조기, 탈수기, 선별기, 호퍼, 탈취설비 등 증설 및 개·보수

- 건물보수 : 건물 내·외부 보수 및 환경개선

타당성 조사 용역

실시기관 : 전문 용역기관에 의뢰

조사기간 : 2016.03.01 ~ 06.30(4개월)

용역내용

- 처리용량 최대 가능 범위 여부(500톤/일 이상)

- 증설에 따른 난지 물재생센타 음폐수 처리 용량 부하 검토

- 건물 개·보수 및 설비 일체의 증설, 보수 보강 방법 검토

- 총 사업비 산출 및 사업 추진방식 검토(국비, 시비)

- 관련법규 검토 및 기초자료 수집 조사

소요예산 : 22,000천원(구비)

예산재원 : 2016년도 확보된 예산이 없으므로 민간위탁금에서 전용하여 추진

- 서울시 중기재정계획(시비 100억원 편성 추진 중)대상인 “난지음식물류폐기물 자원화시설 증설 및 환경개선사업” 재원 확보를 위한 선행 사업이며

- 2017년도 공사 추진을 위한 절차로 서울시 타당성심사 검증 및 투자심사를 거치기 위한 선행 용역으로 금년에 완료하여야 함

- 예산비목 : 음식물류폐기물 수거, 307)민간이전, 05)민간위탁금

→ 음식물류폐기물 수거, 401)시설비및부대비, 01)시설비

증설 효과

서울시 음식물류폐기물 공공처리율 증가 및 안정적 처리시설용량 추가 확보

민간 위탁처리를 공공처리로 전환하여 자치단체 음식물 처리비용 저감

(기존 6개 지자체 외 2개 지자체 전량 처리 가능)

노후된 기존 설비의 교체로 안정적인 처리와 효율성 증대

문제점 및 대책

용량 증설 신고 : 처리기관 → 고양시

- 비상 확보 필요성 제기 설득

→ 고양시 60톤/일 이용 중 비상시 추가 반입가능

- 서울시 및 반입 지자체와 공동 협의 추진

인근 지역 주민 설득

- 난지 시설의 노후 상태가 매우 심각하여 주요장비 교체와 탈취설비 보강 등 환경개선사업이 시급함

- 용량 증설시 대덕동 주민지원협의체 복지지원금 추가 증액 가능

(5,440원/톤, 년간 5억5천만원 → 9억2천만원)

- 대덕동 주민동의서 징구

Ⅳ		향후일정

2016.03 ~ 06 : 음식물 자원화시설 증설 및 환경개선 타당성 조사용역

2016.05 ~ 08 : 타당성 검증 의뢰(서울시 공공투자관리센터)

2016.07 ~ 08 : 사업예산 협의(서울시)

2016.08 ~ 09 : 서울시 투자심사 의뢰

2016.09 ~ 2017.02 : 기본 및 실시설계

2017.03 ~ 2017.12 : 증설 및 환경정비 공사 시행. 끝.