문서번호	토목부-2453
결재일자	2015.2.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장

남부순환로(개봉역앞)구조개선공사

유수장애 지장물(상수도) 이설 완료보고

2014. 2.

도시기반시설본부

(토 목 부)

- 남부순환로(개봉역앞)구조개선공사 -

유수장애 지장물(상수도관) 이설 완료보고

개봉역앞 하수BOX내에 매설된 기존 상수도관(D=250㎜)을 강서수도사업소의 이설 승인조건에 따라 공사를 완료함에 따라 이에 대한 공사비를 설계변경시 반영하기 위한 검토보고임.

※ 개봉역앞 기존 상수관로 이설계획 현황보고(토목부-14088호<2014. 7.22.>)관련임.

공사개요

○ 위    치 : 구로구 개봉동 234-1 ~ 198-1(개봉역 일대)

○ 사업규모 : 지하차도 설치 폭 4차로, 연장 736m

- 남·북측 측도설치 : 폭 2~3차로, 연장 2,280m

○ 사업기간 : 2007. 9. ~ 2015. 6.30.

○ 총사업비 : 66,777백만원

○ 시 공 사 : ㈜케이에쓰시건설외 1사

○ 감 리 사 : ㈜동명기술공단외 1사

이설현황

○ 위 치 도

○ 기존 상수도관(D=250㎜ → D=300㎜) 이설현황

구분	위 치	상수도관 규격	단위	수량	비 고
1구간	개봉역앞 횡단보도	KP D300mm	m	41.0
		강관 D300mm	m	12.0	기존수로암거 하월구간
		소 계	m	53.0
2구간	오슬로 모텔앞	KP D300mm	m	22.0
		강관 D300mm	m	18.0	기존수로암거 하월구간
		소 계		40.0
계			m	93.0

추진경위

○ ‘13.12. 5. : 시민불편민원 조치요청(도로계획과-15124호)

○ ‘13.12.16. : 상수도 개량 협의 이행에 따른 협조요청(토목부-23333호)

○ ‘14. 4.10. : 개봉역앞 기존상수관로(D250mm) 이설 협의에 따른 회신

(강서수도사업소 급수운영과-7288호)

○ ‘14. 4. 2. : 상수관로 이설 추진 철저지시(SMIH-14-21569호)

○ ‘14. 7.22. : 개봉역앞 기존 상수관로 이설계획 현황보고(토목부-14088호)

○ ‘14. 8.29. : 남부순환로(개봉역앞) 상수관 이설공사에 따른 협조요청

(강서수도사업소 급수운영과-20964호)

○ ‘15. 2. 6. : 금회 감리단 실정보고 제출(남부감 제15-29호)

보고내용

○ 개봉역앞 기존 상수도 관로가 하수BOX를 관통하여 매설되어 유수장애가 발생되고 있으므로, 구로구에서 이를 이설하여 주도록 시장단에 요청

○ 상수도관 이설을 위하여 강서수도사업소와 협의하여 자재는 수도사업소에서 지원(29백만원)하고 위 공사에 포함하여 시행하는 방안으로 행정2부시장께 보고되어 이설공사를 추진하고, 공사비 반영을 위한 검토보고임.

공사비 증·감 내용

(단위 : 원)

공 종	단위	공 사 비			비고
		당 초	변 경	증·감
1,토공	식	625,431	6,415,212	증)5,789,781
2,관부설공	식	7,806,587	15,883,449	증)8,076,862
3,구조물공	식		12,085,763	증)12,085,763
4,작업구공	식		72,972,985	증)72,972,985
5,강관압입공	식		47,766,850	증)47,766,850
6,포장공	식		1,467,437	증)1,467,437
7,부대공	식	50,945	29,345,802	증)29,294,857
8,사급자재비	식	11,895,995	35,929,247	증)24,033,252
직접공사비		20,378,958	221,866,745	증)201,487,787
제경비		2,621,042	32,233,255	증)29,528,013
공급가액		23,000,000	254,100,000	증)231,100,000
부가세		2,300,000	25,410,000	증)23,110,000
도급공사비		25,300,000	279,510,000	증)254,210,000
폐기물처리비	식	-	3,454,000	증)3,454,000
총공사비		25,300,000	282,964,000	증)257,664,000

감리단 의견

○ 개봉역앞 하수 BOX내 유수장애 지장물인 기존 상수관로(D=250㎜) 이설공사는 강서수도사업소의 이설 승인조건에 의해 이설공사를 2014.10.23. 완료 하였음.

○ 상수도관 이설을 위한 추진기지 설치후 강관부설시 지중화사업과 연계하여 별도로 압입강관(D=800㎜)부설하여 한전 및 통신사 협약서에 의거 압입강관추진 및 가시설 중복 공사비(설계가) 64,000천원에 대하여 50%(감 32,000천원)를 지중화 공사비 정산시 한전 및 통신사에 정산요구 예정임.

○ 증액되는 공사비 257,664천원에 대하여는 본부 설계변경소위원회 심의결과에 따라 추후 설계변경에 반영하고자 함.

조치의견

○ 감리단 의견과 같이 개봉역앞 하수BOX내 유수장애 지장물인 상수도관(D=250㎜) 이설에 대한 수량 및 단가에 대하여는 승인하고, 증액되는 공사비(257,664천원)에 대하여는 추후 우리 본부 설계변경소위원회 심의결과에 따라 설계변경에 반영하고자 함.

붙 임 : 감리 검토의견서 1부.  끝.