2013년 도로유지관리사업 추진현황( ‘13.12.31기준)

연번	사 업 명	사업개요	총사업비	추진실적 및 향후계획	공정(%)
	계		205,843,281
4	도로시설물 일상유지 보수공사	ㅇ 위치 : 서울시 전지역 ㅇ 규모 : 시도상 1종시설물17개소 전용도로 13개노선, 소규모 보수공사 18개소 ㅇ 사업기간 : 2013.3~2014.2 ㅇ 총사업비 : 5,830백만원	5,830,000	ㅇ 사업착공 : ‘13. 3. o 사업추진실적 - 12월말기준 실적 : 슈청소 50개소, 단면보수 494.2㎡, 신축이음보수 133.8m, 표면보수 1,201㎡, 아스콘포장 98a, 교면방수 3,516㎡, 캐노피설치 1개소 완료 - 공정 97%(12/31 현재) o 향후계획 - ‘14.2.28일 공사완료 및 준공	97
7	상도터널 보수공사	ㅇ 위치 : 상도동717~본동136 ㅇ 규모 : 누수보수 1,872m 표면처리 15,880㎡ ㅇ 사업기간 : 2013.3~2013.10 ㅇ 총사업비 : 1,400백만원	1,400,000	ㅇ 사업착공 : ‘13.10.14 ㅇ 사업추진실적 - 설계용역완료 - 교통처리대책 심의 중 - 공정 10%(10/15 현재) ㅇ 향후계획 - ‘14.7.13 일 공사완료 및 준공	10
11	도림천 4복개외 2개소 보수공사	ㅇ 위치 - 도림천1 : 서울대정문~신림동228-1 - 도림천4 : 대림동1101-7~611 - 도림천좌안(강서) : 신도림역~ 구로디지털단지역 ㅇ 규모 : 단면보수 1,452㎡ 균열보수 8,541m, 표면보수 1,000㎡ ㅇ 사업기간 : 2013.3~2013.12 ㅇ 총사업비 : 890백만원	890,000	ㅇ 사업착공 : ‘13.5.1 ㅇ 사업추진실적 - 단면보수 373㎡, - 표면보수 9,140㎡ ㅇ 공정 100%	100
19	도로시설물(교량관리) 일상유지보수	ㅇ 위치 : 서울시 관내 ㅇ 규모 : 서울시 고가도로 및 일반교량 시설물 유지 관리(228개소) ㅇ 사업기간 : 2013. 3. ~ 2014. 2 ㅇ 총사업비 : 15,448백만원	15,448,000	ㅇ 사업착공 : ‘13. 3. o사업추진중 : ‘13.3.1～’14.2.28 o추진사항 ･ 12월말기준 실적 : 슈청소 86개소, 단면보수 840㎡, 신축이음보수 227.8m, 표면보수 2,045.1㎡, 아스콘포장 167.9a, 교면방수 5,986㎡, 캐노피설치 3개소 완료 - 공정 97%(12/31 현재) o 향후계획 - ‘14.2.28일 공사완료 및 준공	97
34	영동1교 보수공사	ㅇ 위치 : 서초구 양재동 1114-285번지 ㅇ 사업규모 - 교면방수 및 포장 49a - 신축이음교체 70m - 단면보수 308㎡ 등 ㅇ 사업기간 : ‘13.3∼12 ㅇ 사 업 비 : 600백만원	600,000	○사업추진중 - 공사기간 :.5.27~12.17 - 계약물량 : 방수및포장49a, 단면복구 308㎡ - 12월 추진실적 : 방수및포장49a o공정율 100%	100
37	강남터미널보수공사	ㅇ 위치 : 서초구 반포동 19-36번지 ㅇ 사업규모 - 교면 포장 122a - 바닥판 보수 900㎡ ㅇ 사업기간 : ‘13.3∼12 ㅇ 사 업 비 : 616백만원	616,000	o사업추진실적 - 공사기간 :.5.27~12.17 - 도급사 : 엠비에스건설(주) - 계약물량 :교면포장122a - 12월추진실적 : 교면포장122a 완료 o공정율 100%	100
41	보라매고가도로 보수공사	ㅇ 위치 : 영등포구 대림동 ∼동작구 신대방동 ㅇ 사업규모 - 방음벽교체 478m - 강재도장 1,500㎡ - 단면보수 100㎡ 등 ㅇ 사업기간 : ‘13.3∼12 ㅇ 사 업 비 : 700백만원	700,000	o사업추진실적 - 공사기간 : 13.5.1~12.20 - 도급사 : 코리아건설(주) - 계약물량 : 방음벽설치 478m - 12월추진실적 : 방음벽설치478m o 공정율 100%	100