문서번호	시설과-9081
결재일자	2015.12.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	중부공원녹지사업소장
협조	공원운영과장
	조경팀장

남산 국궁장(석호정)시설 개선공사 준공기한 연기 검토보고

2015. 12

남산 국궁장(석호정)시설 개선공사

준공기한 연기 검토보고

남산 국궁장(석호정)시설 개선공사와 관련하여 준공기한 연기요청되어 검토한 결과를 보고드림

공사개요

❍ 공 사 명 : 남산 국궁장(석호정)시설 개선공사

❍ 공사기간 : ‘15. 8. 13. ~ 12. 5.

❍ 총공사비 : 423,121천원

- 도급비 289,326천원(조경 187,194, 건축 102,132)

- 관급비  90,151천원       - 이전비  43,644천원

❍ 도 급 자 : 육림종합조경(주), ㈜성안종합건설

검토사항

❍ 준공기한 연기 사유

- 기상악화(우천 및 폭설)로 인하여 정상적인 공사일정에 차질이 발생하여 절대공기 부족

❍ 준공기한 연기(6일)

- 당초 : 2015. 8. 13. ~ 2015. 12. 5.

- 변경 : 2015. 8. 13. ~ 2015. 12. 11.

❍ 연기에 따른 귀책소재 : 중부공원녹지사업소

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과

검토결과

❍ 상기와 같이 공사기간을 연기하여 공사추진에 철저를 기하고자 함.

붙임  날씨(11,12월) 1부.  끝.