남산 회현자락 한양도성 보존.정비 및 공원조성공사

실정보고 사항 검토결과

[관련공문 : 남산회현-176호 (2017.12.04.)]

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 남산 회현자락 한양도성 보존.정비 및 공원조성공사(3차)

○ 공사기간 : 2017. 1. 1. ~ 2017. 12. 31

○ 공 사 비 : 377,510천원(도급비 : 293,182천원, 관급비 84,328천원)

○ 도 급 자 : 조경-동림건설(주) 대표 김기유, 문화재-장원건설(주) 대표 권기술

□ 검토내용 (책임감리)

○ 검토근거 : 특별과업내용서 5.8항, 5.23항에 의한  동림(남산)2017-80(2017. 11. 23.)호 및 장원업무 제122호(2017.11.24.) 검토임.

○ 검토대상 :  분수대구간 유적박물관 현상공모 설계에 따른 공사 감액  금액을 산림구간에 반영에 대한 검토

○ 검토내용

가. 개 요

위치	당 초	변 경	비 고
조경/토목	현상설계에 의한 중앙광장 (분수대구간) 공사비 삭감	공사 구간 및 공종의 조정
문화재	현상설계에 의한 중앙광장(분수대구간) 공사비 삭감	공사 구간 및 공사량 조정 산림 구간 마감 방안 반영

나. 조경/토목 공사 변경 검토

구 분	변경 내용	공사비 변경(천원)		비 고
		3차	전체
토공	포장 깨기, 잔토움반, 폐기물 상차, 등의 착수시점 조정에 의한 감 조정	△9,686	△9,686
2.우수/급수공	토공 및 우수관로 변경, 배수시설, 맹암거 음수대 급배수의 감 조정	△7,628	△7,628
3.시설물공	음수대, 장대석 계단, 안전난간, 유적안내판의 수량 감조정	△3,322	△20,617
4.포장공	화강석 통석 포장, 포장경계석, 통석경계석, 노면안내판, 야자매트설치 수량의 감 조정	△32,460	△64,610
5.식재 및 이식공	이식 및 수목, 매트 식재 수량 감 조정	△34,588	△40,048
6.부대공	가설휀스의 기간연장 및 해체공사 미반영	△3,257	△3,257
7.운반 및 주요자재	공사 감소에 따른 비용 감액	△2,561	△2,561
소 계		△93,502	△148,407
제 경 비		△40,838	△116,068
부가가치세		△13,434	△27,447
도급공사비		△147,774	△290,922

다. 문화재 공사 물량 및 금액 조정

1) 제1구간(분수대구간) - 조정 없음

2) 제2구간(산림구간) - 산림구간 현상변경 구간 증액 조정

구 분	변경 내용	공사비 변경(천원)		비 고
		3차	전체
1.가설공사	강관 비계메기 가설공사 반영	2,118	-1,372
2.토공사	판축지정 및 잔디식재 마감 반영	30,792	-16,340
3.성곽보전 정비공사	채움석 및 속채움석 보충 반영 혹두기등 다듬기 반영	88,108	-30,717
4.운반공사 (산림구간)	경운기 운반 반영	7,777	-5,312
5.철거공사	수방공사 반영	30,908	28,793
6.운반공사 (흔적형상화)	성곽돌, 속채움석, 진흙 운반	19,864	-1,142
7.운반공사 (전체)	문화재 공사 전체 계상 운반	0	9,431
소 계		179,567	-16,659
제 경 비		65,645	-39,839
보전처리공사		0	-82,658
자문회의비			-5,156
수리보고서	준공 수리 보고서 반영	14,763	0
부가가치세		25,997	-14,431
합 계		증)285,974	-158,743

□ 공사비 검토

가. 공사비 변경(3차분)                                               (단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
총공사비		377,510	490,910	증) 113,400
도급비	계	293,182	431,382	증) 138,200
	조경/토목	156,982	9,208	감)-147,774
	문화재	136,200	422,174	증) 285,974
관급자재비		84,328	59,528	감) -24,800

나. 총차 공사비 변경                                                    (단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
총공사비		4,750,243	4,245,972	감) -504,270
도급비	계	3,788,554	3,338,889	감) -449,665
	조경/토목	2,766,692	2,475,770	감) -290,922
	문화재	1,021,862	863,119	감) -158,743
관급자재비		961,689	907,083	감) -54,605

□ 감리단 검토의견

○ 중앙광장(분수대구간)은 현장 유적박물관 보호각 설치 예정지역으로 구간 내 사업비를 삭감하고 산림구간의 성곽정비 문화재청「사적현상변경」 심의 의결된 승인 안을 시공하는 설계변경이 타당함

○ 예산의 효율적인 집행을 위한 조경공사비 감액하고 문화재 공사비 증액

○ 단가의 적용 및 산출, 수량 산출 및 금액 산출과 증감 금액은 적정함

□ 검토결과

○ 상기 실정보고 사항에 대해 승인하오니, 향후 설계변경 시행 등 공사시공에 철저를 기하기 바람.