남산 회현자락 한양도성 보존.정비 및 공원조성공사

실정보고 사항 검토결과

[관련공문 : 남산 회현-47호 (2015.10.28.)]

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 남산 회현자락 한양도성 보존.정비 및 공원조성공사(1차)

○ 공사기간 : 2014. 12. 19. ~ 2015. 12. 31

○ 도 급 액 : 2,718백만원

○ 도 급 자 : 동림건설(주) 대표 김기유

□ 책임감리 실정보고 내용

구 분	현황 및 문제점	검 토 의 견	비 고 (공급가액)
임 목 폐기물 처 리	▷ 토공사 중 산림구간 벌개제근 및 수목제거시 발생한 임목폐기물 수량은 설계서에 있으나 처리에 대한 공사비 미반영	▷ 처리업체(3개) 조사하여 운반거리가 가까운 적정업체 선정 위탁처리 ⁃ 임목폐기물 처리 : 124.3㎥ (158.7톤)	증) 12,215

□ 공사비 변경 (임목폐기물 처리)

(단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증. 감	비 고
도급비	1) 순공사비	-	324	증) 324
	폐기물상차비	-	324	증) 324
	2) 제경비	-	94	증) 94
	3) 임목폐기물 운반처리비	-	11,797	증) 11,797
	1. 공급가액	-	12,215	증) 12,215
	2. 부가가치세	-	1,221	증) 1,221
	3. 도급공사비	-	13,436	증) 13,436

□ 검토결과

○ 상기 실정보고 사항에 대해 승인하오니, 향후 설계변경 시행 등 공사시공에 철저를 기하기 바람.