납품기한 연기의뢰서

1. 사업개요

가. 계 약 명 : 장충리틀야구장 펜스 보호패드 구매 설치

나. 계약업체 : ㈜스페이스엔지니어링 대표 송재호

다. 계약금액 : 금138,900,000원

라. 계약일자 : 2014. 11. 18.

마. 납품기한 : 2015. 01. 17.

2. 위 공사의 준공기한을 아래와 같이 연기하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한

ㅇ 당  초 : 2014. 11. 18 ~ 2015. 01. 17.

ㅇ 변  경 : 2014. 11. 18 ~ 2015. 02. 23.

나. 연기사유 귀책소재 : 중부공원녹지사업소

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유 : 장충리틀야구장의 펜스 보호패드의 브라켙(지지대)인 ‘Z 클립’을 녹이나지 않는 알루미늄재질로 시공하여 줄 것을 요구함에 따라, 신규 제작에 시일이 필요함.

2015. 1. 6.

확인자 : 시설과장  함석주  (인)

서울특별시 중부공원녹지사업소 분임경리관 귀하