납품기한 연기의뢰서

1. 계약내용

가. 계약건명 : 영등포소방서 담장개방 및 녹화사업 관련 관급자재 구매

나. 계약자 및 계약금액

연번	품 명	계 약 자	계약금액	납품기한	비고
1	안내판(NZ/KY-40-2)	오성씨앤디	667,800원	2015.02.28
2	안내판(NZ/KY-75-1)		1,574,400원	2015.02.28
3	퍼걸러(HJ-352E)	형진랜드(주)	7,238,000원	2015.03.01
합 계			9,480,200

다. 계 약 일

- 안내판(NZ/KY-40-2) : 2014. 12. 30.

- 안내판(NZ/KY-75-1) : 2014. 12. 30.

- 퍼걸러(HJ-352E)    : 2014. 12. 31.

2. 위 물품의 납품기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기납품기한 : 2015. 5. 31.

나. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시서부공원녹지사업소

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유 : 본공사(조경공사) 준공기한 연기에 따른 관급자재 납품기한 연기.  끝.

2015년 2월  10일

시설과장  임 병 국 (인)

서울특별시서부공원녹지사업소 분임재무관 귀하