조달구매 납품기한 연기의뢰서

1. 조달구매 개요

가. 건    명 : 조달구매(한양도성 순성길 조성공사용 물품구매)

나. 도급업체 : ㈜ 에프씨코리아랜드, 초록마당 영농조합법인

다. 도 급 액 : 금50,362,790원

라. 계약일자 : 2013. 12. 30.

마. 납품기한 : 2014. 01. 29.

2. 위 조달구매의 납품기한을 아래와 같이 연기하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한 : 2014. 05. 24.

나. 연기사유 귀책소재 : 중부공원녹지사업소

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

○ 조달구매 납품관련 본 공사인 한양도성 순성길조성공사 기간이 2014. 05. 24.이며, 현재 동절기로 공사 추진이 불가에 따른 조달구매 납품 기한을 연기.

2014. 01.

확인자 : 녹지관리과장  최병언  (인)

서울특별시중부공원녹지사업소 분임경리관 귀하