첨부1		내진성능 부족시설물 연차별 세부 추진계획

구 분		합계	2011 이전	2012	2013	향 후 계 획
						소계	2014년	2015년	2016년	2017년 이후
총사업비		131,710	33,272	7,437	17,601	73,400	5,293	22,025	23,217	22,865
설계용역	예산	6,683	4,225	37	800	1,621	0	1,621	0
	개소	122	42	2	0	78	0	78	0
	대상 시설				187개소(지중구조물)		'14년 보강 시설물	'15년 보강 시설물	'16년 보강 시설물	'17년 보강 시설물
보강공사	예산	125,027	29,047	7,400	16,801	71,779	5,293	20,404	23,217	22,865
	개소	122	17	5	1	99	5	18	34	42
	1종	22	10	<1> (탄천2)	1개소 - 도시고속도로 : 1 (,홍제천고가) - 주간선도로 : 2 (도림천고가,, 광명고가 `13.12)	11	3개소 - 도시고속도로 : 2 (두모교`14..7, 홍제천고가) - 주간선도로 : 1 (도림천고가`14.12) - 2011년 설계 : 1 (금천교`14.3)	6개소 - 도시고속도로 : 2 (염창I.C, 홍제천고가) - 주간선도로 : 3 (영동6교, 신정교, 한남1 고가)< ※ 약수고가,, 서빙고고가 )	2개소 - 도시고속도로 : 1 (홍제천고가) - 도시고속도로 : 1 (복정고가-성남시 이관)	※ 복정고가 예산은 `17년 잔류
	2종	23	7	4 (신천1,2,현저고가) (※수색교 고가- 내진만족 포함)		12		6개소 - 도시고속도로 : 3 (월릉하단IC, 목동교동측 I.C), 여의상류IC) - 주간선도로 : 2 (영동2교, 도림교관악) - 2011년 설계 : 1 (영동5교)	6개소 - 도시고속도로 : 1 (중랑상단IC, 동부간선진입 램프) - 주간선도로 : 1 (영동대교북단고가, 안양교) - 법정시설물 : 1 (기아대교신교, 삼각지고가)	-
	법정외	77	-	1 (잠두봉 고가- 내진만족)		76	2개소 - 주간선도로 : 2 (안암2교`14.12, 우면고가`14.12)	6개소 - 도시고속도로 : 5 (원효대교북단교,새남터 다리,서빙고다리,신내1교,신내2교) - 주간선도로 : 1 (수서IC)	26개소 - 도시고속도로 : 15 (상행3교,하행1교,고덕천교,동작교,반포대교통과교,여의하류IC,행주IC,당현4교,면목천교,서초1고가,서초2고가,서초3고가, 서초교,양재천교,,상촌고가) - 주간선도로 : 11 (봉림교,광복교,오류IC,증산교,청량제1고가,사천교, 충정교고가,연희IC,우이교,도봉교,면목교)	42소 - 기타 노선상 : 42 (방이고가,중암교,성산1교,승리교,월곡교,제3우이교,당현3교,북악스카이웨이1교고가,구로1교,화곡고가,월계2교,당현2교,제1제기교,먹골교,뚝섬고가,성내5교,홍연교,신응교,증산2교,홍남교,상암교,한강로다리,염천교고가,신림1교,신림2교,반포교,주암교,신길고가,주흥교고가,길음교,도봉제1교,보문3교,미아구름다리고가,북악스카이웨이3교고가,빨래골고가,동진교,용두4교,전농교,행주1교,행주2교,개봉교,가마산고가)

첨부2		내진 성능개선 추진 현황

□ 1992 : 도로교 표준시방서에 교량 내진설계 도입

- 내진설계기준을 도입하였으나 적용기준의 명시가 없어 설계 미적용

□ 1995 : 자연재해대책법에 지진방지대책 수립근거 마련

- 지진발생시 대규모 피해우려 시설물은 개별법에 정하도록 의무화

□ 1996 : 내진설계방법 제시로 내진설계 본격 적용

- 개정된 도로교표준시방서에 내진설계 방법 구체적 제시

□ 2000 : 도로교 내진설계 기준강화 (건설교통부)

- 기본 규정은 종전과 유사하나 지반운동의 가속도계수 상향 조정

□ 2002 : 도로시설물 내진대책 기본계획 학술용역 시행

- 1, 2종 시설물 178개 내진성능평가 결과 (내진성능 부족 42개)

□ 2009 ~ 2010 : 도로시설물 내진성능 평가용역 시행

- 소규모 법정외 등 193개 내진성능 평가결과 (내진성능 부족 80개)

□ 2014년 5월기준 내진보강 추진 실적(완료 23, 추진중 6)

- 122개 대상시설중 23개소 완료 : 1종 11개, 2종 11, 법정외 1개

구 분	계	2010년이전	2011	2012	2013
시설수	23	11	6	5	1
시설명		천호대교(1종) 반포대교(1종) 올림픽대교(1종) 사당고가(1종) 봉원고가(1종) 청담2교(1종) 탄천1고가(1종) 노량교(1종) 서호교(1종) 대치교(2종) 망원1교(2종)	탄천2고가(1종) 모래내고가(1종) 영동3교(2종) 반포대교북단(2종) 군자상단IC(2종) 군자하단IC(2종)	현저고가(2종) 신천1교(2종) 신천2교(2종) 수색교고가(2종) 잠두봉고가(법외)	광명고가(1종)

- 추진 중(6개) : 2014년 5개교 완료예정, 1개교 계속(홍제천고가)

※  금천교(1종), 두모교(1종), 도림천고가(1종), 안암2교(법외), 우면고가(법외), 홍제천고가(1종)

첨부3		중요노선상 내진성능 부족 시설물 현황

노 선 명		계	시 설 명			노선보강 완료년도
			1종	2종	법정외
계		63	12	16	35
도시고속도로		37	5	10	22
1	내부순환	1	홍제천고가			2016
2	서부간선	1		목동교동측IC		2015
3	동부간선	8	탄천2고가(`11)	월릉하단IC, 중랑상단IC, 동부간선진입램프 군자상단ic(`11), 군자하단ic(`11)	당현4교, 면목천교	2015
4	북부간선	2			신내1교, 신내2교	2015
5	강변북로	7	두모교, <서빙고고가>	반포대교북단교(`11)	잠두봉고가(`12),원효대교북단교, 새남터다리, 서빙고다리	2015
6	올림픽대로	11	염창IC	여의상류IC, 신천1교(`12), 신천2교(`12)	행주IC, 여의하류IC, 동작교, 반포대교통과교, 상행3교, 하행1교, 고덕천교	2016
7	경부간선	7			서초교, 서초1고가, 서초2고가, 서초3고가, 우면고가, 양재천교, 상촌고가	2016
주간선도로		26	6	6	13
1	도심순환도로					2013이전
2	시흥~중림선					2013이전
3	신림~진관내선					2013이전
4	갈현~적선선					2013이전
5	봉래~세종로선					2013이전
6	사당~서빙고선					2013이전
7	우면~중학선					2013이전
8	장지~가회선	1	한남1고가			2015
9	필동~도봉선	2			우이교, 도봉교	2016
10	양재~혜화선	2	<약수고가>	영동2교		2015
11	내곡~월곡선	1		영동3교(`11)		2013이전
12	장지~성수선					2013이전
13	세곡~상계선	3	영동6교	영동대교북단고가	면목교	2016
14	우면~수서선	1			수서IC	2015
15	방화~암사선	4		안양교	오류IC, 봉림교, 광복교	2016
16	신정~봉천선	3	신정교,도림천고가	도림교(관악)		2015
17	사당~암사선					2013이전
18	과해~삼성선					2013이전
19	양평~노고산선					2013이전
20	공덕~봉래선					2013이전
21	을지~둔촌선					2013이전
22	신월~신당선					2013이전
23	서린~상일선					2013이전
24	온수~망우선	2			충정교고가, 청량리제1고가	2016
25	신설~공릉선	1			안암2교	2014
26	가양~현저선	6	모래내고가(`11)	현저고가(`12), 수색교고가(`12)	증산교, 사천교, 연희IC	2016

기타노선 (1,2종)	4	1 (금천교)	3 (영동5교, 삼각지고가, 기아대교신교)	구분	2013이전 2014 2015 2016

※ 33개 중요노선 중 16개 노선 내진성능 확보(`14.5월 기준)