노들남북 고가차도 철거공사

대중교통 및 보행자 중심의 교통패러다임의 변화와 인근지역 교통체계불편 및 미관저해로 인한 인근 주민의 철거요구에 대한 민원 해결

□ 사업개요

○   위    치 : 동작구 본동 159

○   규    모 : 노들남고가(폭8m, 연장522m), 노들북고가(폭7.5m, 연장461m)

○   공사기간 : 2021. 09. 13. ~ 2022. 09. 12.

○   총사업비 : 14,337백만원('21년 예산 13,080백만원)

○   시 공 사 : 새천년종합건설(주)외 1개사, 감리사 : ㈜도화엔지니어링외 2개사

□ 추진상황(공정률 :   %)

○ '14.10.   . : 고가차도 관리계획 수립 용역 시행계획 수립

○ '19.04.   . : 기본 및 실시설계 용역 시행('20.09. 설계완료)

○ '20.05.21. : 공사중 교통대책 자문회의

○ '21.03.29.  : 서울지방경찰청 교통규제 심의 완료

○ '21.09.13.  : 공사 착공

□ 향후계획

○ '21.09~10. : 교차로 및 차로확보 공사 시행

○ '21.11. : 고가차도 철거

○ '22.07. : 공사완료

	위 치 도

	현 장 사 진

노들 남·북고가차도 전경
북 고가차도 전경	고가차도 시점부
남 고가차도 전경	고가차도 종점부