“ 내 삶의 든든한 이웃, 행복공동체 노원 ”
		노원구
수신	서울특별시장(소상공인지원과장)
(경유)
제목	상계중앙시장 시설현대화사업 사업변경 승인 요청(재보완)

1. 일자리경제과-11725(2014.2.28)호 및 18516(2014.4.2)와 관련입니다.

2. 2015년 전통시장 시설현대화사업 신청건 현장실태조사시 상계중앙시장 시설현대화사업 사업변경 보완요청 자료에 대하여 아래와 같이 재보완 제출합니다.

□ 사업 변경 내역

(단위 : 천원)

당초 사업계획						비고(사업비 증감 및 사유 등)
항 목	총사업비	국 비	시 비	구 비	민 자
설 계	40,672	24,403	8,541	3,661	4,067
전광판	97,000	58,200	20,370	8,730	9,700
CCTV	25,255	15,153	5,304	2,273	2,525
어닝	0	0	0	0	0
건축, 전기 등	831,815	499,089	174,681	74,863	83,182
보험료, 부가세, 감리비 등	331,924	199,155	69,704	29,873	33,192
합계	1,326,666	796,000	278,600	119,400	132,666
변경 후 사업계획						아케이드 길이 축소, 한쪽 방향 아케이들 길이 연장, 전광판 및 CCTV 제외, 어닝 추가
항 목	총사업비	국 비	시 비	구 비	민 자
설 계	68,048	40,829	14,290	6,124	6,805	설계 공모 실시
전광판	0	0	0	0	0	사업 제외
CCTV	0	0	0	0	0	사업 제외
어닝	18,970	11,382	3,984	1,707	1,897	상인들 및 상인회 요구사항(편개형 아케이드로 비나 눈이 점포로 들이침)
건축, 전기 등	907,724	544,634	190,622	81,696	90,772	·일부 사업구간 건축주 반대로 축소 (설치 길이 455m→396m) ·한쪽 방향 아케이드 길이연장(3→3.5m) ·상부 아케이드(지붕) 재료 불연성 재질로 교체
보험료, 부가세, 감리비 등	331,924	199,155	69,704	29,873	33,192
합계	1,326,666	796,000	278,600	119,400	132,666

※전광판 및 cctv 설비는 2012년 시설현대화사업내역에서 제외하고 2015년 상계중앙시장 시설현대화 추가 사업으로 신청하고자 함.

붙임  1. 국고보조금 신청서(2012년 시설현대화사업) 1부.

2. 국고보조금 신청서(사업변경 관련) 1부.  끝.

							노 원 구 청 장
★주무관										지역경제팀장										일자리경제과장
협조자
시행			일자리경제과-20004									(	2014.04.09.					)		접수			소상공인지원과-4851								(	2014.4.10.					)
우	139-703					서울특별시 노원구 노해로 437(상계동)															/			http://www.nowon.kr
전화		02)2116-3488						/전송			02)2116-4620					/	20090210727@nowon.go.kr												/	공개