노을연료전지 설치계획 협의결과

(2015.7.2. 10:00)

연번	연료전지 설치계획		서부공원녹지사업소 의견	협의의견 (녹색에너지과, 노을그린에너지)	조치의견
	단위 사업명	추진내용 및 기대효과
1	연료전지 발전시설 사업부지(안)	공원측 사업부지 경계 도시계획 변경결정(공원면적 증감 없는 선형변경)으로 확정 및 관리전환 추진 - 연료전지설비 배치 기초도면 참조	◦상세도면 작성시 관리전환 면적, 점용면적 등 추진(공원운영과 정원걸)	◦월드컵공원 도시계획 선형변경 완료후 관리전화 등의 세부진행 일정을 협의 할 예정임	◦월드컵공원 도시계획 변경결정(2015.7.16.예정)이며, 사업추진으로 인한 일시점용, 영구점용 면적 산출 후 관리전환 추진
2	난지창작스튜디오/수소스테이션 접근용 진입로 신설	난지창작센터/수소스테이션 차량운행 동선 노을공원과 분리 – 노을공원 주차장 입구 차량 혼잡도 개선	◦진입로 신설시 횡단조정을 위한 녹지대 훼손이 과다하므로 박영석 기념관 진출입로 사용, 기존 주차장 이용 등 다른 대안으로 검토를 요하며, ◦불가피 하게 신설진입로 개설시 저촉되는 배수시설(U형 배수로), 침출수 이송관로 등의 지장물에 대한 검토 필요하고, U턴차로 설치가 필요하므로 차선 및 교통시설물(교통안전시설 및 신호 등) 설치에 대한 전문가 검토가 필요함(토목시설팀장 오재영) ◦침출수 처리시설 이송관로 매설지점으로 진출입로 신설 불가(환경관리팀장 이재덕)	◦ 난지창작스튜디오 진입로 신설시 침출수 이송관로의 운영에 차질이 없도록 할 예정이나, 서부측 의견에 따라 박영석 기념관 진출입로, 기존주차장 이용 등 방안에 대해 검토 후 재협의하도록 하겠음	◦ 노을공원 부설주차장 진출입 및 혼잡도 개선 및 장래 개발계획에 대한 수용성 제고 등을 위해 난지창작 스튜디오 측으로 도로 신설 필요 ※ 기존 진출입 계단 설치 지역으로 침출수 처리 차질이 없도록 관로 이설 추진
3	노을공원 주차장 차량진출입 동선 개선	차량 진출입로 변경으로 맹꽁이 전기차와 일반차량 운행동선 개선으로 안전사고 등 예방	◦주차차량 진출입 주차관제를 기존시설 이설보다는 타 제품으로 교체 요함(기전시설팀장 이기석)	◦ 진입로 신설 문제와 함께 검토 후 재협의 하겠음	◦ 주차당 운영 동선 및 혼잡도 검토 후 재협의 추진
4	연료전지↔상암변전소 간 송전선로 시공방안	굴착공사로 인한 공원 중앙도로 혼잡도 완화 및 공원이용 시민 불편 최소화	◦산책로를 통해 송전선로 지중매설시 길이가 약 3.3km로 과다하여 공사시 공원 훼손 및 동식물 피해가 심각 할 것으로 판단, ◦난지천 지하 등을 경유하는 지향성 압입공법 적용구간내 침출수 차수벽 저촉 및 훼손우려가 있으니 지장물 등으로 시공성이 다소 불편하나 공원 훼손이 적은 중앙도로를 경유하고 도로포장을 하는 것이 적정 할 것으로 사료됨(토목시설팀장 오재영) ◦산책로를 통한 지중선로 경유시 침출수 이송관로가 지나가는 구역이므로 지장물 조사후 실시설계서 작성 사업계획 협의요함(환경관리팀장 이재덕)	◦ 산책로를 이용한 공사시 공원훼손, 동식물 피해가 없도록 공사방법 등을 세부사항을 협의하며 진행토록 하고, 산책로를 이용한 송전선로 설치와는 별개로 노후 중앙도로 재포장 방안을 추가검토 하겠으며, ◦ 송전선로 계획구간의 지장물 조사, 침출수 차수벽 저촉여부에 대한 세밀한 조사하고 검토를 받아 착공하겠음	◦ 보완대책 및 도로 재포장 일정 수립후 재협의 추진
5	노을공원 주차장 상부 옹벽디자인 개선	시립미술관 및 서부공원녹지사업소에서 추천한 공원, 공공미술전문가 참여(자문) 설계·시공	◦옹벽상부 방음벽 차폐 및 수목 식재로 소리를 2중으로 차폐할 수 있도록 설치계획 제1안 선택(벽화는 향후 미관저해 발생가능(기전시설팀장 이기석)	◦ 공원 미관이 저해되지 않도록 옹벽 디자인, 녹지조성(안) 공원, 디자인전문가 참여 추진	◦ 디자인(안) 수립후 재협의 예정
6	노을공원 주차장 상부 태양광설비 이전	세부시행 방안 서부공원녹지사업소 시설과 협의·시행	◦신설되는 옹벽에 태양광 집열판을 설치 할 경우 미관과 강풍에 취약하여 옹벽이 아닌 주차장 등 다른 장소에 전문가 검토의견이 제시된 설계(안)을 작성 협의 요함(기전시설팀장 이기석)	◦에너지관리공단의 국고보조사업 여부를 확인후 설비 이전 또는 발전사업 등 방향 설정 후 재협의	◦ 월드컵공원 랜드마크 1차 사업(2009.9월) 으로 전액 시비(836백만원) 조성시설로 재산관리관의 판단으로 상업운전 등 검토가능 하므로 설비이전(안) 재협의
7	예정사업부지 소재 매립가스 포집관로 이설	수소스테이션 매립가스 이송관로의 유지관리 및 상호 간섭 배제하기 위해 부지 경계로 이전설치	◦구체적인 도면 및 시공내용 등이 없어 세부검토 불가하며, 수소스테이션 운영과 관련되어 있으므로 대기관리과와 추가 협의 필요(환경보전팀장 이재덕)	◦수소스테이션 운영사항을 검토 이설방안 확정하겠음	◦관로이설은 일정기간 소요되나 최종연결 작업이 2~3시간 이내로 수소스테이션 운영에 문제가 없음
8	예정사업부지 소재 송전철탑 이설	경사면 최하단 위치로 이설하여 최대한 폐기물매립시설 훼손 방지 및 매립가스 누출 안전성 확보	◦ 송전철탑 이설예정지 시험굴착 안전성검토 용역보고서 미제출로 구체적인 방안 검토 불가(환경보전팀장 이재덕)	◦안전성 검토 용역보고서를 제출하고 세부절차를 협의하겠음(7월말예정)	◦2015.7월말경 실시설계(안)과 함께 시험굴착 결과 용역보고서 제출협의
9	연료전지 설치에 따른 전자파영향 검토	전자파 영향 관련 시험성적서 제출	◦의견 없음	-	-
10	연료전지 운영에 따른 소음방지	배경소음 측정 실시완료 공사 및 운영시 비교자료 활용, 방음시설 공원경관과 어울리도록 전문가 자문(협의) 설치예정	◦공원이용객(맹꽁이 차량 등) 피해 없도록 소음방지 대책 강구(기전시설팀장 이기석)	◦공원이용 시민들의 피해가 없도록 소음진동관리법을 준수할 수 있도록 하겠음	◦공원이용 시민들의 피해가 없도록 실시설계 도면 재협의
11	사업부지 소재 수목 및 미술작품 이전	시립미술관과 협의 지정장소로 이전 설치	◦미술작품 이설은 시립미술관과 협의 ◦수목 이설은 녹지팀과 세부 협의요함(토목시설팀장 오재영)	◦이설계획 수립시 녹지팀과 협의하여 진행 하겠음	◦세부 추진일정 수립과 함께 수목 이설문제 협의 추진
12	기타 검토항목	사업소 관리동 뒷편으로 배드민턴장(1면) 조성에 대한 의견	◦공원조성계획 변경 등이 필요하므로 내부 논의 후 재협의(기전시설팀장 이기석)	◦서부측에서 검토의견을 제시하면 관련내용을 검토후 재협의하도록 하겠음	◦서부공원녹지사업소 의견제출시 관련내용 검토후 재협의
13	기타 검토항목	상수도 관로 신설 자료 공유(노을공원 상부 수압 개선)	◦노을공원 상부의 수압이 낮아 신설되는 상수도관로 분기점, 상수도사업본부 협의자료 등 공유 요함(기전시설팀장 이기석)	◦신설 상수도 관로는 노을공원 분기 선로 후단에 위치하여 노을공원 수압에 영향이 없을 것으로 판단되나 상수도 신설 및 폐지사항과 관련한 자료를 함께 공유하여 협의하겠음	◦상수도 관로 신설 등과 관련하여 공원운영 효율화에 기여할 수 있도록 상수도 신설관계 자료를 공유하고 보완대책을 협의해 나가겠음