업무연락전
지시번호	SMIH-14-32349	연번(문서번호)	SMIH-14-32349
지시일자		작성일자	2014-07-17
지 시 자	이한규	처리기한
제 목	노출비탈면 강관네일링 수량변경(축소) 실정보고 승인
내 용
1. 선사고덕0420-425(2014.7.10.)호 및 토목부-13600(2014.7.15.)호와 관련임. 2. “선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사”의 노출비탈면(sta.1+440~1+600)흙깎기결과 비탈면하단 중앙부 일부에 암반이 노출되어 사면안정성 검토결과 비탈면안정공(가압식강관네일링, 수평배수공)을 삭제하여 안정 한 것으로 검토되어 수량변경(축소) 필요하여 실정보고 한 사항에 대하여 승인 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.
붙임 :

행정중심복합도시건설청

서울특별시 도시기반시설본부