붙임 2		노후 하수관로 정비사업 추진현황 및 점검양식

노후 하수관로 정밀조사(‘15~’18)에 따른 긴급대상구간 정비 계획

작성자 : 서울특별시 물재생계획과 7급 김민석(02-2133-3795)

1. 정밀조사 결과(‘15~’18)

구분	총 조사 물량(Km)	긴급보수 대상				비 고 (착수 및 준공)
		사업 물량(Km)	사업비(백만원)
			합계	국고	지방비
계	2,720	2,720	26,500		26,500
‘15년 조사	1,393	1,393	12,800		12,800	‘15.7~’17.9
‘16년 조사	344	344	2,500		2,500	‘16.8~’17.12
‘17년 조사	613	613	4,200		4,200	‘17.4~’18.6
‘18년 조사	370	370	7,000		7,000	‘18.6~’19.7

2. 사업 추진현황(‘16~’18) 및 계획

◯ 서울시 노후하수관로 정비사업(재원협의 완료 사업)

- 사업추진기간 : ‘16.3~ ’16.12.

구분	사업물량		총사업비(백만원)			사업 추진 현황	비 고 (공사착공월 기재)
	(긴급보수) (Km)	(일반보수) (Km)	계	국고	지방비
‘16년			31,500	31,500	00.0	- ‘16.12. : 국비 315억원 배정 ※ 명시이월

- 사업추진기간 : ‘17.3~ ’17.12.

구분	사업물량		총사업비(백만원)			사업 추진 현황	비 고 (공사착공월 기재)
	(긴급보수) (Km)	(일반보수) (Km)	계	국고 (이월예산)	지방비
‘17년	93	00.00	130,600	31,500	99,100	- ‘17.2~’17.12 : 공사 시행(공정률100%)	‘17.5

- 사업추진기간 : ‘18.3~ ’19.9.

구분	사업물량		총사업비(백만원)			사업 추진 현황	비 고 (공사착공월 기재)
	(긴급보수) (Km)	(일반보수) (Km)	계	국고	지방비
합계	80.5	00.00	120,639	23,900	96,739
‘18년	74	00.00	111,100	23,900	87,200	-‘18.3~’19.06:공사중(공정률87%)	‘18.5
‘19년	6.5	00.00	9,539		9,539	-‘19.3~’19.09:공사중(공정률7%)	‘19.3

3. ‘19년 이후 신규사업 추진 계획

◯ 서울시 노후하수관로 정비사업

- 사업추진기간 : ‘19.7~ ’20.12

구분	사업물량 (긴급보수) (Km)	총사업비(백만원)			사업 추진 현황	비 고 (공사착공월 기재)
		계	국고	지방비
합계	103.5	1,955,016	39,100	156,400
‘19년	82.5	1,545,618	39,100	115,461	- ‘19.7 : 4차 조사용역 준공 - ‘19.7 : 공사 발주 및 착공 ※ 공사기간 : ‘19.7~’20.12.	‘19.7
‘20년	21	409,398		40,939	- ’20.12 : 공사 완료	‘20.3

※  ‘19~’20년 사업 일괄 제원협의 신청(‘19년 7월)