붙임 2		노후 하수관로 정비사업 추진현황 및 점검양식

노후 하수관로 정비사업 추진현황 및 계획

(‘21.9.30현재, 서울시)

사업개요

구 분	세부 내용
사업명(착공~준공)	서울시 노후 하수관로 정비사업(2019~2021)
총사업비(백만원)	계: 200,022백만원 국고: 39,100백만원 지방비: 160,922백만원 - ‘19년 : 121,789(국비 31,328, 지방비 90,461) - ‘20년 : 78,233(국비 7,772, 지방비 70,461)
정비물량(km)	계: 101 물량: 101 기타:-
예산집행 현황	집행률: 89.8% (’21. 9월 기준) - ‘19년 : 예산현액 121,789백만원(국비 31,328, 지방비 90,461) 중 36,802백만원(국비 31,328, 지방비 5,474) 집행 - ‘20년 : 예산현액 150,228백만원(국비 7,772, 지방비 142,456) 중 139,589백만원 (국비 7,772, 지방비 131,817) 집행 - ‘21년 : 예산현액 7,460백만원 중 3,165백만원 집행(전액 지방비)
공사추진 현황	공정률: 99.7% 총사업물량 101km 중 100.7km 추진
사업담당자	서울시 물재생계획과 문예원주무관(☎ 02-2133-3795)

정비물량 및 총사업비 변경현황

구 분	정비물량		총사업비			비고
	긴급	일반	계	국고	지방비
정밀조사①시	101		195,500	39,100	156,400
정비대책② 수립 시	101		195,500	39,100	156,400
정비대책 이후③	101		195,500	39,100	156,400
예산편성 시	101		195,500	39,100	156,400
재원협의 시	101		200,022	39,100	160,922	2019.9.30.
사업계획 변경 등	-

(단위 : 백만원, km)

① ‘15~’16년 국비지원을 받은 정밀조사 결과에 따른 긴급대상구간 사업물량 및 사업비 기재

② ‘17.3월 ‘지반침하 대응 노후 하수관로 정비대책’ 에 따른 긴급대상구간 사업물량 및 사업비 기재

③ 정밀조사 용역 지연 등으로 인해 환경부 기보고 결과와 내용이 상이하거나,  타사업에 포함되어 정비물량 변경 또는 신규사업 발굴로 추가 된 사업물량 및 사업비 기재

예산집행 현황

연 도	계			국 고					지방비
	예산현액	집행	집행률	본 예산	예산현액	집행	이월	불용	본 예산	예산현액	집행	이월	불용
2019	121,789	36,802	30.2%	31,328	31,328	31,328	-	-	90,461	90,461	5,474	82,456	2,531
2020	150,228	139,589	92.9%	7,772	7,772	7,772	-	-	60,000	142,456	131,817	7,460	3,179
2021.9	7,460	3,165	42.4%	-	-	-	-	-	-	7,460	3,165	-	-

(단위 : 백만원)

공사추진 현황

단 계	기 간	현 황
설계	‘18.6.~’19.9.	4차 조사 및 설계용역
재원협의 등	‘19.6.~’19.9.	‘19.6.11 : 재원협의 신청(4차 조사 설계분) ‘19.9.30 : 재원협의 완료(총사업비 2,000억원, 국비 391억원)
공사	‘19.9.~’21.12.	착수량 : 101km(공사계약 물량) 공정률 : 99.7%(추진물량 100.7km/ 총 사업물량 101km)
준공(정산)	’21.12.	2021.12월 준공 및 정산

집행부진 사유 및 향후계획

○ 집행부진 사유 : 해당없음(작성대상 : 집행률 70%미만인 사업)

○ 월별 추진 실적 및 계획

구분	'21년 실적 및 계획
	추진 공정	예산집행(백만원)
		계	국고	지방비
계		7,460	-	7,460
‘21.3월	공사추진 96.0%	254	-	254
‘21.6월	공사추진 99%	2,501	-	2,501
‘21.9월	공사추진 99.7%	410	-	410
‘21.12월	- 공사추진 100% 및 정산	4,295	-	4,295