1. 2019년 노후 상수도관 정비공사 현황 보고

《동부수도사업소》

잔여 노후상수도관 조기 정비를 시행하여 최적의 관망 환경을 조성 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급코자 추진 사항을 보고 드림.

□ 사업개요

❍ 정비목표: 19.6㎞

구분 반기별	공사별	계		단위사업			연간단가
		연장(㎞)	사업비 (억원)	건수	연장(㎞)	사업비 (억원)	연장 (㎞)	사업비 (억원)
계		19.6	19,400	8	12.6	12,145	7.0	7,255
상반기	배급수관	10.3	9,600	6	8.6	7,745	1.7	1,855
하반기	배급수관	9.3	9,800	2	4.0	4,400	5.3	5,400

❍ 정비취약지역 내역

구 분	계	전통시장	도심상가	사유지	지장물	대규모단수 및 기타	관계기관 협의필요
지역(개소)	16	8	1	5	1	1	-
연장(㎞)	2.89	1.82	0.32	0.65	0.02	0.08	-

□ 추진실적

(2019. 9. 30. 기준)

구분	계			단위사업			연간단가
	목표 (㎞)	실적 (㎞)	공정율 (%)	목표 (㎞)	실적 (㎞)	공정율 (%)	목표 (㎞)	실적 (㎞)	공정율 (%)
	19.6	10.6	54.1	12.6	6.8	53.4	7.0	3.8	54.3
상반기	10.3	8.5	82.5	8.6	6.8	79.1	1.7	1.7	100
하반기	9.3	2.1	22.6	4.0	-	-	5.3	2.1	39.6

○ 세부 추진현황                                             (9.30.현재)

반기 구분	사업 구분	공 사 명	공사개요		실적		비고
			구경(㎜)	연장 (㎞)	구경 (㎜)	연장 (㎞)
총 계			80~ 300	19.6	80~ 300	10.66
상반기	소 계		80~ 300	10.3	80~ 300	8.56
	단위사업	중곡동104-5~구의동556-6외 9개소배급수관정비공사	150~200	1.58	150~200	1.58	시공완료
		옥수동100~204-1외8개소 배급수관정비공사	100~300	1.36	100~300	1.0
		제기동519번지일대외5개소 배급수관정비공사	150~200	1.30	150~200	0.96
		장안동95번지일대외8개소 배급수관정비공사	150~200	1.48	150~200	1.04
		회기동66-1~80-1번지외2개소 배급수관정비공사	150~300	1.38	150~300	1.01
		전농동295-5~259-7번지외1개소 배급수관정비공사	300	1.47	300	1.24
	연간 단가	연간단가계약공사	80~ 300	1.73	80~ 300	1.73	완료
하반기	소 계		80~ 300	9.3	80~ 300	2.1
	단위사업	자양동216번지외3개소 배급수관정비공사	150~300	2.00	150~300	-	횡단굴착중
		용두동 39번지외11개소 배급수관정비공사	100~300	2.08	100~300	-	횡단굴착중
	연간 단가	연간단가계약공사	80~ 300	5.22	80~ 300	2.1

❍ 정비취약지역 세부 정비실적

연번	위치	구경	연장	구분	처리결과	비고
	계
1	성동구 금호동4가 1109 ~ 1202	100	194	전통시장	-기존관이차도하수BOX옆에부설되어있고신설관부설공간이없음 -보도는타기관지장물이부설되어있는실정임 -성동구청(치수과)과추후(10월)합동조사예정
2	성동구 성수동 26-120 ~ 269-127	150	74	담장	빌라주민과 합동조사 및 추후(10월 초) 재협의 예정
3	광진구 자양동 625	300	763	전통시장	하반기추가발주단위사업으로정비예정 (자양동216-21외3개소배급수관정비공사시행중)
4	중랑구 중화동 307-69~307-68	80	44	사유지	정비완료
5	중랑구 중화동 304-40~304-10	80	60	사유지	작업지시중
6	중랑구 중화동 317-55~317-72	80	150	사유지	작업지시중
7	중랑구 면목동 473-1~461-24	150	80	전통시장	정비완료
8	중랑구 면목동 655-5~668-61	100	188	전통시장	시장 상인회 합동조사 및 추후(10월 초) 재협의 예정
9	묵동 243-28~244-92	150	16	지장물	-기존관이차도하수BOX를하월하고있으며,복개천으로부설공사없음 -중랑구청(치수과)과추후(10월)합동조사예정
10	묵동 186-5~143-8	150	27	사유지	사도구간으로 소유자와 수차례 협의하였으나 소유자가 반대로 공사가 어려운 사항임
11	제기동 635-17 ~ 제기동 585-5	100	151	전통시장	시장 상인회 합동조사 및 추후(10월 초) 재협의 예정
12	제기동 995-10 ~ 제기동 995	150	90	전통시장	하반기추가발주단위사업으로정비예정 (용두동 39번지외11개소 배급수관정비공사시행중)
13	제기동 1016 ~ 제기동 652-2	300	289	전통시장	시장 상인회 합동조사 및 추후(10월 초) 재협의 예정
14	제기동 892-71 ~ 제기동 892-71	80	66	전통시장	시장 상인회 합동조사 및 추후(10월 초) 재협의 예정
15	청량리동 235-4 ~ 청량리동 235-10	300	366	사유지	사도구간으로 소유자와 수차례 협의하였으나 소유자가 반대로 공사가 어려운 상태이며, 국가배상 진행중임
16	청량리동 268 ~ 청량리동 235-4	300	327	도심상가	청량리역 번화가로 야간공사 계획하였으나, 간선 도로로 새벽4시부터 버스 운행, 지장물 산재로 공사진행 불가

※ 정비취약지역 실적 부진사업에 대하여는 별도 도면 작성하여 부진사유 보고요망

□ 부진사유

❍ 상반기 사업

- 상반기 사업은 7~8월 무더위와 잦은 강우(31일), 태풍 및 9월 가을강우 등의 영향으로 실제 공사일수가 적어 추진이 부진하였으나, 작업팀 추가 편성 등을 통하여 10월 중 완료 예정임.

❍ 하반기 사업

- 하반기 사업은 정상 추진중임.

□ 향후 대책

○ 주기적 공정관리 및 작업팀 추가 편성 등 집중 정비를 통한 목표 달성

- 공정관리를 위한 주1회 대책회의 개최(사업소, 공단, 시공업체)

- 각 공사장별 스마트폰 소통 밴드(카톡)를 통한 상시 공정관리체계 구축

- 야간작업 실시와 작업반 추가 투입(1개팀 → 2개팀)으로 공정 단축

○ 공사 시행 수질사고 예방 시뮬레이션 시행

- 공사시행 전일 각 공사장별 단수 및 밸브 조절 사항 등을 과장, 담당자, 시공사 합동으로 시뮬레이션하여 수질사고 사전 예방

○ 단가계약 업체 적극 활용 추진

- 지역 급수공사 단가업체(6개 업체 : 광진1, 성동1, 동대문2, 중랑2)에 우선적으로 작업지시 하여 정비중임.

- 정비물량이 많은 지역은 기타 단가업체(4개 업체 : 시설물3, 누수복구1)를 적극 활용하여 정비

※ 효율적인 업무 추진을 위해 9월말 기준 단가업체별 추진 실적을 분석, 결과에 따라 10월부터 잔여 정비물량을 기타 단가업체 포함 적정 배분하여 작업지시 예정