문서번호	공원녹지정책과-4165
결재일자	2016.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	공원관리팀장	공원녹지정책과장	푸른도시국장

녹색 복지 센터 건립을 위한

기본 및 실시 설계 용역 추진계획

2016. 3.

푸 른 도 시 국

(공원녹지정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

녹색 복지 센터 건립을 위한

기본 및 실시 설계 용역 추진계획

녹색복지 실현을 위한 생애주기 별 테마숲 조성 사업을 시행하면서, 권역별 녹색복지 사업을 총괄하고 운영할 녹색복지센터 건립을 위한  기본 및 실시 설계 용역을 아래와 같이 추진하고자 함

1		추진 근거 및 필요성

□ 추진근거

❍ 녹색복지 기준 및 지표 수립 학술용역(2014)

❍ 행정 제2부시장 방침 제276호(’15. 8. 3)

□ 필 요 성

❍ 다양한 생애 주기별 테마 숲을 조성·운영 하면서 이를 통합적으로          관리하고 운영할 거점 마련

❍   숲을 통한 치유 뿐 아니라 각종 실내 치유(명상실 등)프로그램 등               실·내외 프로그램 연계 및 권역별 녹색복지사업에 대한 업무 총괄 필요

2		추 진 경 위

□ ’14. 2. 25 ~ 12. 21 :  녹색복지 기준 및 지표 수립 학술용역

❍ 녹색복지 개념, 기준 및 지표 개발, 구현방안 등

□ ’15. 8.  3. : 녹색복지 실현을 위한 생애 주기별  테마숲 사업계획 수립

□ ’15. 9. 11. : 녹색복지숲(녹색복지센터) 사업 대상지 선정

❍ 2016년 사업 추진을 위한 대상지 선정

- 노원구 불암산도시자연공원, 강동구 일자산도시자연공원

3		추 진 계 획

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 녹색복지센터 건립을 위한 기본 및 실시설계 용역

❍ 용역기간 : 2016. 4. ~ 12.

❍ 대 상 지

- 노원구 중계동 95-4번지 일대 1,000㎡       (불암산도시자연공원 내)

- 강동구 둔촌동 119번지 일대 2,500㎡     (일자산도시자연공원 내)

❍ 소요예산 : 216백만원

※ 예산과목 : 공원녹지정책과, 공원 녹지정책개발 및 만족도 개선

공원유지관리 및 이용활성화, 녹색복지센터 건립, 시설비

❍ 추진방법

- 용역기관 : 노원구, 강동구

- 계약방법 : 협상에 의한 계약

- 근   거 : 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제43조

► 설계의 전문성, 기술성, 창의성 등이 요구되어 단순히 입찰 가격으로만          낙찰자를 결정하기 어려우므로, 제안서 평가 방식으로 추진

- 참가자격

► 관련법에 의한 면허 소지자(건축, 전기 등)

· 엔지니어링산업 진흥법

· 건축사법

· 전력기술관리법

► 녹색복지 숲(치유의 숲 등)관련 프로그램 운영 실적이 있는 업체

(개인 또는 단체 포함)

※ 공동 수급(분담 이행 방식) 시행

□ 용역내용

❍ 생애주기 별 녹색 치유 총괄을 위한 건축계획 및 도입 프로그램 개발

- 공원 지형, 주변 환경과 어우러지는 건축 디자인, 소재 사용

►  각 대상지 지형, 식생, 주변 환경과 어우러지는 친환경 디자인 도입

►  녹색복지센터, 식생, 산책로 등 경관이 조화를 이루도록 계획

- 녹색복지센터의 역할 및 기능, 도입 프로그램 개발

►  권역별 녹색복지사업 거점으로의 역할을 위한 기능 · 공간 구상

►  대상지 생태 환경 및 공원 내 시설들을 연계한 다양한 실·내외 프로그램

도입 및 이와 관련한 공간 제공

►   보건소, 사회복지시설 등 지역 유관시설과 연계한 건강 측정, 상담 및 각종 치유

요법실 등 녹색 복지와 관련된 다양한 시설 도입

►  녹색복지 숲 이용자에 대한 자료 축적 및 정리 등 이용자 관리를 위한 공간

❍ 국·내외 유사시설의 사례 조사·분석

- 청태산 숲 치유센터, 산음 건강증진센터 등

❍ 우리시 공원 유형에 맞는 실시 설계 시행

- 친환경 건강 소재 사용 권장

- 입지적 요건, 환경요소를 충분히 활용할 수 있도록 설계

► 햇빛, 바람, 소리가 은은히 드나들 수 있는 구조

- 가능한 한 목재를 풍부하게 사용

- 남녀노소 누구나 이용하기 편리하도록 유니버셜 디자인

(Universal design) 적용 권장

► 화장실 등 편의시설은 적용 필수

□ 용역 추진 관련 분야별 MP(Master Planner) 지정

❍ 건축분야와 녹색 복지 등 프로그램 분야의 MP를 지정하여 기본 및        실시설계 전 과정 참여

- 건 축 분 야 : 우리시 도시공원위원회 또는 공공건축가 그룹 중에서 선정

- 녹색복지 분야 : 산림청 및 산림 치유 관련 대학 등 협의 후 선정

4		추 진 일 정

□ ’1 6. 3. ~  4.  : 설계 발주 및 사업 시행자 선정

□ ’1 6. 5. ~ 12.  : 용역 시행

사업 시행자 선정	➡	용 역 착 수 보 고	➡	용역 중간 보고 (1~2회)

최종 설계(안) 확정	➡	도시공원위원회 공유재산심의회	➡	최종 성과품 제출

5		행 정 사 항

□ 건축, 녹색 복지 분야 MP 선정 및 통보(공원녹지정책과)

❍ 분야별 위원회, 유관기관, 대학교와의 협의 등을 통해 선정

□ 용역 진행 전 과정과 관련 시와 긴밀한 협의 필요(자치구)

❍ 용역 전, 중, 후 지속적인 협의 및 보고 등으로 우리시 의견 반영

붙  임 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.