(가칭) 농업공화국 조성사업 개요

농업의 과거 현재 미래와 도농상생의 모든 것을 한곳에서 체험할 수  있는 서울농업의 상징적 복합공간 조성으로 도시농업의 가치 확산 도모

□ 사업개요

○ 사업기간: 2017.1.~2021.9월

○ 위치: 강서구 마곡동 727-164(편익용지)

○ 부지면적: 12,012㎡(약 3,640평)

○ 지역지구: 도시지역, 자연녹지지역

지구단위계획구역(마곡도시개발사업)

○ 건축규모: 지하1층∼지상3층

- 건축면적: 2,400㎡(연면적 9,810㎡)

- 건폐율:19.98%(기준 20%이하), 용적율: 48.37%(기준 50%이하)

○ 총 사업비: 892억원(부지매입비 417, 공사비 등 475)

□ 주요시설

구 분	면적(㎡)	시 설 내 용
합 계	9,810
지상 3층	1,310	농업도서관, 도시농부홀, 운영사무실, 로컬푸드 레스토랑, 카페테리아
지상 2층	2,100	농업박물관(상설), 농업갤러리(기획)
지상 1층	2,400	수직농장(아쿠아포닉스), 지역농특산물 홍보관, 토종씨앗은행 다목적 교육장, 실습장
지하 1층	4,000	농식품 스타트업 공간, 스튜디오, 오픈키친/카페, 주차장

※옥외(9,612㎡) : 중앙광장(지역농특산물 상설판매장, 농부의 시장), 옥외주차장,        체험농장(논·밭, 과수원, 꽃밭, 허브원 등), 2~3층 옥상텃밭 등

□ 향후 일정

○ 국제현상설계 제안공모 및 당선작 선정	2018.12.~2019.5.

○ 도시계획 용도변경(편익용지 ⇒ 공공용지)	2019.1.~6.

○ 시의회 공유재산 관리계획 승인	2019.3.~4.

○ 건축 기본설계, 2단계 투자심사, 실시설계	2019.5.~12.

○ 토지매입	2020.1.~5.

○ 착공, 건축공사, 전시공사	2020.1.~ 2021.6.

○ 개관	2021.9.

□ 위치도

□ 현황사진