휴일 및 야간연장작업 계획(`18.12.15토 ~ 18.12.21금)

사 업 명 : 하남선1-1공구(5호선 연장) 건설공사

2. 작업내용 및 근무자 명단

작업일	작업 시간	작업 구간	휴일 및 야간작업내용			관리자(근무자)
			주요작업내용	인원	장비
12월 15일(토)	주간	본선구간 개착구간 비개착구간	- 기존구조물 벽체 수직 E.D.C.S 절단 정거장 시점 지하1층 2스판 탑슬라브 철근조립 정거장 종점부 지하1층 5스판 버팀해체 환기구 #1 슬라브철근 및 거푸집설치 환기구 #2 덕트기초철근조립	직영:8명 철근공:26명 목수:28명 가시설:6명	카고:3대 살수차:1대	공사 공사 공사 공무 공사 공사 공무 안전	박원철 남용태 강민선 정재홍 김정삼 김태일 유호진 권현석	조기홍
	야간	본선1구간	E.D.C.S. 수직절단(토목) 및 인발 (01:30 ~ 04:00) 기존5호선 지장물이설(전기분야) (00:30 ~ 04:00)	기능공:12명 기능공:13명	BT비계 -	토목 -	장현준 김윤권	장희재 이채석
		비개착구간 개착구간	교통안전 시설물 점검, 양수기 가동 점검	직영:2명	-	공사	김정삼	-
12월 16일(일)	주간	본선구간 개착구간 비개착구간	현장 휴무	직영:2명	-	공무	정금환	-
	야간	본선구간 비개착구간 개착구간	교통안전 시설물 점검, 양수기 가동 점검	직영:2명	-	공무	정금환	-
12월 17일(월)	야간	본선1구간	교통안전 시설물 점검, 양수기 가동 점검(12월17일 ~ 12월21일) E.D.C.S. 수직절단(토목) 및 인발 (01:30 ~ 04:00) 기존5호선 지장물이설(전기분야) (00:30 ~ 04:00)	직영:2명 기능공:12명 기능공:13명	- BT비계 -	- 토목 -	- 장현준 김윤권	- 장희재 이채석
12월 18일(화)	야간	본선1구간	E.D.C.S. 수직절단(토목) 및 인발 (01:30 ~ 04:00) 기존5호선 지장물이설(전기분야) (00:30 ~ 04:00)	기능공:12명 기능공:13명	BT비계 -	토목 -	장현준 김윤권	장희재 이채석
12월 19일(수)	야간	본선1구간	E.D.C.S. 수직절단(토목) 및 인발 (01:30 ~ 04:00) 기존5호선 지장물이설(전기분야) (00:30 ~ 04:00)	기능공:12명 기능공:13명	BT비계 -	토목 -	장현준 김윤권	장희재 이채석
12월 20일(목)	야간	본선1구간	E.D.C.S. 수직절단(토목) 및 인발 (01:30 ~ 04:00) 기존5호선 지장물이설(전기분야) (00:30 ~ 04:00)	기능공:12명 기능공:13명	BT비계 -	토목 -	장현준 김윤권	장희재 이채석
12월 21일(금)	야간	본선1구간	E.D.C.S. 수직절단(토목) 및 인발 (01:30 ~ 04:00) 기존5호선 지장물이설(전기분야) (00:30 ~ 04:00)	기능공:12명 기능공:13명	BT비계 -	토목 -	장현준 김윤권	장희재 이채석