단 수 작 업 계 획 서

(하월곡동64-13~27-118호간외 3개소 배급수관정비공사)

2017. 06.

토네이도건설(주)

단 수 작 업 계 획

성북구 관내 돈암동 1-2 ~ 돈암동 2-1번지 일대 노후관 교체 작업위한 공사로서 단수로 인한

시민불편을 최소화하고 공사를 차질없이 시행하기 위하여 단수 계획을 수립

시행하고자 함.

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 하월곡동 64-13~27-118호간외 3개소 배급수관 정비공사

○ 공사개요 : D=200mm  L=450m

○ 시공회사 : 토네이도건설(주) 대표이사 방 경 임

□ 지역별 단수계획

연번	단 수 위 치	단수예정일	단수시간	단수세대	작업 일수	비고
1	돈암동 1-2 ~ 2-1	2017. 06. 13. ~ 2017. 06. 25.	09:30~16:30	약 110	14

□ 일일작업 계획

- 작업구간 단수관련

작업기간 : 2017년 06월 13일 ~ 2017년 06월 25일

09:00 ~ 09:30 공사착수 준비 - 안전시설 설치

09:30 ~ 16:30 단수, 단수구역외불출수 세대 확인 및 공사착수

16:30 ~ 17:00 통수, 통수후 불출수확인

17:00 ~ 18:00 안전시설 철거 및 청소상태 확인

□ 홍보계획

○ 단수안내 보도요청 및 홍보협조요청 (중부수도사업소)

○ 단수안내문 배포 및 부착(토네이도건설(주) 현장대리인)

- 단수지역에 안내문을 제작하여 공사2일전 1가구 1매씩 배포

- 벽보용 안내문을 통행이 많은 단수지역 골목입구 및 골목내에 부착

○ 홈페이지 단수안내 게재(중부수도사업소)

- 상수도사업본부 홈페이지 단수안내

○ 다량 급수처 단수안내(토네이도건설(주) 현장대리인)

- 병원, 학교, 주요기관 등은 직접 방문하여 단수안내문을 전달하고 사유를 설명

- 저수조 만수위 확보독려 및 절수 홍보

○ 민원발생이 많은 영업집 단수안내(토네이도건설(주) 현장대리인)

- 음식점, 다방 등 수돗물을 많이 사용하는 영업집은 직접 방문하여 단수안내문을 전달하고 사유를 설명

- 사용할 수돗물을 단수전에 미리 용기 등에 충분히 받아 사용토록 안내(아파트 상가)

○ 급수차지원(중부수도사업소)

- 단수지역 주민이 급수차 지원 요청시 증부수도사업소 보유 급수차로 수돗물 공급

- 단수지역 주민에게 공급할 수 있도록 수돗물 PET병 확보

□ 시공회사 및 감독 연락처

구 분	성 명	연 락 처
시 공 회 사	토네이도건설(주)	02-431-0704
현장대리인(현장소장)	이 길 중	*************
공 사 감 독	정 종 우	*************
발주청 담당	김 태 규	02-3146-2206

단 수 안 내

○ 단수 일시 : 2017년 06월 13일 ~ 2017년 06월 25일 (우천시 연기됩니다) ○ 공사기간 : 2017년 06월 13일 ~ 2017년 06월 25일 ( 단수시간 : 09시 30분 ~ 16시 30분 중2시간) ○ 단수지역 : 돈암동 1-2 ~ 돈암동 2-1번지 일대 ○ 단수이유 : 노후관 교체 공사 ▶ 비가 내리면 공사가 연기될 수 있으니 양해하여 주시기 바랍니다 ▶ 처음 수돗물을 사용하실 경우 약간의 녹물이 나올 수 있사오니 잠시 물을 흘려 보낸 후 사용하세요. 공사로 인하여 불편을 드려 대단히 죄송합니다
공사 문의	주간(담당자) : 3146-2206 야간(당직실) : 3146-2000	공 사 감 독 : 정종우 ************* 현 장 소 장 : 이길준 *************

중부수도사업소장