당산119안전센터 내진보강 추가공사 계획

- 청사근무환경개선을 위한 -

당산119안전센터 내진보강 공사로 인한 기존 시설물의 제거 및 마감을

위하여 추가공사를 실시하여 청사관리에 만전을 기하고자 함.

추진근거

市소방행정과-35350(2013.12.31.)호 『2014년도 세입․  세출 예산편성 결과 알림』

소방행정과-8113(2014.5.20.)호  「당산119안전센터 구조(내진)안전진단 용역 완수보고」

소방행정과-8999(2014.6.3.)호 「당산119안전센터 내진보강 공사 계약체결 보고」

현실태

기존 에어콘 · 도시가스 배관, 창고, 벽면 석재, 타일 등이 설치됨

벽체보강 “B” 부분 마감재를 제거하였으나 RC조가 아니라 벽돌조로 드러남

추진방향

기존 에어콘 · 도시가스 배관, 창고, 벽면 석재, 타일 등 제거 및 재시공

벽체보강 장소 “B”가 RC조가 아니라 벽돌조로 벽체보강 장소 “A”의 철판         두께 6㎜에서 10㎜로 변경 시공

변경 전	변경 후

보강계단 내부현황	보강계단 외부현황

소요예산 : 금11,000,000원(금일천일백만원)

계약방법 : 전자수의시담(조달청 G2B 이용)

공사개요

업체선정 : (주)건설진단보강기술원, 대표자 : 김대련 (☏02-564-3700)

공 사 비 : 금11,000,000원(금일천일백만원)

공사내용

- 기존 에어콘 이설 후 재시공

- 각종 배관(도시가스) 이설 후 재시공

- 가설창고 제거 및 재시공

- 기존 석재 제거 및 재시공 등

공사사유 : 내진보강 실시설계 생략으로 기존 시설물에 대한 제거 및 재시공                 금액이 빠진 견적금액으로 조달청(G2B이용)에 견적제출 공고하여                 업체를 선정 내진보강 공사를 진행 하였으며, 작업 중 벽체를                   보강할 “B”장소가 RC조가 아닌 벽돌조로 그에 따른 추가 공사                 를 실시하고자 함

예산과목

- 소방행정업무의과학화로고품질서비스제공/ 직무환경개선/ 소방관서보수

,보강공사/ 시설비(40101)

공사 예정표