연번	공사명(공구명)	공사개요	도급비 (억원)	착공일	준공 예정일	공사추진사항	공정(%)
소계	도시철도토목부	10개 공사장
1	916공구	L=1,1km(정거장 2개소)	1,526	2008-06-02	2016-03-01	□ 코엑스몰 연결출입구 H빔 매몰부 할석 및 미장, 방수 가시설 접속부 기존파일철거 및 보조파일 설치 띠장, 버팀보 철거 및 인양, 자재정리 □ 기타 보도정비 및 점검 지적사항 조치(928) 상수도 보수 및 보강작업	99
2	918공구	L=1.291km(정거장 1개소)	1,377	2010-02-19	2016-02-17	▶ 터널1구간 - 터널 인버트 철근조립 및 가공/운반 - 터널 인버트 콘크리트 타설 ▶ 개착1구간 - 9~10span 헌치 거푸집 설치 ▶ 931정거장 - 2,3span 상부슬래브 벽체 되메우기 정리 및 버팀목 설치 - 10span 지하1층 상부슬래브 멍에,장선,합판 거푸집 설치 - 12span 지하2층 중간슬래브 철근 조립 - 정화조 지하1층 벽체1단 거푸집 설치 - #3작업구 하부 가시설 자재 인양 ▶ 개착3구간 - 22span 이동통로 변경, 덕트 개구부 덮개 설치 - 23span 상부슬래브 철근 조립 - 24,25span 수직,수평 앵글 해체 - 25~27span 되메우기 정리 및 버팀목 설치 - 34span 시스템동바리 설치 ▶ 지중(동공)점검 - 공사구간 순찰, 육안점검	62
3	919공구	L=1.2km(정거장 2개소)	2,041	2009-12-31	2015-12-29	- 집수정 펌프 가동 상태점검 ▣ 931S1 환기구 - 지하 2층 중간슬래브 철근조립 및 동바리 보강 - 지하 2층 벽체 거푸집 보강 ▣ 932정거장 - 시점(931S2E2) 4단 사버팀보, 2단 횡버팀보 설치 - 지하 1층 기둥 거푸집 해체(4Span) - 지하 1층 토사피트, 면벽 콘크리트 타설(5, 6Span) - 구조물 매몰부 면정리 및 면벽 거푸집 설치(7Span) - #2 연결통로 1, 2단 사버팀보 해체(8Span) - 중앙파일 절단(11Span) - #1, 2 출입구 토류판 설치 및 어스앵카 띠장, ㄷ-형강 설치 - #3, 4 출입구 2단 버팀보 보강재 설치, 계단설치 ▣ 933정거장 - 지하 3층 보호벽 거푸집 설치 및 콘크리트 타설(3Span) - 지하 1층 상부슬래브 양생(5Span) - 지하 1층 기둥 콘크리트 타설 및 154kV 깨기, 매달기(7Span) - 지하 1층 슬래브 동바리 설치 및 상수도관 매달기(7Span) - 지하 1층 상부슬래브 철근조립 및 동바리, 거푸집 설치(9Span) - 지하 1층 중간파일 해체(9Span) - 지하 1층 슬래브 동바리 해체(10Span) - #1, 2 출입구 어스앵커 띠장 설치 및 사버팀보 설치 - #5, 6 출입구 주형받침보 보강, 기존구조물 깨기, 도시가스 매달기 - #5, 6 출입구 어스앵커 천공 ▣ 쉴드터널 - 갱내 발판, 레일 및 레일슬리퍼 제거 - 커터헤드 육성보강 및 커터씰 반출	41
4	920공구	L=1.39km(정거장 1개소)	1,532	2009-12-31	2015-12-29	[1환기구] -보호벽 거푸집 조립 -중앙파일 방수철판 용접 [쉴드 TBM 구간-BOX1] -1구간 인버트 철근 가공 및 조립 -1구간 수전설비 해체 및 이동 -2구간 쉴드TBM 조립 [BOX1~2환기구] -보호벽 거푸집 해체 및 정리(1-2span) -BOX1 기초 철근 이동 및 조립(3span) [934정거장~BOX2구간] -정거장 바닥 면정리 및 시트방수(1span) -정거장 1단 벽체 거푸집 조립(3span) -정거장 보조파일 제작(7-9span) -정거장 출입구 지장물 조사 및 복구(1,2번) -3환기구 내부벽체 거푸집 조립(1span) -BOX2 보호벽 거푸집 해체(1~3span)	55
5	921공구	L=1.74km((정거장 2개소)	1,707	2009-12-31	2015-12-29	(935 정거장) ■ 본선 및 정거장 공사 - 동바리 해체 작업(1~2스판) - 상부슬라브 방수 면정리 작업(3스판) - 중앙파일 및 ㄷ-형강 해체작업(6스판) - 지역난방관 받침 기둥 철근 조립 작업(5스판) (936 정거장) ■ 본체구조물 - 지하2층 슬라브 철근 및 거푸집 설치(3스판) - 지하1층 가시설 버팀보 해체 작업(4스판) - 벽체 거푸집 설치 작업(자전거주차장) - 벽체거푸집 해체 작업(연결통로) ■ 환승통로 - NTR 강관압입 및 굴진 ■ NATM터널 - 상행선 (보도헌치 콘크리트 타설작업) - 하행선 (라이닝 폼 조립작업) (쉴드터널) ■ 쉴드발진부(본선) - 쉴드터널 굴진 및 세그먼트 조립 - 침목 및 레일 설치작업	52
6	922공구	L=1.47km(정거장 1개소)	1,317	2010-09-16	2016-03-17	■ 936S2E2 - 지하2층 1단벽체 거푸집 해체 ■ 937정거장 - 1SPAN 중간슬라브 동바리 설치 - 3~4SPAN 측벽 5단 띠장해체(상선) - 3~4SPAN 지하1층 1단벽체 되메우기(하선) - 5SPAN 지하1층 1단벽체 거푸집 설치 - 6SPAN 지하1층 대합실 기초 거푸집 해체 - 9SPAN 중간슬라브 및 마감벽 동바리 보강 - 9SPAN 중간슬라브 철근조립 ■ 937S1E1 - 작업사항 없음 ■ 본선 집수정 - 작업사항 없음 ■ 본선 1터널 1.상선 - 인버트 철근가공 및 조립(17~20span) - 보도헌치 거푸집 설치(9~16span) 2.하선 - 라이닝폼 이동 ■ 본선 2터널 1.상선 - 영구갱문 철근조립 2.하선 - 현장정리 ■ 본선 3터널 1.상선 - 라이닝 콘크리트 타설(37span) 2. 하선 - 라이닝 콘크리트 타설(42span)	62
7	923공구	L=1.7km(정거장 1개소)	982	2010-09-20	2016-03-21	□ 본선터널 1. 현장정비 □ 본선1구간(937S2) 1. 1span 중간슬라브 철근조립(40k 210~232) 2. 17~18span 상부되메우기(40k 498~516) 3. 21~22span 4단 버팀보 해체(40k 564~597) 4. 23~24span 측벽 채움콘크리트 타설(40k 597~633) 5. 26span 기둥 및 상부슬라브 내벽 거푸집 설치(40k 651~670) □ 938 정거장(937E2, 938E1) 1. 27span 5단 버팀보 해체(40k 670~696) 2. 28span 중간슬라브 철근조립(40k 696~714) 3. 31span 상부슬라브 동바리 설치(40k 752~769) / 4. 34~35span 지하2층 2단벽체 방수(40k 805~837) 5. 37~38span 지하1층 1단벽체 방수(40k 857~890) / 6. 39span 상부슬라브 철근조립(40k 890~907) 7. 39span 상부슬라브 동바리 보강 및 2단벽체 거푸집 설치(40k 890~907) / 8. 환기덕트#3 슬라브 철근조립 □ 본선2구간(938S1) 1. 종점부 연장구간 주형보 및 복공판 설치 2. 복구#5(41k 195~285) 차선도색 및 가드휀스 설치	60
8	우이~신설 궤도공사	L=23.4km(정거장 1개소)	198	2009-09-15	2016-11-30	[1공구 차량기지~L03정거장종점] - 0km145.3~1k763.0 L=1km908.3 - * 전회콘크리트 타설 완료구간 가설재 해체 및 양생 * 현장콘크리트 타설준비(07/22.수) sco 분기기 및 인상선 선형정정,배수로 설치,콘크리트 타설전 검측 * 차회 현장콘크리트 타설준비(7/29.수) 건넘선 2조 침목배열 및 궤광조립 * L01정거장 #8 건넘 침목 및 레일 배열 [2공구 L03정거장종점~L07정거장종점] - 1km763.0~4km995.8 L=3km232.8 - * 콘크리트 타설구간 양생 및 가설재 이동 * 현장 콘크리트 타설 1k601~2k901 L=490m 상선 L03정거장~L03환기구(07/21.화) 현장 콘크리트 타설 07:00~ 남동 레미콘 수직관 위치 L03정거장 예정67대 * L04정거장~L04환기구 상선(07/28.화) 체결구 및 가설재 배열,조립,1차 LEVEL 정정 [3공구 구간 L07정거장종점~L10정거장종점] - 4km995.8~8km167.5 L=3km171.7 - * L05~L07정거장 장대레일 운반 [4공구 구간 L10정거장종점~과업종점] - 8km167.5~11km262.23 L=3km094.73 - * 현장 콘크리트 타설 완료 -작업 없음	57
9	하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사	L=628m(정거장 1개소)	111	2015-03-17	2019-03-28	-
10	하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사	L=471m(환기구1개소)	386	2015-03-30	2018-07-10	-

‘15년 하반기 외국인 근로자 현장방문 안전교육 대상공사장