건의사항	서울시 의견
공기연장에 따른 간접비 지급 기반 구축 ◦ 기청구된 간접비가 조기 지급될 수 있도록 서울시에 협조 요청	◦ 건설공사 계약 시 공사 지연사유에 대한 책임소재를 명확하게 하여 시공사가 부당한 부담을 받는 일이 없도록 하고, ◦ 또한, 관련 부서와 긴밀한 협의 등을 통해 지급이 확정된 간접비가 조기 집행될 수 있게 적정 필요예산을 확보할 수 있도록 노력하겠음 ◦ 앞으로도 기본 및 실시설계를 내실화 하여 부적정한 공사기간 산정 방지를 통하여 간접비 발생을 최소화 할 수 있도록 하겠음