문서번호	시설보수과-1485
결재일자	2014.2.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설보수과장
협조

도로시설물 일상유지보수공사(1종터널 및 복개)

설계변경(정산) 검토 보고서

2014. 2.

서부도로사업소

(시설보수과)

도로시설물 일상유지보수공사(1종터널 및 복개)

설계변경(정산) 검토 보고서

『2013년 도로시설물 일상유지보수공사(1종터널 및 복개)』관련 작업지시에 따른 시공물량 증·감 내역을 반영하여 아래와 같이 설계변경(정산) 시행코자 함.

□ 공사현황

❍ 공 사 명 : 2013년 도로시설물 일상유지보수공사(1종 터널 및 복개)

❍ 공사기간 : 2013. 4. 19 ~ 2014. 2. 28.

❍ 공사개요 : 단면복구 2,837㎡, 아스콘포장 89.4a, 균열보수 177m

신축이음장치 보수 284m, 물끊기공 1,764m 등

❍ 총공사비 : 1,898백만원(도급비 1,681, 관급비 187, 이설비 30)

❍ 도 급 자 : ㈜신우시스템 대표 유선경

□ 설계변경(정산) 내역

구 분	당 초	변 경	증․감액
총 공 사 비	1,898,298,920	1,888,728,920	감)9,570,000
도 급 비	1,681,570,000	1,672,000,000	감)9,570,000
관 급 비	186,728,920	186,728,920	-
이 전 비	30,000,000	30,000,000	-

□ 주요 설계변경 내용

❍ 단면보수 : 2,857㎡ → 2,837㎡ (감 20㎡)

❍ 군열보수 : 223m → 177m (감 46m)

❍ 물끊기공 : 546m → 1,764m (증 1,218m)

❍ 신축이음장치보수 : 364m → 284m (감 80m)

※ 세부내역 붙임 참조

□ 변경사유

❍ 작업지시에 따른 물량 증·감

- 시설물현장관리제(정기점검, 정밀안전진단, 정밀점검, 겨울철대비 특별점검 등) 지적사항 및 민원사항에 따른 작업지시로 인한 물량 증․감

❍ 긴급사항에 따른 신규공종 발생

- 서울역고가 안전관리 추진방안에 의한 추가 작업, 분신사건 관련 경찰서 요청사항(점검통로 진입방지) 및 금화터널 교통사고(사망사고) 후속조치에 따른 신규공종 발생 등

□ 보고자 의견

❍ 상기 보고내용과 같이 시공물량 증·감 내역을 반영하여 설계변경(정산) 계약 후 준공 처리코자 함.

붙  임 : 1. 설계변경(정산) 내역서 1부.

2. 공종별 물량 증·감표 1부.

3. 제비율 검증표 1부.

4. 일상유지보수(1종터널 및 복개) 차수별 작업내역 1부.  끝.