□ C등급 이하 시설물 조치계획

(단위 : 개소)

구 분	계	‘13년 보수중	'14년	철거예정
계	19	13	4	2
C등급	17	12	4	1
D등급	2	1		1
비 고			동호대교, 안암2교 청량리1고가 장안교(구교)	아현고가 서울역고가

연번	시설명	종별	준공 년도	안전등급	판정사유	조치 계획	사업소
1	성산대교	1종	'80	C급 ('12년 안전진단)	-바닥판 하면 균열 및 백태	- '13년 보수완료 (2,145백만원) ․'13.9 ~ 12월 - 성능개선공사를 위한 기본 및 실시설계 용역중이며, ‘15년 교량상부교채공사 발주예정	강서
2	동호대교	1종	'84	C급 ('13년 안전진단)	- 램프 바닥판 하면 균열 및 백태	- '14년 보수예정 (1,000백만원)	성동
3	홍제2교	법정외	'70	C급 ('11년 안전진단)	-바닥판하면 박락, 백태 -교면포장 및 방수불량	- '12년 보수완료 (500백만원) - '13년 보수완료 (500백만원) ․'13.5.29~'13.11.24	서부
4	안암2교	법정외	'65	C급 ('10,’12년 정밀점검)	-바닥판하면, 거더, 가로보 철근노출	- '14년 보수예정 (1,000백만원)	북부
5	중랑교	2종	'71	C급 ('11년 안전진단)	-바닥슬래브 열화 및 강도저하 -교좌장치 가동불량	- '13년 보수중 (1,040백만원) ․총사업비 3,276백만원 ․'13.5.2~ '14.3.19	성동
6	여의2교	2종	'90	C급 ('10년 정밀점검)	-바닥판 및 거더부 균열발생	- '12년 보수완료 (300백만원) ․'12.4.30~'12.12.30 - '13년 보수중 (일상유지보수 140백만원) - '14년 보수예정(1,000백만원)	강서
7	안양교	2종	'77	C급 ('07년 안전진단)	-바닥판노후로 인한 균열 및 백태	- 안양교 확장공사 실시설계용역 중으로 확장 공사전 시급한 구간 일상유지 보수완료 (50백만원) - 안양교 확장(전면교체)공사 '14 하반기중 발주예정(도시기반시설본부)	강서
8	응봉교	1종	'79	C급 ('08년 정밀점검)	- 교량에 대한 전면 재보수 및 보강 시행 필요	- 확장공사중 ('08.10~'14.12) 총공사비 : 785억원	토목부
9	장안교 (구교)	2종	‘71	C급 (‘12년 안전진단)	장안교 성능개선필요	실시설계중 용마터널 준공시기에 맞춰 성능개선	성동
10	아현고가	1종	'69	C급 ('11년 안전진단)	-교대 단면보수부 박리 -재료분리 및 백태	- '13년 철거예정 (5,000백만원)	서부
11	수락고가	2종	'94	C급 ('10,’12년 정밀점검)	-바닥판상면 열화,포장균열 -신축이음장치 누수	- '13년 보수중(2,500백만원) ․'13.10.23~'14.2.16	북부
12	이문고가	2종	'79	C급 (‘11년 안전진단)	-바닥슬래브 열화 및 강도저하 -거더 종균열	- '13년 보수중 (2,400백만원) ․총사업비 4,720백만원 ․'13.3.20~'14.3.19	성동
13	청량리 제1고가	법정외	'67	C급 ('11년 진단 ‘13년 정밀)	-교좌장치 가동불량 -거더 단부 파손	- '14년 보수예정 (1,260백만원) ※'11년 정밀점검 결과 : 성능개선필요	성동
14	가리봉철도 고가	2종	'77	C급 ('11년 정밀점검)	-바닥판노후로 인한 균열 및 백태	- '13년 보수중(일상유지보수 180백만원) - '14년 보수예정(350백만원)	강서
15	개봉 고가차도	2종	'77	C급 ('11년 정밀점검)	-바닥판노후로 인한 균열 및 백태	- '12년 철도구간 보수완료 (868백만원) - '13년 보수중 (900백만원) ․'13.8.22~12.31(‘14.4.25.연기중) - '14년 보수예정(1,500백만원)	강서
16	대방 지하차도	2종	'76	C급 (‘11년 안전진단)	-박스 슬라브하부 누수 및 백태 -포장부 노후화 및 불량	- '12.4월 슬라브하부 누수 보수완료 - '13.7월 포장 정비완료(160백만원) ※ '13년 정밀점검 결과 : C등급 ‘14년 일상유지보수 실시	남부
17	홍제천복개 1-5	2종	'91	C급 ('12년 정밀점검)	-슬라브하면 백태 및 균열	- '13년 보수중 (624백만원) ․'13.4.8~'14.2.28	서부
18	염천교	법정외	'78	D급 ('11년 안전진단)	-Steel Box Girder 부식에 의한 단면감소	- '13년 보수중 (1,555백만원) ․'13.8.13~'14.6.12	서부
19	서울역고가	1종	'70	D급 ('11년 안전진단)	-받침장치 부식 -강재부식 및 도장 들뜸	- 중차량 통행제한조치 ․'02.12 : 통과차량 (중차량13톤, 높이:3m이상) 통행제한 ․'07.12 : 중차량(노선버스포함) 통행제한 - '13년 보수 중(280백만원) ․'13.4.8~'14.2.28	서부

※ 연도별 안전등급 현황 : 15개소('10) → 27개소('11) → 23개소('12) → 24개소('13)

→ 19개소('14)

※ 안전등급 산정기준(안전점검 및 정밀안전진단 세부지침, '10.12)이 경간별 평균등급

에서 최저등급으로 변경되어 C, D등급 시설물 증가('10년 15개 ⇒ '11년 27개)

□ 안전등급 변경현황(‘13년)

연번	시설명	종별	준공 년도	안전등급	판정사유	조치 계획	사업소
1	영동3교	2종	'86	C급 ('11년 안전진단)	-상하 슬라브 이격	- '12년 보수완료 (420백만원) ․'11.12~'12.5 ※ '13년 안전진단 결과 : B등급	동부
2	성내교	2종	'72 ‘80	C급 ('11년 정밀점검)	-교면포장부의 망상균열 발생 -슬래브 상ㆍ하면 열화 및 백태	- '13.10~12월 보수완료(800백만원) ※ '13년 정밀점검 결과 : B등급	동부
3	홍제교	법정외	'80	C급 ('11년 정밀점검)	-교면포장 및 방수불량 -신축이음장치 파손	- '12년 보수완료 (일상유지보수 235백만원) ※'13년 정밀점검 중 (B등급)	서부
4	봉원 고가	2종	'79	C급 ('11년 정밀점검)	-바닥판 하면 균열 및 누수 -포장 및 방수불량	- '12년 보수완료 (일상유지보수 235백만원) ※'13년 안전진단 중 (B등급)	서부
5	구로 고가 차도	2종	'77	C급 ('11년 정밀점검)	-바닥판노후로 인한 균열 및 백태	- '12년 보수완료 (700백만원) ․'12.6.1~'12.12.27 ※ '13년 정밀점검 결과 : B등급	강서

※ 월곡천1복개 : B등급 → A등급