도로점용공사장 교통소통대책 13차  회의록

2012.  7

도시교통본부

(교통운영과)

｢도로점용공사장 교통소통대책 13차｣ 회의록

	<회의개요>
□ 일 시 : 2012. 8.9(목) 15:00~18:00 □ 장 소 : 13층 소회의실 1 □ 참 석 - 마국준 위원, 임병현 위원, 강동수 위원, 권재근 위원, 박준 위원, 박상섭 위원, 신치현 위원, 오은미 위원, 윤미례 위원 □ 안 건(8건) - 한강초교앞 보도육교 재설치공사 - 면목역~중랑문화원간 배수관정비공사 - 수도권 고속철도(수서~평택) 제1-2공구 노반시설 기타공사 - 잠실길 지하도로 조성공사 - 현석2구역 정비기반시설 설치 공사 - 상계10동 666-3~670간 하수도 정비공사 - 홍제동 무악청구아파트입구앞~서소문사거리간 송배수관 정비공사 - 신월동36-1~250-44간 송배수관정비공사 □ 심의결과 - 원안가결 1건, 조건부 시행 5건, 재심의 2건

□ 위원 발언 내용(한강초교앞 보도육교 재설치공사 : 조건부 시행)

<000 위원>

○  1, 2단계 횡단면도 차로수 수정 및 교통량 재확인하여 보완바람

<000 위원>

○ 일반차량 및 버스의 교통량 데이터를 이용하여 공사시간, 동시공사 방안 등을 통해 공사기간을 줄이는 방안을 검토하기 바람(야간공사 1시~4시)

<000 위원>

○ 마지막 차로를 조정하여 우회전 차량이 이용 가능하도록 방안을 검토하기 바람

□ 위원 발언 내용(면목역~중랑문화원간 배수관정비공사 : 조건부 시행)

<000 위원>

○ 도면에 신호운영을 표시하기 바라며, 통제수는 모범운전자를 배치하기 바람

<000 위원>

○ 8작업구에서 진입무 taper는 완만하게 처리하고, 진출부 taper는 적게하는 방안을 검토 바람

<000 위원>

○ 교대 통행시 간이 신호등을 추가하는 방안을 검토하기 바람

<000 위원>

○ 공정표는 4page을 기준을 재작성하기 바라며, 공정을 줄이는 방안을 검토하기 바람(180일 → 120일)

<000 위원>

○ 16분기구에서 1일 공사는 임시차로보다는 1개차로를 점유하는 것이 안전에 바람직함으로 검토바람(대항차로가 2개차로임으로 라바콘 설치)

<000 위원>

○안내표지판을 설치하여 우회도로를 이용할수 있는 방안을 검토하기 바람

<000 위원>

○14작업구 교차로의 신호운영 방안에 대해 검토 바람

<000 위원>

○14작업구 위치 변경 검토(교차로에서 최대한 이격시켜 공사 바람)

□ 위원 발언 내용(수도권 고속철도(수서~평택) 제1-2공구 노반시설 기타공사 : 조건부 시행)

<000 위원>

○ 공사시간을 24시간으로 하여 공사기간을 단축하는 방안을 검토 바람

<000 위원>

○ 노선도를 포함하기 바람

<000 위원>

○ 좌회전차로 분기 시작전에 안전시설 보완하기 바람

□ 위원 발언 내용(잠실길 지하도로 조성공사 : 재심의)

<000 위원>

○ 주변에 공사가 많은 관계로 다른 공사와 연계하여 종합적으로 교통처리계획을 수립하고 의견을 수렴하기 바람

<000 위원>

○ 2, 4단계 복공판 시종점부의 완화 곡선 처리가 필요함

<000 위원>

○ 광역버스 및 통학용 버스의 주차에 대한 방안 검토

□ 위원 발언 내용(현석2구역 정비기반시설 설치 공사 : 조건부시행)

<000 위원>

○버스 정류소 이전에 대한 사항을 구청 및 버스관리과와 협의하기 바람

<000 위원>

○통제수는 모범운전자를 배치하기 바람

□ 위원 발언 내용(상계10동 666-3~670간 하수도 정비공사 : 원안가결)

<000 위원>

○2-4단계에서 안전을 위해 2안으로 하기 바람

<000 위원>

○3-11단계에서 주간공사를 포함하여 공사기간을 단축하기 바람

□ 위원 발언 내용(홍제동 무악청구아파트입구앞 ~ 서소문사거리간 송배수관 정비공사 : 재심의)

<000 위원>

○ 중앙버스전용차로는 23시부터 점용이 불가능함으로 버스 교통량 및 일반차량 교통량을 재조사하기 바람

<000 위원>

○ 재조사된 자료를 바탕으로 적절한 공사시간 및 공사기간에 대해 분석하여 제시하기 바람

<000 위원>

○ 작업구 길이 조절에 대하여 검토 바람

<000 위원>

○ 중앙버스전용차로 점용에 대한 버스운영계획 수립 바람

□ 위원 발언 내용(신월동36-1~250-44간 송배수관정비공사 : 조건부시행)

<000 위원>

○ 작업구 구간이 짧은 구간에 대해 길이 검토 바람

<000 위원>

○ 작업구가 맨홀이 있는 부분은 통합하여 공사하는 방안 검토 바람

<000 위원>

○ 분기구가 있는 곳에 작업구를 만드는 방안 검토바람