<서식 1>

도봉노인종합복지관 기능보강사업(증축) 계획서

□ 사 업 명 : 시립도봉노인종합복지관 증축

□ 추진목적

○ 도봉노인종합복지관은 2000년 10월에 개관하여 일평균 1,200명의 어르신이 복지관을 이용하는 기관으로, 지역의 특성상 장기이용회원이 많고, 5시간 이상 상주하여 이용하는 회원수가 많아 1일 이용인원 대비 공간의 협소문제가 지속적으로 제기되고 있음

○ 이를 보완하기 위하여 2010년 10월부터 복지관 인근 상가건물을 임대하여 별관을 운영중(연면적 202.77㎡, 계약당시 보증금 4억)

- 임대료 상승으로 보증금 4억에 월세 80만원 구비로 부담

- 매월 70만원 정도의 별관 관리비에 대한 지출부담

- 지속적 임대료 상승에 따른 도봉구의회의 효율성 문제 제기

- 별관(체력단련실) 이용어르신의 민원 및 안전사고 대처 부담

○ 위와 같이 시설의 운영 및 어르신 관리의 효율성을 높이기 위하여 증축이 매우 필요한 상황임

□ 사업개요

○ 추진기간 : 2016년 1월 ~ 10월(실공사기간 7개월)

○ 사업내용(위치, 면적 등)

- 위 치 : 서울특별시 도봉구 도당로2길 12-13(쌍문동)

- 규 모 : 지상 2층(501.56㎡)

- 증축방법 : 지하 다목적실 위쪽 수직 증축(現 게이트볼장 사용)

○ 사 업 비 : 1,402백만원

□ 추진계획

○ 연차별 사업비

(단위 : 백만원)

총 사업비	2015년	2016년	2017년	2018년
1,402	-	1,402	-	-

○ 당해연도 추진일정 및 사업비

추진내용 (단위 : 백만원)	1/4	2/4	3/4	4/4
공사비(건축,설비,전기,통신)		1,154
용역비(설계, 감리 등)+부대비	244	4
총 사 업 비	244	1,158

□ 기대효과

○ 시설편의 증진 및 이용자 만족도 향상을 통한 고령친화적 환경구축

○ 전문적이고 다양한 노인적합 프로그램 운영으로 노인종합복지관의 기능강화

○ 생산적이고 건강한 노후생활 지원을 위한 개인 및 집단 맞춤형 서비스 강화

<서식 2>

재산매입,신․증축 검토 의뢰서

1. 사업의 구분

사업구분	☑ 시 사업 □ 자치구 지원사업 □ 특별교부금 사업
신규 및 연차사업구분	☑ 신규사업 □ 연차사업
사업비 구분	☑ 사업비 100억원 미만 □ 사업비 100억원 이상 □ 사업비 500억원이상 □ 사업비 1,000억원이상

2. 사업개요

사 업 명	도봉노인종합복지관 기능보강사업	사업기관(부서)
사업기간(개월)	2016.1 ~ 2016. 10(10개월)	총사업비(천원)	1,402,132
사업목적	❍사업취지 : 기관운영의 효율성 증대 및 공간부족 문제의 해결 ❍필 요 성 : 구비로 운영되는 별관 시설운영의 어려움 발생 및 어르신 안전사고 대처 문제 등에 따른 효율적인 관리 운영의 필요성 제기. 공간부족에 따른 이용자들의 지속적인 민원 및 프로그램 운영의 한계 발생 ❍기대효과 : 시설편의 증진 및 다양한 노인적합 프로그램 운영을 통한 이용자 만족도 향상. 생산적이고 건강한 노후생활 지원을 위한 개인 및 집단 맞춤형 서비스 강화
사업내용	❍사업위치 : 서울특별시 도봉구 도당로2길 12-13(쌍문동 19-12) ❍사업규모 : 부지면적 : 1,708㎡, 건물면적 : 3,272.93㎡(지하1 /지상4) ❍세부내용 : 지하 다목적실 위쪽(현. 게이트볼장) 수직증축(501.56㎡)
예산구분	❍당년도집행 ❍차년도예산(✔)
사업비	❍총 계 : 1,402,132천원(건물 : 1,402,132천원)
	❍채원별 : ☑ 전액시비 □ 특별교부금 □ 국시비 매칭 □ 기타
	❍회계별 : ☑ 일반회계 □ 특별회계 □ 기타

3. 상위계획(마스터플랜)에의 적합성 여부 : 해당없음

4. 사업비 세부내역

가. 산출내역

구 분	산출기초(천원)	금 액(천원)
총 계		1,402,132
산 출 내 역	공사비(건축,설비,전기,통신 등) 501.56㎡×2,301,000원	1,154,089
	구조안전진단/측량 및 보강비(기둥10개) 164,000,000원 지질조사, 실시설계(4.81%) 및 감리(1.23%)	243,658
	공사비의 0.38%	4,385

나. 연도별 소요

(단위 : 천원)

구 분		계	2015년	2016년	2017년	2018년	예산과목
내용별	계
	일반매입
	보상
	기타(공사비 등)			1,402,132
재원별	계
	국비
	시비(특별교부금)			1,402,132
	구비
	지방체
	민자

5. 세부추진계획(예정)

구 분	추진사항	법적근거	세부추진내용	추진기간
총 계	- 해	당	없음	-
산출내역

6. 기타사항

기타사항	해당 자치구 및 지역주민 등의 의견수렴을 통해 사업추진 가능여부 검토 등
기타참고자료

위     치     도(예시)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

	N					범 례
						적색 실선	도봉노인종합복지관․별관
						노란실선 A,B,C	도봉로 서측지역
						노란실선 D,E,F	도봉로 동측지역
S
위치도 설명					○ 대상지는 도봉구 쌍문동에 위치하고 있으며 지하철 1․4호선 창동역과 4호선 쌍문역(각 도보 15분 거리)에 인접하고 있고 창동교교차로를 통해 동부간선도로로 진입이 가능함. ○ 노란실선 A, C, D - 도봉로를 중심으로 좌우로 위치한 도로 전면에는 상가시설이 있으며, 후면에는 단독․다세대주택 밀집지역임 ○ 노란실선 B, E - 아파트 단지 밀집지역으로 E 지역 우측(창동역 동편)으로도 모두 아파트 단지가 밀집되어 있음 ○ 노란실선 F : 병원, 소규모 공업사․공장 등이 단독주택과 혼재 ○ B와 C 사이에는 쌍문근린공원이 있어 지대가 높은 지역임 ○ 복지관과 별관 사이 왕복4차선 도로가 있어 무단횡단 등의 위험

현   장   사   진

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

사진설명

도봉노인종합복지관 위성사진 : 본관 및 게이트볼장(수직 증축공간)

시설출입구	좌측방향 본관출입문 정면우측방향 후문위치	게이트볼장

사진설명

도봉노인종합복지관 시설 전경