(구)구의취수장 제1도수관로 폐쇄공사 추진현황

□ 공사개요

❍ 기간 : 2014. 11. 24~12. 23(화)

- 도수관로 주변 터파기 및 포장깨기 :   11. 24(월)~12.14(일)

- 밸브조절 및 폐쇄공사 시행 :        12.22(월)~12.23(화)

❍ 규모 : D1650㎜ 폐쇄(관절단 및 마개플랜지 접합)

❍ 공사(협조)부서 : 동부수도사업소(단가계약업체)

❍ 시행부서 : 본청 문화정책과

□ 그간 추진사항

❍ 취수중단 없이 도수관로 폐쇄공사 가능하도록 연결공사 시행

- 기간 : 2014. 11.

- 규모 : 제1,2도수관로 연결 1200㎜×1개소(착수정 입구)

- 부서 : 동부수도사업소(단가계약업체)

※ 향후 제1,2도수관로 연결로 자양취수장 원수활용 가능

❍ 시설물 점검

- 기간 : 2014. 11. ~ 12.

- 대상 : 취수장~정수센터 경계 변류, 16개 작동상태 확인

- 부서 : 동부수도사업소 급수운영과(시설물단가계약업체)

□ 도수관로 폐쇄관련 배관현황도

1정수장

2정수장

구의정수센터

양지초교

D1,650mm 제1도수관로

D2,200mm

D1,650mm 제2도수관로

P

강  북

취수장

P

P

P

구  의

취수장

P

P

구의취수장 도수관로

절단 및 마개플랜지 접합

양지초교

□ 관련사진

도수관로 부설공사	관로 터파기 및 콘크리트깨기