(구)구의취수장 제1도수관로 폐쇄공사 추진현황

□ 구의취수장 폐쇄개요

❍ 시설물 현황❍ 시설물 현황

- 부     지 : 16,631㎡(건물면적 : 4,699.1㎡)

- 취수펌프 등 : 192종 437대

❍ 취수장 폐쇄 : 2014. 09. 30

❍ 폐쇄 취수장 용도 : 서울거리예술창작센터 조성

- 기간 : 2014.10. 1~2015. 2. 28

- 부서 : 문화정책과(도시기반본부, 건축부)

❍ 미결사항 : 제1도수관로 페쇄공사

-제1도수관로가 강북 도수관로와 연결되어 있어 서울거리예술창작센터 조성에 지장이 없도록 취수장 입구에서 폐쇄 필요

□  도수관로 퍠쇄공사 현황

❍ 기간 : 2014. 11. 24~2015. 1.

❍ 규모 : D1650㎜ 폐쇄(관절단 및 마개플랜지 접합)

- 공사 소요시간 : 약 7시간

❍ 시행부서 : 본청 문화정책과(도시기반본부, 건축부)

❍ 공사(협조)부서 : 동부수도사업소(단가계약업체), 구의정수센터

❍ 추진사항

- 터파기 및 포장깨기           : 11. 24(월)~12.14(일)

- 밸브조절(단수) 요청(배수과) : 2014. 12. 17

- 본부(배수과) 회신           : 2015. 1월중 시행 검토

□ 그간 추진사항

❍ 취수중단 없이 도수관로 폐쇄공사 가능하도록 연결공사 시행

- 기간 : 2014. 11. 17~11. 25

- 규모 : 제1,2도수관로 연결 1200㎜×1개소(착수정 입구)

- 부서 : 동부수도사업소(단가계약업체)

※ 향후 제1,2도수관로 연결로 자양취수장 원수활용 가능

❍ 단수구간 밸브 작동상태 점검 실시

- 기간 : 2014. 11. 27~12. 4

- 대상 : 취수장 입구~정수센터 경계 도수관로 변류

•밸브(16개소) : 제수변 3개소, 공기변 11개소, 퇴수변 2개소

- 점검내용 : 밸브작동상태

- 점검부서 : 동부수도사업소(시설물 단가계약업체)

※ 도수관로 폐쇄관련 배관현황도

1정수장

2정수장

구의정수센터

양지초교

D1,650mm 제1도수관로

D2,200mm

D1,650mm 제2도수관로

P

강  북

취수장

P

P

P

구  의

취수장

P

P

구의취수장 도수관로

절단 및 마개플랜지 접합

양지초교

※ 관련사진

도수관로 부설공사	관로 터파기 및 콘크리트깨기