연도별 도시개발사업 추진 현황

(2017. 8월 현재)

연번	사업소	도시계획 사업명	사업위치	면적(㎡)	급수세대	사업기간 (년)	시행사	진행사항	담당자	비고
계		20개소		17,741,411	83,040	‘07 ~‘20
1	중부	용산국제업무단지	용산구 한강로3가 40-1	518,692	4,300	‘10 ~‘16		사업 취소 (2013.10.10)	신정우(2149)	사업취소
2	동부	신내3국민임대주택	중랑구 신내동	267,059	5,134	‘07.~‘14.	SH공사	완료	이용민(2802)	100%
3	동부	양원보금자리주택	중랑구 신내동 일원	385,205	3,846	‘10 ~‘19	LH공사	건물철거중	이용민(2802)	1%
4	북부	상계장암도시개발	상계동 1200-1일원	267,455	2,397	‘04.~‘15	SH공사	완료	윤승구(3367)	100%
5	강서	천왕2지구국민임대주택	구로구 천왕동	278,851	1,589	‘06.~‘14.	SH공사	완료	김효경(3966)	100%
6	강서	마곡도시개발사업	강서구 마곡동 가양동	3,665,722	12,030	‘07.~‘17.	SH공사	진행중	정수용(4021)	75%
7	강서	천왕(2,4,6)단지 주택건설	구로구 천왕동	92,610	1,682	‘08.~‘16	SH공사	완료	김승완(3967)	100%
8	강서	항동보금자리주택	구로구 항동	665,566	5,230	‘10 ~‘18	SH공사	골조공사중	김효경(3966)	5%
9	남부	금천구도시개발	금천구 시흥동 113	687,025	6,659	‘10 ~‘19	LH공사	사업취소 (17.7.12)	류태현(4546)	사업취소
10	강남	강남보금자리주택	강남구 세곡동 일원	940,677	6,821	‘09.~‘15.	LH공사	완료	고원석(4855)	100%
11	강남	세곡2보금자리주택	강남구 수서동	263,814	4,450	‘10 ~‘16	SH공사	인수·인계중	고태우(4855)	98%
12	강남	서초보금자리	서초구 우면동 일대	36,000	3,304	‘09 ~‘13	LH공사	완료	박준성(4892)	100%
13	강남	우면보금자리	서초구 우면동 일대	174,703	3,137	‘09 ~‘15	SH공사	완료	박준성(4892)	100%
14	강남	내곡보금자리	서초구 내곡동 일대	819,388	4,521	‘12 ~‘17	SH공사	완료	박준성(4892)	100%
15	강동	문정택지개발사업	송파구 문정동	328,079	근생시설	‘07 ~‘17	SH공사	진행중	이덕규(5144)	60%
16	강동	위례신도시도시개발	송파구 거여동, 장지동	6,668,565	19,811	‘09 ~‘18	LH공사 SH공사	진행중	이덕규(5144)	60%
17	강동	고덕지구보금자리주택	강동구 고덕동 일원	827,000	4,300	‘11 ~‘20	LH공사 SH공사	골조공사중	송정호(5194)	3%
18	강동	강일3지구보금자리 주택	강동구 강일동, 상일동	330,000	3,130	‘11 ~‘20	LH공사 SH공사	골조공사중	김정은(5195)	3%
19	강동	강일4지구보금자리 주택	강동구 강일동	525,000	4,900	‘11 ~‘20	LH공사 SH공사	골조공사중	김정은(5195)	3%