문서번호	임대주택과-5611
결재일자	2015.5.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		임대주택과장	주택건축국장
협 조
	법제심사팀장
	신문팀장
	임대사업팀장

도시계획시설사업 실시계획(변경) 인가 및 고시

2015.5

임대주택과

도시계획시설사업 실시계획(변경) 인가 및 고시

중구 만리동2가 218-105 일대 도시계획도로 개설과 관련 사업시행자로 지정된 만리제2주택재개발사업조합으로부터 실시계획 변경 요청이 있어 관련규정에 따라 실시계획(변경) 인가하고 고시하고자 함

□ 사업 개요

○ 사업명: 만리2주택재개발구역 외 도로(소로3-000호) 신설공사

○ 종  류: 도시계획시설(도로) 사업

○ 위  치: 중구 만리동2가 218-105번지 일원

- 시점 : 중구 만리동2가 218-105번지

- 종점 : 마포구 아현동 87-6

○ 면적 및 규모: 948.2㎡ (B=6m, L=129m)

□ 실시계획 변경 내용

○ 사  유: 진입도로 공사 지연에 따른 준공예정일 변경

○ 준공예정일

- 당초: 2014년 11월 30일

- 변경: 2015년 6월 30일

□ 처리 방안

○ 실시계획을 변경 인가하고 관련규정에 따라 우리시 시보에 고시

붙임 : 1. 고시문 - 1부

2. 만리2재개발조합 요청 공문 - 1부.  끝.