				★대리			팀장	교통정보처장	도로관리본부장
문서번호		교통정보처-5488
보존기간		준영구		협 조			팀장
결재일자		2018.09.21.
공개여부		공개
도시고속도로 CCTV 영상설비 교체계획(안)
			2018. 09
						교통정보처

도시고속도로 CCTV 영상설비 교체계획(안)

설치(́́́́ ́01년)된지 19년이 경과되어 노후된 CCTV 영상설비를 고화질 디지털 장비로 교체하여 신속한 돌발대응 및 양질의 교통정보 제공
		※

Ⅰ	추진개요

□ 추진배경

○ 센터 아날로그 영상설비 노후화로 영상절체, 제어 등 운영이 불안정 하며

장애발생시 돌발상황 확인 및 대응지연

○ CCTV 영상설비 주요부품 노후화로 빈번한 장애발생(내구연한 10년 초과)

- 주요부품 단종으로 장애발생시 신속한 조치 곤란

○ 한국도로공사, 서울지방경찰청 등 영상연계 주요기관 CCTV 기 디지털 전환

- 공단 CCTV 영상 시인성이 떨어진다는 민원 제기(Naver 연간 1,050만명 접속)

※ 도로관리(영상연계기관) CCTV 디지털 전환현황

구 분	서울지방경찰청	한국도로공사	강남순환도로 등 3개 기관
CCTV 수량	293대 (연계영상 : 수신-293, 제공-157)	5,100대 (연계영상 : 수신-53, 제공-7)	총 426대
신호방식	디지털(HD-SDI)	디지털(HD-SDI)	디지털(HD-SDI 및 IP 카메라)
영상화질	FHD(200만 화소)	HD(130만 화소) ~ FHD	SD(41만 화소) ~ FHD
사업시기	’15년 ~ ’17년	’12년 ~ ’13년	’13년 ~ ’16년

□ 추진방향

○ 고화질(HD급 이상) CCTV 영상처리 및 외부기관 영상연계 강화

○ 돌발상황 감시기능 및 유지관리 효율을 고려한 CCTV 및 영상설비 개선

○ 최신기술 발전동향 및 경제성 등을 고려하여 CCTV 카메라 선정

Ⅱ	시스템 설치현황

□ 현장 시스템 : 969대(CCTV 157(아날로그 140), 영상검지기 812(아날로그 745))

구 분	CCTV					영상검지기(VDS)
	수량 (대)	설치 년도	교체수량	내구연한 초과(대)	비 고	수량 (대)	설치 년도	내구연한 초과(대)	비 고
내부순환, 강변북로	38	’02년, ’07년(1대)	37	1	아날로그	214	’02년	213	아날로그 (213), 디지털(1)
북부간선, 강변북로	22	’04년	5	17	아날로그 (17), 디지털(5)	120	’04년	120	아날로그
올림픽, 노들길	40	’05년	2	38	아날로그	218	’05년	218
동부간선, 경부고속	36	’07년	-	36	아날로그	194	’07년	194
소월/소파로, 남산 1,3호 터널	9	’00년 ~ ’02년	9	-	아날로그	-	’00년 ~ ’02년	-	-
주요도로	8	’13년	-	-	디지털	52	’13년	-	디지털
강남순환로	4	’16년	-	-	디지털	14	’16년	-	디지털
계	157	-	53	92	아날로그 (140), 디지털(17)	812	-	745	아날로그 (745), 디지털(67)

※ 노후화 비율 : 86.4% / 아날로그 비율 : 91.3%

□ 센터 시스템 : 12종 208대

구 분	시스템명	수 량	용 도	설치년도	내구연한 초과	비 고
영상분배 및 전송	영상분배기 (VDA)	108대	아날로그 영상 분배	’02년 ~ 07년	108대	-
	비디오 매트릭스 스위쳐	1대	아날로그 영상 절체 및 제어	’02년 ~ ’07년	1식	디지털 전환시 불필요
	인코더	4대	아날로그 CCTV(140대) 디지털 변환	’15년	-	-
	영상분배서버	4대	디지털 영상분배	’15년 ~ ’16년	-	-
	모바일 제공 서버 (Wowza)	2대	홈페이지 및 모바일 제공가능 형태로 파일변환	’16년	-	-
영상저장	영상저장서버	1대	CCTV(157대) 영상저장	’15년	-	-
상황판 영상표출	DLP CUBE	15대	상황판 중앙 영상표출	’07년	15대	디지털 영상 표출가능
	영상모니터	60대	상황판 좌/우 영상표출	’13년	-	아날로그 영상만 표출
	영상표시제어서버	1대	영상 절체 및 제어(상황실)	’16년	-	-
	통합제어서버	1대	상황판 표출방식 제어	’16년	-	디지털 전환시 불필요
	IP Wall	1대	디지털 영상 선택적 표출	’16년	-	-
	영상디코더	10대	디지털 → 아날로그 변환	’16년	-	영상모니터에 디지털 영상 표출

Ⅲ	영상설비 디지털화 기술검토

□ 현장 시스템 분야

○ 아날로그 CCTV 카메라(41만 화소) 디지털화 방안

- 돌발상황 감지기능 향상을 위해 FHD(200만 화소)급 이상 CCTV 카메라로 선정

- 교체사업 예산을 고려하여 기존 pole 재활용 여부 검토

- 유지관리 및 장애예방을 위해 단순화된 시스템 적용

- 제어방식 디지털화 변경(Serial → TCP/IP)으로 제어서버 및 운영단말 변경 필요

※ 디지털 CCTV 종류별 장・단점 비교

구 분	1안	2안	3안
방 식	포지셔닝 IP 카메라	스피드돔 IP 카메라	HD-SDI
현장설치 사진
현장 시스템 구성	∘ 포지셔닝 카메라 (팬틸트, 줌제어 내장, 하우징 일체형) ∘ 광 전송장비	∘ 돔카메라 (팬틸트, 줌 제어 내장) ∘ 광 전송장비	∘ 촬상부 : 카메라, 줌렌즈, 하우징(와이퍼, 열선), 팬틸트 ∘ 제어부 : 인코더, 제어기, 문자발생기 ∘ 통신부 : 스위치, 광 전송장비
사업비용	개소당 약 7,500천원 [6,300천원(카메라 구매‧설치) + 200천원(브라켓 제작) + 1,000천원(광 전송장비)]	개소당 약 7,000천원 [4,000천원(카메라 구매‧설치) + 1,000천원(4M Arm) + 1,000천원(피뢰침) + 1,000천원(광 전송장비)]	개소당 약 15,000천원
	총 1,050백만원 [7,500천원 × 140대]	총 980백만원 [7,000천원 × 140대]	총 2,100백만원 [15,000천원 × 140대]
장 점	∘ 구매‧설치비용 비교적 저가 ∘ 구성이 단순, 유지관리 편리 ※ 기성품으로 예비품 확보용이 ∘ 기존 pole을 이용한 설치가능 (브라켓 제작 필요)	∘ 구매‧설치비용 다소 저렴 ∘ 구성이 단순, 유지관리 편리 ※ 기성품으로 예비품 확보용이	∘ 여러 운영기관에 검증된 장비로 안정성 높음 ∘ 기존 pole구조에 설치 가능
단 점	∘ 스피드돔 방식보다 설치가격 다소 높음(대당 약 500천원)	∘ 기존 pole 활용시 별도 Arm 설치 및 피뢰침 변경 필요 - 구조물 안전 및 미관 저해 ※ pole로 인한 사각지대 발생	∘ 설치비용 고가 ∘ 구성이 복잡, 장애요소 많음 ∘ 일부 주요장비(제어기) 호환성이 낮아 예비품 확보 어려움
운영기관	함양군청 (산불감시용으로 운영)	부천시 교통정보센터	도로공사, 서울지방경찰청, 공단

○ 돌발상황 모니터링용으로 활용하고 있는 아날로그 영상검지기 745대

영상확인 방안

- 기존 센터 영상절체/제어설비(Video Matrix) 철거시 상황실에서 아날로그

영상검지기 영상확인이 불가하여 인코더(아날로그 신호를 디지털 신호로 변환)를

설치하여 영상 확인

※ 현장 아날로그 영상검지기 디지털 방식으로 교체시 5,215백만원 소요

□ 센터 영상설비 및 네트워크 분야

○ 교통상황 모니터링 및 외부연계 영상 증가로 센터 네트워크 및 영상설비

고도화 필요

- 내부 처리영상 및 외부연계 영상 증가

구 분		기 존	변 경
내 부	수 량	224대 ∘ FHD급(200만 화소) CCTV : 12대 ∘ SD급(41만 화소) CCTV : 145대 ∘ SD급(41만 화소) 영상검지기 : 67대 ※ 영상검지기 745대는 아날로그방식 처리	969대 ※ 기존대비 4배 이상 증가 ∘ FHD급(200만 화소) CCTV : 157대 ∘ SD급(41만 화소) 영상검지기 : 812대
	용 량	약 300MB	약 1.12GB
외부 연계	수 량	12개 기관 2,138개 영상제공 (동시제공 : 약 220개)	12개 기관 2,138개 영상제공 (동시제공 : 약 360개)
	용 량	약 220MB	약 720MB
계		약 520MB	약 1.84GB

○ 저장영상 화질개선을 위해 영상저장서버 용량증설 필요

- 현 재 : 4TB(CIF급 영상(10만 화소) 157대, 7일 저장)

□ 상황판 영상표출설비 분야

○ FHD(200만 화소)급 영상표출이 가능토록 상황판 성능개선 필요

기존설비	필요설비
∘ 해상도 : 1080 × 768(82만 화소) ∘ 기 능 : HD급(100만 화소) 영상표출시 미세한 깨짐현상 발생	∘ 해상도 : 1920 × 1080(200만 화소) 이상 ∘ 기 능 : FHD(200만 화소)급 영상 원활한 표출가능

○ 원활한 돌발상황 공유, 견학 프로그램 다양화 등을 위해 자유로운

표출방식이 가능한 방식의 상황판 구성 필요

Ⅳ	추진계획

□ 아날로그 CCTV 카메라(140대) FHD 디지털(200만 화소) 카메라로 교체

○ 기존 pole 및 피뢰침 재활용(브라켓 별도제작)

○ 포지셔닝 IP 카메라 방식(팬틸트, 줌제어 내장 및 하우징 일체형)

구 분	기 존		변 경
종 류	BOX형 CCTV(촬상부, 제어부 구분)		IP 카메라(200만 화소)
방 식	아날로그 방식		디지털 방식
현장 설치사진	<촬상부>	<제어부>	<카메라, 제어 일체형>

□ 아날로그 영상검지기 영상 확인 및 통신망 구성 방안

○ 아날로그 영상검지기 영상(745대) 디지털 신호로 인코딩

① 인코더 신규설치, 영상검지기 465대 영상을 디지털 변환(사업비용 : 250백만원)

② 서울지방경찰청 인코더 활용, 140대 영상검지기 영상 디지털 변환

③ 현장 CCTV 디지털화 교체시 철거 인코더를 활용, 140대 영상검지기 영상

디지털 변환

※ 사업예산의 효율적 집행을 위해 철거장비 재활용(인코더 전체 신규설치시 150

백만원 추가소요)

○ 무인통신중계소 통신망 디지털 전환

- 센터와 1:1 광 자가망으로 구성된 CCTV 47대는 별도 장비없이 디지털 전환

- 무인통신중계소를 거쳐 센터로 전송되는 CCTV 98대 디지털 전환 방법

구 분	수 량	디지털화 전환방법	사업비용	비 고
계	98	-	68백만원	-
2-1단계 성산 (’12년 성능개선)	8	‘국사-센터’간 예비회선 이용, 양측에 광 L2 스위치 설치	3백만원	제품단종
2-1단계 성수, 공릉 (’15년 성능개선)	14	샤시 여유공간을 활용, 디지털방식 광 다중화 카드 설치	13백만원	철거된 아날로그 광 다중화 장비는 VDS 예비품으로 활용 (VDS 94대 대상)

구 분	수 량	디지털화 전환방법	사업비용	비 고
2-2단계 성산, 청담 (성능개선 미시행)	40	<무인통신중계소 광 다중화장비 성능개선 후> 샤시 여유공간을 활용, 디지털방식 광 다중화 카드 설치	26백만원	철거된 아날로그 광 다중화 장비는 VDS 예비품으로 활용 (VDS 218대 대상)
3단계 성수, 한남 (성능개선 미시행)	36		26백만원	철거된 아날로그 광 다중화 장비는 VDS 예비품으로 활용 (VDS 194대 대상)

※ 무인통신중계소 광 다중화장비(4개소) 성능개선 미시행시 예비회선을 활용해

센터-국사 양단 광 L2 스위치 설치 필요(소요비용 : 약 50백만원)

- 주요도로(강남대로, 서부간선 등) 임대망 CCTV 8대 및 강남순환도로의

네트워크 방식 CCTV 4대는 기존망 유지

□ 센터 네트워크 용량 및 영상설비 증설

○ 영상설비 네트워크 용량 : 1G → 10G

○ 영상분배서버 : 4대 → 8대

- 영상분배방식 변경 : 아날로그 방식(Video Matrix) → 디지털 방식(영상분배서버)

○ 영상저장서버 : 4TB → 10TB

□ 상황판 영상표출설비 전체를 DLP(Digital Lighting Processing)

방식으로 교체

○ 중앙 상황판(15대) 200만 화소 이상으로 성능개선(기존 82만 화소)

○ 중앙, 좌/우 구분없이 33개 상황판에서 자유로운 표출이 가능토록 구성변경

- 교통관리센터 상황판 전/후 비교

기 존	개 선
∘ 중 앙(15대) : 디지털방식 표출 ∘ 좌/우(각 30대) : 아날로그만 표출	중앙, 좌/우 구분없이 33개 상황판에서 자유로운 구성의 표출가능

□ 사업예산 및 연차별 사업내용

○ 사업예산 : 3,088백만원

- 세부내역

구 분		비 용(백만원)	비 고
계		3,088
센터 네트워크 증설 및 영상설비 구매설치		790	교통관리센터 (19층)
현장 CCTV 교체	통신장비 구매설치	68	무인통신중계소
	현장 CCTV 카메라 구매	812	-
	현장 CCTV 카메라 설치공사	238	CCTV 현장설치 및 통신망 구성 등
	소 계	1,118	-
상황판 표출설비 개선	상황판 설비 구매설치	1,090	교통관리센터 (20층)
	상황판 맵 프로그램 제작	50
	상황실 인테리어 변경	40
	소 계	1,180	-

○ 연차별 사업내용

- ’19년 : 센터 네트워크 증설 및 영상설비 디지털화

- ’20년 : 현장 CCTV 디지털화 교체(140대)

- ’21년 : 교통관리센터 20층 상황판 표출설비 개선

계	2019년	2020년	2021년
3,088백만원	790백만원	1,118백만원	1,180백만원

□ 계약방법 : 조달계약 및 협상에 의한 계약

○ 정보화사업 예산타당성 심사 대상(영상분배서버 및 영상표출관리서버)

※ 총 사업비 40억 미만으로 市 투자심사 제외

Ⅵ	추진효과

□ 신속한 돌발감지 및 외부기관 영상연계 강화로 통합 재난대응력 제고 □ 양질의 영상서비스 제공(Naver)으로 시민만족도 향상

□ 유지관리 효율성 향상.  끝.