도시기반시설본부장 사무인계·인수서

【도시기반시설본부】

1. 2020년 7월 1일 현재 도시기반시설본부장의 업무를 별첨과 같이 인계·인수함.

2. 인계인수서 내용은 사실과 같이 작성하였음.

3. 인계인수 및 입회자는 다음과 같음.

○	인계자	전직위	도시기반시설본부장		성명	한제현	(인)
○	인수자	직 위	도시기반시설본부장		성명	박상돈	(인)
○	입회자	직 위	총무부장		성명	강희은	(인)

□  목      차  □

1. 기구․조직 현황	1

2. 정․현원 현황	1

3. 부별 주요 업무	2

4. 주요사업 추진현황	7

5. 주요 지시사항	54

6. 소송계류중인 사항	56

7. 보존문서 현황	63

8. 비밀소유 현황	64

9. 장부·대장 목록	65

10. 차량현황	66

11. 재산조서	67

12. 세입세출예산현계표	68

13. 세입세출외 현금수지현계표	69

14. 지방교부세 수불현계표	70

15. 적립금 조서	70

16. 유가증권 수불현계표	71

17. 보조금 수지현계표	71

18. 물품조서	72

1. 기구․조직 현황

□ 1본부 2국 10부 1단 53과

															본 부 장
				시 설 국																							도 시 철 도 국
	총무부			토목부			건축부			설비부			방재시설부											도시철도계획부			도시철도사업부				도시철도토목부			도시철도건축부			도시철도설비부			영동대로복합개발추진단
																안전관리과
	(3과)			(6과)			(7과)			(5과)			(5과)			(1과)								(4과)			(4과)				(4과)			(3과)			(7과)			(4과)

2. 정/현원 현황

(2020.6.30.)

구분		계	일반직							임기제	관리 운영직
			소계	3급 이상	4급	5급	6급	7급	8급 이하	소계	소계
계	정원	341	328	3	11	53	149	109	3	6	7
	현원	341	328	4	11	53	151	90	19	6	7
시설국	정원	194	182	2	5	27	77	68	3	5	7
	현원	196	186	3	5	27	79	60	12	5	5
도철국	정원	147	146	1	6	26	72	41	0	1	0
	현원	145	142	1	6	26	72	30	7	1	2

3. 부별 주요 업무

□ 시설국 : 5부 1과

부 서 명	주 요 업 무
총무부	1. 기본운영계획의 수립·조정 및 심사분석 총괄 2. 세입·세출예산의 편성·집행 총괄 및 조정 3. 중기재정계획 및 재정운영계획에 관한 사항 총괄 4. 법제업무 및 소송의 총괄·조정 5. 통계에 관한 사항 총괄 6. 인사·조직·복무·급여 및 직원후생 총괄 7. 감사 및 사정, 각종 민원, 비위조사에 관한 사항 총괄 8. 을지연습에 관한 사항 9. 평가업무 및 비전전략업무 등 총괄 10. 언론·홍보에 관한 사항 총괄 11. 지출 및 결산에 관한 사항 총괄 12. 공사도급·용역·물품구매·제조·운반 및 임대차계약에 관한 사항 총괄 13. 세입·세출외 현금 및 유가증권의 출납보관 총괄 14. 물품의 수급 및 출납에 관한 사항 총괄 15. 토지취득, 수용, 고정자산 등 재산관리의 총괄·조정 16. 통합사업관리정보시스템 구축 및 운영에 관한 사항 17. 건설알림이 구축 및 운영에 관한 사항 18. 흙은행시스템 구축 및 운영에 관한 사항 19. 그 밖에 본부 내 다른 부·과의 주관에 속하지 아니하는 사항

부 서 명	주 요 업 무
토목부	1. 도로·교량의 공사에 관한 사항 2. 도로건설 등 본부 시설국 소관 설계·공사(공원 및 조경시설 제외)에 관한 사항 3. 시장 및 본부장이 특별히 지정하는 건설공사에 관한 사항 4. 교차로 입체시설 등 도로구조물 공사에 관한 사항 5. 도시고속도로의 공사에 관한 사항 6. 시설국 소관 신규 공사 시공·감리 총괄 7. 신공법·신기술 개발 및 자료실 운영 8. 건설공사, 용역 등 발주 전 심의 및 설계변경 심의에 관한 사항 9. 기술 관련 업무 중 그 밖에 다른 부의 주관에 속하지 아니하는 사항
건축부	1. 공용의 청사 및 산업·복지시설 건립 공사의 설계 및 시공에 관한 사항 2. 문화재시설 및 체육시설의 시공에 관한 사항 3. 그 밖에 시장 및 본부장이 지정하는 건축공사의 시공에 관한 사항 4. 공공다중이용 건축물 중 시장이 관리하는 체육시설 2개운동장(잠실·목동) 및 시립병원(직영병원 및 북부노인전문요양병원)건축물안전점검에 관한 사항
설비부	1. 각종 건설공사에 대한 기계·전기 및 설비공사의 설계 및 시공에 관한 사항 2. 신재생에너지 설비의 시공에 관한 사항 3. 그 밖에 시장 및 본부장이 지정하는 기계·전기 및 설비공사에 관한 사항
방재시설부	1. 본부 소관 시설물 공사장 등의 풍수해 및 재난관리 업무 2. 하수 및 빗물 펌프장 등 치수 시설의 공사에 관한 사항 3. 친환경설비 및 물재생센터 관련 시공에 관한 사항 4. 공원·조경 공사의 설계·시공 및 산사태 복구공사에 관한 사항 5. 경의·경춘선 공원화 사업 등 대형공원조성 사업 추진에 관한 사항 6. 시장 및 본부장이 지정하는 방재 및 시설공사에 관한 사항
안전관리과	1. 본부 건설 안전계획 수립 및 안전지도관리 총괄 2. 본부 공사장 품질관리 업무 총괄

□ 도시철도국 : 5부 1단

부 서 명	주 요 업 무
도시철도 계획부	1. 도시철도 건설 기본계획(변경) 및 건설계획(공법 및 시공관리)수립·조정 2. 도시철도건설 설계 총괄 3. 도시철도건설 토목·궤도 기본 및 실시설계 4. 도시철도국 수탁공사 협의·조정에 관한 사항 5. 도시철도 건설 사업면허 및 사업계획 승인에 관한 사항 6. 도시철도국 공사 및 감리 발주계획 수립·조정에 관한 사항 7. 도시철도건설 민자유치 총괄 8. 경전철 민간투자사업에 관한 사항 9. 경전철 교통개선대책 및 사전 환경성 검토에 관한 사항 10. 도시철도국 내 다른 부의 주관에 속하지 아니하는 사항
도시철도 사업부	1. 도시철도 건설공사 공정관리 업무 총괄 2. 도시철도 건설공사(신림선, 동북선, 별내선)의 토목공사계획 및 시공관리 3. 벌점 부과관리(본부) 총괄 4. 도시철도 설계·준공 관련 도서 자료실 운영 총괄 5. 설계변경 자문업무 총괄(국총괄) 6. 도시철도공사의 물가변동 기준 수립 업무 총괄 7. 기술정보교환회의 운영 8. 공정관리분야 민자사업 협상 9. 7호선 연장 공사대금 청구소송 총괄 10. 건설공사 사후평가 업무 11. 우이신설 공사대금(1~4공구) 청구 소송 총괄 12. 우이신설선 토목 시공관련 사후관리

부 서 명	주 요 업 무
도시철도 토목부	1. 도시철도건설공사의 토목공사 계획 및 시공관리 총괄업무 2. 도시철도건설공사 궤도 시공 및 감리업무 3. 시공, 감리에 대한 평가 등 업무 총괄 4. 환경영향평가 사후관리 총괄 5. 공사장 교통대책 총괄 6. 환경정비 총괄 7. 장애물 총괄 8. 보상 총괄 9. 폐기물 처리 총괄 10. 도시철도 계측업무 총괄 11. 피해건물 보수·보상에 관한 업무 총괄 12. 제2기 도시철도 사후관리(5·6·8호선, 7호선1~25공구, 7호선 연장 701~704공구, 광명차량기지, , 도봉차량기지) 13. 신교통 토목공사관리 총괄 14. 9호선 1, 2, 3단계 사후관리(901공구~923공구) 15. 3호선 연장구간 사후관리 16. 본부 소관 시설물 등의 설해대책 업무 총괄
도시철도 건축부	1. 도시철도 정거장 디자인 계획 및 설계 2. 도시철도 정거장 및 환기구 등 색채·조형물 계획 3. 도시철도 민간투자사업 관련 업무(건축분야) 4. 도시철도건설 건축 시공관리 5. 도시철도 정거장 방재계획 업무 6. 도시철도 정거장 안내싸인 계획 7. 도시철도 정거장 승강편의시설 확충계획·설계 및 건축·토목 시공관리 8. 기존 도시철도 개량부분 사후관리

부 서 명	주 요 업 무
도시철도 설비부	1. 전력설비(송변전, 전차선, 전력사령설비) 계획, 설계 및 시공관리 2. 정거장 전기설비 계획, 설계 및 시공관리 3. 차량 수급계획·설계 및 제작관리 4. 차량기지 검수설비 계획 및 시공관리 5. 기계설비(냉방, 환기, 공기정화, 스크린도어, 소방설비, 승강설비) 계획, 설계 및 시공관리 6. 통신 및 역무자동화설비 계획·설계·시공관리 7. 신호설비 계획, 설계 및 시공관리 8. 종합사령실 계획·설계 및 시공관리 9. 승강편의시설(전기, 기계, 통신) 설계 및 시공관리 10. 신교통시스템 설계 및 시공관리 11. 도시철도 민간투자사업 관련 업무(설비분야)
영동대로 복합개발 추진단	1. 영동대로복합개발 사업의 토목 설계 및 시공관리 2. 영동대로복합개발 사업의 건축 설계 및 시공관리 3. 영동대로복합개발 사업의 설비(전기, 기계, 통신, 신호) 설계 및 시공관리 4. 영동대로복합개발 사업의 건설사업관리 업무 5. 영동대로복합개발 사업의 설계, 시공, 건설사업 관리에 대한 평가 등 업무 6. 영동대로복합개발 사업의 공사장 공정관리, 품질관리 업무 7. 영동대로복합개발 사업의 방재·안전계획 및 스마트 정거장 구축 업무 8. 영동대로복합개발 사업의 공사장 교통대책 수립 9. 영동대로복합개발 사업의 각종 인·허가 업무 및 영향평가 업무 총괄 10. 삼성∼동탄 광역급행철도 위수탁 구간 시공 및 건설사업관리 업무

4. 주요사업 추진현황

□ 부서별 추진현황(총괄)

부 서 명	대상사업	완 료	추 진 중			취소․보류
			소 계	정 상	부 진
계	164	59		105
토목부	55	16		39
건축부	62	24		38
설비부	21	18		3
방재시설부	13			13
도시철도계획부	3			3
도시철도사업부	4	1		3
도시철도토목부	3			3
도시철도설비부	2			2
영동대로복합개발 추진단	1			1

주요사업 추진현황

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(도시기반시설본부)

1. 총    괄

대상사업	완 료	추 진 중	취소․보류
164	59	105

2. 주요사업 추진현황

○ 완료

연번	건 명	사업내용(개요)	추 진 현 황	추진부서
1	여의교 확장공사	○ 위치 : 영등포구 여의교, 북단~ 대방역간 용호로 교통축 ○ 사업개요 - 여의교 확장(폭 8차로 → 9차로, 연장 240m),보행교량 신설 (폭 4.6m ∼ 5.2m, 연장 240m) ○ 공사기간 : ‘16. 11. ~ ’18. 6. ○ 소요예산 : 78억원	○ '12. 4. ~ '15.12. : 기본 및 실시설계 ○ '16. 7. : 재투자심사 완료 ○ '16.11. : 공사 계약 ○ '17. 2. : 하천점용허가 및 공사 착공 ○ '18. 6. 25. : 준공	토목부
2	퇴계로 외 1개소 도로공간재편공사	○ 위치 : 퇴계로(회현역7번 출구 ~ 퇴계로 2가) 만리재로(만리 2구역 ~ 공덕동오거리) ○ 사업개요 - 퇴계로 보도확장 : B=5.5m→6.0～14.0m,L=850m - 만리재로 보도확장 : B=4.0m→6.0～10.0m, L=1,170m - 보도블럭정비(12,415㎡), 아스콘포장 (54,163㎡), 수목식재 및 띠녹지 조성 등 ○ 공사기간 : '17. 1 ~ ’18. 4 ○ 소요예산 : 53억원	○ ′17. 1. : 공사착공 ○ ′17. 3. : 공사시행 홍보 ○ ′17. 10. : 만리재로 보행환경개선공사 완료(1, 2구간) ○ ′18. 3. : 퇴계로 보행환경개선공사 완료 ○ ′18. 4. : 공사준공	토목부
3	한남2고가차도 외 1 개소 철거공사 실시설계	○ 위치 -한남2고가차도 : 한남동707-327 -구로고가차도 : 가리봉동139~신림동1667-10 ○ 사업개요 - 고가차도 철거 : 872m ․ 한남2고가차도 : 폭15m, 연장341m ․ 구로고가차도 : 폭18.5m, 연장531m ○ 설계기간 : '17. 4.～'18. 4. ○ 소요예산 : 3.8억원	○ '14. 7.~'15.10.: 고가차도 철거 등 방안 검토 ○ '15. 6.~'16. 9.: 고가차도 관리계획 수립 ○ '16. 8. : 고가차도 철거 등 관리 계획 보고 ○ '16.10. : 투자심사(조건부) ○ '17. 4. : 실시설계 계약 ○ '17. 4. : 실시설계 착수 ○ '17. 6. : 특정제품(공법)심의 ○ '17. 9. : 한남2고가 철거 설계 완료 ○ '17.12.: 구로고가 공사중 교통계획 수립 ○ '18. 4. : 설계 완료	토목부
4	제2자유로 종점부 입체화 실시설계	○ 위치 : 마포구 상암동 월드컵로 ○ 사업개요 -구룡사거리 : 구룡교 확장(폭6.0m, 연장300m) -월드컵파크3단지 교차로 : 신호연동화 -월드컵경기장교차로 : 지하차도신설 폭4차로 연장540m -월드컵로 : 월드컵파크3단지교차로 ~ 월드컵경기장교차로 (양측 2차로 확장) ○ 설계기간 : '17. 5.～'18. 5. ○ 소요예산 : 12.5억원	○ '09.12. : 파주운정4지구 광역 교통개선대책 확정 ○ '12.12. : 광역교통개선대책 변경 확정 ○ '13.10. : 투자심사 ○ '14.12. : 기본설계 착수 ○ '16.12. : 건설기술 심의 ○ '17. 1. : 기본설계 완료 ○ '17. 5. : 실시설계 계약 ○ '17. 5. : 실시설계 착수 ○ '17. 7. : 실시설계 자문 ○ '17.11. : 특정제품(공법)심의 ○ '18. 2. : 설계VE ○ '18. 5. : 설계 완료	토목부
5	천호지하차도 평면화 및 중앙버스전용차로 설치 실시설계	○ 위치 : 천호대교 남단 ~ 강동구 성내동 엘웨딩홀 교차로 ○ 사업개요 : -천호지하차도 평면화 : 폭 16m(4차로), 연장 355m(BOX 100m, U-Type 255m) -중앙버스전용차로 설치 : 왕복2차로, 연장 1.2km, 중앙정류장2개소 ○ 설계기간 : '17.11. ~ '18.5. ○ 소요예산 : 2.1억원	○ '14.10.~11.:천호지하차도 평면화 건의(강동구>서울시) ○ '16. 5. : 타당성조사 용역 착수 ○ '17. 1. : 주민설명회 ○ '17. 3. : 전문가 자문회의 ○ '17. 5.~7. : 서울공공투자센터 타당성 검증 ○ '17. 7. : 사업 추진계획 수립 ○ '17. 8. : 용역 추진계획 수립 ○ '17. 9. : 용역 발주 ○ '17.11. : 용역 계약 ○ '18. 4. : 전문가 자문회의 ○ '18. 5. : 설계완료	토목부
6	서울창업허브 별관 리모델링공사	○ 위치 : 마포구 공덕동 370-4,10호 (구 산업인력관리공단) ○ 사업개요 - 리모델링 : 지상4층, 연면적 5,656㎡, 창업지원시설 ○ 사업기간 : '15. 1 ~ '18. 2 ○ 사 업 비 : 113억원	○ '15.07. : 공사발주의뢰 ○ ‘15.10. : 설계공모 공고 ○ ‘15.12.~’16.7. : 설계용역 ○ '16.12. : 공사착공 ○ '18.02. : 공사준공	건축부
7	밤고개로 확장공사	○ 위치 : 강남구 세곡동사거리~수서IC간 ○ 사업개요 - 도로확장 6차로 → 7 ~8차로, 연장 1.85㎞ ○ 공사기간 : '17. 5 ~ '20.4. ○ 소요예산 : 346억원	○ '17. 5. : 공사착공, 3구간 한전지중화 협약 체결 ○ '17. 8. : 2구간(SH 시행) 공사 협약 ○ '17.11. : 1구간 우선 4차로 확보 완료 ○ '18. 2. : 5구간 4차로 확보 완료 3구간 통신지중화 완료 ○ '18. 3. : 3구간 PC암거 설치 조립식 옹벽 블록 설치 완료 ○ '18. 4.~ 6. : 5구간 지하철 냉각탑 이설 ○ ’18. 7.~ 11. : 전 구간 한전주 지중화 공사 ○ ’19. 10. : 1,2구간 지중화 완료 ○ ’20.4. : 도로확장 완료 및 준공	토목부
8	종로 BRT 및 도로공간재편 사업	○ 위치 : 세종사거리 ~ 동묘앞 ○ 사업개요 - 중앙차로 설치 3.8km, 정류소 15개소 - 사업비 : 149억원 ○ 기간 : '17. 8. ~'18. 8.	○ '17. 8. : 공사착공 ○ '17.10. : 중앙부 버스차로 포장 완료 ○ '17.12. : 중앙버스전용차로 개통 ○ '18. 5. : 연등회 행사 지원 - 승강장 바닥기초 평탄화 작업 ○ '18. 6. : 차도상 맨홀 인상, 유관기관 지적사항 조치 ○ '18. 8. : 준공	토목부
9	종각역 북측 지하공간 재생공사	○ 위치 : 종각역 북측 지하공간 ○ 사업개요 - 태양광이용 지하공간 재생(1,171m2) - 지하정원(134m2) 및 보행교 1개소 ○ 기간 : ’19.04. ~ ’20.01. ○ 소요예산 : 34억	○ ’19.04. : 공사착공 ○ ’19.07. : 태양광 시스템 설치, 조경공사, 보행교공사 ○ ’20.01. : 공사준공 ○ ’20.02. : 시설물 인수인계	토목부
10	천호대로(광나루역) 확장 공사	○ 위치 : 광진구 구의동 58-15 ～ 광장동 388-10 ○ 사업개요 - 폭 6→10차로, 연장 900m (지하차도 580m 포함) - 중앙버스전용차로 설치 2,600m - 상징조형물 설치(높이 23.3m) ○ 공사기간 : '10. 10 ~ '18. 12 ○ 소요예산 : 1,061억원	○ '10.10. : 공사 착공 ○ '11.10. : 매장문화재 발굴 완료 ○ '17. 2. : 지하차도 구조물 완료 ○ '17. 6. : 파형강판 설치완료 ○ '17. 9. : 파형강판 라이닝 보강완료 ○ '17.12. : 하부 지하차도 개통 ○ '18. 5. : 중앙버스전용차로 완료 ○ '19.11. : 공사 준공	토목부
11	중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사	○ 위치 : 노원구 월계역 ~ 하계동 청구아파트(중랑천) ○ 사업개요 - 보행교량 : 폭4.5m 연장191m ○ 공사기간 : '16. 4 ~ '18. 11 ○ 소요예산 : 118억원	○ '07. 5. : 학여울 청구APT 인도교 설치 청원 ○ '16. 4. : 계약 및 착공 ○ '16. 4. : 주민설명회 개최 - 월계역사 연장 민원사항 제출 - 당초 191m → 261m 연장 ○ '17.1.~12 : 월계역사 연장 실시설계 ○ '17.12 : 상판거치 완료(191m) ○ '18.5.1 : 청구아파트~월계역공영주차장 개통 완료 ○ '19.04. : 월계역사 연장개통 및 준공	토목부
12	올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사	○ 위치 : 올림픽대로 ~ 서울교 남단 ~ 여의대로 축 ○ 사업개요 - 진입램프 설치 폭6.4m, 연장 712.6m (교량:235m,옹벽:477.6m), 올림픽대로 이설 980m ○ 공사기간 : '16. 11 ~ '18. 11 ○ 소요예산 : 137억원	○ '12. 4. ~ '15.12. : 기본 및 실시설계 ○ '16. 7. : 재투자심사 완료 ○ '16.11. : 공사 계약 ○ '17. 2. : 하천점용허가 및 공사 착공 ○ '18.07. : 진입램프 교각 구체 시공 ○ '19.09. : 공사 준공	토목부
13	장지지하차도~동부간선도로간 연결로 설치공사	○ 위치 : 서울 송파구 장지동 ○ 사업개요 - 진출입 램프 신설 : · 진입연결로(Ramp-B) L=638m · 진출연결로(Ramp-B) L=455m ○ 공사기간 : '17. 6. ~ '19. 9. ○ 소요예산 : 365억원	○ '16.12. : 협약체결 (서울시 ⇔ 롯데물산 외 2) ※ 비관리청 사업(공사후 기부체납) ○ '17. 6. : 공사 착공 ○ '18. 5. : 교량 하부공사 완료 ○ '18. 6. : 강교 조립 및 거치 ○ '18. 8. : 교량 상부 슬라브 시공 ○ '19. 5. : 교량 및 하부도로 포장공사 ○ '19.10. : 공사 준공	토목부
14	노들섬 특화공간 조성 토목공사	○ 위치 : 용산구 이촌동 302-146일대(노들섬) ○ 사업개요 - 옹벽보수보강공사(10,137㎡), 보도육교(폭 3.5m, 연장 139m) 설치 ○ 공사기간 : ′17.11.∼′19.11. ○ 소요예산 : 85억원	○ '17.09.18. : 계약심사완료 ○ '17.09.25. : 일상감사완료 ○ '17.10.10. : 공사발주 ○ '17.11.15. : 공사착수 ○ '17.11.22. : 예장동 유스호스텔 앞 지반침하 긴급복구 공사시행 ○ '17.12.27. : 예장동 유스호스텔 앞 긴급복구공사 준공 ○ '18.07. : 노들섬 내 오수관로 시행 ○ '19.11. : 준공	토목부
15	동작대로(연장) 중앙버스전용차로 설치공사	○ 위치 : 과천대로 서울시계~동작대로 방배경찰서 앞 ○ 사업개요 - 중앙버스전용차로 2.8㎞, 정류소 4개소 ○ 공사기간 : ’17. 12. ~ ’18. 10. ○ 소요예산 : 80억원	○ '16. 5. : 사업계획 수립 ○ '16.12. : 기본 및 실시설계 용역 착수 ○ '17. 8. : 교통안전시설 심의 완료 ○ '17.12. : 시설공사 계약 ○ '18. 3. : 공사 착수 ○ '18. 10. : 공사 준공	토목부
16	구로고가차도 철거공사	○ 위 치 : 구로구 가리봉동 140 (남부순환로, 디지털단지5거리 주변) ○ 규 모 : 폭18.5m, 연장 536m ○ 공사기간 : 2018. 8. ~ 2019. 9. ○ 소요예산 : 97억원	○ '16. 8. : 고가차도 관리계획 수립 ○ '17. 4. : 실시설계 착수 ○ '18. 4. : 실시설계 완료 및 공사발주 ○ '18. 8. : 공사착공 ○ '19. 3. : 고가차도 철거 완료 ○ '19. 9. : 준공	토목부
17	세운상가 활성화를 위한 공공공간 조성공사	○위 치 : 종로구 장사동 2-1일대 ○규 모 : 지하1층/지상5층, 연면적 741㎡ 초록띠공원 3,748㎡ 및 플랫폼 쉘 (거점공간) 등 5,194㎡ ○총사업비 : 441억원 ○공사기간 : ‘16.03.~’17.11.	○‘16.03: 공사착수 ○‘16.08: 문화재 정밀발굴조사 완료 ○‘16.09: 발굴유적에 대한 보존방안 회의 ○‘16.10: 문화재청 심의 통과 ○‘17.05: 보행데크 및 철골구조물 설치 완료 ○‘17.06: 청계천 보행교 교량하부철골 설치 ○‘17.09: 개장식 ○‘17.10: 공사준공	건축부
18	마포석유비축기지 재생 및 조성공사	○위 치 : 마포구 성산동 산53=1일대 ○규 모 : 탱크6개소 (재생 5개소, 신축 1개소) 지하3층/지상2층, 연면적 7,256㎡ ○총사업비 : 417억원 ○공사기간 : ‘15.12.~’17.08.	○‘14.02: 친환경 문화공원 조성 추진 계획 ○‘14.10: 설계용역 착수 ○‘15.12: 설계용역 완료 및 공사착수 ○‘16.12: 1차분 공사 준공 ○‘17.08: 임시사용통보 및 3차분 공사 준공 ○‘17.09: 건축공사 및 건설사업관리 용역 준공	건축부
19	서울창업허브 별관 리모델링공사	○ 위치 : 마포구 공덕동 370-4,10호 (구 산업인력관리공단) ○ 사업개요 - 리모델링 : 지상4층, 연면적 5,656㎡, 창업지원시설 ○ 사업기간 : '15.01. ~ '18.02. ○ 사 업 비 : 113억원	○ '15.07. : 공사발주의뢰 ○ ‘15.10. : 설계공모 공고 ○ ‘15.12.~’16.7. : 설계용역 ○ '16.12. : 공사착공 ○ '18.02. : 공사준공	건축부
20	재사용(새활용) 플라자 조성공사	○위 치 : 성동구 자동차시장길 49 ○규 모 : 지하2층/지상5층, 연면적 16,227㎡ ○총사업비 : 499억원 ○공사기간 : ‘15.01.~’17.03.	○‘12.08: 서울재사용플라자 조성계획 ○‘14.10: 설계용역 완료 ○‘15.01: 공사착수 ○‘15.04: 기공식 ○‘17.03: 공사완료 ○‘17.04: 준공검사 및 인수인계	건축부
21	봉제박물관 건립공사	○ 위치 : 종로구 창신4가길 26 ○ 사업개요 - 지하1층, 지상4층, 연면적 499.12㎡ - 주민마당, 팹랩(Fab lab), 기획전시실, 옥상전망대 ○ 사업기간 : '15.08. ~ '18.04. ○ 사 업 비 : 36.7억원	○ '14.12. : 봉제박물관 건립 및 봉제거리 조성계획 수립 ○ '17.08. : 골조공사 완료 ○ '16.11. : 설계용역 완료 ○ '16.12. : 공사착수 ○ '18.02. : 공사준공 ○ '18.04. : 개관식 및 시설물준공통보	건축부
22	서울창업허브 별관 리모델링공사	○ 위치 : 마포구 공덕동 370-4,10호 (구 산업인력관리공단) ○ 사업개요 - 리모델링 : 지상4층, 연면적 5,656㎡, 창업지원시설 ○ 사업기간 : '15.01. ~ '18.02. ○ 사 업 비 : 113억원	○ '15.07. : 공사발주의뢰 ○ ‘15.10. : 설계공모 공고 ○ ‘15.12.~’16.7. : 설계용역 ○ '16.12. : 공사착공 ○ '18.02. : 공사준공	건축부
23	서울혁신파크 1단계 조성공사	○ 위치 : 은평구 통일로 684 ○ 사업개요 - 9,10,15동 12,608㎡ 리모델링 홈베이스 829㎡, 발전기실 111㎡ 증축 ○ 사업기간 : '15.05. ~ '17. 12. ○ 사 업 비 : 298억원	○ '15.05. : 사업의뢰 ○ '16.01. : 설계용역 착수 ○ '16.10. : 설계용역 완료 ○ ‘16.12. : 공사착공 ○ ‘17.04. : 공간 활용계획 변경 시행 요청 ○ ‘17.06. : 외벽 디자인 변경 요청 ○ ‘17.12. : 공사준공	건축부
24	세종대로 일대 역사문화특화공간 조성공사	○ 위치 : 중구 태평로1가 60-6 외 2 ○ 사업개요 - 지하3층, 지상1층, 연면적 2,898㎡ - 주요시설 : 전시장, 광장 등 ○ 사업기간 : '16.10. ~ '18.12. ○ 사 업 비 : 143억원	○ ‘14.10. : 기본계획 수립 ○ ‘15.11. : 설계용역 착수 ○ ‘16.09. : 설계용역 준공 ○ ‘16.10. : 공사 착수 ○ ‘18.12. : 공사준공	건축부
25	홍릉 바이오 의료 R&D 앵커 조성사업 (2단계)	○ 위치 : 동대문구 회기로 산117-3 ○ 사업개요 - 연면적 6,328㎡, 건물 2개동 · 신관동(리모델링) 지하 1층, 지상 5층 · 별관동(증축) 지하 2층, 지상 4층 - 주요시설 : 실험실, 사무실 등 ○ 사업기간 : '15.11. ~ '19. 10. ○ 사 업 비 : 141억원(2단계)	○ ‘15.11. : 사업의뢰 ○ ‘17.11. : 공사(2단계) 착수 ○ ‘17.12. : 설계용역 준공 ○ ‘18.11. : 신관동(리모델링)공사완료 ○ ‘19.10. : 공사준공	건축부
26	북한산성 대남문 해체보수 공사	○ 위치 : 종로구 구기동 산 3-1 ○ 사업개요 - 바닥면적35.24㎡ 높이 약 5.7m ○ 사업기간 : '17. 02. ~ '20. 05. ○ 사 업 비 : 17억원	○ ‘17.02. : 기본계획 수립 ○ ‘17.07. : 설계용역 착수 ○ ‘17.08. : 설계용역 준공 ○ ‘18.08. : 공사 착수 ○ ‘20.05. : 공사준공	건축부
27	시립중랑노인전문 요양원 증축공사	○ 위치 : 중랑구 양원역로 38(시립북부병원내) ○ 사업개요 - 지하1층, 지상5층. 연면적 2,334.37㎡ ○ 사업기간 : '16.04. ~ '19.07. ○ 사 업 비 : 72.8억원	○ '16.04. : 증축계획 방침수립 ○ '16.11. : 설계공모 공고 ○ '17.11. : 설계용역 준공 ○ '17.12. : 건설사업관리 및 공사착수 ○ '19.07. : 공사준공	건축부
28	전태일 노동복합시설 리모델링 공사	○ 위치 : 종로구 청계천로 105 (관수동 152-1) ○ 사업개요 - 지상 6층, 연면적 1,913.53㎡ ○ 사업기간 : '16.09. ~ '19.03. ○ 소요예산 : 43억원	○ '16.09. : 리모델링 방침수립 ○ '17.05. : 설계공모 공고 ○ `17.11. : 설계용역 준공 ○ `18.02. : 건설사업관리 및 공사착수 ○ `19.03. : 공사준공	건축부
29	창동역 고가하부 문화예술공방 조성공사	○ 위치 : 도봉구 창동역 1번출구 앞 고가하부 ○ 사업개요 - 규 모 : 지상1층(3동), 연면적 123㎡, 보도(도로) 포장 등 ○ 사업기간 : '17.01. ~ '18.12. ○ 사 업 비 : 12억원	○ '17.04. : 사업계획수립(동북권사업단) ○ '17.06. : 설계용역 착수 ○ '17.12. : 공사발주 및 착공 ○ ‘18.12. : 공사준공	건축부
30	노들섬 특화공간 조성공사	○ 위치 : 용산구 이촌동 302-6일대(노들섬) ○ 사업개요 - 지상3층, 연면적 9,349㎡ ○ 사업기간 : ‘17.10. ~ ’19.11. ○ 사 업 비 : 519.2억	○ `17.07. : 설계용역 완료 ○ `17.10.26. : 공사 착수 ○ `19.05.31. : 2차공사 준공 (서측구간 : 공연장 등) ○ `19.09.04. : 동측 예비준공검사 ○ `19.10.28. : 동측 사용승인 (다목적시설, 군사시설) ○ `19.11.30. : 공사 준공	건축부
31	돈화문 민요박물관 건립공사	○ 위치 : 종로구 와룡동 5-9외 1필지 ○ 사업개요 - 지하2층/지상1층, 연면적 1,384.82㎡ ○ 사업기간 : ‘18. 01. ~ ’19.08. ○ 사 업 비 : 91억	○ `17.10. : 설계용역 완료 ○ `18.01.01. : 공사 착수 ○ `19.02. : 골조공사 완료 ○ `19.07. : 예비준공검사 ○ `19.08.31. : 공사 준공 ○ `19.11.21. : 개관	건축부
32	한양도성 인왕·백악구간 성벽 보수공사	○ 위치 및 규모 : ① 인왕구간(위치 : 종로구 부암동 산22-1) : 성벽 붕괴구간 및 주변부 42.2m, 여장 45.7m 복원 ② 백악구간(위치 : 성북구 성북동 산25-1) : 성벽 붕괴구간 5.8m, 여장 해체·보수8.7m ○ 사업기간 : ‘17.12. ~ ’19.12. ○ 사 업 비 : 26.7억	○ `17.07. : 설계용역 완료 ○ `17.12.08. : 공사 착수 ○ `19.04. : 백악구간 예비준공검사 ○ `19.07. : 여장 및 옥개석쌓기 완료 ○ `19.11. : 인왕구간 예비준공검사 ○ `19.12. : 공사 준공	건축부
33	남부도로사업소 청사신축공사	○ 위치 : 금천구 시흥동 961-5외 8필지 ○ 사업개요 - 지하1층, 지상5층, 연면적 5,360.71㎡ ○ 사업기간 : ‘12.04 ~ ’20.04 ○ 공사기간 : ‘17.11 ~ ’20.04 ○ 사 업 비 : 186억원	○ '15.04. : 설계용역 발주 ○ '17.07. : 설계용역 완료 ○ '17.10. : 건설사업관리용역 업체 선정 ○ '17.11. : 공사착수 ○ ‘20.04. : 공사준공	건축부
34	북부장애인복지관 증축공사	○ 위치 : 노원구 덕릉로 70가길 92 ○ 사업개요 - 사회복지시설 - 지상3층 1개층 연면적 1,191㎡ 증축 (기존 지하1층/지상2층 연면적 3,159㎡) ○ 공사기간 : ‘18.05. ~ ’19.10. ○ 총사업비 : 38.2억원	○ ′17.05. : 설계용역 완료 ○ ′18.05. : 공사 착수 ○ ′19.10. : 공사 준공	건축부
35	낙원상가 공용공간 개선 저층부 건축공사	○ 위치 : 종로구 낙원동 288 외 78 ○ 사업개요 - 가설건축물 - 지상1층 2개소, 연면적 634㎡ 신축 ○ 공사기간 : ‘19.05. ~ ’20.03. ○ 총사업비 : 8.3억원	○ ′18.10. : 설계용역 완료 ○ ′19.05. : 공사 착수 ○ ′20.03. : 공사 준공	건축부
36	서울기록원 건립공사	○ 위치 : 은평구 녹번동 산1-61외 2 ○ 사업개요 - 지하2층, 지상5층, 연면적 15,003㎡ ○ 사업기간 : '14.07. ~ '18.12. ○ 사 업 비 : 498억원	○ '14.09. : 건립계획 수립 및 설계공모 ○ '14.12. : 사업의뢰(행정국 서울기록원) ○ '15.01. : 설계용역 착수 ○ ‘15.11. : 설계용역 완료 ○ ‘16.04. : 공사착공 ○ ‘18.12. : 공사준공	건축부
37	시립노원청소년직업 체험센터 신축공사	○ 위치 : 노원구 하계동 224-9 외 3 ○ 사업개요 - 규 모 : 지하1층/지상3층, 연면적 3,259.21㎡ ○ 사업기간 : '15.07. ~ '19.04. ○ 사 업 비 : 84억원	○ '15.06. : 사업의뢰(청소년담당관) ○ '16.01. : 설계용역 착수 ○ '16.09. :도시계획시설결정 완료 ○ '17.02. : 경관심의 완료 ○ ‘17.06. : 설계경제성심의 완료 ○ ‘17.08. : 설계용역 준공 ○ ‘17.12. : 공사착공 ○ '19.04. : 공사준공	건축부
38	시민생활사박물관 리모델링공사	○ 위치 : 노원구 공릉동 622 ○ 사업개요 - 규 모 : 3개동, 지하1층/지상5층, 연면적 6,919.78㎡ ○ 사업기간 : '15.08. ~ '19.05. ○ 사 업 비 : 192억원	○ '15.08. : 사업의뢰(박물관과) ○ '15.12. : 설계공모 공고 ○ '16.04. : 설계용역 착수 ○ '17.11. : 설계용역 완료 ○ '17.10. : 공사착공 ○ '19.05. : 공사준공	건축부
39	북부법조단지 환경개선공사	○ 위치 : 노원구 공릉동 622 ○ 사업개요 - 규 모 : 지하1층 증축, 총 사업면적 8,254㎡ (보행로, 차로, 조경) ○ 사업기간 : '15.08. ~ '19.07. ○ 사 업 비 : 62억원	○ '15.08. : 사업의뢰(박물관과) ○ '15.12. : 설계공모 공고 ○ '16.04. : 설계용역 착수 ○ '17.11. : 설계용역 완료 ○ '18.03. : 공사착공 ○ '19.07. : 공사준공	건축부
40	서울소방해정타운 건립공사	○ 위치 : 은평구 진관동 110-26일원 ○ 사업개요 - 지하 2층,지상 15층 연면적 25,174㎡ ○ 사업기간 : '14.01. ~ '19.12. ○ 소요예산 : 760억원	○ `12.09. : 기본계획 수립 ○ `15.11. : 설계용역 완료 ○ `16.05. : 공사착공 ○ `17.06.. : 1차 준공 ○ '12.09. : 추진계획 수립 ○ '15.11. : 설계용역 완료 ○ '16.05. : 공사착공 ○ '19.07. : 1단계 공사 준공 ○ '19.12. : 2단계 공사 준공	건축부
41	탄천물재생센터 복개공원(4단계) 공사	○ 위치 : 강남 일원동 580번지 제2처리장 상부 ○ 사업개요 - 구조물 복개 A=33,978㎡ ○ 사업기간 : '13. 3 ~ '17.4. ○ 사 업 비 : 359억원	○ '12.12 : 시설공사 입찰공사 및 감리용역 계약 ○ '13.10 : 공사착공 ○ '17.04 : 준공	방재시설부
42	경춘선 폐선부지 공원조성공사 (2단계)	○ 위치 : 경춘철교~산업대3길(과기대) 고가철교 ○ 사업개요 - 공원조성 : 연장 1.1km - 조성면적 : 53,860㎡ ○ 공사기간 : '15. 10 ~ ’17. 4 ○ 소요예산 : 59억원	○ '15.10. : 공사착공 ○ ‘16.07. : 경춘철교 정비완료 (L-176m) ○ ‘17.04. : 공사준공 ○ ‘17.05. : 인수인계 완료	방재시설부
43	마포석유비축기지 주차장공원화 사업	○ 위치 : 마포구 성산동 661번지 일대 ○ 사업개요 - 공원조성 A=35,212㎡ ○ 사업기간 : '16. 7 ~ '17. 6. ○ 사 업 비 : 43억원	○ '16.07. : 공사착공 ○ ‘17.04. : 사회적기업(문화 놀이짱 포함) 이전완료 ○ ‘17.06. : 공사준공 ○ ‘17.07. : 인수인계중	방재시설부
44	도림천 상류 관악산 저류조 설치공사	○ 위치 : 관악구 관악로1 서울대학교 내·외 및 주변 ○ 사업개요 - 빗물저류조 65,000㎥ ○ 공사기간 : '12. 1 ~ '17. 7 ○ 사 업 비 : 583억원	○ '12.01. : 공사 착공 ○ '14.06. : 서울대내 (버들골, 공대폭포) 저류조 설치 완료 ○ '17.05. : 서울대 정문 앞 저류조 설치 완료 ○ '17.07.15 : 공사준공	방재시설부
45	합정외1개소 빗물펌프장 증설공사	○ 위치 : 마포구 모래내로 84 마포구 토정로 8-3 ○ 사업개요 - 중동펌프장 증설 210㎥/분 - 합정펌프장 증설 160㎥/분 ○ 사업기간 : '13. 1 ~ '17. 7. ○ 사 업 비 : 119억원	○ '13.01. : 공사착공 ○ ‘15.05. : 중동펌프장 완료 ○ ‘17.07. : 합정펌프장 완료 ○ ‘17.08. : 인수인계 완료	방재시설부
46	잠원2빗물펌프장신설공사 (자연방류관로 부분)	○ 위치 : 강남구 압구정로 현대고~신사공원~한강 ○ 사업개요 - BOX부설(2@3×2.5m L=640m) 수문2개소, 가동보1개소, 신사공원 및 한강공원 복구 ○ 공사기간 : '13. 01 ~ '17. 09 ○ 사 업 비 : 173억원 ※당초 펌프장을 계획하였으나 주민반대로 대안인 자연방류관로 설치(한강수위 10.1m이하시 30년 빈도 대응 가능)	○ '13. 1.: 공사 착공 ○ '14.2.: 펌프장 건설반대 공사중단 ○ '14. 3~`15. 7월 : 시장님 면담, 국회의원정책간담회, 대안마련 ○ '15.10. : 공사재개 ○ '17.6. : 관로공사 완료 ○ '17.9. : 공사준공 ○ ‘17.12. : 인수인계중	방재시설부
47	마곡지구내 재생수 공급시설 설치공사	○ 위치 : 강서구 마곡동 91번지 (서남물재생센터 內) ○ 사업개요 - 재생수 처리시설 20,000톤/일 ○ 공사기간 : '11. 11 ~ '17. 7 ○ 사 업 비 : 177억원	○ '09. 2. : 기본 및 실시설계 완료 ○ '11. 4. : 투자심사 완료 ○ '11.11. : 공사 착공 ○ '15.12. : 기계, 전기분야 공사완료 ○ '17. 1~6. : 종합시운전 ○ '17. 7. : 공사준공 ○ '17. 8. : 인수인계 완료	방재시설부
48	양재대로 녹지연결로 조성공사	○ 위치 : 강남구 개포동 1274일대(달터공원~구룡산) ○ 사업개요 - 녹재열결로 폭20m, 연장 54m, 수목식재 등 ○ 공사기간 : '13. 03 ~ '17. 10 ○ 사 업 비 : 68억원	○ '16.02. : 실시설계 완료 ○ '16.06 : 공사착공 ○ '17.05 : 교량거터 가설완료 ○ '17.10 : 조경공사 완료 ○ '17.11 : 개통 및 공사 준공 ○ '17.12 : 인수인계서 제출	방재시설부
49	경춘선 폐선부지 공원조성공사 (2단계)	○ 위치 : 경춘철교~과기대 고가철교 ○ 사업개요 - 공원조성 : 연장 1.1km - 조성면적 : 53,860㎡ ○ 공사기간 : '15. 10 ~ ’17. 4 ○ 소요예산 : 59억원	○ '15.10. : 공사착공 ○ ‘16.07. : 경춘철교 정비완료 (L-176m) ○ ‘17.04. : 공사준공 ○ ‘17.05. : 인수인계 완료	방재시설부
50	중랑재생센터 고도처리 및 시설 현대화사업(T/K)	○ 위치 : 성동구 송정동 73번지 (중랑물재생센터 內) ○ 사업개요 - 고도처리개량 : 88만톤/일 (존치 10만톤 포함) - 시설현대화 : 25만톤/일 - 하수도과학관 : 1,800㎡ ○ 공사기간 : '09. 2 ~ '18. 6 ○ 사 업 비 : 3,603억원	○ '09. 8. : 본공사 착공 ○ '12.12. : 고도처리 개량공사 ○ ‘13. 5. : 용수공급시설 준공 ○ '16. 9. : 종합시운전 착수 ○ '17. 2. : 종합시운전 중단보고 ※ 사유 : 총질소(T-N) 보증수질 20㎎ /L 초과 예상 등 ○ '17. 7. : 여재교체 완료 ○ '17.12. : 종합시운전 ○ '18. 6. : 준공	방재시설부
51	서초역～방배로간 도로개설공사	○ 위치 : 서초구 방배동 내방역～ 서초동 서초역(대법원앞) ○ 사업개요 - 도로개선 폭 40m(6차로), 연장 1,280m(터널 355m 포함) ○ 사업기간 : '07. 11 ~ '19. 01 ○ 사 업 비 : 1,648억원	○ '06.06. : 도시계획시설(도로) 사업 실시계획 고시 ○ '12.04. : 용역 계약 ○ '14.02. : 설계완료 ○ ‘15.10. : 공사계약 및 착공 ○ ‘19.05. : 공사준공	방재시설부
52	양평1유수지 CSOs 저류조 설치사업	○ 위치 : 영등포구 양평동3가 57번지 (양평빗물펌프장 內) ○ 사업개요 - CSOs 저류조: Q=46,000㎥ ○ 공사기간 : '16. 12. ~ '19. 11. ○ 사 업 비 : 367억원	○ '16. 3. : 기본 및 실시설계 완료 ○ '16.10. : 환경부 설계승인 ○ '16.12. : 공사착공 ○ '18. 7. : 저류조 구조물 설치 ○ '19.10. : 상부 생태체육시설 설치 ○ '19.11. : 공사준공	방재시설부
53	신월 빗물 저류배수 시설 등 방재시설 확충 공사(T/K)	○ 위치 : 양천구 가로공원로~신월동~ 목동유수지 ○ 사업개요 - 빗물저류배수터널 : D=5.5~10.0m, L=4.7km - 수직구 6개소, 재난체험관 및 목동1펌프장 재설치(Q=840㎥ /min) ○ 사업기간 : '13. 5. ~ '20. 5 ○ 사 업 비 : 1,390억원	○ '12. 7 : 턴키 발주 ○ '13. 5 : 공차착공 ○ '17. 7 : 전구간 터널관통 ○ '19. 7 : 빗물저류배수시설 운영 ○ '20. 5 : 공사준공	방재시설부
54	강남역 주변 역경사관로 개선공사	○ 위치 : 강남역 8번출구 주변 ○ 사업개요 - 개선□2.0×3.0m L=71m - 엘리베이터, 에스켈이터 및 기계설비 재설치 - 지하상가 재배치 및 지장물 이설등 ○ 공사기간 : '16. 10 ~ '18. 5 ○ 사업비 : 131억원(이설비37억포함)	○ '16.06. : 역경사관로 개선방안 수립 ○ `17.03 : 본 공사 착수 ○ `17.06 : 관로개선(통수) ○ `17.12 : 8번출입시설(E/V, E/C) 토목구조물 설치 ○ '18.05 : 공사준공	방재시설부
55	청계천 생태환경 개선공사(2단계)	○ 위치 : 청계천(L=8.12km) ○ 사업개요 - 여울보 및 징검다리 12개소 - 저수호안 사행 283개소 개선 등 ○ 공사기간 : '16. 08 ~ '18. 02 ○ 사 업 비 : 34억원	○ '16.12. : 홍수방지벽 신설완료 ○ '17.05. : 제2진출입경사로 신설완료 ○ '17.10 : 제1진출입경사로 신설완료 ○ '17.12.: 하상 식생방틀 시공 중 ○ '18.02 : 공사준공	방재시설부
56	남부도로사업소 제설전진기지 조성공사	○ 위치 : 서초구 우면동 446-5일대 (강남순환도로 선암교 하부) ○ 사업개요 : 부지조성 6,459㎡ - 제설전진기지 및 직원대기실 등 ○ 사업기간 : '17. 09 ~ '18. 03 ○ 사 업 비 : 41억원	○ '16.12. : 장비보관소 부지변경 계획 수립(부시장 방침) ○ '17.03. : 투자심사 ○ '17.05. : 디자인심의 ○ '17.09. : 공사 착공 ○ '17.10. : 가설건축물 축조신고 승인 ○ '17.12. : 건축물 철골공사 ○ '18.06 : 공사준공	방재시설부
57	경춘선 폐선부지 공원조성공사(3단계)	○ 위치 : 노원구 경춘선 폐선부지 ○ 사업개요 - 공원조성 : 연장 2.9km - 조성면적 : 85,038㎡ ○ 공사기간 : '17. 1 ~ '18. 6 ○ 소요예산 : 56억원	○ '17.01. : 공사착공 ○ '17.10. : 구 화랑대역사구간 준공 - 연장 2.5km, 면적 67,538㎡ ○ '17.11. : 구 화랑대역사구간 개원 - 시장, 국회의원 등 1,000여명 참석 ○ '18.06. : 잔여구간(0.4km)공사준공	방재시설부
58	돈의문 박물관마을 수직정원 조성공사	○ 위 치 : 종로구 새문안로 37번지 일대 ○ 사업개요 - 수직정원 552㎡, 옥상녹화 170㎡, - 온실 77.74㎡ ○ 공사기간 : ’19.11.~’20.06 ○ 소요예산 : 1,155백만원	◦18.07. : 시장요청사항(조경과) ◦18.12. : 설계용역 착수(도공단) ◦19.08.: 설계용역 준공 ◦19.10. : 공사발주 ◦19.11.: 공사착공 ◦19.12.: 지장물(체험관) 이전완료 ◦19.12.: 가설공사 착수(실 착공) ◦20.06 : 공사 준공	방재시설부
59	우이신설 도시철도 민간투자사업	○ 위 치 - 강북구 우이동~동대문구 신설동역 ○ 규 모 - 연장11.4㎞,정거장 13개소, 차량기지 1개소 ○ 기 간 : ’09.09. ~ ’17.08. - 개통일 : ´17.09.02 ○ 총사업비 : 8,889억원 (재정 : 4,142, 민자 : 4,747)	○ ’09.04. : 실시협약 체결 ○ ’09.09. : 공사 착공 ○ ’09.09. : 실시계획승인 및 공사착수 ○ ’15.11. : 토목본체 구조물․궤도 부설․차량반입 완료 ○ ’17.03. : 자금재조달 금융약정 체결 (사업시행자↔대주단) ○ ’17.04. : 타인자본 3,242억원 인출 ○ ’17.05. : 시설물 검증시험 완료 ○ ’17.07. : 철도종합시험운행 (영업시운전) 완료 ○ ’17.08. : 공사 준공 ○ ’17.09. : 개통	도시철도 사업부

○ 추진중

구분	건 명	사업내용(개요)	추 진 현 황	추진부서
1	월드컵대교 건설 공사	○ 위치 : 마포구 상암동 ～ 영등포구 양평동 ○ 사업개요 - 폭 6차로(B=31.4m), 연장 1.98km, ･ 주경간 855m(비대칭복합사장교 540m + 강박스거더 315m) ○ 공사기간 : '10.3 ~ '20.8 (준공기한 변경예정 '21.12) ○ 소요예산 : 3,550억원	○ '10. 3. : 공사 착공 ○ '14.12. : 수상구간 교각(15기)시공 ○ '17.12. : 북단 연결로, 교량상부공(강교가설) 및 사장교 주탑 시공 ○ '18.12. : 강교 가설 및 주탑부 시공완료 ○ '20. 6. : 남단 연결로 및 접속교 시공 중 ○ '20. 12. : 본선 개통 ○ '21. 12. : 전구간 개통	토목부
2	서부간선지하도로 민간투자사업 (2개공구)	○ 위치 : 영등포구 양평동(성산대교 남단) ~ 금천구 독산동(금천IC) ○ 사업개요 - 소형차 전용도로(폭4차로, L= 10.33km) 터널:7.9km, 개착BOX : 1km, 토공 및 U-Type : 1.43km ○ 공사기간 : '16.03 ~ '21.08 ○ 소요예산 : 5,200억원 - '07.7월 불변가 (민간자본 3,820억원, 시비 1,380억원)	○ '07.12. : 민간투자사업 제안서 제출 ○ '13.11. : 기본설계 건설기술심의 완료 ○ '15. 3. : 실시협약 체결 ○ '15.12. : 실시계획 승인 ○ '16. 3. : 공사착공 ○ '16. 8. : 환기구 반대 민원으로 인한 공사 중단 ○ '16.12. : 환기방식 변경(내부정화) 방침 ○ '17. 2. : 공사재개 ○ '20. 3. : 본선터널 굴착완료 ○ '20. 4. : 공사기간 변경('21.2.→'21.8.) (행정2부시장 방침 제111호) ○ '21. 8. : 준공예정	토목부
3	제2자유로 종점부(난지도길) 입체화공사	○ 위치 : 마포구 상암월드컵경기장 사거리 일대 ○ 사업개요 - 지하차도 신설(폭4차로, 연장540m) - 도로확폭 (1개차로 582m) ○ 공사기간 : '19. 8 ~ '22.1 ○ 소요예산 : 432억원	○ '12.12.26. : 파주운정3지구 광역교통 개선대책 확정(LH-720억원 부담) ○ '17.01.31. : 기본설계 완료 ○ '18.05.31. : 실시설계 완료 ○ '18.09.20. : 투자심사 통과 ○ '18.11.30. : 건설사업관리용역 계약 ○ '19.04.18. : 공사입찰 공고 ○ '19.04.29. : 소규모 환경영향평가서 협의 완료 ○ '19.08.01. : 시설공사 계약 및 착공 ○ '20.04. : 지장물 이설 완료 ○ '22.01. : 준공 예정
4	월드컵대교~서부간선도로 직결램프 설치공사	○ 위치 : 영등포구 양평동 일원(성산대교 남단) ○ 사업개요 - 연결로4개소,1차로, 폭=5.75~9m, 총연장=1,622m(교량 L=652.2m) ○ 공사기간 : '19. 1 ~ '20.12 ○ 소요예산 : 257억원	○ '18.04. : 설계착수 ○ '18.10. : 설계VE, 건설기술심의 ○ '18.11. : 실시설계 완료 ○ '18.12. : 공사발주 ○ '19.01. : 공사착공 ○ '19.03.~08. : 지장물 조사 및 측량 ○ '19.09.~12 : 교량 기초 및 기둥 시공 ○ '20.03.~06 : 교량 기초 및 기둥 시공 ○ '20. 12. : 개통 및 준공	토목부
5	율곡로(창경궁앞) 도로구조 개선사업	○ 위치 : 종로구 권농동 8(창덕궁 돈화문) ～ 종로구 원남동 166(원남동 사거리) ○ 사업개요 - 도로확장 폭 28.2m～30.7m(6차로), 연장 810m ･ 지하차도 설치 연장 320m ○ 공사기간 : '10. 10 ~ '21. 6 ○ 소요예산 : 854억원	○ ’10. 9. : 공사계약 및 착공 ○ ’15. 2. : 돈화문 월대앞 도로선형 변경 시행 ○ ’16. 1.~10. : 파형강판 구조안정성 검토 ○ ’16.11. : 사업계획변경조정위원회 심의 ○ ’18. 4. : 창경궁측 광화문방향 2개차로 개통 ○ ’18. 5~ 7. : 중앙기둥 기초 시공 ○ ’18. 8.~’19.11.: 구조물 상부 아치 제작 ·시공 및 토사 반입 예정 ○ ’21.6. : 준공예정	토목부
6	남부순환로(개봉1동 사거리 주변) 평탄화 공사	○ 위치 : 남부순환로 오류IC ～ 매봉 초등학교간 ○ 사업개요 - 도로개선 폭 30m(6차로), 연장 1,100m ･ 오류IC교 확장 : 폭32m → 38m, (차로수 :5차로→8차로) 연장38m ○ 공사기간 : '16. 3. ~ '22.12. ○ 사 업 비 : 438억원	○ '16. 3. : 공사착공 ○ '17. 4. : 오류IC 우회도로 개통 ○ '18. 6. : 오류IC 기존교량 철거 가시설 설치 ○ '18. 9. : 오류IC 교량설치 예정 ○ '22.12. : 준공예정	토목부
7	창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업	○ 위치 : 돈화문로, 서순라길, 낙원상가 ○ 사업개요 - 가로개선(폭 6.5m~22m, 연장 1,620m) ○ 공사기간 : '18. 12. ~ '20. 8. ○ 사 업 비 : 163억원	○ '18.12. : 시설공사 계약 ○ '19. 4. : 건설사업관리용역 계약 ○ '19. 5.~8. : 공사중지( 종로구청 요청사항 반영) ○ '19. 8.~11.: 종로구청 요청사항 반영 재설계 및 낙원상가 등 설계변경 없는 공사 재착수 ○ '20. 3. : 낙원상가 공사 완료 ○ '20. 8. : 돈화문로 차도부 포장 ○ '20. 8. : 준공예정
8	고덕교 확장 및 고덕 보도교 설치공사	○ 위치 : 강동구 강일동 599일원 ○ 사업개요 - 고덕교 확장(4→6차로), 캔틸레버 보도2개소(고덕교 양측) ○ 공사기간 : '19. 1. ~ '20. 12. ○ 사 업 비 : 35억원	○ '18. 9. : 설계완료 ○ '19. 1. : 공사계약 ○ '19. 4.~6. : 교대위치 지하 지장물 다량 발견 및 유관기관 이설협의 ○ '19. 8.~9. : 교대위치 위치변경 검토 ○ '19. 12. : 보도교 공법 설계변경 ○ '20.2.~5. : 통신관로 이설협의 및 공사 ○ '20.5. : 본공사 실착공	토목부
9	잠실대교 남단IC 연결체계 개선사업	○ 위치 : 송파구 잠실대교 남단 IC ○ 사업개요 - 연결로 구조개선 - 폭 1차로, 연장 = 3.66km(지하차도 300m, 교량 33m) ○ 공사기간 : '20. 8. ~ '25.8. ○ 사 업 비 : 436억원	○ '17. 8. : 실시설계용역 착수 ○ '19. 5. : 실시설계 VE 완료 ○ '19. 9. : 건설기술심의 ○ '20. 4. : 실시설계 용역 완료 ○ '20. 6. : 투자심사 완료 ○ '20. 7. : 발주 시행 예정	토목부
10	천호대교 남단IC 연결체계 개선사업	○ 위치 : 송파구 천호대교 남단 IC, 토평동 781-16번지 ~교문동 611-6번지 ○ 사업개요 - 연결로 구조개선 및 도로확장 - 폭 1차로, 연장=2.95km(지하차도 194m 포함) - 도로확장(중로3-26호선) 폭=6m→12m, 연장 =220m ○ 공사기간 : '20. 8. ~ '25.8. ○ 사 업 비 : 369억원	○ '17. 8. : 실시설계용역 착수 ○ '19. 5. : 실시설계 VE 완료 ○ '19. 9. : 건설기술심의 ○ '20. 4. : 실시설계 용역 완료 ○ '20. 6. : 투자심사 완료 ○ '20. 7. : 발주 시행 예정	토목부
11	도시고속도로 연결램프(화랑로) 진출입 설치공사	○ 위치 : 중랑구 북부간선도로 묵동IC내 ○ 사업개요 - 진입램프 B=5m, L=640.8m - 진출램프 B=5m, L=838.5m ○ 공사기간 : '19.5.~22.10. ○ 사 업 비 : 275억원	○ '15. 12. : 실시설계 완료 ○ '19. 5. : 공사계약 및 착공 ○ '19. 6.~7. : 공사시행 전 주민설명회 개최(중랑구, 노원구) ○ '19.8. : 집단민원 발생(중랑구) ○ '19.9. : 사업계획 변경(도로계획과) 및 공사중지 ○ '20. 1. : 보완설계용역 시행 ○ '20. 9. : 보완설계용역 완료 ○ '20. 10. : 공사 시행	토목부
12	신림~봉천터널 도로건설공사 (2개공구)	○ 위치 : 관악구 신림동 1667-9 ～ 봉천동 231-1 ○ 사업개요 - 도로건설 5.58km(폭원 왕복 4차로) ○ 공사기간 : '10. 10 ~ '23. 12 ○ 소요예산 : 5,507억원	○ '09.10. : 일괄입찰방식 도급계약 ○ '10. 4. : 도시계획시설(도로) 결정 ○ '10. 7. : 운영방안검토(시장방침) - 유료화→무료화 ○ '10.10. : 공사 계약 및 착공 ○ '14. 8. : 시의회 출구 이전 청원 접수 및 채택 ○ '15.11. : 시의회 입구 이전 청원접수 및 채택 ○ '17.12. : 준공기한 연기 - ‘17.12.31.→ ’20.12.31. ○ '19. 4. : 준공기한 연기 - ‘20.12.31.→ ’23.12.31. ○ '19.10. : 2공구 터널 굴착 완료 ○ '20. 6. : - 1공구 : 터널굴착 및 상수도이설 중 지하차도 진출입부 변경 설계중 - 2공구 : 터널 공동구, 방수 공사 및 라이닝 철근 조립 작업 중 ○ '23.12. : 준공 예정	토목부
13	성산대교(북단) 성능개선공사	○ 위치 : 서울시 마포구 망원동 (내부순환로) ○ 사업개요 - 접속교 B=27m, L=212m - 램프 2개소 B=10.5m, L=100m - 구조물 보수․보강, 슬래브 교체, 가교설치 ○ 공사기간 : '17. 3 ~ ’20. 09 ○ 소요예산 : 305억원	○ ′17. 3. : 공사착공 ○ ′18. 11. : 가교 개통 ○ ′19. 10. : 교량바닥판 교체 완료 (양화방향) ○ ′20. 6. : 교량바닥판 교체 완료 (성산방향) ○ ′20. 6. : 가교 철거 중 ○ ′20. 9. : 준공 예정	토목부
14	성산대교(남단) 성능개선공사	○ 위치 : 서울시 영등포구 양화동 (서부간선도로) ○ 사업개요 - 접속교 B=27m, L=362m - 램프 4개소 B=8.9~15m, L=650m - 구조물 보수․보강, 슬래브 교체, 가교설치 ○ 공사기간 : '18. 1 ~ ’20. 12 ○ 소요예산 : 291억원	○ ′18. 1. : 공사착공 ○ ′20. 3. : 가교 개통 ○ ′20. 6. : 교량바닥판 교체 완료 (1단계) ○ ′20. 7. : 교량바닥판 교체 완료 (2단계) ○ ′20. 8. : 교량바닥판 교체 완료 (3단계) ○ ′20. 12. : 준공 예정	토목부
15	올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선 공사	○ 위치 : 송파구 풍납동 일대 ○ 사업개요 - 램프신설 : L=1,383m(교량 446m 포함) - 램프이설 : L=1,309m(교량 139m 포함) - 올림픽대로 이설 : 하남방향(L=1.21Km), 김포방향(L=1.46Km) ○ 공사기간 : '16. 4 ~ '21. 12 ○ 소요예산 : 507억원	○ '12.3.~‘13.2. 타당성조사 및 기본계획 ○ '13. 5.~ ‘15. 6 : 기본 및 실시설계 ○ '16. 3. : 시설공사 계약 ○ '17. 4. : 시설공사(1차)준공 ○ '17.12. : 시설공사(2차)준공 올림픽대로(김포) 교통전환 ○ '18.12. : 시설공사(3차)준공 Ramp-J1,J2,E교 하부공 완료 ○ '19.12. : 시설공사(4차)준공 Ramp-J1, J2교 슬라브 완료 ○ '20.03. : 준공기한 연기 - ‘20.03.05.→ ’21.12.31. ○ '20.06. : Ramp-J2교(하남) 하부공 시공중 올림픽대로(김포,하남) 이설 작업 중 ○ '21.12. : 준공 예정	토목부
16	신림공영차고지 (저류조 포함) 건설공사	○ 위치 : 관악구 신림동 140-2일대 ○ 사업개요 - 주차장(버스101대, 지하1층 56대+지상45대) - 램빗물저류조(V=35,000m3) ○ 공사기간 : '18. 10 ~ '21. 9 ○ 소요예산 : 664억원	○ '10.07.21. : 공영차고지 추가 조성 계획 수립 ○ '16.09.29. : 도시계획시설사업 실시계획인가 고시 ○ '18.09.04. : 공사계약 ○ '19.05. : 무단점유자 명도소송 ○ '19.09.16. : 매장문화재 지표조사 실시 ○ '19.10.18 : 매장문화재 표본조사 ○ '19.11. : 건설, 소각폐기물 반출 ○ '20.06. : 흙막이 가시설 설치 및 암 발파 ○ '21.09. : 준공 예정	토목부
17	개봉철도고가 성능개선공사	○위치 : 서울시 구로구 개봉동 235 [남부순환도로상 개봉철도고가 ] ○사업개요 : 바닥판,거더교체 및 가교설치 바닥판교체 면적 3,292,m2 거더교체 54본 가교설치 및 철거 177m(2차로) ○공사기간 : ‘20.05.~‘21.11 ○소요예산 : 179억원	○ '18.7.~'19.3. : 실시설계 ○ '19. 4. 24. : 공사계약 ○ '19. 5. 3. : 공사착공 ○ '19.5.~'19.9. : 유관기관 협의 - 한국철도공사, 한국철도시설공단, 경찰청 등 ○ '19. 6. 25. : 주민설명회(1회) ○ '19. 7. 8. : 주민설명회(2회) ○ '19. 9. 5. : 철도보호지구내 공사시행 알림(한국철도시설공단 수도권본부) ○ '19. 9. 12. : 가설교량 착공 ○ '19.09~12.: 가교 하부 BENT설치 ○ '20.01.13.: 가교 상부 거더 설치완료 ○ '20.04.27.: 가교 프리캐스트 바닥판 설치완료 ○ '20. 5. 13 : 가설교량 우회도로 개통 ○ '20. 6. 현재 : 본선교량 철거 (오류IC방향)	토목부
18	세종대로 도로공간 재편사업	○ 위치 : 세종대로 사거리~서울역 교차로 ○ 사업개요 : 보행친화공간 재편사업 L=1.55km ○ 공사기간 : '20.7. ~ '20.12. ○ 소요예산 : 181억원	○ '17.11. : 추진계획 수립(보행정책과) ○ '19.10. : 주민간담회 시행(2회) ○ '20. 6. - 가로 숲 조성 및 구역 분할에 따른 보완설계 시행 - 건설사업관리용역 계약 완료 ○ '20. 6. 19. : 공사 발주의뢰(입찰공고중) ○ '20.12. : 준공 예정	토목부
19	동부간선도로 확장 공사 (3개 공구)	○ 위치 : 노원구 월계동(월계1교)～의정부시계 ○ 사업개요 - 도로확장 폭원 : 4→6차로, 연장 6.85Km ○ 사업기간 : '07. 10. ~ '21. 12. ○ 소요예산 : 5,254억원 ※ 기획재정부 총사업비변경 조정 협의 중	○ '10. 6. : 월계1교 램프개통 (의정부, 성수 방향) ○ '14. 3. : 상일보도 육교 설치완료 ○ '17. 4. : 노원진입램프 재설치 완료 ○ '12. 1. : 1공구 경원선 철도이설로 공사일시 중지(‘17.9 공사재개) ○ '19. 9. : 녹천마을 도로확장 완료 ○ '20. 3. : 학여울청구아파트 방음벽 완료 ○ '20. 5. : 구간별 방음벽 설치공사 완료 ○ '20. 7. : 2공구 도봉지하차도 2,700m 시공 중(전체2,990m) ○ '20.08. : 3공구 관리기관 전환 예정 ○ '20.12. : 확장공사 전구간 개통 예정 ○ '21.12. : 준공 예정	토목부
20	천호지하차도 평면화 및 중앙버스전용차로 설치공사	○ 위치 : 천호대교 남단 ~ 강동구 성내동 엘웨딩홀 교차로 ○ 사업개요 - 천호지하차도 평면화 폭 16m, 연장 355m - 중앙버스전용차로 설치 연장 1.2km ○ 공사기간 : '19. 1. ~ '20. 8. ○ 소요예산 : 51억원	○ '14.10. : 천호지하차도 평면화 건의 (강동구 → 서울시) ○ '17. 7. : 사업 추진계획 수립 ○ '18. 5. : 실시설계 완료 ○ '19.1.~ 8. : 천호지하차도 공간활용 방안 검토 ○ '19. 9. : 지하차도 공간활용 별도 사업 시행 결정(도로계획과 방침) ○ '20. 1. : 공사중 교통소통대책 및 유관기관 협의 등 착공 준비 ○ '20. 3. : 교통규제심의 실시 ○ '20. 4. : 공사 실착공 ○ '20. 5. : U-type EPS블록 설치 완료	토목부
21	퇴계로(2단계) 보행친화공간 재편공사	○ 위치 : 퇴계로2가~광희동 사거리 ○ 사업개요 - 보행친화공간 재편사업 연장 1.5km - 차로 폭 축소(6~8 → 4~6차로) ○ 공사기간 : '19. 8. ~ '20. 11. ○ 소요예산 : 100억원	○ '18.4.~18.12. : 기본 및 실시설계 용역 ○ '19.6.~19.8. : 공사 발주 및 착공 ○ '19.11. : 공사착공 ○ '20. 6. : 구간 별 보도 확장공사 시행 중 ○ '20.10. 공사 준공 예정	토목부
22	헌릉로 확장 기본 및 실시설계 용역	○ 위치 : 서초 헌릉IC~강남 내곡IC ○ 사업개요 - 헌릉로 확장 L=1.3km(6→8~10차로) - 연결로 신설 L=0.15km ○ 공사기간 : '21. 3 ~ ’22. 12 ○ 소요예산 :279억원 (공사비219, 보상비52, 설계비8) ※‘20년 예산20억은 보상비 예산임 ‘20년 보상 시행후 ’21년 공사착공예정	○ ′19.03. : 설계용역 착수 ○ ′19.08. : 노선선정 자문위원회 ○ ′19.10. : 주민설명회 ○ ′19.11. : 지역수자원위원회 ○ ′19.12. : 노선선정 확정 ○ ′20.02. : 기본설계 완료 ○ ′20.04. : 설계VE ○ ′20.05. : 공공디자인심의 각 행정절차 ○ ′20.06. : 설계심의 ○ ′20.07. : 설계 용역 준공 ○ ′21.02. : 공사 착공예정~	토목부
23	탄천변 동측도로 확장공사 실시설계	○ 위치 : 송파구 잠실경기장 ∼ 문정동 ○ 사업개요 -폭2차로→4차로, 연장4,900m 주요구조물 : 지하차도 4개소 ○ 설계기간 : '10. 2. ~ '20.12. ○ 소요예산 : 설계비-41억원 ※ 사업예산 : 4,271억원 <기투자심사 : 1,600억 추가사업비 2,671억원은 LIMAC에서 검증중이며 완료후 투자심사 예정)	○ '10.02. : 확장 추진계획 방침 ○ '10.02. : 실시설계용역 착수 ○ '10.07. : 설계자문회의 ○ '10.08. : 주민설명회 개최 ○ '11.10. : 투자심사 (부정적 : 전면지하화) ○ '12.02. : 기본설계안 공람공고 ○ '12.06. : 실시설계 중지 ○ '16.03. : 연결로 사업과 구조개선사업 구분 추진 계획 통보 (도로계획과) ○ '16.04.~'16.12. : 타당성 조사 및 기본계획 용역 ○ '17.02: 사업 기본계획 수립 - 1구간 초록생태길, 2구간 지상도로 정비 ○ '17.02.~'17.09. : 타당성 검증 (한국지방행정연구원) ○ '17.10: 시 투자심사 (조건부 추진) - 1구간 우선 사업추진, 2구간은 지하화 민원해소 대책 및 교차로 도로 용량 증대 방안 마련 등을 고려하여 사업재검토 ○ '18.03. : 1구간 설계 용역 착수 ○ '19.03.: 2구간 타당성조사 및 기본계획 용역 착수 ○ '20.01. : 2구간 기본계획 수립 - 주요 교차로 구간 지하화, 사업구간을 나누어 단계적 건설 추진 ○ '20.01: 2구간 타당성검증 의뢰 (한국지방행정연구원(LIMAC)) ○ '20.04: 2구간 업무약정 체결 (서울시-LIMAC) ○ '20.06월 현재 : 2구간 한국지방행정연구원 타당성 검증 중 ※ 1구간은 기본설계 후 실시설계 준비 중	토목부
24	양재대로 지하차도 기본 및 실시설계 용역	○ 위치 : 강남구 개포동 구룡터널 교차로~일원지하차도 교차로 ○ 사업개요 : 지하차도 신설 및 구조개선 (대모지하차도 신설 L=1174m 일원지하차도 구조개선 L=482m) ○ 용역기간 : '13. 7 ~ '20. 7. ○ 소요예산 : 22억원	○ '13.07. : 용역착수 ○ '16.09. : 시투자심사 반려(2,695억원) ○ '17.08. : 타당성 조사(LIMAC) ○ '17.09. : 투자재심사(1,862억원) <대모 공사 추진, 일원 재검토) ○ '18.04. : 대모지차하도 공사 착공 ○ '18.05. : 일원, 대청 타당성 재조사 ○ '19.10. : 타당성 재조사 완료 <일원 사업변경 추진, 대청보류) ○ ' 20.01. : 일원지하차도 설계 재시행 ○ ' 20.06. : 설계VE 재시행 ○ ' 20.07~08. : 교통심의 및 준공	토목부
25	노들로 구조개선 기본 및 실시설계 용역	○ 위치 : 노들로(영등포구 양화교~동작구 한강대교 남단) ○ 사업개요 : 도로구조 및 시설개선 총연장 8.5㎞ - 8차로 구간 : 양화교~양화대교 남단(B=41m) - 4차로 구간 : 양화대교 남단~한강대교 남단(B=17.5m) ○ 용역기간 : ‘19. 4. ~‘20. 7. ○ 사업비 :121.4억원(20년예산 27.5억)	○ '19.04.22.: 용역착수 ○ '19.05.02.: 착수보고회 개최 ○ '19.05.22.: 현장조사 ○ '19.07.19 : 현황측량 완료 ○ '19.08.02 : 교통량 조사 ○ '19.09.10. : 교통량 분석 ○ '19.09.~10. : 관계기관 협의 및 자료검토 ○ '19.11.26. : 자문회의(노선선정) ○ '19.11.29. : 소규모 환경영향평가, 재해영향평가 착수 ○ '19.12.~'20.01. : 노선자문 조치결과 작성 및 보완 ○ '20.02.~'20.03. : 설계VE(1~3차) ○ '20.04.23. : 경관심의 ○ '20.04.28 : 교통소통대책 자문회의 ○ '20.05.22 : 설계지도점검 ○ '20.05.27 : 건설기술심의 ○ '20.05.28 : 공공디자인 공동심의 ○ '20.06.08 : 소규모재해영향평가 심의 ○ '20.06.15 : 소규모환경영향평가 협의요청 ○ '20.06~07 - 교통규제심의 및 소규모 환경영향평가 보완 - 용역준공	토목부
26	노들남·북 고가차도 철거 기본 및 실시설계	○ 위치 : 동작구 본동 159 일대 ○ 사업개요 : 고가차도 철거 - 노들남고가(폭 8m, 연장 522m) - 노들북고가(폭 7.5m, 연장 461m) ○ 용역기간 : '19. 4 ~ '20. 7. ○ 사업비 : 117억원(‘20년 예산 62.5억)	○ '19.04.05. : 용역 착수 ○ '19.04.29. : 착수보고 ○ '19.06.19. : 중간보고 ○ '19.08.13. : 건설기술심의(1차) ○ '19.11.08. : 실시설계 시행요청(도로계획과) ○ '19.11.18. : 설계경제성(VE) 심의 ○ '19.12.12. : 실시설계 착수보고 ○ '20.02.10. : 교통소통대책 사전협의 ○ '20.02.25. : 건설기술심의(2차) ○ '20.03.25. : 설계지도점검 사전협의 ○ '20.04.16. : 특정기술 선정심사 ○ '20.04.24. : 하천점용허가 사전협의 ○ '20.04.28. : 설계지도점검 ○ '20.05.21. : 교통소통대책 자문회의 ○ '20.05.25. : 건설기술심의(3차) ○ `20.06 ~ 07 - 교통규제심의 및 용역준공	토목부
27	양재고개 녹지연결로 조성사업 기본 및 실시설계	○ 위치 : 서초구 서초동 산30-18일대 ○ 사업개요 - 녹지연결로 폭 10m, 연장 100m ○ 사업기간 : '15. 1.～'22.12. - 설계기간 : '17.10.～'20. 7. ○ 총사업비 : 149억원 - 설계예산 : 5.2억 원	○ '16.10. : 기본계획 용역 ○ '17.06. : 공모 당선작 발표 ○ '17.10. : 용역 착수 ○ '18.08. :건설기술심의 ○ '19.08. : 공모당선작 디자인 변경 합의 ○ '19.10. : 투자심사(재검토) ○ '19.11. : 행정2 현황보고 ○ '20.05. : 투자심사(조건부 시행)	토목부
28	도시고속도로 연결로(화랑로 진출) 설치 보완설계	○ 위치 : 중랑구 묵동(기존 묵동 IC 주변) ○ 사업개요 - 진출램프 B=5m L=839m (교량 L=510m) - 진입램프 B=5m L=641m (교량 L=269m) ○ 사업기간 : '13. 1.～'22.10. - 설계기간 : '20. 1.～'20. 9. ○ 총사업비 : 276억원 - 설계예산 : 6.8억 원	○ '09.12 : 타당성 및 기본계획용역 ○ '13.09.: 주민설명회 개최(공릉2동) ○ '15.12.: 실시설계 준공 ○ '19.05.: 공사 착공 ○ '19.06.: 주민설명회(노원구) ○ '19.07.: 주민설명회(중랑구) ○ '19.07.: 노원구 국회/시의원 면담 ○ '19.08.: 집단민원 발생 알림(중랑구) ○ '19.08.: 전석기시의원(중랑) 면담 ○ '19.08.: 공사반대 의견 알림(중랑구) ○ '19.09.: 사업계획변경 방침 ○ '19.09.: 공사중지 ○ '19.10.: 사업계획 변경에 따른 추진계획 방침 ○ '19.11.04.: 보완설계용역 발주 ○ '20.06.: 보완노선 관계구청 협의회 개최	토목부
29	백년다리(한강대교 남단 보행교) 조성사업 기본 및 실시설계	○ 위치 : 한강대교 남단 ○ 사업규모 : 폭 8m, 연장 500m ○ 사업기간 : '19. 3.～'21. 7. - 설계기간 : '19. 9.～'20. 7. ○ 총사업비 : 300억 원	○ '19.03. : 백년다리 조성 추진 방침 ○ '19.05~07. : 국제현상설계공모 ○ '19.09 : 기본 및 실시설계용역 ○ '20.01 : 공공토론 추진 운영계획 수립 ○ '20.01 : 설계 VE ○ '20.01~05 : 공공토론 운영위원회 및 공동조사단(안전성 검증) 운영 ○ '20.04 : 건설기술(기본설계)심의 ○ '20.06 : 시민 여론조사 실시 ○ '20.06 : 공공토론회 개최 ○ '20.06 : 실시설계 의뢰	토목부
30	퇴계로 지하차도 상부개선 기본 및 실시설계	○ 위치 : 중구 충무로2가 61-3일대 ○ 사업규모 : 교차로 동측(충무로역) 지하차도 BOX구간 연장(9m) - 횡단보도 확대(2→8m), 횡단보도 및 유턴차로 분리 ○ 사업기간 : '19. 2.～'21. 6. - 설계기간 : '20. 5.～'20.12. ○ 총사업비 : 19억 원(설계예산 1.4억원)	○ '19.02. : 사업추진계획 수립 ○ '19.08. : 박순규시의원(중구) 보고 ○ '19.10 : 전문가 자문회희 ○ '19.12. : 타당성조사 추진 ○ '20.05. : 기본 및 실시설계용역 착수	토목부
31	월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계	○ 위치:영등포구 양평동 월드컵대교 남단 ○ 사업개요 - 연 결 로 : Ramp-A ~ F 보완(폭 1차로) - 지하차도 : 강남방향 → 교량으로 형식변경 - 접 속 교 : 종단선형 변경(연결로 계획변경영향) ○ 사업비 :35억원(설계비31, 설계감리비 3.9)	○ '17.08.07. : 용역 계약 및 착수 ○ '18.03.23. : 노선 선정 보고회 개최 ○ '18.10.01. - 공항로~월드컵대교 직결램프 설치요구 민원(강서구, 시의원, 주민 등) ○ '18.12.04. - 공항로~월드컵대교 연결 노선(안) 설명(램프-D) 장상기(강서구) 시의원 최종 수용 ○ '18.12.05. - 안양천로~월드컵대교 연결램프 검토 요청(램프-H):신정호(양천구) 시의원 최종 수용 ○ '19.04.24. : 하천점용 협의 ○ '19.09.20. : 노선자문회의 (D.H-RAMP) ○ '19.11. - 철도보호구역내 행위허가(서울9호선) 협의 - Ramp-D, H 구간 설계 완료 - 설계경제성 심사(VE) 및 계약심사 ○ '20.5.21. : 도시공원 심의 ○ '20.6.30 - 건설기술심의 및 실시계획변경인가 ○ '20.07. : 특정기술 심사 및 용역준공	토목부
32	태릉~구리IC간 광역도로확장 기본 및 실시설계	○ 위치 : 북부간선도로 묵동IC(서울 중랑구) ~ 구리IC(구리 인창동) ○ 사업개요 - 도로확장 폭 4~6차로 → 6~8차로, 연장 4.79㎞ (서울 1.38㎞, 민자 1.78㎞, 구리 1.63㎞) ○ 사업비 : 1,368억원(서울시 1,165+구리시 203) - 공사비 886, 설계비 45, 감리비 42, 보상비 395 - 국비 625, 시비 553, 구리시 72, LH분담금 118	○ '07.12.31. - 대도시권 광역교통시행계획 수립 고시(건고시 제2007-658호) ○ '09. 03. - KDI예비타당성조사 용역 (~09. 7.) (기획재정부) ○ '15.12.29. - 사업시행 및 사업비 분담에 대한 협약 체결 완료(서울시↔구리시) ○ '16. 3.25.: 투자심사(적정) ○ '16.11.15.: 기본 및 실시설계 착수 ○ '18.12.31.: 서울시 구간 설계완료 ○ '19.12. - 구리시 구간 방음터널 설치요구에 따른 타당성 재조사(증889억, KDI 실시) - 도로계획과에서 사업비 증액으로 인한 총사업비 조정 및 기획재정부 타당성재조사 실시(~20.9.) ○ '20.12.31. : 설계준공	토목부
33	서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 실시설계	○ 위치 :영등포구 양평동(목동교)~금천구 독산동(금천IC) ○ 사업개요 - 왕복 4차로, 연장 8.1km, 친환경공간 119천㎡ ○ 사업비 : 859억원	○ '13.09.~'15.02. - 타당성 조사 및 기본계획 ○ '15.10.28. : 투자심사 완료 ○ '16.05.~'19.03. : 기본설계 시행 ○ '18.08.26. : 2단계 투자심사 ○ '19.07.11. : 실시설계용역 계약 ○ '19.08.30. : 착수보고회 개최 ○ '19.08.~'19.09. : 관계기관 자료 수집 ○ '19.09.~'19.12. : 실시설계 노선 검토 ○ '19.11.18. - 소규모 환경영향평가, 재해영향평가 계약 ○ '19.11.~'19.12 : 관계기관 협의 ○ '20.3.10. : 실시설계 자문회의(1차) ○ '20.07. : 실시설계 자문회의(2차) ○ '20.11. : 실시설계 완료	토목부
34	강남순환 도시고속 도로 건설	○ 위치 : 금천구 독산동～강남구 수서동 ○ 사업개요 - 폭 4～10차로, 연장 22.9km (민자구간 12.4km) - 교량 4개소, 지하차도 9개소, 영업소 2개소 ○ 공사기간 : '01. 12. ~ '21. 12. ○ 소요예산 : 2조 6,044억원 (재정 : 1조6,946억원, 민자 : 9,098억원)	○ '94. 2. : 강남순환도시고속도로 건설방침 ○ '00. 5. : 도시계획시설 결정 ○ '01.12. : 4공구 착공 ○ '02. 6. : 민자구간 실시협약 ○ '02. 7. : 8공구 착공 ○ '07.11. : 민자구간 착공 ○ '13. 8. : 과천시 구간 도시계획 결정 ○ '16. 7. : 강남순환로 1단계구간 개통 ○ '18. 7. : 금하지하차도(4공구), 매헌, 염곡동서지하차도(8공구) 시공중 ○ '19.12. : 금하지하차도(4공구), 염곡동서지하차도(8공구) 개통 ○ ’20.5.30 : 4공구 준공 ○ '20.12. : 매헌지하차도(8공구) 개통	토목부
35	양재대로 구조개선 (대모지하차도)	○ 위치 : 구룡마을 교차로~개포3·4단지 교차로 ○ 사업개요 - 지하차도 1개소 왕복 4차로~10차로, 연장 2,7km ○ 공사기간 : ’18. 7. ~ ’24. 12. ○ 총사업비 : 1,862억원	○ '10. 3 ~'12. 2 : 타당성조사 ○ '13. 7~'15. 7 : 기본설계 ○ '17.10. : 투자심사 완료 ○ '18. 1. : 사업추진계획 수립 ○ '18. 3. : 실시설계 완료 ○ '18. 4. : 설계 원가검토(조달청) ○ '18. 6. : 공사·감리 계약 ○ '18. 7. : 지장물(가로수,광역상수관) 이설 추진중 ○ '19 1. : 도시계획시설 변경결정 및 실시설계인가 ○ '19. 2. : 도로확장 착수 ○ '19. 7. : 시상수도 이설 착수 ○ '20. 6. : 광역상수도(D2,400)이설 착수 ○ '20. 9. : 대모지하차도 본 구조물 가시설 착수	토목부
36	광복교~안양교 주변 도로확장공사	○ 위치 : 구로구 개봉동 ~ 구로동 구로IC앞 ○ 사업개요 - 도로확장 폭 4→6차로, 연장 1,110m · 광복교 확장 : B=5→6차로, 보도교 L=67m ․ 안양교 신설 : B=6차로, L=275m ○ 공사기간 : ’16. 4. ~ ’21. 12. ○ 소요예산 : 833억원	○ '06. 6.~’07.11. : 기본설계 ○ '07.12.~’09. 2. : 실시설계 ○ '12. 5. : 보완설계용역 착수 ○ '15. 9. : 재투자심사 완료 ○ '16. 3. : 시설공사 계약 및 착공 ○ '16. 8. : 하천점용허가 ○ '17. 3. : 교통우회용 가교 개통 ○ '19. 3. : 안양교(구로IC방향) 개통 ○ '20. 11. : 안양교(오류IC방향) 완료 ○ '20. 12. : 안양교(오류IC방향) 개통 ○ '21. 5. : 교통우회용 가교 철거 완료 ○ '21. 12. : 준공	토목부
37	한남2고가 철거 및 중앙버스전용차로 설치공사	○ 위치 : 용산구 한남1고가 남단 ~ 서초구 한남대교 남단 ○ 사업개요 - 당초: 고가차도 철거 폭15m, 연장 340m BRT 설치 연장 2km, 버스정류소 3개소 - 변경: 고가차도 교면포장 및 단면보수 ○ 공사기간 : `17.12. ~ `20.8. ○ 소요예산 : 46억원	○ '16. 8. : 고가차도 관리계획 수립 ○ '17. 9. : 실시설계 완료 ○ '17. 11.~12. : 공사 발주 및 착공 ○ '18. 1. : 교통규제심의 완료(서울시경) ○ '18.4.~6. : 철거를 위한 수목이식 및 보도축소(3개소) ○ '18. 7.~ : 한남2고가 철거시기 조정 ('19년 이후)으로 공사중지 ○ '19. 8.~ : 한남2고가 철거계획 변경 (고가철거시 주변교통 흐름에 악영향으로 철거를 잠정보류하고 노후된 고가 보수 및 기시공분 원상복구) ○ '20. 3. : 보수공사 실시설계 완료 ○ '20. 3. : 보수공사 착공 ○ '20. 8. : 시설공사 준공	토목부
38	개봉고가 성능개선공사	○ 위치 : 구로구 개봉로 68 ~ 개봉로 124 ○ 사업개요 - 교량성능개선(DB18→DB24) · 폭18.9m, 연장 332.8m, 보행육교 1개소 ○ 공사기간 : ’19. 8. ~ ’23. 4. ○ 소요예산 : 195억원	○ ’16.11. : 투자심사 ○ ’17. 6. : 용역계약 및 착수 ○ ’18.10. : 노후 보행육교 개선 추가 검토 ○ ’18.11.~12. : 설계심의 및 설계VE ○ ’18.12.6. : 철도 횡단심의 ○ ’19. 2.14. : 설계안전성자문회의 ○ ’19. 2.28. : 교통처리대책심의 ○ ’19. 2.28. : 개봉고가 실시설계준공 ○ ’19. 7.31. : 개봉고가 공사계약 ○ ’19. 8.12. : 개봉고가 공사착공	토목부
39	내부순환로(월곡IC) 구조개선공사	○ 위치 : 성북구 하월곡동 37번지 일대 ○ 사업개요 - 램프설치 연장 465m 폭6m(방호벽포함) (교량=375m, U형옹벽=36.5m, L형옹벽 =26m, 토공=25m) ○ 공사기간 : ’20. 2. ~ ’22. 9. ○ 소요예산 : 155억원	○ ’16.4.~ ’17.2. : 타당성조사 ○ ’18.4.30. : 기본 및 실시설계 ○ ’19.1.30. : 건설기술심의(기본설계) ○ ’19.7.29. : 특정공법심의 ○ ’19.8. ~’19.9. : 실시설계(VE) ○ ’19.10. : 실시설계 계약심사 완료 ○ ’19.12.30. : 설계 준공 ○ ’20.1. : 공사발주 ○ ’20.2. : 공사착공	토목부
40	동대문 실버케어센터 건립공사	○ 위치 : 동대문구 답십리동 553, 554 ○ 규모: 지하1층/지상4층, 연면적 2,884㎡ ○ 공사기간 : '19.08. ~ '21.03. ○ 총사업비 : 118억원	○ '19.05.~06. : 건설사업관리용역 및 공사발주 ○ '19.07. : 건설사업관리용역 착수 ○ '19.08. : 공사 착공 ○ '20.01..: 공사변경 계약체결 [공기연장 1차(증95일)] ○ '20.05. : 건설사업관리용역 1차준공 ○ '20.06.현재: 지하층 골조공사 중	건축부
41	BT-IT 융합센터 건립공사	○ 위치 : 성북구 하월곡동 96-113외4 ○ 사업개요 - 지하 1층,지상 5층 연면적 2,883.77㎡ ○ 사업기간 : ‘18.08. ~ ’21.04. ○ 공사기간 : ‘20.05. ~ ’21.04. ○ 사 업 비 : 억원	○ `18.08. : 사업계획 수립(거점성장추진단) ○ `19.08. : 설계용역 착수 ○ `20.02. : 설계용역 준공 ○ '20.04. : 건설사업관리용역 계약 ○ '20.05. : 공사착공 ○ '21.04. : 공사준공(예정)	건축부
42	세운상가군 공공공간 조성공사(2단계)	○ 위치 : 세운상가군(삼풍~PJ~인현~진양상가)~ 남산순환로 ○ 사업개요 - 보행데크 신설·정비: 삼풍·PJ호텔구간 데크 신설, 인현·진양상가 데크 정비, 연결통로 2개소 - 공중보행교(2개소), 공공임대셀 24개소 등 ○ 사업기간 : ‘17.2~’21.06 ○ 공사기간 : ‘18.9~’21.06 ○ 사 업 비 : 550억원	○ `17.02. : 공공공간 국제지명설계공모 관리용역 및 설계용역 추진계획 ○ `17.03. : 공공공간 국제지명설계공모 ○ `17.07. : 설계용역 착수 ○ '17.11. : 디자인 심의 ○ '17.12. : 기본설계 기술심의 ○ '18.04. : 실시설계 건설기술심의 ○ '18.09. : 건설사업관리용역 계약 및 공사착공 ○ '21.06. : 공사준공(예정)	건축부
43	광역소공인 특화지원센터 건립공사	○ 위치 : 성동구 아차산로17길 9 ○ 사업개요 - 지하2층, 지상7층, 연면적 2,709.89㎡ ○ 사업기간 : '17. 7 ~ '21. 12 ○ 사 업 비 : 172.76억원	○ ‘18.06. : 건립계획 방침수립 ○ ‘18.12 : 설계공모 공고 ○ ‘20.02. : 설계용역 준공 ○ ‘20.07. : 건설사업관리 및 공사착수(예정) ○ ‘22.07. : 공사준공(예정)	건축부
44	시립마포 실버케어센터 건립공사 (서울창업허브단지 조경공사포함)	○ 위치 : 마포구 공덕동 370-4 ○ 사업개요 - 지하 2층, 지상 4층, 연면적 12,271㎡ ○ 사업기간 : '16. 6 ~ '19. 5 ○ 사 업 비 : 332억원	○ ‘16.03. : 건립계획 방침수립 ○ ‘17.07 : 설계공모 공고 ○ ‘19.05. : 설계용역 준공 ○ ‘19.04. : 건설사업관리 및 공사착수 ○ ‘21.12. : 공사준공(예정)	건축부
45	동북권 세대융합형 복합센터 건립공사	○ 위치 : 도봉구 창동 1-8 ○ 사업개요 - 규 모 : 지하2층/지상5층, 연면적 17,744.60㎡ ○ 사업기간 : '16. 4 ~ '20.9. ○ 사 업 비 : 479억원	○ '16.04. : 사업계획수립(동북권사업단) ○ '17.07. : 설계용역 (~‘18.05.) ○ '18.01. : 건설사업관리용역 착수 ○ '18.05. : 공사발주 ○ ‘18.06. : 공사착공 ○ ‘20.09. : 공사준공(예정)	건축부
46	서울의료원 권역응급의료센터 건립공사	○ 위치 : 중랑구 신내로 156(신내동,서울의료원) ○ 사업개요 - 지상5층, 연면적 4,920㎡ ○ 사업기간 : ‘16.3~’21.7 ○ 공사기간 : ‘19.2~’21.7 ○ 사 업 비 : 217.9억원	○ '16. 5. : 서울의료원 권역응급의료센터 건립계획 수립 ○ '18.10. : 설계용역 완료 ○ '19. 2. : 공사·건설사업관리용역 착수 ○ '20. 1. : 서울의료원 응급센터 증축공사 계획(안) 수립 ○ '20. 4. : 추가증축공사 설계용역 착수 ○ ‘20. 5. : 공사 재개 ○ '20.11. : 추가증축공사 설계용역 완료(예정) ○ ‘21. 7. : 공사완료(예정)	건축부
47	삼양동 빈집활용 복합커뮤니티 건립공사	○ 위치 : 강북구 미아동 791-2521외7 ○ 사업개요 - 지하2층,지상2층, 전체 연면적 837㎡ ○ 사업기간 : ‘18.9~’21.8 ○ 공사기간 : ‘20.6~’21.8 ○ 사 업 비 : 41.9억원	○ '18. 9. : 삼양동 마을재생 추진계획 방침 ○ '19.12. : 설계용역 완료 ○ '20. 1. : 사업의뢰(주거환경개선과→건축부) ○ '20. 6. : 공사·건설사업관리용역 착수 ○ ‘21.8. : 공사준공(예정)	건축부
48	서울공예박물관 조성공사	○ 위치 : 종로구 율곡로 3길 4(舊 풍문여고 부지) ○ 사업개요 - 증축및대수선, 지상3층~5층 건물6개동, 연면적10,590㎡ ○ 사업기간 : ‘18.05. ~ ’20.09. ○ 사 업 비 : 417억	○ `17.12. : 설계용역 완료 ○ `18.05. : 공사 착수 ○ `18.12. : 철거, 지반 및 구조보강공사 ○ `19.08. : 기본설계 확정 회의 ○ `19.10. : 설계변경 실시설계 완료 ○ `19.12. : 계약변경 진행 중 (한옥공방 증축공사 등) ○ `20.09. : 공사 완료(예정)	건축부
49	딜쿠샤 원형 복원공사	○ 위치 : 종로구 사직로2길 17 ○ 사업개요 - 지하1층/지상2층, 연면적 623.76㎡ ○ 사업기간 : ‘18.11. ~ ’20.11. ○ 사 업 비 : 24.1억	○ `18.06. : 설계용역 완료 ○ `18.11. : 공사 착수 ○ `19.03. : 후면 보강옹벽공사 완료 ○ `19.04.~ : 원형복원 고증을 위한 문화재 기술지도 자문(7회) 및 공사 진행 중 ○ `20.11. : 공사 준공(예정)	건축부
50	평창동 미술문화복합공간 건립공사	○ 위치 : 종로구 평창문화로 101 ○ 사업개요 - 지하1층/지상5층(건축물 3개동), 연면적 5,594m2 ○ 사업기간 : ’19.06. ~ ’21.06. ○ 사 업 비 : 264억	○ `18.12. : 설계용역 완료 ○ `19.09. : 공사 착공 ○ `19.10. : 기존건물 철거 완료 ○ `19.12. : 부지 흙막이공사 진행 중	건축부
51	서울 운현궁 보수공사	○ 위치 : 종로구 삼일대로 464 ○ 사업개요 - 운현궁 면적 : 16,646㎡ - 노락당, 노안당, 이로당 (지붕, 마루, 기단, 창호보수 및 벽지·천정지 교체) ○ 사업기간 : ‘19.08. ~ ’21.01. ○ 사 업 비 : 12억	○ '19.05. : 설계용역 완료 (문화재청 설계심사 완료) ○ '19.08. : 공사 착공 ○ '19.08. : 상주감리 착수 ○ '19.09. : 1차 자문회의 ○ '19.10. : 2차 자문회의 ○ '19.12. : 노락당구역 기와, 차양공사 완료 ○ '20.02. : 3차 자문회의 ※ 공사내용 일부 변경을 위한 기술지도 자문회의 개최 및 문화재청 설계변경 승인 준비	건축부
52	G밸리 근로자 문화복지센터 건립공사	○ 위치 : 금천구 가산동 345-58외 2 ○ 사업개요 - 지하 2층,지상 10층 연면적 6,017㎡ ○ 사업기간 : ‘14.12. ~ ’21.02. ○ 공사기간 : ‘18.03. ~ ’21.02. ○ 사 업 비 : 208억원	○ `16.03. : 기본계획 변경수립 ○ `16.09. : 설계공모 심사 및 당선작 선정 ○ `16.10. : 설계용역 착수 ○ `17.09. : 설계용역 준공 ○ '17.11. : 건축공사 발주 ○ '18.02. : 건설사업관리용역 계약 및 착수 ○ '18.03. : 공사착공 ○ '19.12. : 공동수급체 주계약자 변경 ○ '21.02. : 공사준공(예정)	건축부
53	마곡산업단지 공공산업지원시설 건립공사	○ 위치 : 강서구 마곡동 771-1 ○ 사업개요 - 업무시설 - 지하4층/지상8층, 연면적 21,425㎡ 신축 ○ 공사기간 : ‘18.08. ~ ’21.05. ○ 총사업비 : 482억원	○ ′18.05. : 설계용역 완료 ○ ′18.08. : 공사 착수 ○ ′18.12. : 기초파일공사 완료 ○ ′19.09. : 터파기공사 완료 ○ ′20.07. : 지상층 골조공사 ○ ′21.05. : 공사 준공 예정	건축부
54	금천소방서 건립공사	○ 위치 : 금천구 독산동 1054-8 외 14 ○ 사업개요 - 공공업무시설(소방서) - 지하1층/지상6층, 연면적 5,249㎡ 신축 ○ 공사기간 : ‘19.11. ~ ’21.07. ○ 총사업비 : 213.9억원	○ ′19.01. : 설계용역 완료 ○ ′19.11. : 공사 착수 ○ ′20.01. : 지장물 이설 협의 ○ ′20.06. : 흙막이공사 완료 ○ ′20.07. : 기초공사 ○ ′21.07. : 공사 준공 예정	건축부
55	서울광역푸드뱅크 센터이전건 립공사	○ 위치 : 성동구 송정동 74-7 ○ 사업개요 - 가설건축물 - 지상2층, 연면적 985㎡ 신축 ○ 공사기간 : ‘19.12. ~ ’20.11. ○ 총사업비 : 27억원	○ ′19.10. : 설계용역 완료 ○ ′19.12. : 공사 착수 ○ ′20.07. : 컨테이너 설치 및 이주 ○ ′20.11. : 공사 준공 예정	건축부
56	동자동 쪽방주민지원시설 리모델링공사	○ 위치 : 용산구 동자동 9-7 외 1 ○ 사업개요 - 근린생활시설 - 지하2층/지상4층, 연면적 588㎡ 리모델링 ○ 공사기간 : ‘19.12. ~ ’20.9. ○ 총사업비 : 18.5억원	○ ′19.10. : 설계용역 완료 ○ ′19.12. : 공사 착수 ○ ′20.07. : 구조보강 및 설비공사 ○ ′20.09. : 공사 준공 예정	건축부
57	창작연극지원센터 건립공사	○ 위치 : 성북구 동소문동 1가 1-4 외 1 ○ 사업개요 - 문화 및 집회시설 - 지하2층/지상6층, 연면적 7,224㎡ 신축 ○ 공사기간 : ‘20.02. ~ ’23.1. ○ 총사업비 : 345억원	○ ′19.10. : 설계용역 완료 ○ ′20.02. : 공사 착수 ○ ′20.07. : 부지정리 및 천공작업 ○ ′23.01. : 공사 준공 예정	건축부
58	스페이스 살림 조성공사	○ 위치 : 동작구 대방동 340-3외 3필지 ○ 사업개요 - 지하 2층, 지상 7층, 연면적 17,957㎡ ○ 공사기간 : '17. 12. ~ '20. 9. ○ 사업비 : 510억원	○ '15.04. : 조성계획 수립(시장방침) ○ '16.04. : 국제설계공모 공고 ○ '16.06. : 사업의뢰(여성적책담당관) ○ '16.07. : 설계용역 착수 ○ '17.11. : 설계용역 완료 ○ '17.12. : 공사착공 ○ '20.09. : 공사준공(예정)	건축부
59	지역대표 거점형 키움 센터(1호) 조성공사	○ 위치 : 노원구 상계동 1071-2 ○ 사업개요 - 지하1층, 지상5층 연면적 1,683.81㎡ ○ 사업기간 : ''19.04. ~ '20.08. ○ 소요예산 : 39억원	○ `19.04. : 기본계획 수립 ○ `20.01. : 설계용역 완료 ○ `20.03. : 공사착공 ○ `20.08. : 준공예정	건축부
60	시립청소년음악창작센터 건립공사	○ 위치 : 양천구 신정동 1290-6 ○ 사업개요 - 지하1층/지상6층, 연면적 5,410㎡ ○ 사업기간 : '17. 01. ~ '22.04. ○ 사 업 비 : 216억원	○ '17.01. : 기본계획 수립 ○ '18.01. : 건축사업적정성 검토 ○ '18.12. : 설계용역 착수 ○ '20.01. : 설계용역 완수 ○ ‘20.03. : 건설사업관리용역 선정 ○ ‘20.04. : 시공자 선정 및 공사착공 ○ ‘21.03. : 1차수 공사준공(예정) ○ '22.04. : 총차 공사준공(예정)	건축부
61	동북권 아동청소년 예술교육센터 건립공사	○ 위치 : 강북구 미아동 811-2 ○ 사업개요 - 예술교육센터 ・ 지하1층, 지상4층, 연면적 4,725.36㎡(17,718백만원) - 종합체육센터 ・ 지하2층, 지상2층,연면적 2,645.89㎡(14,136백만원) ○ 사업기간 : ‘16.06. ~ ‘22.09. ○ 사 업 비 : 383억원	○ '16.07. : 기본계획 수립 ○ '18.05. : 설계용역 착수 ○ '19.08. : 설계용역 완료 ○ '19.08. : 건설사업관리용역 계약 ○ ‘19.09. : 공사착공	건축부
62	서울 시네마테크 건립공사	○ 위치 : 중구 마른내로 38 ○ 사업개요 - 지하3층/지상10층, 연면적 4,893㎡ ○ 사업기간 : ‘15.07. ~ ‘22.03. ○ 사 업 비 : 264억원	○ ‘15.07. : 사업계획 수립 ○ ‘18.05. : 설계용역 착수 ○ ‘19.10. : 설계용역 완료 ○ ‘19.12. : 건설사업관리용역 계약 ○ ‘20.01. : 공사착공 ○ ‘20.02. : 기존건물 철거공사 완료	건축부
63	서울애니메이션센터 재건축 사업 (설계용역)	○ 위 치: 중구 예장동 8-145외 3필지 ○ 사업개요 - 규 모: 지하 4층, 지상 3층 - 연면적: 15,900㎡ ○ 사업기간 : '16.05. ~ '25.02. ○ 사업비:596억원 (공사비524,감리비29,설계비41,기타2)	○ ’16.11.07.: 당선작(공간종합건축) ○ ’17.02.24.: 설계용역 계약 및 착수 ○ ’19.08.14.: 설계용역 준공 ○ ’19.08.21.: 문화재위원회 심의 ○ ’19.12.13.: 건설사업관리용역 ‘일시정지’ 통보 ○ ’20.03.19.: 재건축 변경계획 방침 (변경)수립 ※ 총사업비 765억원(140억 증가), 사업 기간 32개월 증가(‘16.5∼’25.2) ○ ’20.11.~’21.12.: 설계보완 (문화재위원회 재심의, 유구 해체․이전) ○ ’22.01.~’22.03.: 공사 발주 및 계약 ○ ’22.04.~’25.02.: 신축공사 착공 및 준공(유구 복원)	건축부
64	속초공무원수련원 증축 및 리모델링 증축사업 (설계용역)	○ 위 치: 강원도 속초시 노학동 721-3 외1 ○ 사업개요 - 규 모 ▪증축:지하2층~지상4층(1개동, 50객실) ▪리모델링 - 지상8층:카페테리아,세미나실 등➛ ‘객실’ 로 변경 - 지하1층:노래방,사우나,PC방 등➛ 부분‘리모델링’ ○ 사업기간 : '18.06. ~ '22.01. ○사업비:266억원 (공사비230, 감리비23,설계비11.4,기타1.6)	○ ’18.06.: 건축사업 적정성 사전검토 ○ ’19.01. ~ 04.:현상설계 공모 (도시공간개선단) ○ ’19.04.: 당선작 선정(솔토지빈) ○ ’19.07.: 설계계약 완료 (솔토지빈건축사사무소) ○ ’19.08.27.: 착수보고회 개최 ○ ’20.02.23.: 소규모지하안전향평가 용역 실시 ○ ’20.09. : 착공 ○ ’22.01. : 준공	건축부
65	서울바이오허브 글로벌협력동 건립 (설계용역)	○위치 : 동대문구 회기동 109-140외 1 ○규모 : 지하2층/지상7층, 연면적 24,906.96㎡(증축 14,848.63㎡) ○용도 : 교육연구시설 ○총사업비 : 496억원 ○공사기간 : ‘20.10.~’22.4.	○‘19.09: 서울바이오허브글로벌협력동 건립 추진계획 ○‘19.10: 설계용역 착수 ○‘19.11: 건설사업관리용역 착수 ○‘20.03: 경관심의 신청 ○‘20.04: 설계경제성(VE) 심사 의뢰 ○‘20.04: 공용건축물 협의 ○‘20.06: 건축(굴토)계획 심의 의뢰 ○‘20.06: 건설기술심의 의뢰 ○‘20.06. 현재 : 실시설계 진행 중	건축부
66	난곡사거리 행복주택 및 복합체육시설 건립 (설계용역)	○위 치 : 관악구 신림동 1569-20일대 ○규 모 : 지하3층/지상26층, 연면적 24,669.6㎡ ○총사업비 : 514억원 ○공사기간 : ‘22.06.~’26.12.	○‘19.01: 8만호 공공주택 공급 세부 실행계획수립 ○‘20.01: 설계공모 공고(SH공사) ○‘20.06: 설계용역 착수 ○‘21.07: 설계준공(예정) ○‘22.06: 공사착공(예정) ○‘26.12: 공사준공(예정)	건축부
67	서울 어울림 체육센터 건립 (설계용역)	○ 위치 : 노원구 상계동 1268(수락산역 환승주차장) ○ 사업개요 - 지하2층, 지상3층, 연면적 14,200㎡ ○ 설계기간 : '19.12. ~ '20.12. ○ 사 업 비 : 698.8억	○ '19.05. : 설계공모 (당선작 발표 : ’19. 6. 26.) ○ '19.10. : 건립계획 변경 ○ '19.10. : 사업추진의뢰 ○ '19.12. : 설계착수 ※ 설계자문위 구성 및 착수회의 준비 중	건축부
68	서울연극센터 리모델링 공사 (설계용역)	○ 위치 : 종로구 대명길 3 ○ 사업개요 - 지상4층, 연면적 1,022.88㎡ ○ 설계기간 : '19.11. ~ '20.05. ○ 사 업 비 : 32.1억	○ '18.11. : 기본계획 수립 ○ '19.04. : 정밀안전진단 ○ '19.07. : 설계공모 (당선작 발표 : ’19. 9. 25.) ○ '19.10. : 사업추진의뢰 ○ '19.11. : 설계착수 ○ '19.12. : 기본설계 진행중	건축부
69	AI 지원센터 건립공사 (설계용역)	○ 위치 : 서초구 태봉로 108(우면동 141) ○ 사업개요 - 지하 1층,지상 7층 연면적 10,220㎡ ○ 사업기간 : ‘19.04. ~ ’22.11. ○ 설계기간 : ‘20.03. ~ ’20.11. ○ 공사기간 : ‘20.12. ~ ’22.11. ○ 사 업 비 : 284.7억원	○ `19.06. : 기본계획 변경수립 ○ `20.01. : 설계공모 심사 및 당선작 선정 ○ `20.03. : 설계용역 착수 ○ `20.11. : 설계용역 준공(예정) ○ '20.11. : 건축공사 발주(예정) ○ '20.12. : 건설사업관리용역 착수(예정) ○ '20.12. : 공사착공(예정) ○ '22.11. : 공사준공(예정)	건축부
70	농업공화국 조성사업 (설계용역)	○ 위치 : 강서구 마곡동 727-164 ○ 사업개요 - 지하2층/지상2층, 연면적 11,312㎡ ○ 사업기간 : ‘19.07. ~ ’22.05. ○ 설계기간 : ‘19.07. ~ ’20.09. ○ 공사기간 : ‘20.10. ~ ’22.05. ○ 사 업 비 : 326억원	○ `18.09. : 기본계획 수립 ○ `19.05. : 설계공모 심사 및 당선작 선정 ○ `19.07. : 설계용역 착수 ○ '20.07. : 건설사업관리용역 착수(예정) ○ `20.09. : 설계용역 준공(예정) ○ '20.10. : 공사발주 및 착공(예정) ○ '22.05. : 공사준공(예정)	건축부
71	50+동부캠퍼스 복합시설 건립공사 (설계용역)	○ 위치 : 광진구 자양동 57-153 ○ 사업개요 - 노유자시설, 교육연구시설 - 지하3층/지상3층, 연면적 10,800㎡ 신축 ○ 설계기간 : ‘17.09. ~ ’20.10. ○ 총사업비 : 247억원	○ ′17.09. : 설계용역 착수 ○ ′20.06. : 실시설계 및 도시계획시설 해제 진행 ○ ′20.10. : 설계용역 준공 예정 ○ ′20.12. : 공사 착수 예정	건축부
72	시립송파실버케어센터 건립공사 (설계용역)	○ 위치 : 송파구 가락동 481-2 ○ 사업개요 - 노유자시설 - 지하2층/지상4층, 증축면적 4,933㎡ ○ 설계기간 : ‘19.06. ~ ’20.08. ○ 총사업비 : 140.8억원	○ ′16.03. : 시립송파실버케어센터 건립 계획 수립 ○ ′19.06. : 설계용역 착수 ○ ′20.01. : 설계VE 심사 ○ ′20.05. : 건설기술심의 ○ ′20.08. : 설계용역 준공 예정	건축부
73	시립강동 실버케어센터 건립공사 (설계용역)	○ 위치 : 강동구 고덕동 317-23 ○ 사업개요 - 지상3층, 연면적 4,058㎡ ○ 사업기간 : '20.11. ～ '22.06. (설계기간 : '19.11. ～ '20.09.) ○ 사업비 : 123억원 (설계비 : 7.5억원)	○ '14.04. : 치매요양 종합대책(시장방침) ○ '16.03. : 노인요양원 건립계획 수립 ○ '19.05. : 설계공모 공고 ○ '19.11. : 설계용역 착수 ○ '20.01. : 계획설계 완료 ○ '20.05. : 경관심의 ○ '20.05. : 중간설계 완료 ○ '20.06. : 설계경제성(VE) 검토	건축부
74	시립서대문농아인 복지관 별관 복합시설 건립공사	○ 위치 : 서대문구 남가좌동 295-18 외 2 ○ 사업개요 - 사회복지시설, 노유자시설 - 지하2층/지상8층, 증축면적 3,652㎡ (총연면적 4,645㎡) ○ 설계기간 : ‘19.12.~’20.10. ○ 총사업비 : 122.7억원	○ ′17.09. : 시립서대문농아인복지관 별관 건립 변경계획 수립 ○ ′19.12. : 설계용역 착수 ○ ′20.03. : 지반조사 실시 ○ ′20.04. : 경관심의 ○ ′20.10. : 설계용역 준공 예정 ○ ′21.01. : 공사 착수 예정	건축부
75	강북노동자복지관 증축 및 리모델링공사 (설계용역)	○ 위치 : 마포구 아현동 711-2 ○ 사업개요 - 지하 1층, 지상 5층, 연면적 2,259㎡ ○ 사업기간 : '20.10. ～ '21.12. (설계기간 : '19.12. ～ '20.08.) ○ 사업비 : 74억원 (설계비 : 3.2억원)	○ '15.04. : 서울시 노동정책 기본계획(시장방침) ○ '16.03. : 상수도사업본부 구서부수도사업소 청사 사용합의 및 안전진단 ○ '16.05. : 강북근로자복지관 이전 기본계획수립 ○ '19.02. : 건축사업 적정성 사전검토 ○ '19.08. : 설계공모 공고 ○ '19.12. : 설계용역 착수 ○ '20.01. : 계획설계 완료 ○ '20.04. : 기본설계 완료 ○ '20.05. : 경관심의 ○ '20.06. : 설계경제성(VE) 검토	건축부
76	로봇과학관 건립공사 (설계용역)	○ 위치 : 도봉구 마들로 13길 70(창동1-7) ○ 사업개요 - 지하 1층/지상 4층, 연면적 6,053㎡ ○ 사업기간 : ‘20.12. ~ ‘22.12. (설계기간 : '19.09. ～ '20.08.) ○ 사 업 비 : 307억원	○ ‘18.11. : 설계공모 공고 ○ ‘19.02. : 당선자 발표 ○ ‘19.09. : 설계용역 착수(‘20.08.완료) ○ ‘19.06. : 건설사업관리용역 계약	건축부
77	서울사진미술관 건립 (설계용역)	○ 위치 : 도봉구 마들로 13길 70(창동1-7) ○ 사업개요 - 지하 2층/지상 4층, 연면적 6,402㎡ ○ 사업기간 : ‘21.05 ~ ‘23.06 (설계기간 : '20.02. ～ '21.02.) ○ 사 업 비 : 244.6억원	○ ‘16.07. : 기본구상 계획 수립 ○ ‘20.01. : 설계용역 발주 의뢰 ○ ‘20.03. : 설계용역 착수(‘20.08.완료) ○ ‘20.07. : 기본설계 및 설계자문회의(2차, 서면) 진행	건축부
78	난지물재생센터 3차(총인)처리 시설 설치사업 (설비부)	○ 위치 : 고양시 덕양구 대덕로 426 (난지물재생센터 내) ○ 사업개요 - 총인처리시설 439,2000㎥/일 (T-P 0.12㎎/L이하) ○ 공사기간 : '17.10. ~ '22.10. ○ 사 업 비 : 540억원	○ '13.05. : 물재생센터 총인처리 시설 설치계획 수립 ○ '17.02. : 실시설계 완료 ○ '17.06. : 공사계약 ○ '17.08. : 공사중지 (GB관리계획 변경 미승인-경기도) ○ '19.03 : 난점마을 도로개설비 10억 지원 (25억 중 10억 지원) ○ '19.05~12: 공동실무협의회 개최 (서울시↔고양시),4회 ○ '20.03. : GB관리계획 변경 신청 (서울시→경기도) ○ '20.06. : GB관리계획 변경 승인 (경기도 고양시→서울시) ○ '20.06~07. : GB관리계획 변경 승인에 따른 도시계획및행위허가 ○ '20.08. : 공정계획 재수립 및 공사착공 ○ '22.10. : 공사준공(예정)	설비부
79	서남물재생센터 3차(총인)처리 시설 설치사업 (설비부)	○ 위치 : 강서구 양천로 201 (서남물재생센터 내) ○ 사업개요 - 총인처리시설 737,000㎥/일 (T-P 0.20㎎/L 이하) ○ 공사기간 : '17.06. ~ '21.04. ○ 사 업 비 : 911억원	○ '13.05. : 물재생센터 총인처리 시설 설치계획 수립 ○ '14.10. : 타당성 및 기본계획 용역 ○ '17.02. : 기본 및 실시설계 완료 ○ '17.06. : 공사착공 ○ '20.06 : 구조물공사 완료, 설비공사중 ○ '21.04. : 공사준공(예정)	설비부
80	강동구 자원순환센터 건립공사(T/K) (설비부)	○ 위치 : 강동구 아리수로87길 272 일원 ○ 사업개요 - 폐기물처리시설 (대지면적 41,153㎡, 연면적 44,236㎡) - 음식물자원화 360톤/일 - 음폐수처리 300톤/일 - 압축적환시설 200톤/일 - 재활용품선별시설 70톤/일 - 대형폐기물 적환시설 10톤/일 ○ 공사기간 : '20.05. ~ '24.02. ○ 사 업 비 : 1,714억원	○ '11.12. : 서울 고덕강일 보금자리주택 지구 지정 고시 ○ '12.07. : 폐기물 종합처리 기본추진방안(강동구) ○ '17.03. : 강동구 자원순환센터 건립 기본계획 방침(강동구) ○ '18.01. : 추진계획 수립(시장방침 제5호) ○ '19.08. : 입찰공고 ○ '20.04. : 실시설계 적격자 선정 ○ '20.05. : 시설공사 계약 및 착공 ○ '24.02. : 공사준공(예정)	설비부
81	서남재생센터 고도처리 및 시설 현대화 사업(T/K)	○ 위치 : 강서구 마곡동 91번지 (서남물재생센터 內) ○ 사업개요 - 고도처리개량 : 127만톤/일(존치12만톤 포함) - 시설현대화 : 36만톤/일 ○ 공사기간 : '09. 11 ~ '21. 05 ○ 사 업 비 : 3,299억원	○ '09.11. : 본공사 착공 ○ '12. 8. : 고도처리 개량공사 완료 ○ '14. 2. : 기존시설 고도처리 개량공사 완료 ○ '15. 8. : 시설현대화공사 착공 ○ '19.9~‘20.3. : 시설현대화 종합시운전 ○ '20. 6. : 물재생체험관 시공 중 ○ '21. 5. : 준공 예정	방재시설부
82	서울제물포터널 민간투자사업	○ 위치 : 양천구 신월동(신월IC) ～ 영등포구 여의도동(여의대로, 올림픽대로) ○ 사업개요 : - 왕복 4차로, 연장 7.53km (소형차 전용 터널) ○ 사업기간 : '15. 10 ~ '20. 10 ○ 사 업 비 : 4,546억원 [민자3,753, 재정 793억원]	○ '13.10. : 도시계획시설결정 ○ '15.09. : 실시계획 승인 ○ '15.10. : 공사착공 ○ '12.02. : 본선터널 굴착완료 ○ '20.06. : 본선터널 라이닝 시공 중 ○ '21.04. : 공사준공 예정	방재시설부
83	전농동~배봉로간 연결고가도로 건설공사 (한국철도시설공단 위탁 사업)	○ 위치 : 동대문구 전농동 588~배봉로 간 ○ 사업개요 - 도로개설 : 폭21m, 연장454m ○ 공사기간 : '19. 11. ~ '23. 11. ○ 사 업 비 : 411억원 ○ 공사시행자 : 한국철도시설공단 수도권본부	○ '09. 9. : 사업추진계획 방침 ○ '18.11. : 공사위탁 협약체결 ※ 서울시 ↔ 한국철도시설공단 ○ '19.11. : 공사 착공	방재시설부 (한국철도 시설공단 위탁공사)
84	디지털3단지~ 두산길 간 지하차도 건설공사	○ 위치 : 금천구 디지철3단지~두산길 간 ○ 사업개요 - 도로개설 : 4차로, 연장452m (지하차도 : 2차로, 290m) ○ 공사기간 : '17.12. ~ '21. 4. ○ 사 업 비 : 685억원	○ '14.12. : 실시계획인가 고시 ○ '16. 9. : 독산동 구간 보상완료 ○ '17.12. : 공사 착공 ○ '18. 2. : 철도황단구간 위수탁 협의 (한국철도시설공단) ○ '18. 1.~10. : 지장건축물 철거 ○ '18. 6.~‘19. 3. : 각종 지장물 철거 ○ '19. 3.~ 6. : 고지수로(2@3.5×2.5)이설 ○ '19. 8. : 수용재결 공탁 ○ '19.11. : 공사 중지 - ㈜교학사 소유 시설물 및 인쇄장비 미이전 ○ '20. 7.현재 : 명도(토지인도 등) 소송진행	방재시설부
85	신상도 지하차도 확장공사	○ 위치 : 동작구 상도동 159-21~207-5 ○ 사업개요 - 도로확장 폭 2차로 → 4～6차로, L=324m - 지하차도 확장 폭 2차로→ 4차로, L=221m ○ 공사기간 : '07.12. ~ '21.6. ○ 사 업 비 : 318억원	○ '07.12. : 공사 착공 ○ '09.10. : 신상도초등학교 측 옹벽설치 완료 ○ '10.12. : 1차 공사 중지 (상도제7주택재개발사업 지연) ○ '14.03~‘15.02. : 보상구간 건물철거 ○ '15.03 : 2차 공사 중지 (재개발사업 취소, 지장가옥 주민 미이주) ○ '16.12. : 보도 set-back 공사 완료 ○ '17.01. : 3차 공사 중지 (추가 보상절차 이행 필요) ○ '17.05. : 손실보상계획 열람공고 ○ '18.08. : 중토위 수용재결위원회 개최 ○ '19.12. : 지장가옥 주민 이주 완료, 보완설계 완료 및 공사 재개 ○ '20.06 : 가시설공 진행중(공정률 35%)	방재시설부
86	난지물재생센터 환경개선사업	○ 위치 : 고양시 덕양구 대덕로426 (난재물재생센터내) ○ 사업개요 - 주민친화시설 조성 212,895㎡ - 악취개선사업 등 ○ 사업기간 : '17. 04 ~ '21. 04 ○ 사 업 비 : 510억원	○ '15.12. : 실시설계 완료 ○ '16.09. : 설비공사 착수(기계) ○ '16.11. : 건설사업관리용역 착수 ○ '17.06. : 공사계약심사 등 사전절차 이행 ○ '17.08. : 공사계약 및 착공 ○ '18.11. : 공사 일시중지(GB관리계획 변경 지연 및 고양시 갈등) ○ '20.06. : 환경개선사업 타절 방침 (물순환안전국) ○ '20.07. : 마무리공사 행위허가 ○ '20.08. : 공사 재개	방재시설부
87	난지물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업	○ 위치 : 고양시 덕양구 대덕로426 (난재물재생센터내) ○ 사업개요 - 총인처리시설 439,200㎥/일 - 통합수질혼화조, 유출입관로 ○ 사업기간 : '17. 07 ~ '22. 02 ○ 사 업 비 : 531억원	○ '15.09. : 용역착수 ○ '16.07. : 기본설계 준공(물순환안전국) ○ '17.02. : 실시설계 준공(설비부) ○ '17.05. : 건설사업관리용역 계약 ○ '17.08. : 공사계약 ○ '17.08. : 공사일시중지(GB관리계획 지연) ○ '20.06. : GB관리계획 경미한 변경 승인(고양시→물재생시설과) ○ '20.07. : 행위허가 ○ '20.08. : 공사 재개	방재시설부
88	탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업	○ 위치 : 강남구 개포로 625일원 (탄천물재생센터내) ○ 사업개요 - 총인처리시설 45만톤/일 ○ 사업기간 : '17. 09 ~ '21. 04 ○ 사 업 비 : 409억원	○ '17.10. : 공사착공 ○ '18.04. : 2처리장 가시설 및 터파기 ○ '18.12. : 1처리장 겹침CIP 설치 ○ '19.06. : 1처리장 가시설 및 터파기 ○ '20.03. : 1,2처리장 토목구조물 완료 ○ '20.04.~현재 : 건축구조물 공사중	방재시설부
89	남산 예장자락 재생사업(공원및주차장)	○ 위치 : 중구 예장동 4-1번지 일대 ○ 사업개요 - 공원 16,373㎡, - 주차장 버스 39면, 승용 2면 - 도로교통체계 개편 ○ 사업기간 : '15. 1 ~ '20. 12 ○ 사 업 비 : 598억원	○ '16.08. : 기공식(시장님 참석) ○ '16.11. : 실시설계 착수 ○ '17.04. : 남산2청사 및 공원부지내 문화재 조사 ○ '17.06. : 건물지 유구 이전복원용역 착수 ○ '17.08. : 공사착공 ○ '17.12. : 소방재난본부 주차장 철거 및 수목이식 중 ○ '18.09. : 보완설계완료 ○ '19.05. : 도로개설 완료(교통우회) ○ '19.10. : 공기연장 및 사업계획 변경 ○ '20.06. : 주차장 골조완료 및 기계.전기공사 시행중	방재시설부
90	국회대로 지하차도 및 상부공원화사업	○ 위치 : 양천구 신월IC ～ 국회의사당 교차로 ○ 사업개요 - 폭 40~55m, 연장 7.6km (친환경공간 약 11만㎡) ○ 사업기간 : '13. 10 ~ '25. 12 ○ 사 업 비 : 4,015억원	○ '15.3. : 시점부구간 일괄입찰 추진방침(시장방침) ○ '16.01. : 턴키공사 입찰(2회유찰) ○ '16.04. : 현안사항 검토보고 - 중첩구간 수의계약 - 잔여구간 일반공사로 추진 ○ '17.12. : 중첩구간 수의시담 중 - 잔여구간 및 2단계구간 설계중 ○ '18.11. : 2단계 실시설계 이관 ○ '19.06. : 목동4,7단지 주민설명회 ○ '20.06. : 실시설계 진행(9월완료예정)	방재시설부
91	중랑천 생태회복 및 친수문화 조성사업	○ 위치 : 중랑천 한강합류부~군자교 (L=4.9km) ○ 사업개요 - 한강·청계천 합류부 도류제 및 홍수 저감형 호안 조성, － 여울, 제방 숲 등 조성 ○ 사업기간 : '18. 9 ~ '20. 3 ○ 사 업 비 : 262억원	○ '14.7~`16.6 : 중랑천 마스터플랜 용역시행 ○ '16.7.~`18.2 : 하류구간 기본 및 실시설계 ○ '18.03~06 : 계약심사 등 사전 절차 이행 ○ '18.09. : 공사착공	방재시설부
92	반포천 유역분리 터널 건설공사	○ 위치 : 서초구 법원로 10 ~ 사평대로 240 ○ 규모 : □ 4.5 × 4.5m ~ D7.1m, 연장 1,162m - 유입부 구조개선 : □ 2.8×2.65m@3, 1개소 - 유입부 관로부설 : □ 4.5×4.5m, 98m - 터널 : D 7.1m, 944m - 유출부 개착부 : □ 6.5×6.5m ~ 9.6×3.0m, 72m - 유출부 비개착부 : □ 3.0×3.0m@3 ~ 4.7×2.0m@2, 48m ○ 공사기간 : 2018.02. ~ 2021.1. ○ 총사업비 : 449억원	○ '17. 3.31 : 기본 및 실시설계용역준공 ○ '17. 9.29 : 시설공사 발주 의뢰 ○ '17.10.18 : 건설사업관리용역 발주 ○ '17.12.05 : 건설사업관리용역 계약 (도화엔지니어링외 2개사) ○ '18.1.30 : 시설공사 도급계약 (호반산업외 1개사) ○ '18.2.1 : 공사착공 ○ '20.6.현재 : TBM터널 403m 굴진	방재시설부
93	낙산 성곽길 정비 공사	○ 위 치 : 동대문성곽공원~낙산정상 ○ 사업개요 :한양도성 내측 순성길 정비 - 규 모 : 연장 863m, 폭 15m내외 - 내 용 : 성곽길 정비, 차도 및 놀이 시설 정비, 하수관 개량 등 ○ 공사기간 : '19. 11 ~ ’20. 11 ○ 소요예산 : 2,551백만원	○ '15.12. : 성곽마을 이화충신권 보전관리 실행계획 수립 ○ '17.07. : 기본설계용역 완료 ○ '19.06. : 실시설계용역 완료 ○ '18.11. : 문화재 현상변경허가 심의(변경) ○ '19.10. : 공사발주 ○ '20.03. : 현장 실착공 ○ '20.06.현재 : 하수관개량 공사 중 ○ ’20.11. : 준공예정	방재시설부
94	도시철도 9호선 4단계 건설사업	○ 위 치 - 중앙보훈병원 ~ 고덕역(5호선) ~ 고덕강일1지구 ○ 규 모 - 연장 4.1㎞, 정거장 4개소 ○ 사업비 : 6,408억원	○ '12.12. : 고덕·강일 보금자리주택지구 광역교통개선대책으로 9호선 4단계 도입 ○ '15. 6. : 서울특별시 10개년 도시철도망구축계획 반영 ○ '15.10. : 예비타당성조사 요청 ○ '18. 5. : 예비타당성조사 통과 ○ '18. 9. : 기본계획 용역 계약·착수 ○ '19. 7. : 중앙투자심사 통과 / 공청회 개최 ○ '19. 9. : 시의회 의견청취 / 기본계획 승인 신청(국토교통부) ○ '20. 3. : 총사업비 협의 완료(기획재정부) ○ '20. 4. : 기본계획 승인(국토교통부) ○ '20. 6. : 입찰 관련 심의 등 입찰 준비 중	도시철도 계획부
95	위례신사선 도시철도 민간투자사업	○ 위 치 - 위례중앙 ～ 유통단지 ~ 학여울 ~ 신사 ○ 규 모 - 연장 14.7km, 정거장 11개소, 차량기지 1개소 ○ 사업비 : 14,847억원 ○ 최초제안자 : GS건설 컨소시엄	○ ’15. 6. : 도시철도망구축계획 변경 승인(국토부) ○ ’17. 1. : 위례신사 민자제안서 접수 ○ ’17. 3. : 민자적격성조사 의뢰 ○ ’18.11. : 민간투자사업 적격성조사 결과 통보(KDI 공공투자관리센터→교통본부) ○ ’18.11. : 민자적격성조사 결과 알림 및 업무이관(교통본부→도기본) ○ '19. 7. : 제3자 제안공고 ○ '19. 9. : 1단계 사전심사(PQ) ○ '19.11. : 2단계 사업제안서 제출 ○ '20.1. : 사업제안서 평가 ○ '20.1. : 우선협상대상자 선정 ○ '20.3. : 본협상 kick off ○ '20.6. : 실무협상 추진 중	도시철도 계획부
96	위례선(트램) 도시철도 건설사업	○ 위 치 - 마천역 ～ 복정역․8호선 추가역(지선) ○ 규 모 - 연장 5.4km, 정거장 12개소, 차량기지 1개소 ○ 기 간 : ’19 ~ ’24 ○ 사업비 : 기본계획(안) 2,655억원	○ ’14. 5. : 위례신도시 광역교통개선 대책 변경안 확정(국토부) ○ ’15. 6. : 도시철도망구축계획 변경 승인(국토부) ○ ’15. 7. : 위례선 최초제안 제출 (두산건설) ○ ’18. 07. : 민자적격성조사 (B/C=0.75 타당성미확보) ○ ’18.12. : 타당성 조사 비대상 사업 결정(국토부) ○ ’19. 3. : 시 투자심사 완료 ○ ’19. 5. : 공공주도사업 추진을 위한 업무협약 체결(국토부 ,서울시, LH 등 7개기관) ○ ’19. 7. : 중앙 투자심사 완료 ○ ’19. 8. : 기본계획 용역 착수 ○ ’20. 4. : 주민공청회, 시의회 의견 청취 완료 ○ ’20. 6. : 기본계획 승인 신청 ※ LH와 총사업비 조정 협의 중	도시철도 계획부
97	별내선(8호선 연장) 건설공사	○ 위 치 - 강동구 암사동(암사역) ∼ 구리시 토평동 ○ 규 모 - 총연장 3.72㎞, 정거장 1개소, 모란 차량기지 유치선(7편성) ※ 경기도 구간 : 연장 9.19km(구리시 토평동~남양주시 별내동), 정거장 5개소 ○ 공사기간 : ’17.08. ~ ’23.09. ○ 총사업비 : 4,868억원	○ '14.12. : 기본계획 고시 ○ '15.06. : 건설사업 업무협약 체결 (서울시외 4개 기관) ○ '17.04. : 총사업비승인(기재부) ○ '17.06. : 사업계획변경 승인 ○ '17.08.~'17.09.. : 공사계약 및 착공 - 1공구:쌍용건설, 2공구:두산건설 ○ '20.06.현재 : 본선 개착, 정거장(1개소), 수직구(2개소) 가시설 및 토공 정상 추진 중 ※ 공정률 : 45%	도시철도 사업부
98	신림선 도시철도 민간투자사업	○ 위 치 - 샛강역 ~ 대방역 ~ 보라매역 ~ 신림역 ~ 서울대 앞 ○ 규 모 - 연장 7.8㎞, 정거장 11개소, 차량기지 1개소 ○ 사업비 : 8,376억원 (재정 4,286. 민자 4,090) ○ 기 간 : ’17.02. ~ ’22.02. ○ 사업시행자 - 남서울경전철주식회사 (주간사 : 대림산업)	○ '15.08. : 실시협약 체결 ○ '16.09. : 실시계획 승인 (토공 및 가시설분야) ○ '17.01. : 실시계획 변경 승인(구조물 분야) ○ '17.02.03. : 공사착수 ○ '20.06.현재 : 본선 및 정거장(11개소), 차량기지․종합관제동(1개소) 공사 정상 추진 중 ※ 공정률 : 53%	도시철도 사업부
99	동북선 도시철도 민간투자사업	○ 위 치 - 왕십리역 ~ 고려대역 ~ 미아사거리역 ~ 하계역 ~ 상계역 ○ 규 모 - 연장 13.4㎞, 정거장 16개소, 차량기지 1개소 ○ 사업비 : 1조 5,963억원 (재정 8,100. 민자 7,863) ○ 기 간 : ’20. ~ ’25. ○ 사업시행자 - 동북선 도시철도(주) (주간사 : 현대ENG)	○ '18.07. : 실시협약 체결 ○ '18.12. : 실시계획(차량기지) 승인 ○ '19.09. : 실시계획(본선, 정거장) 승인 ○ '19.11. : 실시계획(차량기지) 승인 취소 및 재협의 ○ '20.01. : 실시계획(차량기지) 재승인 ○ '20.02. : 공사 착수 및 보상의뢰 ○ '20.04. : 보상계획(차량기지) 열람 공고 ○ '20.06.현재 : 보상 및 행정절차(지장물 이설협의 등) 추진(계속)	도시철도 사업부
100	하남선(5호선연장) 건설사업	○ 위 치 - 강동구 상일동역~서울시계 ○ 규 모 - 연장 1.1km, 정거장 1개소 (차량기지 입출고선 1.37㎞포함) ○ 기 간 : ’15.03. ~ ’20.12 ○ 사업비 : 3,746억원	○ ’09.03. : 예비타당성 조사 ○ ’13.11. : 하남선 복선전철 기본계획 고시(국토교통부) ○ ’15.03. : 공사 계약 및 착수 ○ ’15.08. : 사업계획 승인(국토부) ○ ’18.07. : 본선 터널 및 개착구조물 완료 ○ ’19.03. : 강일역 본체 구조물 완료 ○ ’20.06 현재 : 정거장 외부출입구 구조물 및 입출고선 공사 중	도시철도 토목부
101	진접선(4호선연장) 차량기지 추진	◦ 위 치 - 경기도 남양주 진접읍 금곡리 일원 ◦ 규 모 - 차량기지 197,400㎡, 인입선 4.9㎞, 창동차량기지 철거1식 ◦ 사업기간 : ’18년 ~ ’25년 ◦ 사업비 : 5,335억원	◦ ’13.12.19. : 진접선 복선전철 기본계획 수립 고시(국토부) ◦ ’14.12.12 : 4호선연장(진접선) 사업추진계획 수립(교통본부) ◦ ’15.05.06. : 설계용역 착수 ◦ ’16.12.12 : 기본계획(차량기지 위치) 변경고시(국토부) ◦ ’18.02.22. : 진입도로 실시계획 인가 고시(남양주시) ◦ ’18.09.05. : 차량기지 사업계획 승인 고시(국토교통부) ◦ ’18.09.05. : 공사 발주 (조달청 계약 의뢰) ◦ ’18.12.28. : 공사 계약 - 1공구(인입선) : KCC건설 - 2공구(차량기지) : 현대엔지니어링 ◦ ’18.12.31. : 공사 착공 ◦ ’19.01.16. : 건설사업관리용역 착수 ◦ ’19.07.22. : 차량기지 및 입출고선 보상계획공고 ◦ ’20.06.현재 : 차량기지 보상협의, 진입도로 및 인입선 환기구 공사 중	도시철도 토목부
102	하남선(5호선 연장) 궤도공사(1.2공구)	○위 치:강동구 상일동(상일역) ~ 하남시 창우동 ○규 모 : 궤도부설 L =17.71km(단선) - 1공구: 궤도 L= 9.69km(1~3공구) - 2공구: 궤도 L= 8.02km(4~5공구) ○기 간: ‘17.09~’20.12. ○사업비: 24,228백만원	○ ‘17. 09. : 1공구 착공 ○ ‘17. 12 : 레일,침목 반입 ○ ‘18. 01~11: 레일용접 및 궤도부설 ○ ‘18. 12. : 1공구 준공 ○ ‘18. 11. : 2공구 착공 ○ ‘19. 01~11: 궤도부설 L= 7.06km ○ ‘20. 12. : 2공구 준공 예정	도시철도 토목부
103	하남선(5호선 연장) 건설사업 (설비분야)	○ 위 치 - 강동구 상일동역 ~ 하남시 창우동 ○ 규 모 - 연장 7.725km, 유치선 2선, ○ 기 간 : ’12. ~ ’20.12. ○ 사업비 : 1,065억원 ○ 사업내용 - 시스템 · 송변전․전차선․통신․신호공사 및 관급자재(전구간) - 정거장 전기, 기계공사 및 관급자재, 책임감리용역 (상일동역 ~ 서울시계)	○ ’18.03:통신공사(2단계 구간) 착공 ○ ’18.04:통신공사(1단계 구간) 착공 ○ ’18.05:송변전공사(1단계 구간) 착공 ○ ’18.07:신호공사 착공 ○ ’18.07: 전차선공사 (1단계, 2단계, 차량기지) 착공 ○ ’18.08:기계공사 착공 ○ ’18.09:정거장전기공사 착공 ○ ’18.10:송변전공사(2단계 구간)착공 ○ ’19.07:1단계구간 시운전열차 투입 ○ ’20.04:2단계구간 시운전열차 투입 ○ ’20.06:1단계구간 영업시운전 완료 ○ ’20.07:2단계구간 사전점검 추진	도시철도 설비부
104	하남선(5호선 연장) 건설사업 (SE·감리)	○ 위 치 - 강동구 상일동역 ~ 하남시 창우동 ○ 규 모 - 연장 7.725km, 유치선 2선, ○ 기 간 : ’12. ~ ’20.12. ○ 용역비 : 69억원 ○ 사업내용 - 시스템시스템통합감리 · 송변전․전차선․통신․신호분야 SE 및 책임감리용역(전구간)	○ ’18.05:시스템통합감리 발주 ○ ’18.06:시스템통합감리 계약 ○ ’19.07:시스템통합감리 1차 준공 ○ ’19.08:시스템통합감리 2차 계약 ○ ’20.03:시스템통합감리 2차 준공 ○ ’20.03:시스템통합감리 3차 계약	도시철도 설비부
105	영동대로 지하공간 복합개발사업 (기본설계단계)	○ 위 치 - 코엑스 사거리(9호선 봉은사역) ~ 삼성역 사거리(2호선) ○ 규 모 - 복합환승센터 597m(지하7층) - 철도터널 403m ○ 기 간 : '15. ~ '27. ○ 사업비 : 17,459억원 ○ 관련노선 : GTX-A·C, 삼성동탄선, 위례신사선, 지하철 2·9호선 ※ 사업비(기본설계) : 24,474백만원(’18. 2.~ 20.12.) ○ 사업내용 - 4개 광역․도시철도 노선이 계획되어 있는 영동대로 지하공간을 대중교통 허브 및 시민중심 공간으로 복합개발	○ '16. 5. : 기본구상 수립 ○ '16.10. : MOU체결(서울시-국토부) ○ '17. 8. : 기본계획 수립 ○ '17.10. : 국제설계공모 당선작 발표 ○ '18. 2. : 기본설계 착수 ○ '19. 2. : KTX 연장선 배제 통보 (국토부) ○ '19. 6. : 복합환승센터 지정 승인 (국토부 대광위) ○ '19. 7. : 토목분야 건설기술심의, 일상 감사, 계약심의 완료 ○ '19. 9. : 재해영향평가, 환경영향평가 협의 완료 ○ '19.10. : 복합환승센터 및 사업자 지정 고시 ○ '20.6.8 : 삼성동탄선 총사업비 조정 심의 (기획재정부) ○ '20.6.13 : 토목분야 4개공구 발주 중 (조달청) ○ '20. 6월 현재 건축‧시스템분야 기본설계 마무리 중(98%)	영동대로 복합개발 추진단

5. 주요 지시사항 목록

□ 도시기반시설본부 : 6건

지 시 사 항		추 진 상 황	주관부서
일 자	지시내용(요약)
‘15.01.14	○ 건설공사장 사고조사 매뉴얼 제작	○ 사고 유형별 조치 매뉴얼 현황 - 재난 및 긴급현안 초기대응 매뉴얼 - 재난 유형별 현장조치 행동 매뉴얼(55개) ○ 국내 사고조사 업무 매뉴얼 사례 조사내용 - 건설사고 조사업무 매뉴얼(국토교통부) - 사고조사에 관한 안전가이드(한국산업안전보건공단) ○ 매뉴얼 추진내용 - 기존 유형별 행동 매뉴얼 내용 · 공사장 붕괴사고 : 도로, 지하철, 상수도, 아파트공사장 · 시설물 관련사고 : 한강교량, 도로터널, 운영중인 지하철, 대형건축물등 · 자연재해 관련사고 : 산사태, 설해, 지진, 폭염, 풍수해 등 - 사고조사 필요한 매뉴얼 · 인위적인 재난중 사고성 재난에 해당하는 각종 공사장 사고에 대한 조사 업무 매뉴얼 작성 · 국토교통부에서 시행하는 사고조사 이외 사고에 대하여 직접적인 조사활동에 필요한 사항을 작성토록 함(건설기술진흥법 제67조) ․건설사고조사 업무매뉴얼을 기준으로 작성	안전관리과
’14.02.13	○ 지하철 환기구 개선방안 - 건물 안이나 옥상 등 보행지장 방지, 미관저해 방지 방안	○ ’14. 3. 3. 보고 완료	도시철도 계획부
’14.02.27	○ 지하철 5호선 설계 발주조건 보고 - 운영회사 추진 진행 검토	○ ’14. 3. 3. 보고 완료	도시철도 계획부
’15.01.14	○ 경전철 민자협상 백서 제작	○ 민자협상 추진 백서 제작 계획 방침수립(’15.02) ○ 부서(분야)별 자료수집 원고(초안) 작성(’15.03∼06) ○ 분야별 원고 취합 및 편집 교정 (’15.07∼08) ○ 타 민자사업 백서 사례 비교 등 검토 및 보완(’15.09∼10) ○ 서울공공투자센터 등 자문 수정 후 백서 완료(’15.11∼12.)	도시철도 계획부
’14.07.15	○ 경전철 설계시부터 수익모델 창출에 대한 검토	○ ’14. 8.18 : 시장요청사항 처리계획 수립 ○ ’14. 8.22 : 수익모델도입을 위한 협의체 구성 ○ ’15. 1. 9 : 수익성확보방안 수립 위한 자문회의 개최 ○ ’15. 5.19 : 시장님 보고완료 ○ ’15. 5.29 : 경전철 수익성확대방안 조치계획보고 (행정2부시장 방침)	도시철도 계획부
’15.01.21	○ 노량진 수산시장 문제 - 노량진 수산시장과 1, 9호선 연결통로 건설에 중앙정부예산 26억원을 확보했다고 하면서 서울시에 30% 시비를 지원해 달라는 요청이 있는데 대응방안	○ ’15.1.2. 이행방향보고 ○ ’15.9.15. 시장님 메모보고 ○ ’15.11.15. 보고완료	도시철도 계획부

6. 소송계류중인 사항

□ 도시기반시설본부 소송 현황 (2016년~2020년)

구분	계	진행중인 사건	종결된 사건
			계	2016	2017	2018	2019	2020
계	82건	46건	36건	3건	5건	7건	11건	14건
시설국	49건	25건	24건	3건		4건	6건	11건
도시철도국	33건	21건	12건		3건	1건	5건	3건

※ 소송 결과(36건) : 서울시 승소(소취하‧기각 포함) 22건, 서울시 패소 11건,

화해 권고 및 이송 등 3건

□ 유형별 소송 현황 (2016년~2020년)

(’20.6.20 기준)

구분	계	공사대금 청구 (간접비 포함)	구상금 청구	손해배상 청구	입찰 관련	명도 소송	벌점부과 취소청구	기타
합 계	82	42	4	14	5	2	3	12
진행중인 사건 (‘20. 6.20 기준)	46	29	1	10	3	1	0	2
종결 사건	36	13	3	4	2	1	3	10

□ 진행중 소송 현황

(’20.6.20 기준)

계	1심	2심		3심
		직전심 승소	직전심 패소	직전심 승소	직전심 패소
42건	26건	6건	2건	8건	-

※ 진행중 소송 세부 내역 별첨

□ 총 46건

※

간접비 청구소송(28건)

연번	사 건	원고	피고	사건요지	소관부서	진행사항
1	공사대금 등 청구 ※ 소가 : 408,726천원	**산업 개발(주)	서울특별시	원고는 양화대교 구조개선공사를 수행한 수급인들로서, 유관사업인 4대상사업 및 경인운하의 전면 재검토에 따를 공사 중지 및 피고의 공기연장 등으로 공사중단, 선투자 금융비용, 수상장비 누락분, 간접비 등 간접비 청구	토목부	1심 일부승소 2심 일부승소 3심 진행
2	공사대금 ※ 소가 : 1,483,665천원	**건설외 2	서울특별시	장물 손실보상 지연, 문화재 시굴 및 발굴조사 지연 등에 따른 공기연장에 대한 간접비 지급 요구하여 소송 제기	토목부	1심 진행중
3	공사대금 ※ 소가 : 2,766,146천원	**아산외 1	서울특별시	서부트럭터미널 앞 지하차도 건설공사”와 관련 원고들의 귀책사유 없이 총공사기간이 8차례에 걸쳐서 연장된바, 추가 간접비를 지급 요구하며 소송제기	토목부	2심 일부승소 3심진행
4	공사대금 ※ 소가 : 8,095,179천원	**건설 (주)	서울특별시	암사대교건설공사 공기연장(사업예산 미확보, 인허가지연)에 따른 간접비 청구 소송을 제기	토목부	1심원고 일부승소 2심진행
5	공사대금 ※ 소가 : 1,200,000천원	**** 주식회사 외 2	서울특별시 외 1	“월드컵대교 건설공사”는 진행과정에서 예산투입 부족에 따른 공정지연으로 공사기간이 연장되어 시공사로부터 연장된 기간 동안 추가 발생할 간접비에 해안 청구	토목부	1심진행
6	손해배상 청구 ※ 소가 : 107,500천원	**********조합연합회	서울특별시외1	‘19. 3. 3. 01:41분경 공사 구간 시점부 부근에서 원고차량이 전방에 쓰려져 있던 오토바이 운전자를 원고 차량 바퀴로 역과하여 사망에 이르게 한 사고로, 발주청의 도로유지관리 책임을 들어 서울시 50%, 시공사 50% 소송 제기	토목부	1심진행
7	손해배상 청구 ※ 소가 : 150,000천원 2018가단 56337	나** (**사우나)	전** 서울시청 공무원 이** 관악구청 공무원 박** 관악경찰서 공무원	“신림~봉천터널 도로공사(2공구)”원고는 공사현장 부근에서 대중목욕탕을 운영하는 사업자로 본 공사시 터널 발파 진동으로 사업주의 정신적 고통 및 사우나 영업 손실이 발생되었는대도 지하 발파 공사를 계속 실시하므로 공사 중지 등을 하지 않아 불법행위책임을 지고 위자료 청구	토목부	1심진행
8	손해배상 청구 ※ 소가 : 210,000천원	이** 나** (**사우나)	서울특별시지에스건설 남서울경전철 한화건설 관악구	“신림~봉천터널 도로공사(2공구) 및 신림동 경전철 민간투자사업 공사(3공구)원고는 공사현장 부근에서 대중목욕탕을 운영하는 사업자로 상기 터널공사시 터널 발파 진동 및 소음으로 시설물 피해 및 영업손실이 발생하였는바, 이로 인한 피고들의 불법행위 책임을 지고 손해배상 청구	토목부	1심진행
9	공사대금 청구 ※ 소가 : 2,868,628천원	**건설 외 2	서울특별시	에너지제로하우스 건립공사에 관한 도급계약을 체결하고 2012.7.31 준공검사를 완료하였으나, 서울시가 정당한 사유 없이 설계변경을 하였으므로 이로 인해 발생한 공사대금을 청구	건축부	1심승소 2심일부승 3심진행
10	공사대금 ※ 소가 : 9,784,376천원	**물산 (주)	서울특별시	DDP 건설공사와 관련하여 수급인의 책임이 없는 사유로 사업계획을 변경(공사기간 연장)하여 공사비 증액된 사유가 있으니 공사비(간접비)를 청구	건축부	1심승소 2심일부승 3심진행
11	공사대금 등 청구 ※ 소가 : 737,123천원	(주) ** 건설	서울시	“서울한양도성 흥인지문 및 광희문 주변 단절된 성곽 연계성 회복공사’ 와 관련하여 피고의 요구에 따른 기존 계약에 포함되지 않은 다수의 추가 공사로 발생한 공사대금 청구	건축부	1심일부승 2심진행
12	공사대금 (2019나66417) ※ 소가 : 57,680천원	블****(주)	서울특별시	“성동소방서 신축공사” 의 하도급업체로 미지급된 잔여공사대금 57,680천원을 하도급대금 직접지급합의를 근거로 발주처에서 직접 지급할 것을 요청	건축부	1심승소 2심진행
13	공사대금 (2018가합567681) ※ 소가 : 300,000천원	누***** (주)	서울특별시	“성동소방서 신축공사” 의 원도급사로 미지급된 잔여공사대금 중 300,000천원을 지급할 것을 요청	건축부	1심진행
14	공사대금 등 청구 (2019가단5295035) ※ 소가 : 73,965천원	건설 ** (주)	서울특별시	‘돈화문 민요박물관 건립공사’ 관련 공사 진행시 사용한 현장 인근 사무실 임대료 실비 지급 청구	건축부	1심진행
15	공사대금 청구 (2020가합505792) ※ 소가 : 201,000천원	주식회사 **토건	서울특별시	원고는 노들섬 특화공간 조성공사와 관련하여 계약을 체결한 자로서 2차 공사기간(92일 증)과 3차 공사기간(41일 증) 증가에 대한 공사비(간접비)에 대한 지급요청 청구	건축부	1심진행
16	공사대금 등 청구 (2019가합575993) ※ 소가:201,000천원 및 청구금액 별도 감정	㈜**건설, ㈜**산업	서울특별시	서울소방행정타운공사와 관련하여 발주당시 예정가격을 과소 책정하여 도급공사를 낙찰 받음에 있어 발생한 손해배상 및 본 공사를 진행하는 과정에서 추가로 발생한 공사비에 대한 지급의무가 있다며 소 제기	건축부	1심진행
17	손해배상 등 청구 (2020가합538945) ※ 소가:666,429천원	**개발(주)	서울특별시	원고는 어린이병원 삼성발달센터 건립공사와 관련하여 피고가 불법행위에 기한 손해배상금 576,029,631원 및 설계변경에 따른 공사대금 90,400,000원을 지급할 의무가 있다며 소 제기	건축부	1심진행
18	공사대금 청구 (2020가합521589) ※소가201,000천원	**종합건설(주)	서울특별시	세종대로일대 역사문화특화공간 조성공사의 시공사로 1차수 공사기간이 피고의 책임으로 총 249일 연장되었고, 이에 대한 간접비()를 청구함	건축부	1심진행
19	구상금 청구 (2018나65673) ※ 소가 : 3,090천원	한화손해보험주식회사	서울특별시	서울제물포터널 민간투자사업 진행 중 원고 보험차량이 2017.8.10. 8:08경 신월IC 부근 제물포터널 공사현장을 주행하다 노면에 유출된 기름으로 인해 미끄러져 1,2차 접촉사고가 발생하였는바, 도로시설 관리 및 하자보수 책임자로서 서울시의 과실을 주장하며 그 수리비를 구상금으로 청구	방재시설부	1심승소 2심승소
20	공사대금 ※ 소가 : 178,712천원	*****종합건설	서울시	“염창외1개소 빗물펌프장 증설공사” 강서구 염창동 및 개화동 펌프장, 펌프실 증설공사 중 강서구청의 요구사항 수용과 추가적인 물량투입 등으로 인한 공기연장에 따른 간접비 청구	방재시설부	1심 일부승소 2심진행
21	공사대금 등 청구의 소 ※ 소가 : 23,596,270천원	**건설외 3	서울시	중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업의 시공사가 서울시의 예산배정 지연 등으로 공사기간 연장에 따라 추가 소요된 간접비 청구	방재시설부	1심진행
22	공사대금 등 청구의 소 ※ 소가 : 4,950,000천원	**산업(주)외 5	서울특별시외 1	서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업의 시공사가 7차 공사기간 연장에 따라 추가 소요된 간접비 청구	방재시설부	1심진행
23	명도 청구 (토지 등 인도) ※ 소가 : 3,843,065천원	서울특별시	㈜***	“디지털3단지~두산길 간 지하차도 건설공사” 관련 보상이 완료된 ㈜***건물 및 인쇄기등 지장물 미이전에 따른 토지 등 인도 청구 소 제기	방재시설부	1심진행
24	손해배상 청구 (공사 간접비) ※ 소가 : 124,560천원	서울특별시	㈜***	“디지털3단지~두산길 간 지하차도 건설공사” 관련 보상이 완료된 ㈜***건물 및 인쇄기등 지장물 미이전으로 공사중지(‘19.11.11.)되어 발생된 손해 배상(공사 간접비) 청구	방재시설부	소송접수
25	변상금부과처분 취소	㈜***	서울특별시	“디지털3단지~두산길 간 지하차도 건설공사” 관련 보상이 완료된 ㈜***건물 및 인쇄기등 지장물 미이전 등 토지무단 점용에 대한 변상금 부과에 대하여 ㈜***에서 취소 소송	방재시설부	소송접수
26	손해배상 청구 ※ 소가 : 27,200,000천원	서울특별시	**산업(주) 외 3	“7호선 연장구간 공사” 원고가 7호선 연장구간 입찰담합에 참여한 피고에게 입찰담합에 따른 손해배상액(2억, 명시적 일부 청구)을 지급할 것을 청구	도시철도 계획부	1심승소 2심패소 3심파기환송 환송심 진행중
27	손해배상청구 ※ 소가 : 200,000천원	서울특별시	**물산 (주) 외 1	“9호선 919공구” 입찰담합에 따른 피고들의 불법행위로 인한 손해액에 대한 배상 청구(소가 : 2억원, 추후 감정예정)	도시철도 계획부	1심진행
28	설계보상비 반환청구 ※ 소가 : 998,000천원	서울특별시	**산업 개발	“지하철 9호선 919공구 건설공사”에 대하여 공정거래위원회로부터 담합행위에 대한 의견서가 통보되어 시공사에 반환요구 청구하였으나, 거부함에 따른 설계보상비 반환 청구의 소 제기	도시철도 계획부	1심진행
29	손해배상 청구 ※ 소가 : 10,071,908천원	**기업 외 7	서울특별시	“동북선 민간투자사업” 우선협상대상자 지정 취소에 대해 사업준비비용 상당의 손해배상액 지급을 청구하는 소 제기	도시철도 계획부	1심일부승소 2심일부승소 3심 진행
30	공사대금 청구 ※ 소가 : 200,000천원	**산업(주) 외 5	서울특별시	“923공구 건설공사” 938정거장의 위치 변경 및 규모 증가에 대해 추가 공사대금을 청구 소 제기	도시철도 계획부	1심진행
31	공사대금 청구 ※ 소가 : 14,126,002천원	**산업 (주) 외 11	대한민국 서울특별시 보조참가인(부천시)	“지하철 7호선 연장구간 공사”의 공사기간 21개월 연장에 따라 현장소장 인건비 등이 소요되어 시공사측에서 실비(간접비 등) 지급 청구	도시철도 사업부	1심패소 2심패소 3심(파기환송-승소) 고법 환송심 (92.8% 승소) 재상고심 진행
32	공사대금 청구 ※ 소가 : 1,000,000천원	**** 경전철 주식회사	서울특별시	“우이신설 도시철도 민간투자사업 건설공사”의 공사를 진행하면서 5개 유형의 추가 공사비를 지출함에 따른 공사대금 청구	도시철도 사업부	1심진행
33	손해배상(기) 청구 ※ 소가 : 210,000천원	이** 외 1	서울특별시 외 4	“신림-봉천 터널 도로공사 및 신림선 경전철 민간투자사업 건설공사”의 공사 발파 등에 따른 소음·진동으로 인하여 영업장에서 입은 피해 등에 대하여 손해배상 청구 소 제기	토목부 도시철도 사업부	1심진행
34	공사대금 청구 ※ 소가 : 402,000천원	**건설(주) 외 1	서울특별시 외 1	“지하철 917공구 공사” 관련 설계변경으로 인한 공사비 청구의 소 제기	도시철도 토목부	1심승소 2심진행
35	공사대금 청구 ※ 소가 : 1,189,781천원	****개발 (주) 외 1	서울특별시 외 1	“916공구 건설공사”의 건강보험료 등은 입찰공고 시 사후정산에 관한 내용을 기재하지 않아 사후정산이 불가하나, 부당 감액한 건강보험료 등을 지급하라는 소 제기	도시철도 토목부	1심패소 2심승소 3심진행
36	공사대금 청구 ※ 소가 : 3,990,000천원	****(주) 외 2	서울특별시 외 1	“919공구 7차공사” 지체상금 부과에 대하여 지연사유가 원고들의 귀책이 아니어서 지체상금이 발생하지 않으므로 부당 공제한 공사대금 청구 소송 제기	도시철도 토목부	1심승소 2심진행
37	공사대금 청구 ※ 소가 : 6,553,800천원	****(주) 외 1	서울특별시 외 1	“915공구 및 916공구 건설공사” 관련 우리시로부터 받지 못한 공사대금에 대하여 지급을 요청하며 소 제기	도시철도 토목부	1심패소 2심진행
38	공사대금 청구 ※ 소가 : 200,000천원	****주식회사 외 5	서울특별시	“923공구 건설공사” 관련 공사기간 연장(34개월)에 따른 계약금액조정금액에 대하여 공사비 증가에 대한 비용청구	도시철도 토목부	1심패소 2심진행
39	공사대금 청구 ※ 소가 : 7,911,268천원	****(주) 외 2	서울특별시 외 1	“919공구 7차공사” 관련 공사기간 연장(10개월)에 따른 계약금액조정금액에 대하여 공사비 증가에 대한 비용청구	도시철도 토목부	1심진행
40	손해배상 청구 ※ 소가 : 1,922,315천원	㈜***** 외 1	서울특별시 외 1	“921공구 건설공사” 관련 공사기간 연장(36개월)에 따른 계약금액조정금액에 대하여 공사비 증가에 대한 비용청구	도시철도 토목부	1심진행
41	손해배상 청구 ※ 소가 : 989,331천원	***	서울특별시 외 1	“909공구 건설공사” 관련 불량토사 공급에 따른 계약해지로 인한 손해배상 청구	도시철도 토목부	1심진행
42	공사대금 청구 ※ 소가 : 56,621,333천원	****(주) 외 1	서울특별시 외 1	“919공구 건설공사” 관련 공사기간 연장(36개월)에 따른 계약금액조정금액에 대하여 공사비 증가에 대한 비용청구	도시철도 토목부	1심진행
43	공사대금 청구 ※ 소가 : 201,000천원	****(주) 외 2	서울특별시 외 1	“918공구 건설공사” 관련 공사기간 연장(35개월)에 따른 계약금액조정금액에 대하여 공사비 증가에 대한 비용청구	도시철도 토목부	1심진행
44	손해배상 청구 ※ 소가 : 457,937천원	***	서울특별시	“723공구 건설공사” 관련 재산권 침해(사유지 침범)되어 건물면적 손실 및 공사비 증가에 대한 비용청구	도시철도 토목부	1심진행
45	손해배상 청구 ※ 소가 : 1,080,000천원	***	서울특별시 외 4	“909공구 건설공사” 관련 불량토사 공급에 따른 계약해지로 인한 손해배상 청구	도시철도 토목부	1심진행
46	손실보상금 청구 ※ 소가 : 5,000천원	*** 외 4	서울특별시	“진접차량기지 진입도로(소로 1-99호선) 건설공사” 관련 수용재결 보상액의 산정 시 비교조건 등을 수정하지 않아 보상액이 적게 산정되었다고 손실보상금을 청구	도시철도 토목부	1심진행

7. 보존문서 현황

부 서 별	합 계	영 구	준영구	30년	10년	5년	3년	1년
계	7,764	28	53	51	2,444	4,829	580	9
총무부	1,426	2	8	1	44	1,371	56
토목부	2,412	1,941			232	158	81
건축부	985	390	1	36	408	117	33	0
설비부	59					59
방재시설부	386	3		7	216	147	13
안전관리과	25					24		1
도시철도계획부	161		26	14	93	24	4
도시철도사업부	35					35
도시철도토목부	1,261	83	281	16	771	110
도시철도건축부	71			32	4	31	4
도시철도설비부	354	5	5		53	158	133
영동대로 복합개발추진단	61	22			5	16	18

8. 비밀소유 현황

부 서 별	비 밀 등 급 별				대외비	암호자재
	계	Ⅰ급	Ⅱ급	Ⅲ급
계	22		1	21	53
총무부	14		1	13	21
토목부	2				2
건축부	3			1	2
설비부	2				2
방재시설부	3			1	2
안전관리과	3			1	2
도시철도계획부	8			3	5
도시철도사업부	3			1	2
도시철도토목부	3			1	2
도시철도건축부	3			1	2
도시철도설비부	3			1	2
영동대로복합개발추진단	0			0	0

9. 장부·대장 목록

부 서 별	생산년도	장부·대장명	책수	보관장소	비고
총무부	2000～	입찰공고대장	1	사무실
	2010～	민원사무처리부(실적증명발급대장)	1	”
〃(도철)	1999～	정보공개처리대장	2	”
〃(〃)	1989～	공고, 고시부여대장	2	”
〃(〃)	1989～	민원접수처리대장	12	”
〃(〃)	1990～	수입징수부	2	서고
〃(〃)	1990～	도시철도공채부	16	”
〃(〃)	1992～	일상경비지급내역 및 현금출납부	14	캐비넷
〃(〃)	1990～	세출예산추산부	85	서고
토목부	1987	건설공사관리대장	5	〃
		경력확인원 발급대장	1	〃
건축부	1997～	공사관리대장	1	건축부
	1998～	건설공사검사원명령부	1	건축부
방재시설부	2013～	경력․실적 확인서 발급대장	1	서고

10. 차량 현황

(단위 : 대)

연번	차량등록번호	차종	차명	정원
1	156어9718	중형 승용	쏘나타 하이브리드	5명
2	18더4637	중형 승용	아이오닉 일렉트릭	5명
3	75무8228	증형 승합	그랜드 스타렉스	12명
4	18더3614	중형 승용	아이오닉 일렉트릭	5명
5	18더7035	중형 승용	쏘울 전기차	5명
6	87나0377	소형 화물	그랜드 스타렉스	5명
7	39오6055	증형 승용	니로 하이브리드	5명
8	76마1250	증형 승합	그랜드 스타렉스	11명
9	76마1253	중형 승합	그랜드 카니발	11명
10	18더7051	중형 승용	쏘울 전기차	5명

11. 재산조서

□ 도시기반시설본부 : 323건

구 분			토지(천㎡)		건물(천㎡)		기타 (용익물권 등)
			필 지	면 적(㎡)	동 수	면 적(㎡)
합 계			323	218,529.07	1	934.28	180건
공유 재산	소 계		257	218,529.07	1	934.28	180건
	행정재산	계	257	208,098.05	1	934.28
		공 용 재 산	7	2,082.4	1	934.28
		공공용재산	41	19,615.36
		기업용재산	209	186,400.29
	보 존 재 산
	잡 종 재 산		66	10,431.02
국유 재산	소 계		-	-	-	-	-
	행정재산	계
		공 용 재 산
		공공용재산
		기업용재산
	보 존 재 산
	잡 종 재 산

※ 내역은「공유재산시스템」과 같음

12. 세입세출 예산현계표

(단위 : 백만원)

회 계 별	세입예산 현 액	징 수 결정액	수 납 액	과 오 반납액	불 납 결손액	비고
일반회계	1,437	1,789	1,027
도시철도건설특별회계	1,428,908	670,503	670,502

□ 세출예산 현계표(2020.06.30.현재)

(단위 : 백만원)

회계별	예산현액	수 입 액 (자금배정)①	자금전용액 ②	지 출 액 ③	잔 액 ①+②-③	비고
일반회계	6,384	2,729		2,729	3,655
도시철도건설사업비 특별회계	221,083	129,723		119,422	101,661
교통사업특별회계	15,512	10,311		5,791	9,721
광역교통시설특별회계	127,574	80,312		66,452	61,122

□ 국비세출예산 현계표

소 관 별	회 계 별	예산배정액	자금영달액	지 출 액	예산잔액	자금 잔액	비고
계
도시기반 시설본부	도시철도건설 특별회계	60,530	28,540	28,540	31,990

13. 세입세출외 현금수지현계표

(단위 : 백만원)

구 분	수 입	지 출	잔 액	예금종류	비 고
계	91,400	58,225	64,275		이월 31,100
	56,613	56,423	1,302	공금예금	이월 1,112
	92	0	2,392	정기예금	이월 2,300
	34,695	1,802	60,581	별단예금	이월 27,688
※ 잔고증명 별첨 위 사실을 확인함.
년 월 일
확인자：직위 직급 성명 인

14. 지방교부세수불현계표

예산과목			예산액	영 달		집 행		비 고
항	세항	목		금 액	미수령액	금액	잔 액
			-
		해	당	없	음

15. 적립금 조서

(단위:천원)

종 별	금 액	기 간	이 율	통장번호	예 금 주	예치 은행	관리부서
	해	당	없	음

16. 유가증권 수불현계표

권종별	수 익		불 출		잔고		수입목적	보관장소 및 관리부서
	매수	금액	매수	금액	매수	금액
		해	당	없	음

17. 보조금수지현계표

보조부서별	건 명 (내 역)	예산액	영달액 (보조액)	미수령액	집행액 (보조액)	잔액	비 고
계
		해	당	없	음

18. 물품조서

○ 부서별 비품 (사무용, 행정․건설․기타장비 등)

부서명	합 계			정수물품			비 정 수 물 품
	품목수	수량	금액 (천원)	품목수	수량	금액 (천원)	품목수	수량	금액 (천원)
서울시 도시기반시설본부	547	6,201	4,656,331	복사기 등 13	178	637,148	책상,의자 등 534	6,023	4,019,183