도시안전실 부서별 주요업무 현황

〔도시안전실 도시안전과〕

부서명	과(팀)	현원(명)	주요역할 및 업무	2013년 완료․진행(과업)사업 목록
도 시 안전과	안전 기획팀	11명	- 인사, 복무, 조직 - 간부회의 운영, 조례 - 주요업무계획, 심사평가(BSC) - 예산편성 및 결산, 일반회계, - 상훈 및 민원, 정보공개 - 교육, 직원후생복지 - 언론보도 및 홍보, 기타 서무	- 주요업무계획 수립 완료(연초) - 상‧하반기 도시안전실 인사 시행 - 12년 결산완료, 14년 예산편성 중 - 상훈 및 민원, 정보공개(수시) - 교육 및 직원후생복지(수시) - 언론보도 및 홍보(수시)
	안전 정책팀	7명	- 도시안전 마스터플랜 수립 - 안전마을 사업 추진 - 스마트 재난안전관리시스템 구축 - 도시시설물 관리개선 총괄 - 도시 시설물 통합매뉴얼 제작 - 업무연속성 관리(BCM) 시스템 구축 - UN 방재안전도시사업 추진, 국제협력체계 구축	- 도시안전 마스터플랜 수립(관련부서 의견수렴 완료) - 안전마을 사업(대상지역 선정완료, 사업진행중) - 스마트 재난안전관리시스템 구축 (시스템 구축완료) - 도로공사 매뉴얼 제작(계약체결완료) - 업무연속성 관리(BCM) 시스템 구축 (TF 운영중)
	재난 관리 상황팀	11명	- 서울재난관리거버넌스 운영 한파대책 수립 및 추진 - 폭염대책 수립 및 추진 - 초고층 및 지하연계복합건축물 재난관리	- 서울재난관리거버넌스 운영(50%) 한파대책 수립 및 추진(10%) - 폭염대책 수립 및 추진(100%) - 초고층 및 지하연계복합건축물 재난관리(50%)
	생활 안전팀	4명	- 생활안전거버넌스 운영․관리 - 안전관리계획 수립 - 안전리더 육성 및 재난안전교육 - 시민안전문화활성화 추진 - 어린이 놀이시설 안전관리 - 재난피해자 심리안정지원	- 생활안전거버넌스 운영․관리(70%) - 안전관리계획 수립(100%) - 안전리더 육성 및 재난안전교육(70%) - 시민안전문화 활성화 추진(30%) - 어린이 놀이시설 안전관리(70%) - 재난피해자 심리안정 지원(80%)
	안전 점건팀	5명	- 특정관리대상 및 시특법 1, 2종 시설물 관리(NDMS, FMS) - 안전점검의 날 행사(매월 4일) 총괄 - 저소득층 밀집지역 생활환경 개선 - 표본 안전점검계획 수립 및 실시 재난취약가구 안전점검 및 정비사업 안전진단 전문기관 등록사항 관리 및 행정처분에 관한 업무	- 저소득층 밀집지역 생활환경 개선 사업(공사 진행중) - 재난취약가구 안전점검 및 정비사업 (자치구에서 사업 진행중)
	건설업관리팀	7명	- 건설산업기본법 위반업체 행정처분․소송, 세외수입 부과 및 관리 - 건설협회(종합․전문)와의 업무 협력 - 건설업 신규등록, 주기적신고 등 - 불법하도급 신고센터 운영 - 자치구 위임 전문건설업 관리에 관한 지도․감독 - 건설기계업무 지도․감독, 전산망 관리 - 충무계획(건설분야) 등	- 12년 종합건설업 실태조사결과 부적격업체 행정처분 진행 : 총 558건 중 344건(62%) 조치완료('13.8월말 기준) - 건설협회와의 간담회 개최 : 총 3회 - 건설업 신고처리('13.8월말 기준) ․신규등록(140건), 주기적신고(256건), 양도․양수(4건), 합병(6건) 등

1. 서울시 도시안전 마스터플랜 수립

담당부서	팀 장	이정화	2133-8023
안전정책팀	담당자	심숙연	2133-8022

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 도시안전의 중장기 종합계획 수립

○ 사업기간 : ′12.4.5 ~ ′13.10.30

○ 총사업비 : 248백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정  90%, 현재공정 90%, 계획대비 실공정율   100%

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
0	248	0	0	248	248	0	0	248	0	0

□ 추진실적

○ 도시안전수준 진단 및 평가(′12.4~′12.9)

○ 중점과제 및 세부과제 도출(′12.12)

○ 전문가 자문 및 검토

- 착수보고(’12.5.30), 중간보고(’12.8.6, 11.19/’13.3.12), 도시안전 정책자문단(‘13.5.6)

○ 중점과제 보완 및 추진계획(안) 수립(′13.6)

- 27개 중점과제별 추진내용 ‧ 방법 ‧ 일정 등

○ 추진계획(안) 유관부서(12개 실‧본부‧국) 1차 검토(′13.6~′13.7)

○ 2차 합동 검토 및 보완(′13.8~′13.9)

□ 향후 추진계획

○ 마스터플랜 보완('13.9)

○ 시장 숙의 및 전문가 토론회('13.10)

○ 도시안전 마스터플랜 발표('13.11)

○ 실행계획 수립 및 추진, 지속적 모니터링 및 관리(14년 이후)

□ 특이사항 : 없음

2. 주민참여형 안전마을 만들기

담당부서	팀 장	이정화	2133-8023
도시안전과	담당자	채명준	2133-8024

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 주민이 자발적 참여와 협력을 통해 안전문제를 해결하기 위해 지속적으로 노력하는 마을 조성

○ 사업기간 : 2013. 4 ~ 12월

○ 사업내용

구 분	① 지역맞춤형 안전마을	② 통합 안전마을
사업성격	위해요인/취약집단별 단일주제 사업	통합형 사업
대상지역	마을안전에 관심이 높으면서 주민 활동계획이 구체적인 지역(50개소)	안전 위해요인이 많으면서 커뮤니티가 활성화된 지역(시범지역 2개소)
추진주체	3인 이상 주민(단체)	3인 이상 주민(단체)과 자치구 컨소시엄
추진내용	주민활동프로그램(S/W) 위주	주민활동(S/W), 환경조성(H/W) 병행
사업규모	50개소(1차 23개소, 2차 30개소)	2개소(동대문구 회기동, 서대문구 홍은1동)

○ 총사업비 : 1,000백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정 60%, 현재공정 60%, 계획대비 실공정율   100%

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
0	0	0	1,000	0	1,000	0	417		0	700

□ 추진실적

○ ’13. 4 : '13년 안전마을사업 추진계획 수립

○ ’13. 5 : 1차 지역맞춤형 안전마을사업 공모․선정(14개구 23개소)

○ ’13. 6  : 통합 안전마을사업 공모․선정(2개소 / 회기동, 홍은1동)

○ ’13. 8~9 : 2차 지역맞춤형 안전마을사업 공모․선정

□ 향후 추진계획

○ ’13.  9~11 : 현장 모니터링 등 사업 추진

○ ’13.  12   : 사업성과 평가 및 우수사례 발표

□ 특이사항 : 없음

3. 스마트 재난안전관리시스템 구축

담당부서	팀 장	이정화	2133-8023
도시안전과	담당자	김주형	2133-8043

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 급변하는 재난환경에 대비하여 도시안전 및 재난관리체계 선진화

○ 사업기간 : '12.12.18 ~ '13.8.14(8개월)

○ 총사업비 : 822백만원(713백만원, 생활안전거버넌스 시스템 구축사업:109백만원)

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정 100%, 현재공정 100%, 계획대비 실공정율 100%

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
0	1,021	0	0	1,021	1,021	0	822	199	0	39

□ 추진실적

○ 재난관리 정보화전략계획(ISP) 수립('12.6)

○ 전문가 자문회의(4회) : 착수보고회('13.3), 1,2차 중간보고회('13.3월, 6월), 완료보고회('13.8)

	< 스마트 재난안전관리시스템 >

○ 스마트재난안전관리시스템 구축 완료('13.8)

- 통합재난관리시스템 구축

▹ 수방, 제설, 붕괴, 재해이력 등 업무관리 시스템

및 서울안전포털 신규 구축

- 재난관리 인프라 구축

▹ 재난정보 통합DB, 현장대응 모바일 시스템 등

인프라 구축

○ 시스템 시범운영('13.9월)

□ 향후 추진계획

○ 시범운영 결과 반영 및 사용자 교육 : '13.10

○ 시스템 운영 및 유지관리 : '14년~

※ 시스템 운영 및 평가를 통해 '14년 이후 고도화사업 추진

□ 특이사항 : 없음

4. 서울시 도로공사 매뉴얼 제작

담당부서	팀 장	이정화	8023
도시안전과	담당자	박승주	8056

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 공무원, 유관기관, 일반시민 등 모든 사람이 쉽게 이해하고 활용할 수 있는 도로 공간에서 발생하는 모든 공사에 대한 매뉴얼 제작

○ 위    치 : 서울특별시

○ 규    모 : 도로공사에 관한 매뉴얼

○ 사업기간 : 2013.8.29 ~ 2014.3.28(7개월)

○ 총사업비 : 37백만원(원고작성 : 20백만원, 재편집·디자인·인쇄 : 15백만원, 자문: 2백만원)

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정 15%, 현재공정 15%, 계획대비 실공정율 100%

□ 예산투자 현황

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용 (예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
								35	10

○ 사고이월 사유 : 용역기간이 ´14.3.28이 됨에따라 사고이월 발생

□ 추진실적

○ 착수보고회(´13.9.6) 및 1차 품질점검회의(´13.9.23) 개최

○ 매뉴얼 제작범위 및 내용, 기존현황 매뉴얼 및 제도 분석, 기타(공사용 표지판등) 논의

□ 향후 추진계획

○ ´13. 10월 : 공사현황, 기존 매뉴얼 및 제도 분석

○ ´13. 12월 : 통합매뉴얼(안) 작성

○ ´14.   1월 : 편집 및 디자인

○ ´14.   2월 : 전문가·시민의견 수렴

○ ´14.   3월 : 매뉴얼 확정 및 발표

□ 특이사항

○ 당초 총 3종의 통합매뉴얼(도로디자인, 공사, 보도)을 제작코자 하였으나, 예산사정으로 인하여 ‘서울시 도로공사 매뉴얼’ 우선 제작

5. 업무연속성 관리시스템 구축

담당부서	팀 장	이정화	8023
도시안전과	담당자	박승주	8056

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 업무연속성관리시스템 도입으로 재난관리 업무의 연속성을 확보하고, 재난관리체계 진단, 개선 및 교육훈련 등을 통해 재난관리업무 체계화

○ 규    모 : 서울특별시 도시안전실

○ 사업기간 : 2013.8. ~ 2014.3(8개월)

○ 총사업비 : 43백만원(국제표준인증심사비 : 43백만원)

○ 누계 공정률(9월 30일 기준) : 계획공정 13%, 현재공정 13%, 계획대비 실공정률 100%

□ 예산투자 현황

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용 (예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
								43

□ 추진실적

○ 도시안전실 BCM 구축 TF회의 1차(´13.8.13), 2차(´13.8.13), 3차(´13.9.10), 4차(´13.9.27) 개최

○ BCM 개요 설명 및 교육, 조직진단 및 분석

□ 향후 추진계획

○ ´13.   9월 : 조직진단 및 분석

○ ´13. 10월 : 업무영향성 분석, 위험성 평가

○ ´13. 11월 : 위험성 평가 분석결과 및 BCM 전략 수립

○ ´14. 12월 : 교육 및 훈련, 국제표준인증 문서심사

○ ´14.   3월 : 국제표준 인증 본심사 및 인증 취득

□ 특이사항 : 없음

6. 서울재난관리거버넌스 운영

담당부서	팀 장	오종범	2133-8027
도시안전과	담당자	김진경	2133-8033

□ 사업개요

○ 목적 : 대형화, 다양화되고 있는 재난환경의 변화에 대응하여 시민과 함께하는       재난안전 관리로 도시 방재역량 강화 및 공동체 안전문화 확산

○ 사업기간 : 2013.1.1.~ 12.31

○ 총사업비 : 비예산

○ 성    격 : 서울시․유관기관․민간단체․전문가가 주체적으로 참여하는

민․관․군․경 합동협의체

○ 구성 : 총 23명 (위원장 - 도시안전실장)

- 서울시(7)   : 도시안전실(3), 주택정책실, 공원녹지국, 소방재난본부, 복지건강실

- 유관기관(7) : 수방사, 서울지방경찰청, 한전, KT, 한국가스안전공사, KBS, 자원봉사센터

- 민간단체(4) : 재난안전네트워크, 지역자율방재단, 안전모니터봉사단, 의용소방대

- 재난관리 및 도시안전분야 전문가(5) : 심우배, 안철현, 장범수, 서상돈, 송창영

○ 운영 : 분기별로 합동회의 개최(연 4회), 긴급 재난발생시 수시 개최

○ 기능 : 재난발생시 위기관리시스템 및 현장 대응방안 자문, 현장수습 및 구조․구호․복구 지원

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
	0		0					0

□ 추진실적

○ 2012.10.30 : 2012년 제2차 합동회의 개최(제설대책)

○ 2012. 5.29 : 2013년 제1차 합동회의 개최(수해대책)

□ 향후계획 : 2013. 10 합동회의 개최(제설대비 등)

□ 특이사항 : 없음

7. 한파대책 수립 및 추진

담당부서	팀 장	오종범	2133-8027
도시안전과	담당자	김진경	2133-8033

□ 사업개요

○ 목    적 : 겨울철 한파로부터 독거어르신, 쪽방촌, 거리노숙인 등 취약계층 안전보호와 계량기 동파, 화재 등으로부터 시민생활 보호를 위한 한파대책 추진

○ 사업기간 : 2013.12.1.~2014..3

○ 총사업비 : 10,000천원(국비 0%, 시비 100%)

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준                                     (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
	10	10	10					10		10

□ 추진계획

○ 추진기간 : ’13. 12월 ~ ’14. 3월

○ 운영방법 : 시 및 25개 자치구(유관기관 및 민간단체 협력)

○ 추진체계 : 평상시(T/F), 한파지속시(상황실), 비상시(재난안전대책본부)

○ 추진내용

- 사회적 취약계층 안전보호 및 한파 취약시설물 안전관리

․ 독거어르신, 고령자, 쪽방촌, 거리노숙인 등 취약계층 피해예방 및 응급보호

․ 전기, 가스, 전동차, 상수도, 농작물 등 피해예방 및 안전관리

- 화재, 구조·구급, 정전대비 매뉴얼 대응체계 구축 및 홍보

․ 화재예방 활동강화 / 정전사고 대비 매뉴얼 대응 및 절전 홍보

- 한파 지속기간 24시간 대응체계 구축(시·구·유관기관 상황체계 유지)

□ 추진일정

○ ’12. 12 : 서울시 한파종합대책, 시민행동요령, 에너지 절약 등 홍보

○ ’14. 1~3 : 한파지속시 한파대책종합지원상황실 구성·운영

8. 폭염대책 수립 및 추진

담당부서	팀 장	오종범	2133-8027
도시안전과	담당자	김진경	2133-8033

□ 사업개요

○ 목    적 : 여름철 폭염으로부터 독거어르신, 쪽방촌, 거리노숙인 등 취약계층 안전보호와 가스,  지하철 선로 등의 시설물 안전관리를 위한 폭염대책 추진

○ 사업기간 : 2013.6.1.~9.30

○ 총사업비 : 10,000천원(국비 0%, 시비 100%)

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준                                     (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
	10	10	10				10	10		10

□ 추진실적

○ 추진내용

- 사회적 취약계층 안전보호 및 폭염 취약시설물 안전관리

․ 독거어르신, 고령자, 쪽방촌, 거리노숙인 등 취약계층 피해예방 및 응급보호

․ 전기, 가스, 전동차, 상수도 등 피해예방 및 안전관리

- 시민행동요령 홍보 및 시민소통 강화 추진

․ 옥외전광판‧버스 등의 영상매체, SNS, TV 방송 등을 활용한 상황전파 및 홍보

○ 추진성과

- ’13. 4~5 : 재난도우미‧무더위 쉼터 확보 및 사전점검 실시

- ’13. 6~9 : 폭염 종합대책 집중 추진(T/F 운영 및 상황실 운영)

□ 향후 추진계획

○ ’13. 10 : ’13 폭염 종합대책 자체 평가 실시 및 개선방안 마련

9. 초고층건물 안전관리 강화

담당부서	팀 장	오종범	2133-8027
도시안전과	담당자	김윤희	2133-8030

□ 사업개요

○ 목    적 : 초고층 및 지하연계 복합건축물에 대한 종합재난 관리체계의 구축 및 피난  유도계획 등의 적정성 확보로 안전관리 강화 및 인명, 재산상 피해 예방

○ 규    모 : 총 150개(초고층 18, 지하연계복합건축물 132)

○ 사업기간 : 2013.1.1.~12.31

○ 총사업비 : 10,000천원(국비 0%, 시비 100%)

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준                                     (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
	14	14	10				5	5		37

□ 시설현황

○ 초고층 건물

- 층수가 50층 이상 또는 높이가 200m 이상인 건축물

○ 지하연계 복합건축물

- 층수가 11층 이상이거나 1일 수용인원이 5천명 이상인 건축물로서 지하부분이 지하역사 또는 지하도상가와 연결된 건축물로 문화 및 집회시설, 판매시설, 운수시설, 업무시설, 숙박시설, 유원시설, 종합병원, 요양병원 등이 하나 이상 있는 건축물

※ 초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법(2012.3.9 시행)

□ 추진실적

○ 초고층 건축물 등 허가전 사전재난영향성 검토협의 개최(위원수 25)

※ 위원회 개최 실적 : 6회(’12년 4회, ’13년 2회)

○ 허가전 종합재난관리체제 구축 및 피난유도계획 등 8개 분야 48개 항목 적정성 검토

○ 재난대응 및 지원체계 구축

- 초고층 건축물 재난 발생시 즉각적으로 대응 및 지원 가능토록 비상연락망 및 설계도면, 층별 거주인원, 피난안전구역 등 대응 체계 구축

□ 향후 추진계획

❍ 2013. 12 : 초고층 및 지하연계 복합건축물 종합방재실 구축 지속 추진

❍ 2013. 12 : 피해경감계획 이행실태 확인 및 지도점검 실시

10. 재난대응 안전한국훈련

담당부서	팀 장	오종범	2133-8027
도시안전과	담당자	이범일	2133-8029

□ 사업개요

○ 목    적 : 매년 소방방재청 주관으로 전국적으로 실시되는 재난대응 합동훈련으로 재난발생시 신속한 대응 등 재난대비 역량 강화에 기여

○ 규    모 : 84개 기관, 단체, 부서(시, 자치구, 소방서)

○ 내    용 : 지진, 침수, 화재 등 유형별로 주제를 선정, 토론 및 실행기반 훈련

○ 사업기간 : 2013.5.6.~8

○ 총사업비 : 76,430천원(국비 50%, 시비 50%)

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
	76	76	76				76	0		76

□ 추진실적

○ 지진 및 침수, 공동구 화재, 초고층 건물 화재, 지하철 대형화재 토론훈련(5.7~8)

○ 공동구 화재, 지해철 대형화재, 초고층 건물 화재 실행훈련(5.6~7)

○ 시민참여 지진대피 훈련(5.7)

□ 향후 추진계획

○ 2014년 훈련 기본계획 수립 → 훈련실시 및 훈련경비 집행 → 훈련평가 및 환류

□ 특이사항 : 없음

11. 어린이놀이시설 안전관리

담당부서	팀 장	한병연	2133-8044
도시안전과	담당자	신민표	2133-8036

□ 사업개요

○ 대  상 : 7,641개소

○ 의무이행사항(관리주체) : 설치검사, 안전점검, 안전교육, 보험가입, 중대사고 통지

《설치검사》

◈ 설치검사 완료 : 5,006개소, 미완료 : 2,635개소

- 기존 어린이놀이시설은 ’15. 1. 26까지 검사 완료

- 신규 어린이놀이시설은 사용 전 설치검사 완료

◈ 설치검사기관 : 4개 기관[한국건설생활환경시험연구원, 한국기계전기전자시험연구원, (사)대한민국비상재난안전협회, (사)대한산업안전협회]

□ 추진실적

○ 매월 : 관리실태 현황 파악 및 설치검사 이행 독려 요청 중(시→자치구)

○ 2013.2.27 : 어린이놀이시설 안전 강화계획 수립

○ 2013.4.9 : 설치검사 불합격시설에 대해 이용 중지토록 요청(시→자치구)

○ 2013.8.9 : 어린이놀이시설 관리실태 파악 및 안전점검계획 수립

○ 2013.8.26 : 어린이놀이시설 담당부서 회의 개최

○ 2013.8.12 ~ 9.30 : 전체 어린이놀이시설(7,668개소) 대상 일제 안전점검 실시(25개)

□ 향후 추진계획

○ '13. 10월~  : 어린이 놀이시설 안전관리 대책 수립․시행

12. 시민 안전문화 활성화

담당부서	팀 장	한병연	2133-8044
도시안전과	담당자	신민표	2133-8036

□ 사업개요

○ 목  적 : 시민안전문화 의식 고취

○ 주요 사업내용

- 시민안전문화 홍보 및 안전문화 콘텐츠 제작

- 민간 재난관련 조직 네트워크 강화

- 생활안전거버넌스 운영지원 등

○ 사업기간 : 2013.1 ~ 2013.12

○ 사업비 : 115백만원

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
	150.5	134.6	115	0	115	0	23	92	0	103.7

□ 추진실적

○  '13. 4. 1 : 생활안전거버넌스 구성 및 관리(24개 자치구 403개소 7,367명)

○  ‘13. 4. 10 : 생활안전거버넌스 간담회 개최

○  ‘13. 7. 15 : 서울시 자율방재단 연합회 발대식 개최

○  ‘13. 7 ~  : 외국인 여행객을 위한 안전행동요령 리플릿 발간․배포

□ 향후 추진계획

○ ’13. 9~10 : 외국인 거주민을 위한 안전 행동요령 소책자 발간․배포

○ ’13. 9~12  : 어린이놀이시설 안전이용요령 시범교육

○ ’13. 9~12  : 재난안전 공무원 교육모델 개발

○ ’13. 9~12  : 생활안전거버넌스 우수사례 수기전 공모, 민간 재난관련 조직 워크숍 등

○ ’13. 12  : 생활안전길라잡이(25분야) 제작

13. 생활안전거버넌스 구성․운영

담당부서	팀 장	한병연	2133-8044
도시안전과	담당자	김재현	2133-8035

□ 사업개요

○ 연    혁

- 2012. 5월 구성·운영

- 2012. 6.26 지역맞춤형 모델개발 생활안전거버넌스 시범 운영(5개소)

· 종로구(삼청동),강북구(송천동),도봉구 (창2동),구로구(개봉1동),서초구(방배1동)

- 2012.10. 마을안전망 구축사업 지원(46개 거버넌스 159백만원)

- 2013. 9.  생활안전거버넌스 시스템 구축·운영

○ 목    적 : 주민 스스로 거주 지역에 내의 위험요소를 찾아내어 개선함으로써 안전한 생활환경 조성

○ 구 성 원 : 해당지역 주민, 전문가 등 7,600여명

○ 운영지역 : 서울시 410개 동 단위로 구성

○ 활동내용

- 서울시․자치구 추진지역별 재난안전활동에 참여

- 재해 발생시 대응 및 복구활동 지원 참여 예) 제설작업, 수해방지활동 등

- 일상생활의 재난안전 정보와 행동요령을 담은 ‘생활안전 길라잡이’ 실천․확산 등

□ 추진실적

○  '13. 2.19 : 생활안전거버넌스 시스템 구축용역 착수

○  '13. 4.10 : 생활안전거버넌스 간담회 및 의견 수렴

○  '13. 5.20 : 생활안전거버넌스 구성 및 관리(25개구 410개동 7,613명)

○  '13. 6.25 : 생활안전거버넌스 활동매뉴얼 및 모델사례 발간·배부(1,000권)

○  '13. 6.19~26 : 생활안전거버넌스 자치구 권역별 합동교육(7회 1,250명)

○  '13. 8.28~9.5 : 생활안전거버넌스시스템 전산교육(14회 425명)

○  '13. 9. : 생활안전거버넌스 관리시스템 구축 운영

□ 향후 추진계획

○  '13. 9     : 생활안전거버넌스 관리시스템 운영

○  '13.12     : 우수 거버넌스 등 선정 표창, 홍보

14. 안전리더 육성 및 어린이 재난안전교육

담당부서	팀 장	한병연	2133-8044
도시안전과	담당자	신민표	2133-8036

□ 사업개요

○ 목  적 : 재난발생시 피해 최소화 및 안전의식 생활화

○ 추진방법 : 교육대행기관을 선정하여 운영

- 2013년 사업대행기관 : 사단법인 한국생활안전연합

○ 주요 사업내용

- 안전리더(100명) 및 재난안전강사(50명) 육성, 생활안전 길라잡이 개발

- 어린이, 주부, 어르신 대상별 재난안전교육 콘텐츠 개발

- 유치원, 초등학교, 자치회관, 경로당 등에 방문하여 교육 실시(62,500명)

- 가족과 함께하는 안전캠프 운영(2회),

○ 사업비 : 291.8백만원

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
	500	441	291.8	0	291.8	0	141	151	0	350

□ 추진실적

○ '13. 3.6  : 안전리더육성 및 재난안전 교육계획 수립

○ '13. 5.23 : 교육 대행기관 계약 체결

○ '13. 6월  : 안전리더육성 및 재난안전교육 콘텐츠 제작

○ '13. 7월  : 안전리더(100명) 및 재난안전강사(50명) 육성

○ '13. 9.7 : 가족과 함께하는 안전캠프(1차) 실시

□ 향후 추진계획

○ '13. 7 ~ 12월 : 대상별 재난안전교육 실시, 생활안전길라잡이 개발 (유괴, 미아사고  등 25개 분야)

○ '13. 11월   : 가족과 함께하는 안전캠프(2차) 실시

15. 재난피해자 심리안정 지원

담당부서	팀 장	한병연	2133-8044
도시안전과	담당자	문주영	2133-8038

□ 사업개요

○ 연    혁

- 2009. 4 협약체결(하천관리과와 서울시정신보건센터)

- 2011. 1 업무이관(하천관리과→도시안전과)

○ 지원대상

- 재난으로 인한 사망자와 실종자의 가족 및 동행인, 신체적 상해를 입은 사람,

재산상의 손실이 크거나 직업전환이 불가피한 경험자

- 사회적 재난 등으로 인한 경험자, 재난수습활동 참여자

○ 지원방법

- 서울시정신건강센터와 업무협약을 통한 서울시재난심리지원센터 운영

- 서울시 재난심리상담요원 위촉을 통한 대형재난에 대비한 현장 상담 인력풀 확보

○ 사업예산 : 17,500천원(국비 8,750천원, 시비 8,750천원)

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
	14	14	0	0	17.5	0	6.6	10.9	0	17.5

□ 추진실적

○ 2013년 재난심리 안정지원 추진계획 수립

○ 전문상담요원 124명 확보, 정신건강 위기상담 전화 핫라인 24시간 운영(1577-0199)

○ 2013년 6월  상반기 워크숍

○ 2013년 7월  노량진 배수시설 사고, 아시아나 항공기 사고 등에 대한 피해자․유가족 지원

○ 2013년 8월 현재 재난심리 상담 144건(방문 11건, 내소 2건, 전화상담 131건)

□ 향후 추진계획

○ 2013년 하반기 재난심리상담요원 대상 교육

○ 2014년 재난심리지원센터 운영 개선계획 수립 예정

○ 재난피해자 심리안정사업 홍보물 제작

: 소방서, 경찰서, 자치구 담당자를 위한 업무매뉴얼 제작 등

16. 안전관리계획

담당부서	팀 장	한병연	2133-8044
도시안전과	담당자	김재현	2133-8035

□ 사업개요

○ 목  적 : 재난의 예방․대비․대응․복구를 위하여 재난 및 안전관리체제를                     확립하고 이를 체계적으로 적용하기 위함

○ 대  상 : 시 재난관리부서 38개 분야, 유관기관 17개 분야

- 시 : 재난관리 17, 감염병 2, 안전관리대책 11, 국가기반체계 8

- 유관기관 : 군부대, 전기, 가스 등 17개 분야 22개 안전관리계획

○ 내  용

- 재난관리대책, 감염병대책, 국가기반체계 보호대책 등 38개 분야별 계획

- 군부대, 경찰, 전기․가스․통신 등 유관기관 안전관리계획 17개 분야별 계획

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
	14	·	14	·	14	·	·	·	·	14

□ 추진실적

○ ‘13.3.25 2013년 서울특별시 안전관리계획 수립

○ ‘13.4.20 2013년 서울특별시 안전관리계획 심의

○ ‘13.5.22 2013년 서울특별시 안전관리계획 발간·배부

□ 향후 추진계획

○ ‘13.11.  2014년 서울특별시 안전관리계획(안) 작성

○ ‘13.12.  2014년 서울특별시 안전관리계획(안) 심의·확정

○ ‘13.12.  2014년 서울특별시 안전관리계획 발간·배포

17. 저소득층 밀집지역 생활환경 개선

담당부서	팀 장	권순구	2133-8044
도시안전과	담당자	신용휴	2133-8046

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 안전취약 밀집지역의 노후 기반시설로 인한 저소득층 생활주변 위험요소를 시민과 함께 개선하여 시민의 생명과 재산을 보호

○ 위    치 : 구로구 구로시장 등 18개소

○ 규    모 : 재난위험시설(D·E급) 10개소 응급안전조치, 노후 옹벽·담장 정비 등

○ 사업기간 : 2013. 3 ~ 12

○ 총사업비 : 1,000백만원

○ 누계 공정률(9.30 기준) : 계획공정 70%, 현재공정 70%, 계획대비 실공정률 100%

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
0	1,000	1,000	1,000		0		1,000			880

□ 추진실적

○ ‘12년 3개구 7개소 사업대상 선정 및 보조금 지원 완료

○ ‘13.3.6 : 추진계획 수립 및 자치구 공모

○ ‘13.5.9 : 사업대상 선정 및 사업비 교부(7개구 7억원)

○ ‘13.9.6 : 안전마을만들기 연계사업 지원비 교부(2개구 3억원)

□ 향후 추진계획

○ ‘13.7~10 : 자치구 이행실태 점검

○ ‘13.11 : 사업 시행결과 보고(자치구→시)

○ ‘13.12 : 사업 정산결과 제출 및 확정

□ 특이사항

○ 재난위험시설(E급)인 구로시장 내 폐점포 정비후 시장상인회의 자발적인 상가개선

및 시장 살리기 행사 등 서민경제 활성화의 작은 불씨가 됨.

○ 사업비 지원을 확대해 달라는 건의가 많음.

18. 재난취약가구 안전점검 및 정비사업

담당부서	팀 장	권순구	2133-8044
도시안전과	담당자	이원준	2133-8047

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 재난취약가구의 노후․불량 생활시설(전기,가스,보일러 등) 대한 점검․정비 실시, 안전에 취약한 가구의 생활안전 도모 및 복지행정 구현

○ 대    상 : 국민기초생활보장수급자, 장애인, 독거노인, 소년소녀가장 등 차상위계층                 재난취약가구

○ 규    모 : 18,000가구(25개 자치구)

○ 사업기간 : 2013. 3 ~ 12

○ 총사업비 : 8.3억원(시비 5.95억원, 구비 2.35억원)

○ 누계 공정률(8.30 기준) : 계획공정 90%, 현재공정 90%, 계획대비 실공정률 100%

□ 예산투자 현황 - 2013. 8.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
0	812	812	595		0		595			595

□ 추진실적

○ ‘13.2.    : 추진계획 작성 및 자치구에 알림, 보조금교부(5.95억원) 완료

○ ‘13.3     : 정비대상 가구대상 선정 및 컨설팅단 구성(25개 자치구)

○ ‘13.8.30 : 90% 완료( 16,200가구)

※ 정비실적(‘07년도~현재까지)

- 투입예산 : 34억원(국비 3.4억원, 시비 11.5억원, 구비 14.7억원)

- 정비가구 : 120,135가구

□ 향후 추진계획

○ ‘13.9.30 : 사업완료(18,000가구) 및 만족도 설문조사 완료

○ ‘13.10   : 사업완료 보고(자치구→시)

○ ‘13.11   : 사업 정산결과 제출 및 확정

□ 특이사항

○ 사업비 지원을 확대해 달라는 건의가 많음.

※ 금년도 한가구당 표준사업비(59,500원)의 시비 보조율이 55%(33,050원)임.

19. 건설업 관리 및 건설정보 제공

담당부서	팀 장	최순임	2133-8049
도시안전과	담당자	김헌정	2133-8051

□ 사업 개요

○ 목  적 : 건설업체 관리의 투명성·공정성 확보 및 건설업 관계자 상호간 정보공유를 통한 건전한 건설산업 발전 도모

○ 사업기간 : 2013. 1 ~ 12월

○ 총사업비 : 19,000천원

○ 종합건설업 등록현황                                          ('13.8월말 현재)

구 분	업체수	등 록 업 종 수
		계	토 목	건 축	토목․건축	산업․환경설비	조 경
종합건설업 (5개 업종)	1,607	1,817 (100%)	128 (7%)	1,034 (56.9%)	338 (21%)	76 (4.7%)	241 (14.9%)

○ 사업내용

≪부실․부적격업체 행정처분≫

- 등록기준(자본금, 기술능력, 사무실) 미달

- 시공 및 기술관리 위반, 행정처분 불이행

- 불법하도급, 다른 법률 위반으로 통보시

≪청문주재관 운영≫

- 인  원 : 49명 위촉(공인회계사 17명, 변호사 31명, 교수 1명)

- 대  상 : 건설산업기본법 위반혐의업체

- 운영방법 : 연 60회 청문실시 및 건설업 운영에 대한 자문역할

≪『불법하도급 신고센터』 운영 및 포상금 지급≫

- 신고방법 : 방문, 서면신고, 우편, 팩스 등 실명으로 신고

- 지급대상 : 신고된 불법하도급 공사가 사실로 확인된 건별 최초 신고자

- 포상금 : 1건당 20백만원 이하(지급기준 : 과징금의 7% 이내)

※ 불법하도급 공사의 원ㆍ하도급업체의 대표자 및 임원이 신고시 포상금 지급대상에서 제외

≪지역건설산업 활성화 추진≫

- 내   용 : 중소건설업체의 공사참여 확대, 경쟁력 강화, 건설산업 활성화 추진체계 구축

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
	29	6	19				3.4	15.6		19

□ 추진실적

○ 부실․부적격업체 행정처분                                    ('13.8월말 현재)

계	등록말소	영업정지	과징금	과태료	시정명령
605	99	182	14	83	227

○ 청문주재자 인력풀 구성 운영

-  구  성 : 법령에 의거 자격을 갖춘 변호사, 공인회계사, 전직공무원 등

-  인  원 : 제한없음(인력풀 운영)

-  모집방법 : 연중 수시 공개모집

○ 2012년 종합건설업 실태조사 위반업체 행정처분

- 위반건수 총 558건 중 344건(62%) 조치 완료('13.8월말 기준)

○ 불법하도급 신고센터 운영 및 신고자 포상금 지급

- 포상금 1건 지급('13.2.22) : 800천원

○ 지역건설산업 활성화에 관한 조례 개정(‘13.5.16)에 따른 개정내용 전파

- 추진목표 달성현황 반기별 의회보고, 사업계획단계부터 분할발주 검토․시행

○ 지역건설산업 산업활성화 추진실적 보고('13.9.4)

- 중소건설업체 수주율 등 향상, 건설업체간 상생분위기 확산

□ 향후 추진계획

○ 2012년 종합건설업 실태조사에 따른 행정처분 완료

○ 불법하도급 신고센터 홍보 계속 및 신고시 신속 처리

○ 업계와 전문가 의견 수렴 후 지역건설산업 활성화계획 보완('13.11월)

〔도시안전실 보도환경개선과〕

부서명	과(팀)	현원(명)	주요역할 및 업무	2013년 완료․진행(과업)사업 목록
보도 환경 개선과	보도 정책팀	9명	- 보도관리 제도개선에 관한 사항 - 보도 일상 유지관리계획 수립 및 예산 지원에 관한 사항 - 예산․회계․인사․교육 관련 업무 - 업무계획 수립 및 총괄 - 국회․시의회 관련 업무	- 도로 굴착․ 복구 원인자 부담금 징수 조례 개정 - 보도블록 10계명 정착 제도 개선 추진 - 2013년도 서울 보도블록 EXPO 개최 - 보도블록 손해배상센터 운영(`13. 6월 개설)
	지하도상가팀	4명	- 지하도상가 위탁관리 업무 - 공중선정비 및 지중화 관련 업무 - 시설관리공단 지도 감독 총괄 등	- 지하도상가 임대료(대부료) 인상 부과 - 지하도 상가 불법전대 점포 단속(’13.5.29) - 지하도 상가 불법전대 부동산 중개업소 단속(’13.6.13)
	보도 관리 1팀	5명	- 보도관리 일상(특별)점검계획 수립 및 공사장 관리(강북) - 보도공사 원스트라이크아웃제 운영, Ciosing11점검관리(강북) - 보도 손괴자 비용징수에 관한 사항(강북) 등	- 시민참여 거리모니터링단 운영(1월말 시민 646명 발대식 후 활동,) ․신고건수 470건(처리완료 429, 종결 5, 처리중 36) - 보도공사장 상시 현장점검 강화(강북) ․보도정비공사 55개 공사장 점검 및 보도 순찰
	보도 환경팀	4명	- 도로점용료 부과․징수에 관한 사항 - 보도상영업시설물 관리 및 운영	- 시민불편 초래 과밀 및 위치 부적정 시설물 등 총 70개 정비완료
	보도 관리 1팀	5명	- 보도관리 일상(특별)점검계획 수립 및 공사장 관리(강북) - 보도공사 원스트라이크아웃제 운영, Ciosing11점검관리(강북) - 보도 손괴자 비용징수에 관한 사항(강북) 등	- 보도공사장 상시 현장점검 강화 (9.11기준) ․점검 : 1.333회, 지적 : 2,929건 - 부실 보도공사장 제재 ․입찰참가제한 : 3, 부실벌점 : 1, 과태료 부과 : 73
	거리 가게 대책반	7명	- 노점관리 및 노점 특화거리 조성 등 - DDP 주변 노점관리 및 특화거리 조성 등	- DDP주변 거리가게관리 전담부서 신설(‘13.8.9) - DDP 주변 주야간 거리가게 실태조사 실시 등(‘13.8.26) - DDP주변 전체 거리가게(151개) 일시 이전 배치(‘13.9.3~9.9) - 노점단체, 전문가 등 상생위원회 구성 준비 : 위원 동의서 접수 17명

1. 걷기편한 행복거리 만들기 보도 유지관리

담당부서	팀 장	이덕기	2133-8102
보도정책팀	담당자	이상호	2133-8113

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 특별시도상 보도 총연장1,653㎞, 면적6.65㎢ 중 보도포장 10년이상의         노후된 보도정비가 시급하여 보행환경 개선을 위한 최소한의 보도유지관리비를  자치구에 지원

○ 위    치 : 세종대로 등 269개 노선(L=1,653㎞)

○ 규    모 :

○ 사업기간 : 2013. 1 ~ 12

○ 총사업비 : 6,000백만원(시설비 5,950, 사무관리비 50)

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정 83%, 현재공정 98%, 계획대비 실공정율 118%

- 부진사유:해당없음

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	-	-	6,000	-	6,000	-	5,880	120	-

□ 추진실적

○ 자치구에서 관리중인 서울특별시도상 노후 보도를 적기에 정비하여 보행환경을      개선하기 위하여 자치구 지원

- 2013. 2. 1  : 25개 자치구 일괄 배정(3,500백만원)

- 2013. 3     : 종로, 중구 등 도심부 보도정비사업비 배정(380백만원)

- 2013. 7.29  : 상반기 인센티브 사업비 배정(1,200백만원)

- 2013. 9     : 잔여 사업비 추가 지원(800백만원)

□ 향후 추진계획

○  보도 파손 등 보행 불편사항에 대한 신속한 보수로 시민만족도 제고

※ 예산잔액(120백만원) 조기 배정조치

□ 특이사항 : 보도블록10계명, 손해배상제, 원스트라이크 아웃제 강화 등        우리시 보도정책 이행을 위한 자치구 예산 지원요청이 증가하고 있으나 사업예산의 한계로 자치구 지원이 부족한 실정임.

2. 수유전통시장 진입로 가로환경개선사업

담당부서	팀 장	이덕기	2133-8102
보도정책팀	담당자	이상호	2133-8113

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 수유전통시장 진입로 가로환경 개선을 시행하여 시장활성화를 도모하여 지역경제를 살리고 더불어 주변 학교 학생들의 안전한 통학로 확보

○ 위    치 : 강북구 도봉로251 ~ 도봉로 67길 34, 삼양로74길, 삼양로 74다길

○ 규    모 : 도로개선(B=8m L=150m, B=6m L=390m)

○ 사업기간 : 2013. 3 ~ 2014. 6

○ 총사업비 : 1,500,000천원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정10%, 현재공정 10%, 계획대비 실공정율 100%

※ 현재 기본 및 실시설계 용역 시행중

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	-	-	1,500	-	1,500	-	40	1,460	1,160

※ 사고이월 사유 : 설계용역 지연에 따른 공사기간 부족

□ 추진실적

○ 2012. 9      : 서울특별시 주민참여예산사업 선정

○ 2013. 2. 21 : 서울특별시 기술용역 타당성 심사

○ 2013. 3. 21 : 수유전통시장 진입로 가로환경개선사업 기본 및 실시설계용역 착수

□ 향후 추진계획

○ 2013. 9. 30 : 기본 및 실시설계용역 준공

○ 2013. 10    : 계약심사 및 발주

○ 2013. 11    : 공사착공

○ 2014. 6     : 공사준공

□ 특이사항 : 해당없음

3. 사업(과업)명 : 가로공원길 문화의 거리 조성공사(3구간)

담당부서	팀 장	이덕기	2133-8102
보도정책팀	담당자	이상호	2133-8113

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 화곡동 일대 심각한 주차난을 해소하기 위한 가로공원길 지하주차장 건설공사와 연계하여 기존 상권 활성화와 지역발전을 위해 가로공원길을 테마가 있는 문화의 거리로 조성

○ 위    치 : 가로공원길(신월초교 사거리 ~ 화곡터널 입구간)

○ 규    모 : 폭 40m, 연장 235m

○ 사업기간 : 2013. 6. 18 ~ 2013. 12.14

○ 총사업비 : 2,820백만원(국비300백만원,시비2,520백만원)

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정 60%, 현재공정 70%, 계획대비 실공정율 116%

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	-	-	2,820 (2,520)	-	2,820 (2,520)	-	2,078 (1,839)	742 (681)	-

□ 추진실적

○ 2013. 06. 17 : 가로공원길 3구간 공사계약

○ 2013. 06. 18 : 가로공원길 3구간 공사착공

○ 2013. 08. 08 : 가로공원길 3구간 한전 지중화 공사착공

□ 향후 추진계획

○ 2013.09. : 가로공원길 3구간 한전지중화사업 완료

○ 2013.10. : 가로공원길 3구간 공사완료

□ 특이사항 : 해당없음

4. 난우로 통학로 확보사업

담당부서	팀 장	이덕기	2133-8102
보도정책팀	담당자	이상호	2133-8113

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 보행자와 차량이 차도로 혼재통행하고 있어 지역주민과 어린이의 안전확보를 위하여 보도를 설치하여 안전하고 편리한 보행환경 조성

○ 위    치 : 관악구 난우초등학교 입구 ~ 관악구 난곡동 617-3호

○ 규    모 : B=2m(양측), L=350m, 보도정비 및 설치

○ 사업기간 : 2013. 3 ~ 2014. 6

※ 현황조사 및 주민의견 수렴절차로 수행에 따른 설계기간 연장

○ 총사업비 : 180백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정 30%, 현재공정 20%, 계획대비 실공정율 67%

※ 부진사유: 사업구간내 사유지에 대한 현황조사 및 주민의견 수렴 등으로 추진 지연

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	-	-	180	-	180	-	12	168	168

※ 사고이월 사유 : 설계도서작성(10.11일한) 지연에 따른 공사기간 부족

□ 추진실적

○ 2013. 3. 07 : 보조금 간주처리

○ 2013. 6. 10 : 난우로 보도설치 계획 수립

○ 2013. 6. 28 : 설계도서 작성용역 발주

□ 향후 추진계획

○ 2013. 10. 11 : 설계도서 작성용역 완료

○ 2013. 11. 30 : 공사발주 및 계약

○ 2014.  3.~6. : 공사시행

□ 특이사항 : 해당없음

5. 능동로 도로구조 개선공사

담당부서	팀 장	이덕기	2133-8102
보도정책팀	담당자	이상호	2133-8113

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 능동로 보도 및 차로확장을 통한 도로구조개선으로 보행환경 개선 및

차량의 원활한 소통을 도모코자 함.

○ 위    치 : 광진구 자양동 1-1 ∼ 553-428번지간

○ 규    모 : 보도개선 L=900m, 차로확장 L=200m

○ 사업기간 : 2013.08.01 ∼ 2013.12.28

○ 총사업비 : 1,900백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정  25%, 현재공정  25%, 계획대비 실공정율 100.0%

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	-	-	1,900	-	1,795	-	691	1,104	-	-

□ 추진실적

○ 2013.02.21 : 설계용역 계약 및 착수

○ 2013.06.03 : 보도설계 지도점검 요청

○ 2013.06.14 : 계약심사 요청

○ 2013.07.01 : 예산 재배정 요청

○ 2013.07.16 : 공사 발주

○ 2013.07.31 : 공사 계약

○ 2013.08.01 : 공사 착공

□ 향후 추진계획

○ 2013.12.28 : 공사 준공

□ 특이사항 : 해당없음

6. 세계문화유산 정릉 관광안내광장 조성사업

담당부서	팀 장	이덕기	2133-8102
보도정책팀	담당자	이상호	2133-8113

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 유네스코 세계문화유산으로 지정된 정릉의 위상을 높이고 정릉을 찾는                 탐방객의 관광편의 제공을 위해 관광안내광장을 조성하여 정릉을                      세계적인 관광지로 자리매김하는데 기여하고자 함.

○ 위    치 : 성북구 정릉동 966-55외 4필지(231㎡)

○ 사업기간 : 2012. 12 ~ 2014. 10

○ 총사업비 : 2,020백만원(시비 2,000백만원, 구비 20백만원)

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정 30%, 현재공정 30%, 계획대비 실공정율 100%

- 부진사유: 정릉 관광안내광장 조성사업을 위한 사전 행정절차 이행중에 있으나,        향후 도시계획시설 사업지역내 거주민 민원으로 사업시행에 어려움이 예상됨.

□ 예산투자 현황 (2013. 9.30 기준)

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산 (시비)	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	20	16.9	2,000	-	2,000	-	3	1,997	1,997

※ 사고이월 사유 : 도시계획시설내 거주민의 민원으로 행정절차(보상 등) 지연

□ 추진실적

○ 2012. 10 : 도시계획시설 결정 기본계획 수립

○ 2012. 11 : 도시계획시설 입안방침 및 공람공고

○ 2013.  4 : 1,2차 도시계획심의(1차 : 보류 2차 : 원안가결)

○ 2013. 4  : 도시계획시설 결정 및 지형도면 고시

○ 2013. 6  : 분할 및 현황측량

○ 2013. 8  : 도시계획시설 사업 실시계획 인가

□ 향후 추진계획

○ 2013. 10 ~ 2014. 2 : 보상계획 공고 및 보상실시(도로시설과)

○ 2014.  3 ~ 6         :정릉광광안내광장 조성사업 시행예정

□ 특이사항

○ 2013. 8 도시계획시설에 대한 도시관리계획 및 지형도면 고시처분 취소 행정심판      청구(정릉동 966-57 이학성)

7. 지하도상가 운영 관리

담당부서	팀 장	홍 현 구	2133-8120
지하도상가팀	담당자	박 양 수	2133-8122

□ 서울시내 지하도상가 운영 관리

○ 목    적 : 이용시민에게 안전하고 편안하고 쾌적한 지하쇼핑공간 제공을 위함

○ 위    치 : 서울시 전역 (을지로권, 종로권, 명동권, 남대문권, 동대문권, 강남권,     영등포권)

○ 규    모 : 29개소 2,738개 점포

○ 사업기간 : ‘13. 1. 1 ~ 12. 31

○ 총사업비 : 31,271백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정 90%, 현재공정 90%, 계획대비 실공정율  90%

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위: 백만원)

기투자 (2011)	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
29,587	31,256	29,964	31,271	-	31,271	-	23,453	7,818	-

□ 추진실적

○ 지하도상가 상가단위 민간위탁 추진 (2009~2012) : 27개 상가

- 대  상 : 27개 상가  *신당․인현 지하도상가 4회 유찰로 점포단위 계약

- 업무내역 : (수탁법인) 점포운영권, 임대료고지

(공단) 시설물 안전관리, 재난관리, 수탁법인 지도감독

○ 강남권역 지하도상가 시설 전면 개보수 공사 실시(개보수조건부 민간위탁)

- 추진기간 : 2010.9월~ 2012.6월

- 대상상가 : 강남역, 영등포역, 강남터미널1~3

- 사 업 비 : 비예산   * 수탁법인 부담

- 공사내역 : 구조체 보수보강, 건축․기계․전기․소방공사 일체

○ 강북권 지하도상가 편의시설 설치공사 추진중 (편의시설설치 조건부 민간위탁)

- 대상상가 : 시청광장, 명동역 등 강북권 21개 상가

- 추진상황 : 완료)을지로등 12개소   추진중)3개소(소공1~3)

예정)잠실역 등 6개소

- 공사내역 : 에스컬레이터 설치, 화장실 개선, LED 교체, 전기수배전반 교체 등

○ 건축․기계․냉난방․소방 등 기반시설물 유지관리(매년실시)

- 추진기간 : 2013. 1월 ~ 12월,  29개 지하도상가 대상

- 추진방법 : 연간단가

○ 구조체 정밀점검 및 안전진단 실시(매년실시)

- 추진방법 : 외부 전문업체 용역

- 대상상가(‘13년 기준) : 영등포역, 회현 등 3개 상가 - 구조체 정밀점검

강남역, 잠실역 등 14개 상가 - 도시가스 정밀점검

26개 지하도상가 - 소방설비 정밀점검

○ 쾌적한 지하환경 제공을 위한 실내공기질 관리(매년추진)

- 공기질 자동측정시스템 유지관리, 공기청정기 및 공조기 필터교체

- 전체 지하도상가 공기질측정 실시 :  전문업체 의뢰,  연 1회, 10~11월경

※'12년 공기질 측정결과 : 9개 항목 모두 국가기준 및 서울시 기준치 이내

○ 비활성화 상가 대상 상가활성화 사업 추진 : ‘13년 하반기 집중 추진중

- 공실점포를 활용한 청년몰 유치 추진

- 유휴공간을 활용한 다양한 볼거리 제공 (피아노계단 설치, 3D트릭아트 설치)

- 공공기관이 추진하는 행사와 연계하여 지하도상가 할인이벤트 실시 등

○ 공유재산을 활용한 불법행위(전대, 양도․양수) 근절대책 강력 추진

- 지하도상가 제도개선협의체, 불법전대 근절 특별기동반 등 구성하여

지속적으로 추진

- 상가주변 부동산중개업소 합동단속 실시, 강남권지하도상가 전수조사 실시 등

- 그간의 실적 : 총 421건 적발 (전대확인 7개, 전대의심 414개 점포)

* 전대확인점포 퇴거 및 명도소송, 의심점포는 세무조사 의뢰

○ 지하도상가 24시간 모니터링 실시(종합방재센터, U-화재예방시스템 운영)

□ 향후 추진계획

○ 쾌적하고 안전한 지하쇼핑공간 제공을 위한 시설물 안전관리

○ 화재, 수방, 재난 상황 대비한 24시간 모니터링 시스템 운영

○ 지하도상가 활성화 사업 지속 추진

8. 지하도상가 시설 개보수

담당부서	팀 장	홍 현 구	2133-8120
지하도상가팀	담당자	박 양 수	2133-8122

□ 지하도상가 노후시설 개보수

○ 목    적 : 노후시설 개보수 및 이용시민 쇼핑 편의시설 개선을 통한 안전하고

편리한 지하쇼핑공간 제공

○ 위    치 : 서울시 전역 (을지로권, 종로권, 명동권, 남대문권, 동대문권, 강남권,     영등포권)

○ 규    모 : 29개소 2,738개 점포

○ 사업기간 : ‘13. 1. 1 ~ 12. 31

○ 총사업비 : 550백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정 90%, 현재공정 90%, 계획대비 실공정율  90%

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위: 백만원)

기투자 (2011)	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
4,964	4,300	3,987	550	-	550	-	495	55	-

□ 추진실적

○ 2011. 1.27 ~ 2.24 상인종합지원센터 이전(영등포→명동, 13,154천원)

- 상인지원센터 이전 및 구조체 안전점검 실시

○ 2011. 4.28 ~ 8.30 을지로구간 전력케이블 이설(145,508천원)

- 을지로입구~을지3가 지하본선 전력케이블 이설

○ 2011. 5.12 ~12.20 회현지하도상가 출입구 개선공사(2,843,248천원)

- 회현상가 출입구 2개소(1번/ 12번) 개선 및 에스컬레이터 2대 설치

○ 2011.7. 6 ~ 9.29  지하도상가 계단 논슬립 설치(286,122천원)

- 18개 상가 10,343m 계단 논슬립 구매 설치

○ 2011.6.21 ~12.29 청계6가 및 DDP주변 환경정비 (477,191천원)

- 청계6가, 을지로 4구역 일부 벽면 및 캐노피 교체

○ 2011.5.12 ~ 8. 8 11개 지하도상가 시설물 보수 및 석면 철거(125,642천원)

○ 2011.4.29 ~ 5.23 종로4가 배수시설 설치 등 (32,465천원)

- 대  상 : 27개 상가  *신당․인현 지하도상가 4회 유찰로 점포단위 계약

- 업무내역 : (수탁법인) 점포운영권, 임대료고지

(공단) 시설물 안전관리, 재난관리, 수탁법인 지도감독

○ `12.2.8 ~ 11.20 회현지하도상가 출입구 개선 및 에스컬레이터 설치 (2,797백만원)

○ `12.8.1 ~ 11.30 청계6가 지하도상가 시설 전면 개보수 (859백만원)

○ `12.4.30 ~ 9.20  지로권 유도배수관(2,259m) 교체 (331백만원)

○ `13.4 ~ 7월  지하도상가 노후 전기설비 개보수 (250백만원)

- 을지로4구역 변압기 및 주변기기 교체

- 인현지하도상가 전기설비 개선 (고압→저압)

○ `13.6 ~ 9월  지하도상가 지하도내 LED 조명등 교체 (300백만원)

- 을지로권역, 영등포역, 신당/인현 지하도상가

- 2,330등(예비10등 포함) 교체

□ 향후 추진계획 (2014)

○ 노후시설 개보수 및 시민 편의시설 개선을 통한 편리하고 안전한 쇼핑공간 제공

- 영등포시장 지하도상가 노후 휠체어리프트 교체

- 을지로 지하도상가 출입구 캐노피 단계적 교체

- 영등포권역 지하도상가 지하보도 LED 조명등 교체 등

9. 2013 공중선지중화 사업

보도환경개선과	팀 장	홍현구	2133-8120
지하도상가팀	담당자	박효순	2133-8121

□ 사업개요

○ 목    적 : 무질서하게 난립하여 도시미관을 저해하는 공중선을정비 가로환경 개선

○ 위    치 : 도봉구 도봉로외 2개 ( 관악구 관악로, 광진구 미가로 ) 지역

○ 규    모 : 6.1 km ( 도봉로 : 3.0km, 관악로 : 2.4km , 미가로 : 0.7 km )

○ 사업기간 : 2013.1.1 ∼ 2013.12.31

○ 총사업비 : 3,250 백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정 100 %, 현재공정  50 %, 계획대비 실공정율 50 %

- 부진사유: 한전 및 통신사와의 비용분담 문제로 사업지연

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	-	-	3,250	-	3,250	-	2,000	1,250

□ 추진실적

○ 협약체결 및 착공 ( 도봉구 도봉로 )

○ 한전설계확정 및 협약체결 준비중 ( 관악구 관악로 )

○ 한전설계변경 및 협약체결 준비중 ( 광진구 미가로 )

□ 향후 추진계획

○ 공정율에 따라 지중화공사 완료 예정

□ 특이사항

○ 없음

10. 도로부지 실태조사

담당부서	팀 장	송재우	2133-8127
보도환경팀	담당자	장혜리	2133-8131

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 도로부지 점용실태를 점검, 무단점용이 예상되는 지점 등을 지적현황 측량하여 도로법 제94조(변상금의 징수)에 의거 변상금 부과

○ 사업기간 : 계속

○ 총사업비 : 100백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정100%, 현재공정54%, 계획대비 실공정율54%

- 부진사유: 분기별 예산 집행하여, 하반기분은 10월 지급 예정.

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	120	116	100	-	100	-	54	46	-

□ 추진실적

○  '13.3.6. 상반기 도로부지 실태조사 예산 재배정(종로구 등 6개 구): 34백만원

○  '13.6.19. 상반기 도로부지 실태조사 예산 재배정(중구): 20백만원

□ 향후 추진계획

○ ‘13.10. 하반기 도로부지 실태조사 예산 재배정

11. 도로사용료 징수포상

담당부서	팀 장	송재우	2133-8127
보도환경개선과	담당자	장혜리	2133-8131

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 서울특별시 세입징수 포상금 지급조례에 의거하여 도로사용료 미수납금 및 도로부문 세원발굴자 등에 대한 포상금을 지급

○ 사업기간 : 계속

○ 총사업비 : 80백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정 100%, 현재공정54%, 계획대비 실공정율 54%

- 부진사유: 분기별 예산 재배정 하여, 2/4분기(9월), 3/4분(10월) 지급 예정

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	80	78	80	-	80	-	43	37	-

□ 추진실적

○ ’13.7.: ’12.4분기~’13.1분기 도로사용료 징수포상금 지급: 43백만원

□ 향후 추진계획

○ ’13. 9.: ’13. 2분기 도로사용료 징수포상금 지급

○ ’13.11.: ’13. 3분기 도로사용료 징수포상금 지급

12. 도로사용료 징수교부금

담당부서	팀 장	송재우	2133-8127
보도환경개선과	담당자	장혜리	2133-8131

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 효율적인 도로점용료 부과 ･징수를 위하여  도로 점용허가 및 도로점용료 등 징수조례 제12조(세입 및 징수교부금)에 의거하여 자치구에 징수경비를 교부

○ 사업기간 : 계속

○ 총사업비 : 32,640백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정 100%, 현재공정100%, 계획대비 실공정율 100%

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	31,558	31,558	32,640	-	32,640	-	32,640	-	-

□ 추진실적

○ ’13.5.23. ’12. 2분기~’13.1분기 징수교부금 지급: 18,830백만원

○ ’13.9. 9. ’13. 2분기 징수교부금 지급: 13,810백만원

□ 향후 추진계획

○ ’13. 11. : ‘13. 3분기 도로사용료 및 변상금 수납내역 및 감액내역 검토

13. 사업(과업)명 : 보도상영업시설물 관리개선

담당부서	팀 장	송재우	2133-8127
보도환경팀	담당자	서석영	2133-8133

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 보도상영업시설물 교체 완료에 따른 후속관리 대책으로서 과밀․위치 부적정 시설물의 이전 정비 및 철거 실시

○ 위    치 : 서울시 25개 자치구 보도상

○ 규    모 : 보도상영업시설물 총 2,339개(가로판매대 1,149개, 구두수선대 1,190개)

○ 목    표 : 과밀․위치 부적정 시설물 75개소 이전정비 및 철거

○ 사업기간 : 2013. 1 ~ 2013.12

○ 총사업비 : 774백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정 75%(56개), 현재공정 93%(70개), 계획대비 실공정율 124%

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준                                        (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
2,323	551	283	774	12	786	-	561	225	-

□ 추진실적

○ 2010. 1 ~ 3 : 자치구별 보도상영업시설물 설치장소 실태조사 실시

○  2010. 4      : 이전정비 지침 수립

○  2010. 1 ~ 2012. 12 : 411개소 이전정비

○  2013.1 ~ 9 : 과밀 및 위치 부적정 시설물 등 총 70개 정비완료

□ 향후 추진계획

○ 과밀 및 위치 부적정 시설물 등 이전정비 및 철거 지속 추진

14. 중요지역 거리가게․노상적치물 계도 및 예방

담당부서	팀 장	이두영	2133-8472
DDP거리가게대책반	담당자	양철수	2133-8473

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 서울을 국제적 도시로서 깨끗한 이미지를 제고하고 거리 보행환경 개선으로 시민에게 쾌적한 보행 공간 확보

○ 추진배경 : 청계천변 이면 도로에 발달한 속칭 도깨비 시장 등의 많은 노점상이 진출 시도 및 공구상가, 의류상 등이 보도상 적치 영업으로 보행 장애

○ 사업기간 : 2013. 3. 1. ～ 2014. 2.28.(1년간)

○ 총사업비 : 1,138,800천원 / 집행액(8.31기준) : 426,665천원(37.4%)

- 부진 사유 : 2014. 2.28. 까지 연중 집행사업으로 정상 추진 중

*********

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							***** ***
	예산	결산	본예산	전년도이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	1,207	978	1,138	-	1,138	-	426	712	-

□ 추진실적

○ 계도 및 예방 구간 : 9.89km

구간	서울광장 ~ 모전교(왕복)	덕수궁 및 서소문청사주변	청계광장~ 영도교(왕복)
거리	1.10km	1.33km	7.46km

○ 노점 적치물 정비 건수 : 6,298건

□ 향후 추진계획

○ 가을 및 겨울철 노점 및 노상적치물 예방활동 강화 : ‘13. 9월 ~ ’14. 2월

○ 노점 개선 워크숍 개최 : 2013. 12월

□ 특이사항 : 없음.

도시안전실 도로계획과)

부서명	과(팀)	현원(명)	주요역할 및 업무	2013년 완료․진행(과업)사업 목록
도 로 계획과	도 로 정책팀	8명	∘ 도로정책 및 도로정비기본계획 수립․조정․협의 ∘ 주요 사업계획 총괄 ∘ 친환경적 도로공간 재편 및 복합 활용방안 수립 ∘ 특별시도의 노선인정 공고 및 구도의 노선인정 승인 ∘ 도로시설 명 제정 및 개정관련 ∘ 각종 도로통계 관리, 도로전문가 포럼 운영 ∘ 도로건설사업 예산, 결산관련 ∘ 수도권행정협의회, 수도권 광역교통계획 관련사항 총괄 ∘ 장기미집행 및 미집행 도시계획도로 총괄업무 ∘ 과 인사, 시의회, 교육, 상훈, 보안, 감사, 성과관리 등 부서 조직관리 및 운영관련 총괄	∘ 한양도성안 도로공간을 친환경 공간으로 재편 (설계중) ∘ 한강상 교량 연결램프 구조개선 (설곕중)
	민 자 사업팀	5명	∘ 민간투자사업 기본계획 수립․조정 ∘ 민간투자사업 신규사업 개발에 관한 사항 ∘ 도로 지하공간개발 민자사업에 관한 사항 ∘ 유료도로에 관한 업무 ∘ 민간투자사업 운영 및 관리에 관한 업무 (우면산 터널) ∘ 강남순환도로 민자구간 추진 (공사중) ∘ 민간투자사업 금융, 법인세, 도로계획과 도로교통 업무 등	∘ 과천~송파간 도로 (검토중) ∘ 서부간선지하도로 (검토중) ∘ 서울제물포터널 (검토중) ∘ 용마터널 (72%) ∘ 우면산터널 (운영중) ∘ 은평새길 (검토중) ∘ 평창터널 (검토중) ∘ 강남순환도로 민자구간 추진 (공사중) 등
	간 선 도 로 계획팀	4명	∘ 강남지역 11개 자치구 관련도로계획 검토․추진 - 도로건설사업, 설계용역, 담당구 도시계획사업 및 실시계획, 교통영향평가, 비관리청 사업에 관한 사항 - 장기미집행 도시계획도로 관련, 소송 및 각종 민원처리 등 ∘ 자동차 전용도로 지정․해제에 관한 사항 ∘ 한강교량 및 남북단 연결도로와 관련되는 사항 (동부․남부․강서 도로사업소 관할) ∘ 자동차전용도로 지정 및 해제에 관한사항 ∘ 전시긴급복구에 관한 사항	∘ 고척교 확장공사(착공 추진증) ∘ 남부순환로~오정대로삼거리간 도로개설(25%) ∘ 방화대교 남단 접속도로 건설(84%) ∘ 서부트럭터미널 앞 지하차도 건설(85%) ∘ 여의교 확장 및 여의교 남단 교차로 설치(설계중) ∘ 강남순환도시고속도로 건설 (보상 및 공사중 51%) ∘ 디지털3단지~두산길간 지하차도 (기본 및 실시설계중) ∘ 관악 은천길 도로확장(85%) 등 ∘ 신림~봉천터널 (10%) ∘ 가마산길 도로확장(보상중) ∘ 독산로 도로개선(보상중) ∘ 감일∼초이간 광역도로 개설(25%) ∘ 구천면길 도로확장 (8%) ∘ 노량진배수지 도로구조 개선사업(기본계획 설계 중) ∘ 대방지하차도 확장 (타당성조사 중) ∘ 신상도 지하차도 확장(25%) ∘ 올림픽대로 하부 미연결구간 도로개설 (검토중) ∘ 대방동 우정아파트~노량진로간 보행공간 조성 (타당성 조사 중) ∘ 장승배기∼여의도간 도로개설 (기본설계 중) ∘ 탄천변 동측도로 확장(검토 중)
	도로 시설 계획팀	4명	∘강북 14개 자치구 관련 도로계획 검토․추진 - 도로건설사업, 담당구 도시계획사업 및 실시계획, 교통영향평가, 비관리청 사업에 관한 사항 - 장기미집행 도시계획도로 관련, 소송 및 각종 민원처리 등 ∘한강교량 및 남북단 연결도로와 관련되는 사항 (서부․북부․성동 도로사업소 관할)	∘ 덕송~상계간 도로개설 (35%) ∘ 도시고속도로 연결램프 추가설치 (설계중) ∘ 동부간선도로(월계1교~의정부시계)확장(41%) ∘ 겸재교 건설 (60%) ∘ 마장지하차도 구조개선(40%) ∘ 망우리고개 횡단교량 설치(설계중) ∘ 용비교~행당여중간 도로개설(71%) ∘ 율곡로(창경궁앞) 구조개선(38%) ∘ 응봉교 설치(88%) ∘ 천호대로(광나루역)확장 (42%) ∘ 사가정길(장안삼거리~전농동 확장(60%) ∘ 서빙고고가교 및 강변북로 연결로개선(55%) ∘ 성암로 병목구간 개선(보상중) ∘ 시조사 삼거리교차로 외 2개소 개선(설계중) ∘ 신사사거리~고양시계간 도로개설(58%) ∘ 월계2교외 1개소 확장(10%) ∘ 월드컵대교 건설(15%) 등
	광역 도로 계획팀	4명	∘ 수도권 광역도로계획 수립 및 조정 ∘ 지하공간 자원 활용 방안에 관한 업무 ∘ 지하도로 관련 법령･지침 등 기준설정에 관한 업무 ∘ 각종 민원 및 소송에 관한 사항 등	∘ 사가정∼암사동간 도로개설(84%) ∘ 선사로∼고덕지구간 도로확장(50%) ∘ 제물포길 지상부 친환경공간 조성(마스터플랜 수립 중) ∘남부순환로(개봉역 주변) 구조개선(80%)
	도로 재산팀	5명	∘도로부지관련 시유재산 관리 ∘장기 미집행 도시계획시설 매수 청구 보상 ∘미불 용지 보상 ∘도로부지관련 민사 및 행정 소송 수행 등	∘ 장기 미집행 도시계획시설 매수 청구 보상 (지속 추진) ∘ 미불용지 매수 (지속 추진)

1. 한양도성안 도로공간을 친환경 공간으로 재편

담당부서	팀 장	안대희	2133-8062
도로계획과	담당자	김형석	2133-8064

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 한양도성안은 버스, 지하철 노선이 집중되어 있어 승용차 없이도 접근이 양호하고 역사·문화·관광 목적의 통행수요가 많아 도로공간의 재편 필요

○ 사업내용

- 도로 신설․확장시 투수성, 차열성, 저소음 등 환경친화적인 도로포장 도입방안 마련

- 친환경적 도로공간 활용 및 기능 개선방안 수립

▸ 차로축소를 통한 자전거도로 및 공원녹지공간 설치로 지역주민 이용 편의 증대

○  사업기간 : 2013. 3. ~ 2014. 6.

○ 총사업비 : 220,338천원

○ 총사업비 : 571억원(’13년 예산 : 13.5억원)

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 기본설계 중

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
			220		220		190	30

□ 추진실적

❍ 한양도성안 도로공간의 기능재편 방안 검토 용역 추진 중 (’13.3~’14.3)

- 지역 및 통행 특성을 고려하여 우선 시행 가능한 노선 검토 중

※ 지속가능한 도시교통 관리방안 수립, 도심부 관리계획 수립 연구와 연계 추진

□ 향후 추진계획

◦  '13.12월	: 도성안 도로공간재편 기본계획 수립 완료

◦  '14. 6월	: 시범가로 사업 완료

2. 한강상 교량 연결램프 구조개선

담당부서	팀 장	안대희	2133-8062
도로계획과	담당자	정용훈	2133-8067

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 강변북로, 올림픽대로와 연결되는 한강상 교량 중 일부 불합리한 구간을 개선하여 도시고속도로의 기능 및 주변 도로와의 연결성 증대

○ 위    치 : 한남․성수대교 북단, 동호․올림픽대교 남단 IC

○  규    모 : 연결로(4개소) 구조개선

○ 사업기간 : 2012 ~ 2016

○ 총사업비 : 571억원(’13년 예산 : 13.5억원)

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 기본설계 중

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
0	250	206	1,350		1,350		1,178	172

□ 추진실적

❍ ’12. 3 ~ ’13. 2 : 타당성 조사 및 기본계획용역 시행

❍ ’13. 5            : 설계용역 착수

❍ ’13. 8

- 한남․성수대교 북단, 동호대교 남단 연결램프 구조개선 기본설계 중

- 올림픽대교 남단 연결램프 구조개선 기본 및 실시설계 중

□ 향후 추진계획

❍’14. 5        : 설계 완료

❍ ’14년 하반기 : 올림픽대교 남단부터 단계적 공사착공 예정

3. 과천～송파간 도로

담당부서	팀 장	성 명	전화번호
도로계획과	팀 장	김 용 학	2133-8071
	담당자	백 대 열	2133-8075

□ 사업개요

○ 목    적 : 양재IC 주변 교통혼잡 개선 및 위례신도시 등 서울 동남부 지역 대규모 개발로 인한 교통량 증가 대비

○ 위    치 : 사업위치 : 과천시 문원동(과천대로) ~ 강남구 자곡동(문정로)

○ 규    모 : 왕복 4~6차로, 연장 12.17km

○ 사업기간 : 2009. ~ 2017.이후

○ 총사업비 : 456,100백만원 (시 재정지원 보상비 1,328억원)

○ 최초제안자 : 가칭)과천송파간도로(주)

□ 추진경위

○ '07.07.  : 민간제안서 제출(포스코건설 등 7개사)

○ '08.03.  : 위례신도시 광역교통개선대책 확정(국토해양부)

○ '09.01.  : 사업제안서 타당성조사 완료(KDI 공공투자관리센터)

○ '09.02.  : 市 재정계획심의위원회 심의(보류) - 구룡마을 개발계획 연계 검토 필요

○ '13.9월 현재 : 광역교통개선대책(위례신도시) 및 과천대로 접속방안 관련기관 협의 중

□ 향후 추진계획

○ `13.9.~10. : 사업추진방안 유관기관 협의

○ `13.12.      : 제3자 공고안 서울공공관리센터 검토 및 PIMAC 검토 의뢰

4. 서부간선지하도로

담당부서	팀 장	성 명	전화번호
도로계획과	팀 장	김 용 학	2133-8071
	담당자	박 상 위	2133-8072

□ 사업개요

○ 목    적 : 우리시 서남부지역의 남북방향 주요 교통축인 서부간선도로의 지․ 정체해소 및 강남순환도시고속도로와 연계하여 내부순환형 도시고속망 형성

○ 위    치 : 영등포구 양평동(성산대교남단) ~ 금천구 독산동(안양천교)

○ 규    모 : 왕복 4차로, 연장 10.91km (소형차 전용)

○ 사업기간 : 2009. ~ 2021. (당초 완료시기 2017)

○ 총사업비 : 505,400백만원(시 재정지원 건설보조금 1,351억원)

○  협상대상자 : 서서울도시고속도로(주) - 산업은행, 현대건설 등 10개사

□ 추진경위

○ '08.12. : 사업제안서 타당성조사 완료(KDI PIMAC)

○ '09.03. : 시 재정계획심의위원회 심의

○ '09.06. : 기재부 민간투자사업심의위원회 심의

○ '10.06. : 우선협상대상자 선정

○ '13.9월 현재 : 민간사업자와 재정지원금 절감방안 등에 대한 실무협상 중

□ 향후 추진계획

○ '14. 2  : 실시협약 협상완료 후 시 재정계획심의, 시의회 보고

5. 서울제물포터널

담당부서	팀 장	성 명	전화번호
도로계획과	팀 장	김 용 학	2133-8071
	담당자	백 대 열	2133-8075

□ 사업개요

○ 목    적 : 제물포길의 상습정체 해소, 인천공항과의 접근성 개선 및 자동차전용도로로 인한 지역단절 해소에 대한 주민들의 숙원 해결을 위한 기틀마련

○ 위    치 : 양천구 신월IC ~ 영등포구 여의도동(여의대로, 올림픽대로)

○ 규    모 : 왕복 4차로, 연장 7.53km(소형차 전용)

○ 사업기간 : 2010. ~ 2018.

○ 총사업비 : 454,594백만원(시 재정지원 793억원)

○  협상대상자 : 서울터널(주) - 산업은행, 대림산업 등 14개사

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	-	-	3,000		3,000		-	3,000		6,000

□ 추진경위

○ '09.02. : 사업제안서 타당성조사 완료(KDI 공공투자관리센터)

○ '10.05. : 시 재정계획심의위원회 심의

○ '10.06. : 기재부 민간투자사업심의위원회 심의

○ '11.06. : 우선협상대상자 선정

○ '12.11. : 시의회 보고

○ '12.12. : 가협약 체결(실무협상 완료)

○ '13.05. : 도시계획시설(도로) 결정 열람공고

○ '13.6~9: 환경영향평가(초안) 공람 및 주민설명회 개최

○ '13.09  : 도시계획위원회 심의

○ '13.9월 현재 : 기재부 민간투자사업심의위원회 심의 준비중

□ 향후 추진계획

○ '13.10.	: 기재부 민간투자사업심의 및 실시협약 체결

○ '13.10.  : 환경영향평가 주민 공청회 (예정)

○ '13.      : 공사착공

6. 용마터널

담당부서	팀 장	성 명	전화번호
도로계획과	팀 장	김 용 학	2133-8071
	담당자	박 상 위	2133-8072

□ 사업개요

○ 목    적 : 서울동부지역 강남북을 연결하는 체계적인 간선도로망 확충 및 지역주민들의 교통편익 향상

○ 위    치 : 중랑구 면목동(사가정길) ~ 구리시 아천동(암사대교)

○ 규    모 : 왕복 4차로, 연장 3.57km

○ 사업기간 : 2009. ~ 2014.

○ 총사업비 : 178,600백만원(시 재정지원 614억원)

○  협상대상자 : 용마터널(주) - 발해인프라펀드, SK건설 등 6개사

□ 추진경위

○ '01.05. : 민간제안서 접수(SK건설 등 6개사)

○ '03.08. : 실시협약 체결(MRG 80%)

○ '06.6 ~ '09.11 : 보상 추진

○ '09.10. : 실시계획 승인

○ '09.11. : 실시협약 변경(MRG 삭제)

○ '09.11. : 공사 착수

○ '13.9월 현재 : 공사중(공정률 72%)

□ 향후 추진계획

○ '14.11. : 준공(구리암사대교와 동시개통 추진)

7. 우면산터널

담당부서	팀 장	성 명	전화번호
도로계획과	팀 장	김 용 학	2133-8071
	담당자	서 형 준	2133-8074

□ 사업개요

○ 위    치 : 서초구 서초동(예술의 전당) ~ 서초구 우면동(선암교차로)

○ 규    모 : 왕복 4차로, 연장 3.57km

○ 사업기간 : '99.08. ~ '03.12.,  운영기간 : '04.01. ~ '34.01.(30년)

○ 총사업비 : 140,200백만원 (전액 민간자본)

○  사업시행자 : 우면산인프라웨이(주)

- 출자자 지분 : 맥쿼리 36%, SH공사 25%, 군인공제회 24%, 교직원공제회 15%

□ 추진경위

○ '98.05. : 실시협약 체결 및 사업시행자 지정

○ '99.8.~'13.12. : 공사시행 ('04.01.06 : 개통)

○ '05.03. : 출자자 변경 관련 MRG 축소(90%→85%)

○ '08.12. : 자금 재조달 관련 MRG 축소(85%→79%)

○ '11.12. : 통행료 인상(2,000 → 2,500원)

○ '12.5.~10. : 시의회 특위 개최(총 4회)

○ '13.02.~  : 재정지원 해소 관련 사업자 협의

□ 향후 추진계획

○ '13년 하반기 : 사업재구조화 추진 방안 심층 검토 및 사업시행자와 지속 협의

※ 필요시 사업시행자 지정 취소 절차 추진

8. 은평새길

담당부서	팀 장	성 명	전화번호
도로계획과	팀 장	김 용 학	2133-8071
	담당자	김 정 식	2133-8073

□ 사업개요

○ 위    치 : 은평구 불광동(통일로)~ 종로구 부암동(자하문길)

○ 규    모 : 왕복 4차로, 연장 5.78km

○ 사업기간 : 2009. ~ 2017.이후

○ 총사업비 : 223,100백만원 (LH 401, 민간자본 1,830억원)

○  협상대상자 : 은평새길(주) - 발해인프라투융자, GS건설 등 7개사

□ 추진경위

○ '07.07. : 삼송·지축·향동지구 광역교통개선대책 확정(국토부)

○ '07.07. : 민간제안서 제출(GS건설 등 7개사)

○ '08.07. : 사업제안서 타당성조사 완료(KDI 공공투자관리센터)

○ '08.11. : 기재부 민간투자사업심의위원회 심의

○ '08.12. : 시의회 동의

○ '09.05. : 우선협상대상자 선정

○ '11.09. : 주민설명회 개최

○ '11.10. : 전문가 토론회 개최(환경․교통 전문가 및 환경․시민단체, 주민대표 등)

○ '13.07. : 서울시 도시철도 종합발전방안 발표(도시교통본부)

○ '13.9월 현재 : 도시철도 종합발전방안과 연계하여 은평새길 재정지원 최소화 방안 검토 중

□ 향후 추진계획

○ '13.  : 신분당선 연장선의 중앙정부와의 협의추진상황 및 은평새길 민원 등을 종합적으로 검토하여 은평새길 추진방향 결정

9. 평창터널

담당부서	팀 장	성 명	전화번호
도로계획과	팀 장	김 용 학	2133-8071
	담당자	김 정 식	2133-8073

□ 사업개요

○ 위    치 : 종로구 신영동(신영삼거리) ~ 성북구 성북동(성북동길)

○ 규    모 : 왕복 4차로, 연장 2.94km

○ 사업기간 : 2009. ~ 2021.

○ 총사업비 : 153,800백만원 (시 재정지원 438억원)

○  협상대상자 : 평창터널(주) - 한국투자증권, 태영건설 등 5개사

□ 추진경위

○ '07.07. : 민간제안서 제출 (태영건설 등 5개사)

○ '09.03. : 재정계획심의위원회 심의(서울시)

○ '09.05. : 제3자 제안 공고

○ '09.09. : 우선협상대상자 선정

○ '10.08. : 재정계획심의위원회 심의(재심의)

- 성북지역 문화재 훼손 및 교통정체 가중 우려

○ '13.9월 현재 : 사업추진 유보중

□ 향후 추진계획

○ '14.이후   : 성북구청, 관련 시의원 및 지역주민들과 충분한 의견수렴 후 사업추진

10. 고척교 확장공사

담당부서	팀 장	조현석	2133-8076
도로계획과	담당자	신대식	2133-8077

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 서남권 돔야구장 건립 교통개선대책의 일환으로 돔야구장 주변 교통개선 및 보행자 통행공간 확보

○ 위    치 : 구로구 구로동 고척교

○ 규    모 : 교량확장 폭 37.5→52.5m, 연장 203m

(차로폭 : 8→10차로,  보도폭 : 4m → 21m)

○ 사업기간 : 2012. ~ 2014. 9

○ 총사업비 : 20,171백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 착공 준비 중

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
	9,000	9,000			8,000		40	7,960

□ 추진실적

○  '10.10.08	: 서남권 돔야구장 주변 교통처리계획 수립 방침

○  '11.02.	: 돔야구장 교통영향분석․개선대책심의

○  '12.02.23 ~ 11.18	: 기본 및 실시설계용역 시행

○  '12.12.31	: 감리용역 계약

○ '13.4.8	: 공사착공

□ 향후 추진계획

○ '15.2	: 공사 완료

□ 특이사항

○ 돔야구장 완공에 맞추어 공사준공 예정

11. 남부순환로～오정대로삼거리간 도로개설

담당부서	팀 장	조현석	2133-8076
도로계획과	담당자	신대식	2133-8077

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 마곡지구 개발에 따른 인접도로인 방화로의 교통수요 증가 대비 남북구간 도로개설

○ 위    치 : 강서구 방화로 ~ 부천시 오정대로 삼거리

○ 규    모 : 폭 8차로, 연장 1.23km (당초 1.1km)

○ 사업기간 : 2009. ~ 2014.

○ 총사업비 : 82,700백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 보상업무 추진 및 공사 중(25%)

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
	5,835	2,067		3,768	29,331		10,298	19,033

□ 추진실적

○   '07.12.24	: 마곡지구 광역교통개선대책 수립

○  '09.03.~'09.12.	: 기본 및 실시설계 시행

○  '10.09.29	: 공사착수

○   '12.11.29	: 실시계획(변경) 고시(서울시 구간)

○ '13.01.21	: 실시계획 열람공고(부천시 구간)

◦  '13.9월 현재	: 협의보상 진행중

□ 향후 추진계획

○ '14.12	: 공사 완료

□ 특이사항

○ 없음

12. 방화대교 남단 접속도로 건설

담당부서	팀 장	조현석	2133-8076
도로계획과	담당자	신대식	2133-8077

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 올림픽대로와 강서구 방화동 지역(방화로)를 연결하는 도로 건설을 통한 방화동 지역 교통난 해소

○ 위    치 : 강서구 방화로 ~ 방화대교

○ 규    모 : 폭폭 1~ 3차로, 연장 3.53km

○ 사업기간 : 1995. ~ 2014.

○ 총사업비 : 109,807백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 올림픽대로 연결램프 공사 중(공정 84%)

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
			17,075		17,075		13,127	3,948

□ 추진실적

○ '98.04.~'00.08.	: 기본 및 실시설계 시행

○  '04.04.~'05.09.	: 보완설계 시행

○   '05.10.05.	: 공사착수

○   '07.12.24	: 마곡지구 광역교통개선 대책 수립

○ '08.12.~‘09.11	: 변경설계용역 시행

◦  '12.03.28	: 중앙투자심사(행안부)

◦  '12.06.05	: 마곡지구 광역교통개선대책 변경 심의 완료(국토부)

◦   '13.07. 현재	: 공사중(공정률 85%) - Ramp-D 슬라브 시공 및 본선 보조기층 시공

□ 향후 추진계획

○ '14.0.06	: 공사 완료

□ 특이사항

○ ‘13.7.30일 발생한 상판붕괴 사고로 인하여 공사 중단된 상태임.

13. 서부트럭터미널앞 지하차도 건설

담당부서	팀 장	조현석	2133-8076
도로계획과	담당자	신대식	2133-8077

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 남부순환로상의 서부트럭터미널앞 교차로 교통정체 현상 해소 및 통행 차량의 증가 대비

○ 위    치 : 양천구 신정3동 735-5번지 일원(서부트럭터미널앞)

○ 규    모 : 지하차도 신설 폭 4차로, 연장 1,075m

○ 사업기간 : 2008. ~ 2014.

○ 총사업비 : 81,994백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 시점부 U-타입 구간 공사중(공정 85%)

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
	24,280		6,898	10,444	17,342		10,238	7,104

□ 추진실적

○ '03.07.~'04.01.	: 양천구 교통개선 종합계획 수립

○  '05.05.~'06.01.	: 기본설계 시행

○   '06.12.~'07.12.	: 실시설계 시행

○  '08.03.10	: 공사착수

○ '09.04.~'10.06.	: 지하차도 연장 변경설계시행

◦  '12.11.22	: 오류IC 방향 지하차도 임시개통

◦   '13.07. 현재	: 공사중(공정률 84%) - 시점부 U-타입 구간 공사중

□ 향후 추진계획

○ '13.12	: 지하차도 4차로 개통예정

○ '14.04	: 지하차도 공사 완료

□ 특이사항

○ 없음

14. 여의교 확장 및 여의교남단 교차로 설치

담당부서	팀 장	조현석	2133-8076
도로계획과	담당자	신대식	2133-8077

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 여의도일대 대규모 개발사업 추진으로 많은 교통량이 증가할 것으로 예상됨에 따라 이에 대한 개선대책으로 여의교확장 등을 통하여 이 일대 교통난을 해소하기 위함

○ 위    치 : 여의교북단 ~ 대방역간

○ 규    모 : 여의교 확장 8차→9차로(폭 36m→43.5m), 연장 350m, 남단 교차로 설치

○ 사업기간 : 2011. ~ 2014.

○ 총사업비 : 4,500백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 기본설계 진행 중

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
	800	-	4,200	800	4,280		80	4,200

□ 추진실적

○ '09.07.14	: 여의도일대 교통개선대책수립결과 및 추진계획

○  '11.01. ~ 12.	: 기본계획 시행

○   '12.04.12	: 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수

○  '12.07.06	: 지반조사용역 계약 및 착수

○ '13.07.23	: 여의교 확장 기본설계 자문회의 개최

□ 향후 추진계획

○ '14.12	: 공사 완료

□ 특이사항

○ 없음

15. 강남순환도시고속도로 건설

팀 장	조현석	2133-8076
	김용학	2133-8071
담 당	박운용	2133-8078
	김정식	2133-8013

□ 사업개요

◦ 위    치 : 금천구 독산동(소하JCT) ~ 강남구 일원동(수서IC)

◦  규    모 : 폭 6~8차로, 연장 22.9㎞ (민자사업구간 12.4km)

◦  사업기간 : 1994.~ 2016.5

◦  총사업비 : 1,551,445백만원 (민간자본 5,371억원 별도)

- 민자구간 통행요금 : 시흥 및 선암영업소 각 1,100원(소형기준, `00.11월 불변가)

※ 사업시행자 : 강남순환도로(주) - 산업은행, 두산건설 등 11개

○ 누계 공정율 : 계획공정  51.8%, 현재공정  51.0%, 계획대비 실공정율 98.5%

□ 예산투자 현황

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
728,537	161,200	158,612	160,000	2,588	162,588		112,949	49,639

□ 추진실적

◦ '02.06.05 : 도시계획시설(도로, 광장) 결정

◦ '02.06.27 : 민간투자사업 실시협약 체결

◦ '07.02.10 : 민간투자사업 실시계획 승인

◦ '12.05.07 : 추진방안 검토 보고(부시장, 사업기간 조정 : 2년 연기)

◦ '07.07.~’13.9월 현재 : 보상 및 공사 시행중(공정률 51%)

□ 향후 추진계획

○ `16.5월 : 도로 개통

□ 특이사항 및 대책

○ 준공시기 연기(’14.5→’16.5)에 따른 협상 추진

⇒ 물가상승으로 인한 재정지원 증액은 불가피하나, 통행료 일부 조정을 통한 추가 재정지원 등 재정지원 최소화 방안으로 협상 추진하고, 현안사항 적극 해결하여 `16.5월 개통에 차질없이 사업 추진

16. 디지털3단지～두산길간 지하차도 건설

담당부서	팀 장	조현석	2133-8076
도로계획과	담당자	박운용	2133-8078

□ 사업개요

◦  위    치 : 디지털3단지(가산동319-10)~ 두산길(독산1동 998-10)

◦  규    모

- 도로개설 폭 4차로(12~26m), 연장 453m(지하차도 폭 2차로, 연장 310m)

- 서부간선도로 진출램프(폭 1차로, 연장 235m)

◦  사업기간 : 2012. ~ 2016.

◦  총사업비 : 45,341백만원(시비 45,141, 구비 200백만원)

□ 예산투자 현황

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
200	200	63	3,206		3,206		749	2,457

□ 추진실적

◦  '10.03.~'10.12  : 타당성조사 용역 시행

◦  '12.02.~'12.09  : 기본계획 용역 시행

◦  '13.05.21       : 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수

◦  '13.09월 현재   : 유관기관 협의 및 기본설계 중

- 서부간선도로 진출램프는 금천구에서 서울지방경찰청 교통규제심의 진행중으로,
‘13.12.까지 공사 완료예정

□ 향후 추진계획

○ '13.12.	: 서부간선도로 진출로 공사 완료(금천구)

○ '14.05.	: 기본 및 실시설계 완료

○ '14.06.~'16.12.	: 보상 및 공사 시행

17. 관악은천길 도로확장

담당부서	팀 장	조현석	2133-8076
도로계획과	담당자	박운용	2133-8078

□ 사업개요

◦ 위    치 : 은천길 현대시장 ~ 관악로 강남고려병원 앞

◦ 사업규모 : 폭 3→4차로(18m→20m), 연장 950m

◦ 사업기간 : 2007. ~ 2013

◦ 총사업비 : 19,645백만원(구비 100, 시비19,545)

◦ 누계 공정율 : 계획공정  85.0%, 현재공정  80.0%, 계획대비 실공정율 94.1%

□ 예산투자 현황

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
19,145	0	0	500	0	500		431	69		0

□ 추진실적

◦ ’07.07	: 기본 및 실시설계 시행

◦ ’09.12	: 공사 착공

◦ ’11.04 : 전선지중화 협약 체결

◦ ’11.11	: 전선지중화 착공

◦ ’12.02	: 중토위 수용재결

◦ ’12.04	: 보상비 집행완료

◦ ’13.9월 현재 : 도로확장 공사중(공정률 80%)

□ 향후 추진계획

○ `13.10 : 공사 완료

□ 특이사항 및 대책

○ `13.10월 사업완료 예정으로, 특이사항 없음.

18. 신림~봉천터널 건설

담당부서	팀 장	조현석	2133-8076
도로계획과	담당자	박운용	2133-8078

□ 사업개요

◦ 위    치 : 관악구 신림8동 시흥IC~ 관악구 봉천7동 낙성대

◦ 규    모 : 도로개설(터널) 폭 4차로, 연장 5,600m

◦ 사업기간 : 2007. ~ 2018이후

◦ 총사업비 : 550,700백만원

◦ 누계 공정율 : 계획공정  10.0%, 현재공정  10.0%, 계획대비 실공정율 100.0%

□ 예산투자 현황

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
32,000	30,000	2,339	25,000	27,661	52,661		26,993	25,668

□ 추진실적

◦ '08.11.26	:  KDI PIMAC의 타당성 검토

◦ '09.01.30	:  추진방식 변경(민자→재정)

◦ '10.04.01	:  도시계획시설(도로) 결정

◦ '10.07.29	:  사업계획 변경(도로운영 : 유료→무료)

◦ `10.10.08	:  공사 착수

◦ `12.06.29	:  사업추진 관련 숙의(시장실)

◦ `12.09.27    :  긴급공사구간(강남순환도로 하부통과) 공사 착공

◦ `13.01.24    :  도시계획시설 실시계획 고시(난곡사거리 구간)

◦ `13.09월 현재 :  보상 및 공사중(10%)

□ 향후 추진계획

○ `14.12 : 긴급공사 및 난곡사거리 보상 완료

○ `15이후 : 시 재정여건을 고려하여 사업추진

□ 특이사항

○ 남부순환로의 교통정체 해소를 위해 강남순환도시고속도로 사업과 연계하여 본격적인 사업추진이 필요하나, 시 재정여건이 어려워 사업진행이 원만하지 못한 실정임.

19. 가마산길 도로확장

담당부서	팀 장	조현석	2133-8076
도로계획과	담당자	박운용	2133-8078

□ 사업개요

○  위   치 : 금천구 가산동 553-1번지 일대

○  규   모 : 도로확장  폭 29 → 32m (보도확장), 연장 120m

○  사업기간 : 2013. 1 ~ 2013. 12

○  총사업비 : 1,900백만원(보상비 1,630,  공사비 270)

□ 예산투자 현황

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
0	0	0	1,900	0	1,900		-	1,900		0

□ 추진실적

○  ‘13.2.21 : 도시계획시설(도로) 변경 결정

○  ‘13.5.08 : 도시계획시설사업 실시계획 고시

○  ‘13.9월 현재 : 보상협의중

□ 향후 추진계획

○ ‘13. 10	: 보상 완료

○ ‘13. 12	: 공사 완료

□ 특이사항

○ `13.12까지 도로확장을 완료할 예정으로 특이사항 없음.

20. 독산로 도로개선 (가각정리)

담당부서	팀 장	조현석	2133-8076
도로계획과	담당자	박운용	2133-8078

□ 사업개요

◦  위    치 : 금천구 시흥동 789-66호

◦  규    모 : 폭 8m, 연장 10m

◦  사업기간 : 2013. 1 ~ 2013. 12

◦  총사업비 : 1,500백만원(보상비 1,360/ 공사비 140)

□ 예산투자 현황

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
0	0		1,500	0	1,500		129	1,371

□ 추진실적

◦  ‘12.06.05    : 독산로 도로개선(가각정리)사업계획 수립

◦  ‘12.07.02    : 도시관리계획(도로) 변경결정

◦ '13.03.07	: 도시계획시설 실시계획 고시

◦ '13.9월 현재  : 보상협의 중

□ 향후 추진계획

○ ‘13. 10	: 보상 완료

○ ‘13. 12	: 공사 완료

□ 특이사항

○ `13.12까지 사업완료할 완료할 예정으로 특이사항 없음.

21. 감일∼초이간 광역도로 개설

담당부서	팀 장	조현석	2133-8076
도로계획과	담당자	이성주	2133-8080

□ 사업개요

○ 목    적 : 서울시 동북부지역과 경기도를 연결하는 동서간 도로망 확보로 주변지역 대규모 개발에 따른 교통수요 증가에 대처

○ 위    치 : 강동구 상일동(천호대로) ~ 하남시 시계

○ 규    모 : 도로개설 폭 6차로, 연장 0.14km(전체구간 연장 5.63㎞)

○ 사업기간 : 2004. ~ 2014.

○ 총사업비 : 10,000백만원(국비 5,000, 서울시 5,000)

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정 25%, 현재공정 25%, 계획대비 실공정율 100%

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
0	7,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	0	0

□ 추진실적

○ '04.04.21.   : 광역도로 지정

○ '06.09.08.   : 예비타당성 조사

○ '07.12.31.   : 대도시권 광역교통시행계획 고시

○ '08.05.31.   : 사업시행 주체 및 사업비 분담협의

○ '11.05.12.   : 도시계획시설 변경 결정

○ ‘11.12.02.   : 서울시 구간 사업시행 협약 체결(서울시↔하남시)

- 보상 및 공사시행 : 하남시, 비용부담 : 서울시가 하남시에 납부

○ ‘12.01.26.   : 실시계획 인가

○ ‘12.02.01.   : 공사 착공(하남시)

○ ‘13.8월현재   : 보상완료 및 공사중

□ 향후 추진계획

○ ‘14.12.    : 공사 완료(서울시 구간)

□ 특이사항

○ 해당 없음

22. 구천면길 도로확장

담당부서	팀 장	조현석	2133-8076
도로계획과	담당자	이성주	2133-8080

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 :  일부 구간의 노폭 협소로 교통소통이 원활하지 못하여 도로확장을 통해 도로구조 및 교통체계 개선과 지역발전 도모

○ 위    치 : 강동구 천호동 217-18(천일초교사거리~명일역)

○ 규    모 : 도로확장 2→3차로,연장 1,340m

○ 사업기간 : 2004. ~ 2017(시재정여건상 사업기간 변경)

○ 총사업비 : 62,931백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정 8%, 현재공정 8%, 계획대비 실공정율 8%

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
4,460	900		0	750	750	0	22	728

□ 추진실적

○ '04.12.~‘06.02. : 기본설계 시행

○ '06.07.27.     : 도시계획시설 변경결정

○ ‘09.02.~’10.01. : 실시설계 시행

○ ‘10.05.13.     : 도시계획시설(도로)사업 실시계획 고시

○ '10.05.~	: 보상 시행

○ '13.08월 현재  : 보상중(1필지), 보상건축물 철거완료(4개동)

- 총 216필지 87개동 중 9필지 4개동 보상 완료, 이월액으로 1필지(지장물 없음) 보상중

□ 향후 추진계획

○ 천호뉴타운 개발사업과 연계, 시 재정여건을 감안하여 사업비 집행시기 조정

□ 특이사항

○ 저촉 토지 및 건물에 대한 조기 보상을 요구하는 해당 토지주들의 의견 및 건의 사항 발생

23. 노량진배수지 도로구조 개선사업

담당부서	팀 장	조현석	2133-8076
도로계획과	담당자	이성주	2133-8080

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 노들길상 노량진배수지공원으로 진입할 수 있는 좌회전차로 확보를 통해 교통정체 해소

○ 위    치 : 동작구 노량진 본동 노량진배수지공원 주변

○ 규    모 : 차로 확장 폭 4→5차로(좌회전차로 추가), 연장 100m

○ 사업기간 : 2013. ~ 2015.

○ 총사업비 : 2,000백만원

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
0	0	0	100	0	100	0	0	100	0

□ 추진실적

○ ’13.03.12 : 타당성 및 기본계획용역 발주

○ ’13.04.30 : 타당성조사 및 기본계획용역 계약 및 착수

□ 향후 추진계획

○ ‘13.10.26  : 용역 완료

○ ‘13.11.이후 : 용역시행 결과에 따라 후속절차 추진

□ 특이사항

○ 해당 없음.

24. 대방지하차도 확장

담당부서	팀 장	조현석	2133-8076
도로계획과	담당자	이성주	2133-8080

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 대방지하차도 교통축의 교통현황을 파악하고, 교통정체의 근본적인 원인을 분석하여 교통개선방안과 지하차도 확장의 타당성을 검토

○ 위    치 : 여의대방로(신길동 1367)

○ 규    모 : 지하차도 폭 19.8m, 연장 150m, 옹벽 179m(4차로)

○ 사업기간 : 2013. ~ 미정

○ 총사업비 : 200백만원

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
0	0	0	200	0	200	200	25	175	0

□ 추진실적

○ ‘13.04.26	: 타당성용역 발주 의뢰

○ ‘13.06.07	: 타당성조사용역 계약

□ 향후 추진계획

○ ’13.11.06 : 타당성조사 용역 준공

○  ‘13.11월 이후 : 용역시행 결과에 따라 후속절차 추진

□ 특이사항

○ 해당 없음

25. 신상도 지하차도 확장

담당부서	팀 장	조현석	2133-8076
도로계획과	담당자	이성주	2133-8080

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 양녕로 확장으로 인한 신상도 지하차도 병목현상 해소

○ 위    치 :  동작구 상도동 양녕로~상도동길

○ 규    모 :  도로확장 폭 2차로→ 4～6차로, 연장 324m

○ 사업기간 :  2012. ~ 2015.

○ 총사업비 : 23,609백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정  25%, 현재공정 25%, 계획대비 실공정율 25%

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
12,777	0	0	2,200	0	2,200	0	2	2,198	2,198	0

□ 추진실적

○ '03. 3 ~  '04. 9  : 기본설계 (동작구청)

○ '04.11.30	: 도시계획시설(도로,학교)변경 결정

○ '05. 6 ~ ‘06.12    : 실시설계용역 시행

○ '07.12.31         : 공사계약 및 착공

○ '09.12.             : 신상도초등학교측 옹벽(L=147m) 설치완료

○ '10.12.            : 공사중단(건물철거 및 주차장 조성, 공정율 25%)

○ '12.02.           : 추진위원회 해산

○  '13.08월 현재 : 보상중(1필지)

□ 향후 추진계획

○  '13.12 : 잔여 1필지 보상완료

※ 상도7재개발구역 기부채납구간외

□ 특이사항

○ 신상도지하차도 확장은 상도7구역 재개발사업 부지내 토지를 기부채납 받아 시행 하기로 하였으나, 재개발사업의 추진이 지연되면서 공사가 중단 되었음.

○ 상도7구역은 현재 추진위원회 해산승인 무효확인 소송(항소) 진행중이며, 재개발 사업의 추진경과와 재정여건에 따라 사업이 추진되어야 할 것으로 2013년도 예산 22억원(보상비21억원, 철거비 1억원) 편성하여 보상중 임.

26. 올림픽대로 하부 미연결구간 도로개설

담당부서	팀 장	조현석	2133-8076
도로계획과	담당자	이성주	2133-8080

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 제2롯데월드, 잠실지역 재건축 등 송파구 대규모 개발로 인하여 극심한 정체가 예상되는 송파대로 및 올림픽로의 교통량을 분산하여, 잠실사거 리의 교통혼잡을 완화시키고, 단절된 지역간을 연계하여 시민이동 편익 을 증진

○ 위    치 : 송파구 잠실주공5단지 후면 가람길~아산병원길

○ 규    모 : 도로개설 폭 2~4차로,연장 1.83km

○ 사업기간 : 2009. ~ 2015.

○ 총사업비 : 958억원

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
1,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 추진실적

○ '08.10.~'09.01. : 타당성조사 및 기본계획 용역 시행

○ '09.07.~'10.10. : 기본설계 착수

○ '10.09.	: 디자인심의, 기술심의

○ ‘10.12.~’12.02.    : 실시설계 시행

○ ‘11.11.24	: 주민설명회 실시

○ ‘12.02.29	: 실시설계 준공

○ '13.05.30 / 06.04: 전면 지하화 개설요구 집회 개최(2회)

○ ‘13.08월 현재	: 사업비를 분담토록 되어 있는 제2롯데월드측과 분담금 협의중

□ 향후 추진계획

○ '13. 12.  : 지하차도 사업비 분담 협의 완료, 시의원 및 주민 이해설득

□ 특이사항

○ 장미아파트 뒤편 본 계획도로와 단지내 도로 접속에 따른 교통혼잡 우려 및 도로 개설에 따른 녹지대 훼손을 이유로 도로개설 반대

⇒ 단지내 도로연결 계획 변경 및 장미아파트 통과구간은 단계건설(장미아파트 재건축 전에는 2차로→재건축시 4차로 확장)을 통한 녹지 훼손을 최소화, 소음저감대책으로 방음벽 설치 및 저소음 포장공법을 설계에 반영 하였음.

○ 제2롯데월드 사업시행자의 사업비 분담 관련 사항

- 올림픽대로 하부 미연결 구간 도로개설 중 잠실대교 남단 지하차도 공사는 제2롯데월드 사업자가 시행토록 결정됨.(`10.6.22 건축위원회 심의통과)

⇒ 지하차도 건설비용 부담을 위해 사업시행자와 협의 진행중

27. 대방동 우정아파트~노량진로간 보행공간 조성

담당부서	팀 장	조현석	2133-8076
도로계획과	담당자	이성주	2133-8080

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 경부선 및 국철1호선으로 단절된 우정아파트 주변지역과 노량진로를 연결하여 지역주민 통행불편 해소 및 지역균형발전 도모

○ 위    치 :  동작구 대방동 우정아파트 ~ 노량진로 현대아파트 주변

○ 규    모 : 보행로 폭 2차로, 연장 100m

○ 사업기간 : 2013. ~ 미정

○ 총사업비 : 2,800백만원

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
0	0	0	300	0	300	0	0	0	0

□ 추진실적

○ ‘13.04.26 : 타당성용역 발주의뢰

○ ‘13.06.07 : 타당성조사용역 계약

□ 향후 추진계획

○ ’13.11.06 : 타당성조사 용역 준공

○  ‘13.11월 이후 : 용역시행 결과에 따라 후속절차 추진

□ 특이사항

○ 해당 없음.

28. 장승배기∼여의도간 도로개설

담당부서	팀 장	조현석	2133-8076
도로계획과	담당자	이성주	2133-8080

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 대규모 개발사업에 따른 교통량 증가에 대비하고, 동작구와 여의도간  연계도로를 개설하여 교통량 분산에 기여

○ 위    치 : 동작구 노량진동 장승배기길동작구청앞 ～ 여의도간

○ 규    모 : 고가차도 신설 폭 21.5m,연장 800m

○ 사업기간 : 2003 ~ 2017

○ 총사업비 : 157,850백만원

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
150	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0

□ 추진실적

○ '03.11. ~ '05.02	: 타당성조사 및 기본계획

○ '05.05. ~ '06.06	: 기본설계 시행

○ '13.06.27	: 기본설계 보완용역 착수

□ 향후 추진계획

○ ‘14. 06.27  : 용역 완료

○ ‘14. 07.이후 : 용역시행 결과에 따라 검토․추진(市 투자심사 재상정)

□ 특이사항

○ 해당 없음

29. 탄천변 동측도로 확장

담당부서	팀 장	조현석	2133-8076
도로계획과	담당자	이성주	2133-8080

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 서울 동남권 대규모 개발에 대비하여 송파대로 및 동부간선도로의 교통량 분산하여 쾌적한 교통환경 개선

○ 위    치 : 송파구 잠실동 올림픽경기장 ~ 문정동 훼미리아파트

○ 규    모 : 도로확장 2 → 4차로, 연장 5.59㎞

○ 사업기간 : 2005. ~ 2015.

○ 총사업비 : 155,513백만원 (시비 110,513, 롯데 45,000)

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
5,657	0	0	0	1,124	1,124	0	0	0	0	0

□ 추진실적

○ '05.06.~'06.05. : 타당성조사 및 기본계획 수립

○ '07.07.~‘09.02. : 기본설계 시행

○ '08.08.10	: 주민설명회 개최

○ '08.12.31        : 실시설계 계약 및 착수

○ '09.02.25        : 지역주민 청원 채택 (시의회)

○ '11.12.26        : 사업 추진계획 수립

○ '12.06.27        : 시의회(건설위) 현장 방문, 실시설계 일시중지(’12.6.28~)

○ '13.09. 현재	: 민원해결을 위한 재정확보방안 검토중

□ 향후 추진계획

○ ‘14. 2. : 실시설계용역 완료

※ 당초 ’12년 하반기중 투자심사 상정 계획이었으나, 일방향 터널에 대한 강력한 반대로 미 상정, 재정확보 결과에 따라 추진

□ 특이사항

○ 도로의 전면 지하화 요구 민원에 따른 노선 미확정으로 진행이 곤란

30. 덕송~상계간 도로개설

담당부서	팀 장	한정수	2133-8081
도로계획과	담당자	박찬규	2133-8082

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 서울시 동북부지역과 경기도를 연결하는 동서간 도로망 확보로 주변지역 대규모 개발에 따른 교통수요 증가에 대처 및 동북부 지역 광역도로망 확충

○ 위    치 : 노원구 상계동 ~ 남양주시 별내면 덕송리

○ 규    모 : 도로개설 폭 4차로(25m), 연장 0.84km(총연장 2.38km)

※ 경기도 구간 : 폭 4차로 연장 1.54km, 총사업비 41,138백만원

○ 사업기간 : 2004. ~ 2014.

○ 총사업비 : 23,882백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정 35%, 현재공정 35%, 계획대비 실공정율 100%

- 부진사유: 해당없음

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용 (예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
38	6,000	8,343	2,688	0	2,688		2,549	139	-

□ 추진실적

○ '04.04.21	: 광역도로 지정(국토부)

○ '11.06.14	: 공사 착수

○ '13.09월 현재	: 서울시 구간 토공 공사중

□ 향후 추진계획

○ ‘13. 10.	: 서울시 구간 터널굴착 완료예정

○ ‘14. 12.	: 준공

□ 특이사항

○ 협약에 따라 전구간 공사는 남양주시 시행

○ 노원구 접속부분 광역도로 추가 지정요구 민원

31. 도시고속도로 연결램프 추가 설치

담당부서	팀 장	한정수	2133-8081
도로계획과	담당자	박찬규	2133-8082

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 도시고속도로 연결램프(정릉길, 연희로)의 추가설치로 하부도로의 진․출입구간 상습 지․정체 해소 및 지역균형 발전 도모

○ 위    치 : 도시고속도로(정릉길 1개소, 화랑로 2개소)

○ 규    모 : 정릉길 진입램프 : 성북구 정릉동(국민대앞), 연장 277m

화랑로 진출․진입램프 : 노원구 공릉동(화랑대역주변), 연장 각 486m, 466m

○ 사업기간 : 2008. ~ 2015.

○ 총사업비 : 43,121백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 실시설계 진행 중

- 부진사유: 해당없음

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용 (예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
38	1,050	100	2,200	578	2,778		173	2,650	-

□ 추진실적

○ '10.04.~ '11.05	: 기본설계 시행

○ '11.08.~ '13.09	: 실시설계 시행 중 (국민대앞)

○ '13.01.~ '13.12	: 실시설계 시행 중 (화랑로 진출입램프)

○ '13.09월 현재	: 실시설계 진행중

□ 향후 추진계획

○ ‘13. 09.	: 정릉길 진입램프 실시설계 완료

○ ‘13. 12.	: 화랑로 진출입램프 실시설계 완료

○ ‘13. 10.~ ‘15. 12. : 보상 및 공사시행

□ 특이사항

○ 화랑로 진출입램프설치 위치가 경춘선폐선부지 및 BRT 저촉으로 설치위치

검토 및 관계기관 협의에 기간 소요

32. 동부간선도로(월계1교~의정부시계) 확장

담당부서	팀 장	한정수	2133-8081
도로계획과	담당자	박찬규	2133-8082

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 4→6차로로 확장하여 병목으로 인한 상습정체를 해소하고, 서울 동북부지역 교통여건 개선

○ 위    치 : 동부간선도로 월계1교 ~ 의정부시계

○ 규    모 : 도로확장 폭 4 → 6~7차로, 연장 6.85km, 경원선이설 1.46km

- 재정구간(1공구)	: 월계1교~녹천교,   연장 1.4㎞

- 광역구간(2․3공구)	: 녹천교~의정부시계, 연장 5.45㎞

○ 사업기간 : 2004. ~ 2015.

○ 총사업비 : 383,470백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정 41.2%, 현재공정 39.6%, 계획대비 실공정율 96.1%

- 부진사유: 해당없음

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용 (예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
121,730	9,000	9,105	63.135	304,314	63,439		33,576	29,863	-

□ 추진실적

○ '04.04.21	: 광역도로 지정(녹천교~의정부시계)

○ '04.09.~ '07.08	: 기본 및 실시설계 시행

○ '08.07.          : 하천점용허가 및 공사 착수

○ '13.09월 현재	: 공사중

□ 향후 추진계획

○ ‘15. 12.	: 동부간선도로 확장공사 완료

□ 특이사항

○ 광역도로 국비지원 1천억원 한도 적용으로 재원조달 곤란, 국비지원 확대 필요

33. 겸재교 건설

담당부서	팀 장	한정수	2133-8081
도로계획과	담당자	우철신	2133-8083

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 중랑천으로 단절된 중랑구 면목동과 동대문구 휘경동을 연결하는 도로망 구축으로 교통량 분산으로 원활한 교통소통 도모

○ 위    치 : 중랑구 면목동(동2로) ~ 동대문구 휘경동(한천로)

○ 규    모 : 교량건설 폭 15~18m(4차로), 연장 395m

도로확장 폭 20~25→30~33m(4→6차로), 연장 750m

○ 사업기간 : 2003. ~ 2015.

○ 총사업비 : 113,582백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정60%, 현재공정57%, 계획대비 실공정율 95%

- 부진사유: 해당없음

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용 (예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
49,243	13,000	9,186	4,000	3,814	7,814		2,403	5,411	-

□ 추진실적

○ '08.03.20	: 도시계획시설(도로) 변경 결정

○ '08.10.23     : 공사 착수

○ '13.09월 현재	: 동대문구측 접속교량 공사중 (공정률 57%)

□ 향후 추진계획

○ ‘13. 12.	: 동대문구측 교량구조물 공사 추진

○ ‘15. 12.	: 도로확장 및 준공

□ 특이사항

○ 동대문구 방음시설 설치 민원, 아파트 시설 지원 요청

○ 중랑구 접속교량 축소 및 연결램프 설치 민원

34. 마장지하차도 구조개선

담당부서	팀 장	한정수	2133-8081
도로계획과	담당자	우철신	2133-8083

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 마장지하차도 우회차로구간 통과높이가 낮아 화물차량들이 통행을 할 수 없어 우회차로의 종단구배를 조정하여 주민불편을 해소코자 함.

○ 위    치 : 마장동 498번지 일대

○ 규    모 : 도로 개선→ 지하차도 철거 및 신설(폭 15.2m, 연장 135m)

철도 개선→ 마장천교 철거 및 신설(폭 11.8m, 연장 35m)

○ 사업기간 : 2009. 11. ~ 2013. 12.

○ 총사업비 : 15,840백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정40%, 현재공정38%, 계획대비 실공정율 95%

- 부진사유: 해당없음

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용 (예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
151	10,419	10,419	5,270	-	5,270		3,724	1,546	-

□ 추진실적

○ ‘11.10.27.	: 기획재정부 심의(국비 5,520백만원 지원확정)

○ ‘12.08.21.	: 공사 착공

○ '13.09월 현재	: 마장지하차도 옹벽 공사중 (공정률 38%)

□ 향후 추진계획

○ ‘13. 12.	: 마장철교 준공

○ ‘13. 12.	: 마장지하차도 준공

□ 특이사항

○ 심야시간 공사에 따른 소음 민원

○ 마장지하차도 전면 통제에 따른 교통불편 민원

35. 망우리고개 횡단교량 설치

담당부서	팀 장	한정수	2133-8081
도로계획과	담당자	우철신	2133-8083

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 망우로로 인하여 단절된 망우리고개 정상에 망우로를 횡단하는 교량을 설치하여 시민통행 도로로 활용함으로써 보행동선을 연결하여 시민 삶의 질 향상

○ 위    치 : 망우로 구리시계 일대

○ 규    모 : 교량설치 폭 35m, 연장 60m

○ 사업기간 : 2013. 03. ~ 2015. 12.

○ 총사업비 : 6,668백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정50%, 현재공정48%, 계획대비 실공정율 96%

- 부진사유: 해당없음

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용 (예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	-	-	50	-	50		0	50	-

□ 추진실적

○ '13.06.04	: 타당성조사 및 기본계획용역 계약

○ '13.09월 현재	: 교량 구조물 형식 검토 중 (공정률 48%)

□ 향후 추진계획

○ ‘13. 11.	: 분야별 전문가 자문

○ ‘13. 12.	: 용역 준공

□ 특이사항

○

36. 용비교~행당중간 도로개설

담당부서	팀 장	한정수	2133-8081
도로계획과	담당자	우철신	2133-8083

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 동북부 지역의 보조간선도로망 구축으로 지역 균형발전을 도모

○ 위    치 : 성동구 행당동 ~ 성동구 금호동

○ 규    모 : 도로확장 및 개설  L=1,581m, B=18.5~23.5m

교량신설:L=257m,B=21.9m, 교량확장:L=495m, B=4.75m(용비교 4→6차로)

○ 사업기간 : 2007. 3 ~ 2014.

○ 총사업비 : 64,504백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정71%, 현재공정67%, 계획대비 실공정율 95%

- 부진사유: 해당없음

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용 (예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
17,398	3,900	3,900	3,000	-	3,000	-	1,212	1,788	-

□ 추진실적

○ '07.03.22 : 공사계약 및 착수

○  '09.11.03 : 사업추진 변경(용비교만 우선 확장)

○ '13.09월 현재	: 용비교 중앙분리대구간 재설치 공사중(공정률 67%)

□ 향후 추진계획

○ ‘14. 12.	: 공사 준공

□ 특이사항

○

37. 율곡로(창경궁앞) 도로구조개선

담당부서	팀 장	한정수	2133-8081
도로계획과	담당자	우철신	2133-8083

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 도로구조 개선을 통하여 율곡로 주변 교통정체 해소 및 문화재 복원

○ 위    치 : 종로구 창덕궁 돈화문 ~ 원남동 사거리

○ 규    모 : 도로확장 폭 4→6차로, 연장 800m (지하차도 342m 포함)

○ 사업기간 : 2008. ~ 2014.

○ 총사업비 : 85,370백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정38%, 현재공정35%, 계획대비 실공정율 91%

- 부진사유: 해당없음

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용 (예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
26,670	12,000	10,749	10,484	1,251	11,735	-	1,648	8,836	-

□ 추진실적

○  '10.08.19	: 도시계획시설사업 실시계획인가

○  '10.10.11	: 공사 계약

○   '13.07.15	: 문화재현상변경허가(문화재 원형복원)

○ '13.09월 현재	: 가시설공사(종묘측) 진행중 (공정률 35%)

□ 향후 추진계획

○ ‘13. 10.	: 종묘측 옹벽설치 및 한전전력구 이설 완료

○ ‘13. 12.	: 창경궁측 옹벽 시공완료

○ ‘14. 12.	: 중앙부 옹벽, 파형강판 및 문화재공사 완료

□ 특이사항

○ 문화재 전구간 원형복원으로 사업계획 변경 후 현상변경허가

○ 사업계획 변경에 따른 재설계 시행중(~‘13.10까지)

38. 응봉교 재설치

담당부서	팀 장	한정수	2133-8081
도로계획과	담당자	우철신	2133-8083

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 응봉교 확장 및 재설치를 통하여 통행안전 확보 및 교통여건 개선

○ 위    치 : 성동구 응봉동 ~ 성수동

○ 규    모 : 기존교량 철거후 재설치 폭 6차로, 연장 693m

○ 사업기간 : 2001. ~ 2014.

○ 총사업비 : 78,536백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정92%, 현재공정88%, 계획대비 실공정율 95%

- 부진사유: 해당없음

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용 (예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
39,672	15,000	8,722	10,000	6,278	16,278	-	2,869	13,409	-

□ 추진실적

○  '76.04.07	: 도시계획시설(도로) 결정

○  '08.10.20	: 공사 착수

○ '13.09월 현재	: 철도횡단구간 가교 설치중 (공정률 88%)

□ 향후 추진계획

○ ‘13. 12.	: 응봉교 교량구조물 완료

○ ‘14. 12.	: 공사 완료

□ 특이사항

○ 철제 가교로 인한 소음 민원

○ 응봉역 주변(학교 및 아파트 단지) 방음시설 설치 요구

39. 천호대로(광나루역) 확장

담당부서	팀 장	한정수	2133-8081
도로계획과	담당자	우철신	2133-8083

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 천호~하남 광역BRT사업과 연계된 중앙버스전용차로 설치를 위한 천호대로 병목구간 확장 및 천호대로로 단절된 아차산 녹지축 연결

○ 위    치 : 광진구 구의동 58-15 ~ 광장동 388-10(아차산역~광나루역)

○ 규    모 : 폭 6→10차로, 연장 900m(지하차도 580m 포함)

○ 사업기간 : 2007. ~ 2014.

○ 총사업비 : 80,957백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정42%, 현재공정42%, 계획대비 실공정율100%

- 부진사유: 해당없음

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용 (예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
34,413	6,500	6,500	10,000	-	10,000	-	6,752	3,248	-

□ 추진실적

○  '76.04.07	: 도시계획시설(도로) 결정

○ '10.10.12	: 공사계약

○ '13.09월 현재	: 옹벽구조물 공사중 (공정률 42%)

□ 향후 추진계획

○ ‘13. 12.  : 토공작업 완료 및 구조물 공사(U-type 옹벽 300m)

○ ‘14. 12.	: 공사 완료

□ 특이사항

○

40. 사가정길(장안삼거리~전농동사거리간) 확장

담당부서	팀 장	한정수	2133-8081
도로계획과	담당자	이석희	2133-8084

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 서울 동북부지역의 간선도로인 사가정길 미확장 구간의 교차로구간 확장으로 병목현상 개선 및 교통정체 해소

○ 위    치 : 동대문구 장안동 555(장안삼거리) ~ 전농동 32(전농사거리) (총연장 1.2km)

○ 규    모 : 폭 25m(가변포함 왕복 5차로) → 폭 27.5~36.25m(왕복 6차로)
연장 1,200m(배봉차도육교 확장 포함)

○ 사업기간 : 2010. ~ 2017년 이후

○ 총사업비 : 36,600 백만원

- 1단계 구간(연장 520m) :  7,964백만원

- 2단계 구간(연장 680m) : 28,636백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정  60%, 현재공정  60%,  계획대비 실공정율 100%

- 부진사유: 해당사항 없음

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
91	-	-	142	-	142	-	-	142	-

□ 추진실적

○′13.02.14 : 기본 및 실시설계용역 계약

□ 향후 추진계획

○ 1단계 구간 :  '13년 용역완료, ‘14~15년 보상 및 공사

○ 2단계 구간 : 1단계 사업효과, 시 재정여건 등 종합적 검토 후 결정

□ 특이사항

○ 해당사항 없음

41. 서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선

담당부서	팀 장	한정수	2133-8081
도로계획과	담당자	이석희	2133-8084

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 서빙고고가를 연결로 기능에 맞게 축소 재설치하여 반포대교 북단 강변북로 일산방향의 상습정체 구간 해소 및 두무개길의 도로효율 제고

○ 위    치 : 용산구 보광동 36-10 ~ 서빙고동 271-79

○ 규    모 : 서빙고고가교 축소재가설 폭 4차로→1~2차로, 연장755m

○ 사업기간 : 2009. ~ 2014.

○ 총사업비 : 27,300백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정  55%, 현재공정  55%, 계획대비 실공정율 100%

- 부진사유: 해당사항 없음

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
1,596	5,400	5,370	5,000	-	5,000	-	1,468	3,532	-	4,000

□ 추진실적

○ ′09.03.  ~  ′10.09.    : 기본 및 실시설계용역 계약

○ ′10.12.30               : 공사계약 및 착수

○ ′11.02.25 ~′11.11.13 : ‘11년 예산 미확보로 공사 중지

○ ′11.11.14              : 공사 재개

○ ′13.09. 현재            : 공사 중(가교 설치 완료, 서빙고 고가교 철거 중)

□ 향후 추진계획

○ '13. 10.	: 재가설구간 고가교 철거

- 폭 16m, 연장 613m (옹벽 208m, PSC빔 405m)

○ '13. 11.	: 활용구간 고가교 보수보강

- 폭 10.4m, 연장 140m (경원선 통과구간 st,Box교)

○ '14. 12. : 준공

□ 특이사항

○ 지속적인 적정 규모의 예산 투입을 통한 사업장기화 방지 필요

42. 성암로 병목구간 개선

담당부서	팀 장	한정수	2133-8081
도로계획과	담당자	이석희	2133-8084

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 서성암로 4차로 중 2차로 병목구간을 확장 및 개선하여 제2자유로 개통에 따른     우회로 기능 수행 및 상암DMC 개발 가시화에 따른 장래 교통수요증가에 대응

○ 위    치 : 마포구 중동 200 ~ 중동 26-3

○ 규    모 : 도로확장 및 개선 폭2→4차로, 연장 400m                                                        (확장 : 폭 2→4차로 연장 200m, 개선 : 보도설치 등 연장 200m)

○ 사업기간 : 2012. ~ 2014.

○ 총사업비 : 17,800백만원(재원분담내역 : 시비 17,800백만원)

○ 누계 공정율(9월30일 기준) :  계획공정  50%, 현재공정  50%, 계획대비 실공정율 100%         - 부진사유: 해당사항 없음

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	250	124	1,000	-	1,000	-	-	1,000	-

□ 추진실적

○ ′12.05.16 ~ ′13.02.28 : 기본 및 실시설계용역 계약

○ ′13.09.                    : 보상자료 준비 중

□ 향후 추진계획

○ '13.10.	: 도시계획시설사업 실시계획, 감정평가 및 보상 착수

□ 특이사항

○ 불필요한 예산(자동차학원 영업보상)이 낭비되지 않도록 철도시설공단과 협의

43. 시조사삼거리교차로 외 2개소 개선

담당부서	팀 장	한정수	2133-8081
도로계획과	담당자	이석희	2133-8084

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 시조사삼거리 교차로구간 개선, 회기역앞 지하차도 신설, 진흥로 구기터널 앞      S자형 급커브구간 개선으로 교통정체 완화, 지역 연결 및 안전성 향상을 위한    도로사업의 타당성조사

○ 위    치 : 동대문 휘경동 시조사삼거리 및 회기역앞, 은평 불광동 구기터널 앞

○ 규    모 : ① 시조사삼거리 교차로구간 개선 (폭 30 → 33m, 연장 300m)

(개략사업비 : 추정공사비 11억원 + 용역비 + 보상비)

② 회기로~망우로(21길) 연결 지하차도 신설  (폭 10m, 연장 300m)

(개략사업비 : 추정공사비 201억원 + 용역비 + 보상비)

③ 구기터널 앞 진흥로 선형개선 (폭 25m, 연장 600m)

(개략사업비 : 추정공사비 86억원 + 용역비 + 보상비)

○ 사업기간 : 2013. ~ 미정

○ 총사업비 : 200백만원 (타당성조사 용역비만 표시한 것으로서 총사업비는 용역결과에 따라 표시)

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정  70%, 현재공정  70%, 계획대비 실공정율 100%         - 부진사유: 해당사항 없음

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	-	-	200	-	200	-	-	200	-	2,000

□ 추진실적

○ ′13.02.14 : 기본 및 실시설계용역 계약

□ 향후 추진계획

○ ‘13.11 : 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 완료

□ 특이사항

○ 해당사항 없음

44. 신사사거리~고양시계간 도로개설

담당부서	팀 장	한정수	2133-8081
도로계획과	담당자	이석희	2133-8084

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 은평구와 고양시 연결, 광역도로 개설로 수색로 교통량 분산 및 서북부 지역        균형발전 도모

○ 위    치 : 은평구 신사동 신사사거리 ~ 고양시 시계

○ 규    모 : 도로개설 폭 4차로, 연장 1,077m(터널구간 366m 포함)

- 신사사거리~덕산중학교 구간 : 711m(‘10.2. 준공),

덕산중학교 ~ 시계(터널구간) : 366m(공사 시행 중)

※ 미개설 터널구간 총 867m(서울 366m, 고양시 501m)

○ 사업기간 : 2004. ~ 2015.

○ 총사업비 : 40,560백만원 (재원분담내역 : 시비 20,265백만원, 국비 20,295백만원)

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정  58%, 현재공정  58%, 계획대비 실공정율 100%

- 부진사유: 해당사항 없음

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
35,738	3,000	16	1,822	6,159	7,981	-	1,338	6,643	-

□ 추진실적

○ ′04.04.21          : 광역도로 지정

○ ′05.04 ~ ′10.02 : 신사사거리~덕산중학교 공사 시행

○ ′11.10.19          : 공사시행 및 관리에 관한 협약 체결(서울시-고양시)

○ ′12.12.27         : 터널구간 공사 착공

□ 향후 추진계획

○ '13. ~  '15.12.   : 터널구간 공사 시행

□ 특이사항

○ 총사업비 협의조정(→국토해양부, 기획재정부)

45. 월계2교 외 1개소(성산2교) 확장

담당부서	팀 장	한정수	2133-8081
도로계획과	담당자	이석희	2133-8084

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 간선도로상 교량구간의 보도와 차도폭이 일반구간보다 상대적으로 협소하여 발생      하는 병목 및 보행자 불편 해소

○ 위    치 : 노원구 월계2교, 마포구 성산2교

○ 규    모 : 월계2교 차도 및 보도확장 폭 25→29m, 연장 39m

성산2교 보도 확장 폭 30→32~33m, 연장 34m

○ 사업기간 : 2012. ~ 2014.

○ 총사업비 : 2,500백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정 10%, 현재공정 10%, 계획대비 실공정율 100%

- 부진사유: 해당사항 없음

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	100	76	1,700	-	1,700	-	-	1,700	-	100

□ 추진실적

○′12.06.20 ~ ′13.02.28 : 기본 및 실시설계용역 시행

○′13.05.22                 : 공사계약

□ 향후 추진계획

○ '13. ~  '14.05.      : 공사 시행

□ 특이사항

○ 해당사항 없음

46. 월드컵대교 건설

담당부서	팀 장	한정수	2133-8081
도로계획과	담당자	이석희	2133-8084

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 성산대교 및 성산로 주변의 상습정체 해소 및 서부간선지하도로와 연계한 서울           서남부지역 간선도로망 체계 구축

○ 위    치 : 마포구 상암동 ~ 영등포구 양평동

○ 규    모 : 교량건설 폭 6차로(31.4m), L=1,980m

- 주경간교 : 855m(비대칭 복합 사장교 540m, 강박스거더교 315m)

- 접속교: 1,125m(남단 418m, 북단 212m, 지하차도 495m)

○ 사업기간 : 1999. ~ 2019.

○ 총사업비 : 355,049백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정  15%, 현재공정  15%, 계획대비 실공정율 100%

- 부진사유: 해당사항 없음

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
26,720	15,000	15,000	10,000	-	10,000	-	1,802	8,198	-	15,000

□ 추진실적

○′01.04. ~ ′06.12. : 기본 및 실시설계용역 시행

○′10.03.22           : 공사계약

□ 향후 추진계획

○ '13. ~  '15.08.      : 공사 시행

□ 특이사항

○지속적인 적정 규모의 예산 투입을 통한 사업장기화 방지 필요

47. 사가정길~암사동간 도로개설(암사대교건설)

담당부서	팀 장	방영복	2133-8086
도로계획과	담당자	오상준	2133-8088

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 강동구와 중랑구 및 구리시를 연결하는 한강횡단 도로망 구축하여 서울 동부권에 급증하는 교통수요를 대처하고 강동구 및 구리시 지역의 교통 소통개선 및 발전 도모

○ 위    치 : 강동구 암사동 ~ 구리시 아천동

○ 규    모 : 도로개설 폭 4~6차로 연장 2.74㎞

○ 사업기간 : 2001 ~ 2014.12.

○ 총사업비 : 378,312백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정 84%, 현재공정 84%, 계획대비 실공정율 100%

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용 (예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
264,370	52,589	46,433	52,891	5,912	58,803	-	39,860	18,943	-	91,781

□ 추진실적

○ '03.09.	: 기본설계 시행

○ '05.09.	: 실시설계 시행

○ '06.04.	: 보상 및 공사착수

○ '13.09월 현재 : 강남북IC 보상 및 시공 중

□ 향후 추진계획

○ ‘13.12	: 공사 및 연결도로 보상 시행 (목표공정 90%)

○ ‘14.11	: 개통 (‘14.12 : 사업 준공)

48. 선사로~고덕지구간 도로확장공사

담당부서	팀 장	방영복	2133-8086
도로계획과	담당자	오상준	2133-8088

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 강동지역 아파트 재건축, 강일도시개발사업, 하남미사지구 보금자리 주택 건설 등 주변 개발에 따른 교통량 증가에 대비한 지역 교통 환경 개선 도모

○ 위    치 : 강동구 암사동 ~ 고덕동

○ 규    모 : 도로확장 폭 2 → 4~6차로, 연장 3,720m

○ 사업기간 : 2005. ~ 2014.

○ 총사업비 : 127,248백만원 (시비 572억원, LH-하남미사 700억원)

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정 50%, 현재공정 50%, 계획대비 실공정율

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용 (예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
56,224	36,677	15,021	14,335	21,656	35,991	-	15,798	20,193	-	12,524

□ 추진실적

○  '05.08.18 : 도시계획시설(도로)사업 실시계획(서고시 제2005-250)

○  '08.11.25 : 실시설계 완료

○ '11.08.30 : LH공사와 분담금 관련 협약체결

○  '12.07.19 : 실시계획 고시

○ '13.09월 현재 : 협의보상 및 확장구간 공사중

□ 향후 추진계획

○ '13.10. : 도로확장(2→4차로) 완료

○ '13.11. : 협의보상구간 부분 공사 착공

○ '14.11. : 도로확장(4→6차로) 완료

49. 제물포터널 지상부 친환경공간 조성

담당부서	팀 장	방영복	2133-8086
도로계획과	담당자	윤갑진	2133-8089

□ 사업개요

○ 목    적 : 제물포터널 건설과 연계하여 제물포길(현 국회대로) 지상도로의 차로수를 축소하여 녹지 및 자전거도로, 커뮤니티시설 등 친환경공간을 조성함으로써 지역단절 해소 및 주민 삶의 질 향상에 기여

○ 위    치 : 양천구 신월IC ~ 영등포구 국회의사당 교차로

○ 규    모 : 연장 7.6km, 폭 40~55m

○ 사업기간 : 2013 ~ 2021예정

○ 총사업비 : 미정

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	400

○ 사고이월 사유 : 용역 계약기간(~‘14.3월) 미도래

□ 추진실적

○ '10.11.~'12.11. : 제물포터널 목동 나들목 설치요구 민원 대책 검토

○ '12.11.20	: 목동나들목 처리 및 제물포길 친환경공간 조성방안 검토보고

○ '13. 3.	: 아이디어 공모전 시행

- 시민아이디어(~5.10) / 대학생 국제아이디어(~10.31)

○ '13. 5.16	: 타당성조사 및 기본계획 용역착수(~‘14.3.)

○ '13. 5.24/7.24  : 도로․교통분야 전문가 소위원회 개최

□ 향후 추진계획

○ '13.12       : 지상부 마스터플랜 수립

○ '14 ~ 2017 : 기본 및 실시설계

○ '18 ~	: 단계별 공사시행

50. 남부순환로~개봉2동간 평탄화

담당부서	팀 장	방영복	2133-8086
도로계획과	담당자	윤갑진	2133-8089

□ 사업개요

○ 목    적 : 개봉1동사거리 주변 남부순환로와 측도간 단차(0.5m~3.2m)를 평탄화하여 교통운영 체계를 개선하고 주민불편을 해소

○ 위    치 : 남부순환로 개봉1동사거리 주변

○ 규    모 : 도로구조 개선 B=30m, L=1.1km

○ 사업기간 : 2009. 3~ 2016.12

○ 총사업비 : 31,000백만원

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용 (예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
550	500	491	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 추진실적

○ '09.03. ~ '10.05.	: 타당성조사 시행

○ '10.06. ~ '11.10.	: 기본설계 시행

○ '11.12. ~ '13.02.  : 실시설계 시행

□ 향후 추진계획

○ 2015. ~ 2016. : 공사시행 예정

51. 장기미집행 도시계획시설 매수청구 보상

담당부서	팀 장	강흥수	2133-8091
도로계획과	담당자	최재성	2133-8092

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제47조의 2에 따른 장기미집행                     도시계획시설로 인해 재산권 행사를 못하는 토지 소유주의 불편 해소

○ 사업근거 : 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제47조

○ 청구대상 : 시설결정후 10년 이상된 지목이 대(垈)인 토지 등(‘02.1.1부터)

○ 소요기간 : 2년6개월(6월이내 매수여부 결정통지 → 통지후 2년이내 보상 완료)

- 자동실효제도 : 시설결정후 20년 경과시 자동폐지(기산일 : ‘00.7.1)

○ 규    모 : 장기미집행 도시계획시설(도로ㆍ광장) 50개소

- 도로 42개 노선(1.90㎢), 광장 8개소(0.11㎢)

- 장기미집행시설 해소 소요보상비(공시지가×1.8배) : 약 1조16백억원

□ 예산투자 현황

(2013. 9. 30.기준, 단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용 (예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
	14,000	13,890	7,682	-	7,682	-	7,246	436	0	8,000

□ 추진실적

○ 2013년 : 서초구 서초동 1321-41외 3필지 대지 496.6㎡ 매수

○ 2012년 : 동대문구 용두동 144-33외 9필지 대지 2,151.82㎡ 매수, 지출액 13,890백만원

○ 2011년 : 종로구 효제동 297-7 외 1필지 대지 379.3㎡ 매수, 지출액 4,638백만원

□ 향후 추진계획

○ 토지 소유주의 재산권 행사 제한과 관련한 민원해소 차원에서 지속적 추진

52. 도로편입 미불보상

담당부서	팀 장	강 흥 수	2133-8091
도로계획과	담당자	김 덕 수	2133-8093

□ 사업개요

◦  목    적 : 도로편입 미보상 토지에 대한 사후적 보상 실현

토지보상 관련 장기민원 해소 및 시민의 재산권 보호

◦  사업수행주체 : 서울시 및 자치구

◦  보상대상

- 자치구에서「서울특별시 도로 및 하천편입 미불용지 보상규칙」에 의거 보상 결정된 토지

- 민사소송에서 우리시의 패소가 확정된 토지 등

◦  사업기간 : 2013. 1. 1. ~ 2013. 12. 31.(계속)

◦  사 업 비 : 6,000백만원

□ 예산투자 현황

(’13. 9.30. 기준, 단위 : 백만원)

2012		2013							2014년 예산안
예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용 (예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
6,000	10,851	6,000	-	6,000	-	2,103	3,897	0	5,715

□ 추진실적

◦  미불용지 보상실적

(’13. 9.30. 기준, 단위 : 백만원)

2012년			2013년
보상건수(필지)	면적(㎡)	보상액	보상건수(필지)	면적(㎡)	보상액
16 (19)	5,929	10,851	11 (18)	2,292	2,103

※ 예산지원형태 : 자치구로 토지매입 예산 재배정

□ 향후 추진계획

◦  미불용지 확정 토지에 대한 신속한 토지보상 실시(감정평가 및 매수절차 진행중)

- 토지보상 대상 : 10건 30필지 4,471㎡

- 추정 보상비 : 약 3,589백만원

◦  민사소송(부당이득금반환) 진행중인 사건은 소송 종결시 예산 범위내에서 토지보상 예정

〔도시안전실 도로관리과〕

부서명	팀	현원(명)	주요역할 및 업무	2013년 완료․진행사업(과업) 목록
도로관리과	도로관리팀	8명	- 도로유지관리 계획 수립·조정 - 도로유지관리 중기 투자재정 계획 수립 - 도로 제설작업 ․ 설해대책 총괄 - 서울형 중단기 제설대책 추진 - 도로사업소 청사․이전 신축 - 도로사업소 지도 ․ 감독 - 도로사업소 공무직 노동조합 운영 업무 - 주민참여 예산업무 총괄	- 시민과 함게하는 제설대책 추진 - 남부도로사업소 청사 신축
	도로 포장 관리팀	5명	- 아스팔트포장도로 품질향상 방안 수립 ․ 과학적 포장도로 조사․분석을 통한 유지관리 ․포장도로 정책포럼 운영 및 교육실시 ․포장도로 성능개선을 위한 정책수립 등 - 포장도로 유지관리 예산 업무 - 맨홀관리에 관한 업무추진 - 포장도로 소파보수 및 긴급보수에 관한 업무 - 특별시도 배상책임보험 업무 - 방사능 폐기물 처리	- 노후포장도로 정비공사 ․노후아스팔트 포장도로 정비사업 ․도로손상부분 긴급복구공사 ․예방적 유지보수공사 ․불량맨홀정비사업 추진
	도로포장 조사팀	6명	- 도로포장 및 구조상태 조사(Road Scanner, FWD, GPR) - 포장도로관리시스템 유지보수 용역 - 도로 및 도로시설 순찰ㆍ점검	- 도로포장표면상태 및 구조상태 조사 - 포장도로관리시스템 유지보수 용역

부서명	팀	현원(명)	주요역할 및 업무	2013년 완료․진행사업(과업) 목록
도로관리과	도로 안전 시설팀	5명	- 도로부속물 예산 재배정에 관한 사항 - 도로부속물 종합대책계획 수립․시행에 관한 사항 - 주민참여 예산에 관한 사항 (난간, 계단 분야) - 시도의 도로부속물 유관기관 업무협의에 관한 사항 - 방음시설 등 민원에 관한 사항 - 도로부속물 유지관리에 관한 사항 (중앙분리대, 과속방지턱, 미끄럼방지포장, 충격흡수시설 등) - 도로 등 주요시설물 관리에 관한조례 졔․개정에 관한 사항 - 도로굴착복구 기금의관리․운용․결산 - 도로복구 원인자부담금 징수단가 설계적용에 관한 사항	- 방음시설 설치 및 보수․보강(70%) - 도로사면 붕괴예방을 위한 보수․보강사업(60%)
	도로 정보화팀	3명	- 도로관리시스템 운영 및 확대개발 업무 - 6개 도로사업소 행정정보 통신망 운영 및 유지관리 - 제설현장관리시스템 운영 및 확대개발 업무 - 도로굴착복구시스템 운영 및 확대개발 업무 - 도로관리시스템 GIS DB 갱신, 구축 및 장비관리	- 도로정보화시스템 유지운영(60%) - 도로정보전략계획(ISP)수립(50%) - 도로관리시스템DB갱신사업(30%)
	도로조명팀	11명	- 도로조명시설 개선계획 수립·조정 및 유지관리업무 총괄 - 가로등 통제소 (중계소)운영 및 점·소등시스템 유지관리 - 도로조명 에너지절감 계획 수림·시행 및 분석업무 총괄 - 6개 도로사업소 건설장비 유지관리 및 장비관련 통계현황 관리 - 주민참여 예산에 관한 업무 (조명관련)	- 도로조명개선사업(56%) - 원전하나줄기사업(86%) - 주민참여사업(100%)

1. 시민과 함께하는 제설대책 추진

담당부서	팀 장	권완택	2133-8152
도로관리과	담당자	조용상	2133-8154

□ 제설대책 운영개요

○ 제설기간 : ’13. 11. 15 ~ ’14. 3. 15 (4개월간)

○ 제설대책본부 운영 : 33개 기관 (시, 자치구 25, 도로사업소 6, 시설공단)

○ 제설대상 : 8,173㎞ (시도 1,157㎞, 구도 7,016㎞)

○ 사 업 비 : 6,447백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 11.15일부터 제설대책 추진

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준                                       (단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
	6,389	6,003	6,447	-	6,447	-	3,536	2,912	-	7,422

□ 추진실적

○ 친환경 제설방법 모색을 위한 MOU 체결 (2013.5.7.)

- 주요내용 : 제설제가 도로구조물, 식생 및 토양에 미치는 영향, 음식물쓰레기 활용 등 친환경 제설제 개발 및 제설방법 공동 연구 등

○ 친환경 제설방법 확대

- 염화수용액을 활용한 제설방법 대폭 확대 : 2015년까지 전 자치구로 확대

- 상수원보호구역(잠실수중보 ~ 시계)내 구조물 구간 친환경 제설

○ 동절기 대비 제설제(염화칼슘, 소금) 단가계약 체결

- 대상기관 : 25개 자치구 및 6개 도로사업소

- 수    량 : 염화칼슘 12,400톤, 소금 12,600톤

- 계약기간 : 2013.12.30 (납품요구기한 2013.11.30)

□ 향후 추진계획

○ ’13. 10.  4. : 내집 ․ 내점포 앞 눈 치우기 홍보계획 수립

○ ’13. 10. 21 ~ 10.31. : 제설대책 준비상황 사전점검 (자치구 및 사업소)

○ ’13. 10. 31. : 제설함 설치 완료 및 제설제 납품완료

○ ’13. 11.  1. : 제설대비 사전 훈련 실시

○ ’13. 11. 15. ~ : 제설대책 상황실 운영

2. 남부도로사업소 청사 신축

담당부서	팀 장	권완택	8152
도로관리과	담당자	허원회	8153

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 노후되고 사무실 공간부족으로 열악한 근무환경 개선 및 지역주민의 민원해소를 위하여 청사 신축(이전) 추진

○ 위    치 : 금천구 시흥동 963-1(진성연립)외 11필지

○ 규    모 : 부지면적 5,113㎡, 건축연면적 2,694㎡(지하1층/지상3층)

○ 사업기간 : 2012.04 ~ 2016.12

○ 총사업비 : 26,200백만원(보상비 17,900, 공사비 등 8,300)

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 사업 미 착수

- 부진사유: 지역주민이 남부도로사업소 이전반대로 현재 “갈등영향분석” 및 “청사 건축 기획(안) 마련” 하는 등 현실적인 대안 모색 추진중임

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
	500	-	1,000	-	1,000	-	-	1,000

□ 추진실적

○ ‘12.04.13 : 남부도로사업소 청사 이전계획 수립

○ ‘12.05.25 : 재정투자심사(조건부 추진)

○ ‘12.08~’13.2 : 금천구 시흥동 이전계획에 따른 민원제기

- 사업소를 기피시설로 인식하고 이전을 반대하는 인근 주민들과의 갈등해소를 위한 노력(시장과의 주말데이트 등)을 다 하였으나 합의를 도출하지 못하였음

○ ‘13.02.06 : 청사 건축 기획 추진계획 수립

○ ‘13.03.15 : 사업소 이전관련 갈등대응보고회 결과(서울시)

- 도로사업소 이전 입지선정은 총사업비, 실행가능성 및 수용성 등을 종합적으로 검토·선정

○ ‘13.04.29 : 금천구 현장시장실 운영

- 금천구 시흥동으로의 사업소 이전은 주민 동의없이 일방적으로 추진하지 않겠음

※ 금천구청 의견 : 주민이 도로사업소를 기피시설로 인식하고 있고 지역정서 및 자존심 문제를 감안할 때 사실상 사업소 이전은 어려움

○ ‘13.6~9월 : 『갈등영향분석』학술용역 시행(갈등조정담당관)

○ ‘13.06.10 : 영등포구 현장시장실 운영

- 이전대상지를 최대한 물색(장기간 소요)하되, 중장비 등은 격납고처럼 보관하고 기존부지에 복지·문화시설 등 주민편의시설 설치 검토

※ ‘갈등영향분석 용역’ 결과 등을 고려하여 종합적으로 판단

□ 향후 추진계획

○ ‘13.9월 : 『갈등영향분석』학술용역 완료(갈등조정담당관)

- 현(대림동) 청사부지, 당초 계획부지(남현동), 변경 계획부지(시흥동) 등 3개 지역에 대한 갈등요인 분석결과 현실적인 대안 제시

○ ‘13.8~12월 : 『청사 건축 기획』용역 시행(도시기반시설본부 건축부)

○ ‘13.12월 : 도로사업소 이전방안 마련(도로관리과)

- ‘갈등영향분석 용역’ 및 ‘청사 건축 기획용역’ 결과 등을 참조하여 이전방안을 종합적으로 검토

.

3. 노후 포장도로 정비공사

담당부서	팀 장	손경철	2133-8167
도로포장관리팀	담당자	김상훈	2133-8169

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 장기간 사용에 따라 노후 및 파손, 소파(포트홀)로 인해 포장상태가  불량하여 기상악화로 소파(포트홀)가 빈번하게 발생되는 등 시민고객의 안전을 저해하는 지역을 신속하게 정비하여 안전하고 쾌적한 도로환경 조성

○ 위    치 : 특별시도 언주로 등 98개 노선

○ 규    모 : 연장 261km, 면적 13,398a(전체 포장면적대비 4.6%)

○ 사업기간 : 2013.2. ~ 12.

○ 총사업비 : 50,052백만원

단위 : 백만원

항목별	계	노후포장도로 정비공사	도로손상긴급 복구공사	불량맨홀 정비공사	예방적유지보수공사	비고
예산액	50,052	36,413	8,239	4,200	1,200
계획공정(%)	-	82	75	75	75
현재공정(%)	-	83	76.9%	74.8	78
실공정율(%)	-	100	100	99.7	100

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	28,779	28,569	50,052	-	50,052	-	38,285	11,760	-	52,195

□ 추진실적

○ 노후포장도로 정비공사 : 상반기 계획 93노선중 87노선 포장완료(11,847a/12,349a)

○ 도로손상긴급복구공사 : 계획면적 2,000a 중 정비 1,538a완료

○ 불량맨홀정비공사 : 3,473개소 정비계획 중 2,600개소 정비완료

○ 예방적유지보수공사 : 표면처리공법 계획 620a 정비 485a완료

균열보수 28,900m중 5,400m완료

□ 향후 추진계획

○ 노후포장도로 정비공사 : 상반기 잔여물량 및 하반기 물량 시공완료(11~12월 준공처리)

○ 도로손상긴급복구공사 : 지속 도로파손을 감안 2014년 2월까지 공사추진

○ 불량맨홀정비공사 : 지속 불량맨홀 발생을 대비 2014년 2월까지 공사추진

○ 예방적유지보수공사 : 10 ~11월중 정비완료 및 12월 준공처리

4. 도로사면 붕괴 예방을 위한 보수·보강사업

담당부서	팀 장	최연우	2133-8175
도로관리과	담당자	이상하	2133-8177

□ 사업개요

○ 목    적 : 서울시도에 접한 도로사면(비탈면)의 안정성 확보를 위해 안전점검 및                 보수 ․ 보강 실시 등으로 사면 안전관리에 철저를 기하고자함

○ 위    치 : 시도상 취약한 도로사면

○ 규    모 : 서울대고개옹벽 및 절개지외 9개소(공사:7개소, 용역:3개소)

○ 사업기간 :‘13. 1 ~ 12

○ 총사업비 : 4,039백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정60%, 현재공정60%, 계획대비 실공정율60%

- 부진사유: 해빙기 및 수방대비 기간 특별점검 실시 등 안전점검, 실시설계용역                   결과에 따라 공사발주, 계약, 착공 등 절대공사기간이 소요되어 본 공사

실착공 및 예산지출이 다소 늦어짐.

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	2,720	2,399	3,781	258	4,039	-	819	3,220	900	-

□ 추진실적

○ 통일로 산골고개 도로사면 보수보강(숏크리트 300㎡ 등)완료(5.27)

○ 녹번동19-142주변 도로사면 보수보강(숏크리트 405㎡ 등)완료(6.28)

□ 향후 추진계획

○ ‘13.11.29 : 공사준공(서울대고개 도로사면 보수공사 외 4개소)

○ ‘13.12.15 : 정밀안전점검(실시설계)용역완료 등 공사착공(월계로외 3개소)

5. 방음시설 설치 및 보수․보강

담당부서	팀 장	최연우	2133-8175
도로관리과	담당자	이상하	2133-8177

□ 사업개요

○ 목    적 : 특별시도 주변 교통소음 기준을 초과한 지역의 소음 저감을 위해 방음                   시설을 설치 및 정비하여 정온한 면학분위기 및 쾌적한 주거환경을 조성

○ 위    치 : 송파구 강동대로 풍납극동아파트외 4개소

○ 규    모

- 방음시설 신설 : 3개소 H= 4.2m~6m, L= 620m

- 방음시설 정비 : 2개소 H=    5m, L= 224m

○ 사업기간 :‘13. 1 ~ 12

○ 총사업비 : 2,503백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정 70%, 현재공정 70%, 계획대비 실공정율 70%

- 부진사유: 타당성 및 실시설계용역, 디자인심의, 주민설명회 등 행정사항                      이행으로 본공사 착공이 지연됨.

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	1,836	1,168	2,003	500	2,503	-	672	1,831	-	-

□ 추진실적

○ ‘13. 2~7.30 : 풍납극동아파트외 3개소 실시설계용역 완료

○ ‘13. 6. 3 : 풍납극동아파트 방음벽설치 공사시행(78%)

○ ‘13. 7.31 : 금천구 서부간선도로 방음벽 설치완료(H=4.2m, L=220m:100%)

○ ‘13. 8.12 : 잠실초교앞 방음벽 개량 공사착공(69%)

○ ‘13. 9.13 : 여의도고교앞 정비공사 입찰완료

○ ‘13. 9. 9 : 서초방배우성아파트 방음벽설치 공사시행(15%)

○ ‘13. 9.23 : 여의도고교앞 방음벽 개량 공사시행(10%)

□ 향후 추진계획

○ ‘13.12.30 : 공사준공(잠실초교앞, 여의도고교앞, 서초방배우성아파트앞,풍납극동아파트앞)

6. 도로정보화시스템 유지운영

담당부서	팀 장	문상조	2133-8187
도로관리과	담당자	박종윤	2133-8188

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 도로관리과운영중인 정보시스템 및 IT자원의 장애요인 사전예방과 사용자 요구사항을 반영한 최적의 시스템 운영환경 구축 제공

○ 대    상 : 도로정보화 3개시스템(도로관리, 포장도로관리, 제설현장관리시스템)

○ 사업기간 : 2013.1 ~ 2014.2

- 도로관리시스템 : 도로와 관련된 교량, 육교, 고가차도, 옹벽 등 도로시설물 및 부속물관리

- 포장도로관리시스템 : 서울시 도로를 약 40만개의 셀로 나누어 도로포장상태 분석 및 평가

- 제설현장관리시스템 : 겨울철 강설시 제설차량, 인력, 제설상황관리

○ 총사업비 : 114백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정 60%, 현재공정 60%, 계획대비 실공정율 60%

- 부진사유 : 도로 및 포장관리시스템은 유지보수 진행중, 제설현장관리시스템은 겨울철(2013.10~2014.3월 시행예정

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
	103	103			114		24	90

□ 추진실적

○ 도로관리시스템 유지보수 시행중

○ 포장도로관리시스템 유지보수 시행중

○ 제설현장관리시스템 유지보수 계획 작성중

□ 향후 추진계획

○ 제설현장관리시스템 유지보수 계약

○ 제설현장관리시스템 유지보수 시행(2013.10월 ~ 2014.2월)

○ 유지보수 완료(2014.2.28일)

7. 도로조명 개선 사업

담당부서	팀 장	양민수	2133-8191
도로관리과	담당자	정방헌	2133-8192

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 안전사고 방지와 밝고 쾌적한 야간 교통 환경을 제공 및 가로등 노후 전선 개량 및 고효율 저용량 광원으로 교체

○ 위    치 : 종로구 세검정로 외 17개 노선

○ 규    모 : 등주교체(1,514본) 및 고용량 가로등 광학성능 개선(1,795등) 노후선로 교체 18개 노선 37km

○ 사업기간 : 2013.3 ~ 12

○ 총사업비 : 9,683백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정 56%, 현재공정 56%, 계획대비 실공정율 56%

- 부진사유: 굴착기간 제한 따른 공정지연

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
	9153	9114			9,683		6,840	3,023

□ 추진실적

❍ 광학성능(배광파일, 시뮬레이션) 검토 시행

- 종로구 세검정길 외 17개 노선 검토 결과 회시

※ 운전자 편의를 위한 눈부심 및 빌의 퍼져가는 모양(고른조명)

❍ 예산(재)배정 (13개 자치구)

❍ 공사시행

- 보도굴착 및 배관배선

- 관급자재 구매 (가로등주 및 등기구 설치)

□ 향후 추진계획

❍ ’13. 10 ~ 12 : 가로등 개량공사 시행

- 보도굴착 및 배관배선

- 관급자재 구매(가로등주 및 등기구 설치)

- 기성금 지급 및 준공

□ 특기사항

❍ 기타 : 굴착기간 제한에 따른 공정지연

〔도시안전실 도로시설과〕

부서명	과(팀)	현원(명)	주요역할 및 업무	2013년 완료․진행(과업)사업 목록
도 로 시설과	시설기획팀	8명	- 도로시설물 유지관리계획 총괄 수립․조정 - 도로시설물 보수공사 품질향상, 안전점검 및 진단용역 개선업무 - 도로시설물 유지관리 교육계획 수립 및 운영 - 과 운영에 관한 사항	- 도로시설물 안전관리 기본계획 학술용역(완료)
	전 용 도로팀	4명	❍ 자동차 전용도로 유지관리계획 수립 및 조정 - 공사감독 위탁관리 운영 업무 - 전용도로 도로․시설물 관리 위탁 업무 - 청소 및 녹지관리 위탁 운영 업무 - 도로부속물, 교통안전시설 업무 ❍ 전용도로 설해 대책 업무 ❍ 전용도로 환경순찰 업무	- 해당사항 없음
	한강교량팀		- 한강교량 유지관리계획 수립 및 조정 - 한강교량 온라인 안전감시 시스템 운영 업무 - 도로시설물 내진개선 업무 총괄 - 충무계획(긴급복구, 비축자재) 및 을지훈련 관련업무	- 성산대교 성능개선사업(용역발주중) - 한강교량 온라인 안전감시 시스템 유지관리 용역(45%) - 한강교량 일상유지 보수공사 감리 용역 (50%)
	터널복개팀	4명	- 일반시도상에 있는 터널, 복개, 지하차도 유지관리계획 수립 및 조정 - 공동구관리 업무(6개소) - 자치구 위임 시설물(지하보도, 육교) 관리에 관한 지도․감독 업무 - 소송, 배상책임보험 관련업무 총괄 - 신기술 관련 업무 총괄	- 서울시 공동구설치 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 (35%) - 도로시설물(지중구조물) 내진성능 평가용역(30%) - 석촌지하차도 복개사업 타당성 조사 용역 (80%)

부서명	과(팀)	현원(명)	주요역할 및 업무	2013년 완료․진행(과업)사업 목록
도 로 시설과	일반교량팀	7명	- 일반시도상에 있는 교량(한강교량 제외), 고가, 입체교차 유지관리계획 수립 및 조정 - 제한차량 운행허가․시스템 개발업무 - 운행제한차량 단속업무 총괄 및 조정	- 운행제한차량 단속(50%) - 2013년 중차량 운행허가시스템 유지운영(50%)
	수중 조사팀	7명	- 한강교량(자동차전용도로포함) 및 한강에 접한 지천의 일부교량 수중구조물 상시점검계획 수립 및 시행 - 한강교량 및 한강에 접한 지천의 일부 교량 수중 구조물 점검시행 - 점검 장비 및 물품 유지관리 - 수중 촬영자료 분석 및 관리 - 한강교량 하상잔재물 수거업무	- 한강교량 수중점검(청소) 용역(40%) - 동호대교 우물통 기초 정밀진단용역(완료)
	강구조물팀	3명	- 강구조시설물 안전점검(132개) - 강구조물 공사장 용접관련 품질 및 안전점검(16개 현장) - 강교 용접결함부재 보수공사 시행 - 강교 부식부 도장 보수공사 시행 - 강구조물 설계도면 검토 - 용접 및 비파괴검사 관련업무	- 강교 용접결함부재 보수공사(80%) - 강교 부식부 도장 보수공사(70%)
	기전시설팀	4명	- 도로시설물(터널, 지하차도, 교량, 고가차도 등) 부속 기전시설(조명등 전기설비, 기계설비, 통신설비 등)유지관리 총괄 - 소방훈련 및 터널방재업무 총괄 - 경관조명 유지관리 총괄 - 사업소 지도감독 업무 - 사업소 예산관리 업무 - 공동구 전기분야 관련업무	- 2종 도로기전시설물 공공요금 및 일상유지보수(55%) - 2종 터널 및 지하차도 재방송설비 유지보수(58%) - 1종 도로기전시설물 공공요금 관리(75%) - 1종 도로기전시설물 일상유지보수(58%) - 한강교량 및 1종시설물 경관조명 유지보수(58%) - 1종 터널 및 지하차도 재방송설비 유지보수(58%) - 구룡터널외5개소 방재설비 보완공사(80%) - 남산터널 노후방재시설 개량공사(46%) - 동부간선도로 가로등 개량공사(40%) - 지하차도 노후기전시설 개량공사(75%)

1. 도로시설물 안전관리 기본계획 학술용역

담당부서	팀 장	김종호	2133-1652
도로시설과	담당자	박주완	2133-1666

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 서울시 도로시설물의 안전관리 중장기 기본방향 및 기준 수립

○ 사업기간 : ‘12.1.22~’13.8.21 (당초 : ‘12.1.22~’12.12.17)

(※ 시설물 안전 및 유지관리 기본계획(‘12.12월 고시, 국토교통부) 반영 및                       추가 과업으로 절대공기 부족)

○ 총사업비 : 180백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 용역준공(‘13.8.21)

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	180			173	173		164			-

□ 추진실적

○ ‘12. 3. 7 : 착수보고회

○ ‘12. 6.26 : 중간보고회

○ ‘13. 2.15 : 중간보고회

○ ‘13. 3.19 : 자문 회의

○ ‘13. 7.12 : 자문 회의

○ ‘13. 7.29 : 최종 보고

○ ‘13. 8.14 : 포럼 개최

□ 향후 추진계획

○ 도로시설물 안전관리 기본계획에 따라 과제 단계별 추진

□ 특이사항

○ 해당없음

2. 성산대교 성능개선사업 추진

담당부서	팀 장	하현석	2133-1654
도로시설과	담당자	김창환	2133-1672

□ 사업개요

○ 목    적 : 1980년 건설되어 노후화 및 구조물 손상이 심한 성산대교의 성능 개선(DB18→DB24)을 통해 도로시설물 및 시민 안전 확보

○ 위    치 : 성산대교

○ 규    모 : 폭 27~39.2m, 연장 1,455m(본교 및 접속교)

1등교로 성능개선(DB18→DB24)

○ 사업기간 : ‘13. 10 ~ ’17. 12(기본계획, 설계, 시공)

○ 총사업비 : 112,800백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 기본 및 실시설계 발주중

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-			1,850	-	1,850	-	-	1,850	-	847

□ 추진실적

○ '11. 5. ~ '12. 7. : 슬래브 파손(1차 강남측 접속교, 2차 강북측 접속교)

○ '12. 2.24 : 정밀안전진단용역(상태등급 C등급, 슬래브 전면교체 제시)

○ '12. 8. 8 : 성능개선 방침(도시안전실장 방침)

○ '12.10. 8 :  투자심사(조건부 통과)

○ '13. 5. 8 : 추진방안 전문가 자문회의

○ '13. 5.16 : 사업추진 기본계획 수립

○ '13. 8. 2 : 용역발주

□ 향후 추진계획

○ ‘13. 10 ~ ’15.  2 : 기본 및 실시설계

○ ‘15.  3 ~ ’17. 12 : 단계별 공사 시행

□ 특이사항

○ 해당없음

3. 한강교량 온라인 안전감시 시스템 유지관리 용역

담당부서	팀 장	하현석	2133-1654
도로시설과	담당자	김은진	2133-1674

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 한강교량 중 육안 점검이 어렵거나 상시감시가 필요한 주요 부재와 교량거동을 계측기를 이용해 감시함으로써 교량의 안전을 확보

○ 위    치 : 한강교량 9개소

(올림픽, 청담, 원효, 서강, 한강, 성수, 성산, 가양, 행주대교)

○ 규    모 : 계측서버 9대 및 계측센서 8종 217개

○ 사업기간 : ‘13. 5. 15 ~ ’14. 2. 28(총 290일)

○ 총사업비 : 156,326 천원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정 45%, 현재공정 45%, 계획대비 실공정율 100%

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
	131	123	186	-	156	-	-	156	-	260

□ 추진실적

○ ‘13. 5. 15 : ’13년 용역계약 착수

○ ‘13. 6. 17 ~ 7. 15 : 정기점검 1회차 수행 및 점검보고서 작성

○ ‘13. 7. 10 ~ 8. 20 : 1,2분기 계측데이터 분석 및 보고서 작성

○ ‘13. 8. 30 : 용역 중간보고회 개최

□ 향후 추진계획

○ ‘13. 9. ~ 10. : 정기점검 2회차 수행 및 점검보고서 작성

○ ‘13. 10. : 3분기 계측데이터 분석 및 보고서 작성

○ ‘13. 12. : 정기점검 3회차 수행 및 점검보고서 작성

○ ‘14.  1. : 4분기 계측데이터 분석 및 보고서 작성

○ ‘14.  2. 28 : 용역준공

□ 특이사항

○ 해당없음

4. 한강교량 일상유지 보수공사 감리용역

담당부서	팀 장	하현석	2133-1654
도로시설과	담당자	김창환	2133-1672

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 한강교량의 점검·진단 지적사항 등 상시정비 및 소규모 긴급보수 공사 시 외부 감리를 이용하여 공사관리를 효율적으로 수행하기 위한용역

○ 위    치 : 서울시 관리 한강상 교량 20개소

○ 규모 및 내용 : 교면포장, 콘크리트 면보수, 신축이음, 도장 및 강재보수 등

○ 사업기간 : ‘13. 2. 18 ~ ’14. 2. 28

○ 총사업비 : 400,000 천원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정 50%, 현재공정 50%, 계획대비 실공정율 100%

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	350	342	400	-	400	-	195	205	-	400

□ 추진실적

○ ‘13. 2. 18 : ’13년 용역계약 및 착수

□ 향후 추진계획

○ ‘14.  2. 28 : 용역준공

□ 특이사항

○ 해당없음

5. 사업(과업)명 : 공동구 설치 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역

담당부서	팀 장	정 달 근	2133-1655
도로시설과	담당자	성 기 선	2133-1765

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 지하공간의 무분별한 개발을 방지하고, 미래 지향적인 도시공간 관리를 위한 서울시 공동구 중장기 기본계획 수립

○ 위치/규모 : 서울시 전지역( 대로, 광로 946 km)

대로(25~40m 미만) : 712Km, 광로(40m 이상) : 234km

○ 사업기간 : ’13.5.31~’14.3.26

○ 총사업비 : 400백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정 35%, 현재공정 35%, 계획대비 실공정율 100%

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
					400			400	120

□ 추진실적

○ ’12.2.14 : 공동구 설치 중장기 추진계획 보고(행정2부시장)

○ ’12.4.31 : 공동구 설치 활성화를 위한 전문가 자문회의

○ ’13.2.25 : 공동구 중장기 기본계획 수립 검토 보고(행정2부시장)

○ ’13.4.  1 : 공동구 기본계획 수립 용역 발주(착수 ’13.5.31)

○ ’13.6. 5  : 착수보고

○ ’13.8.25~9.2 : 국외 공동구 유지관리 실태 조사

□ 향후 추진계획

○ ’13.10    : 공동구 유지관리 방안 수립

○ ’13.10    : 중간보고 및 자문회의

○ ’14.02    : 최종보고

○ ’13. 5~’14.3 : 용역시행 및 기본계획 수립

□ 특이사항 : 없음

6. 사업(과업)명 : 도로시설물(지중구조물) 내진성능 평가용역

담당부서	팀 장	정 달 근	2133-1655
도로시설과	담당자	류 경 엽	2133-1766

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 지중구조물에 대한 내진성능평가 실시 후 그 결과에 따라 내진보강 대책 마련하여 지진으로부터 서울시 도로시설물(지중구조물)의 안전성을 확보

○ 위    치 : 서울시 전지역 도로시설물(지중구조물)

○ 규    모 : 166개소(터널 28, 지하차도 87, 복개 45, 언더패스 4, 기타(교량) 2)

○ 사업기간 : 2013.07.05 ~ 2014.06.29

○ 총사업비 : 800백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정 30%, 현재공정 30%, 계획대비 실공정율 100%

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
					800			800	240

□ 추진실적

○ ’11.8. 2  : 지중구조물 내진성능평가용역 추진계획 수립(본부장 방침-108108호)

○ ’13.4. 5  : 도로시설물(지중구조물)내진성능평가용역 시행계획(실장 방침-6143호)

○ ’13.4.10 : 도로시설물(지중구조물)내진성능평가용역 발주(착수 ’13.7.5)

○ ’13.7.10 : 착수보고

□ 향후 추진계획

○ ’13. 9 ~ 11월      : 내진성능 예비평가 및 자문

○ ’13. 12 ~ ’14.1    : 상세평가 및 자문

○ ’14. 2 ~ 3월       : 보수․보강방안 검토 및 자문

○ ’14. 4월             : 기술심의

○ ’14. 5 ~ 6월       : 종합보고서 작성 및 준공

□ 특이사항 : 없음

7. 사업(과업)명 : 석촌지하보차도 복개사업 타당성조사 용역

담당부서	팀 장	정 달 근	2133-1655
도로시설과	담당자	성 기 선	2133-1765

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 석촌지하보차도 상부 주차장 활용을 위해 지하차도 진․출입 옹벽(U-TYPE)  일부 복개에 따른 지하보차도의 구조적 안전성 및 경제적 타당성 조사

○ 위     치 : 송파구 석촌동 248(석촌지하보차도)

○ 규     모 : 구조물 설치[ B=23.0m, L=60m, T=0.8m (30m×2개소) ]

주차장 설치[ 약 54대(1개소당 23대~28대)]

○ 사업기간 : ’13.6.10~10.31

○ 총사업비 : 29백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정 80%, 현재공정 80%, 계획대비 실공정율 100%

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
					29			29

□ 추진실적

○ ’12. 2. 8 : 석촌지하차도 일부 복개에 관한 청원 검토 보고(도시안전실장)

○ ’13. 5.  9 : 용역 발주(착수 ’13.6.10)

○ ’13. 7. 8 : 착수보고

○ ’13. 8.13 : 중간보고

○ ’13. 8.23 : 강감창 시의원 면담(주변 사업과 연계하여 정책적 분석 요청)

□ 향후 추진계획

○ ’13.  9     : 자문회의

○ ’13. 10   : 최종보고 및 용역 준공

□ 특이사항 : 없음

8. 운행제한차량 단속

담당부서	팀 장	이영관	2133-1656
도로시설과	담당자	서영아	2133-1680

□ 사업(과업)개요

○  사업근거 : 도로법 제59조 및 같은법 시행령 제55조

○  사업기간 : 2013. 01.01~ 2013.12.31

○  사 업 비 : 2,424,842천원

○  사업내용 :

- 단속체계: 1개반 3조편성(24시간 근무체계 유지)

-  단속구간: 서울시 전 도로(1,114㎞)

- 단속기준

▸ 축하중 10톤 및 총중량 40톤 초과차량

▸ 차량의 폭 2.5m, 높이 4.0m, 길이 16.7m (굴절차 19m)

▸ 별도중량(32t이하)이 제한 공고된 도로시설물 운행차량

- 인력 및 장비

▸ 단속인력: 240명( 고정초소 3개소, 17개 기동단속반에 배치)

▸ 단속장비: 차량17대, 이동식 축중기 89대, 고정식 축중기 2대, 인디게이터13대 등

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
	1,991	1,639	2,425							2,391

□ 추진실적

○   연도별 단속실적                                               (단위 : 건)

단속기간	2011년	2012년	2013년 7월	비 고
검차	76,936	74,509	49,325
적발	3,853	3,942	2,826

□ 향후 추진계획

○ 과적 사전예방 활동 및 홍보강화

▸ 과적발생지인 건설공사장에서 예방검차 등 지도․감독을 통한 사전 과적운행 차단

○ 단속차량 모니터링 시스템 구축으로 효과적인 단속체계 및 차량관리

○ 도로사업소 과적분야 평가 등을 통한 적극적인 업무관리

□ 특이사항

○ 해당 없음

9. 2013년 중차량 운행허가시스템 유지운영

담당부서	팀 장	이 영 관	02-2133-1656
도로시설과	담당자	안 대 호	02-2133-1682

□ 사업 개요

○ 목    적 : 사용자 요구사항, 관계 법령 및 연계시스템 변동 등 여건변화에 유연하고 신속하게 대응함으로써 안정적인 시스템 운영을 통하여 원활하고 신속한 민원처리 도모

○ 시스템명 : 중차량 운행허가시스템

○ 사업내용 : 정기 및 수시점검, 업데이트, 기능개선, 장애처리 등 시스템 유지보수

○ 사업기간 : 2013. 4. 17 ～ 2014. 2. 28

○ 총사업비 : 31,707천원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정 50%, 현재공정 50%, 계획대비 실공정율 100%

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	28	27	32	-	32		12	20	-	35

□ 추진실적

○ 2013. 4.17 : 용역계약 및 착수

○ 2013. 4. ~ 9. 현재 : 시스템 유지보수 시행 중

□ 향후 추진계획

○ 2014. 2. 28 : 용역 준공

□ 특이사항

○ 해당 없음

10. 2013년 한강교량 수중점검(청소) 용역

담당부서	팀 장	(성명)	(전화번호)
도로시설과	담당자	전봉재	2133-1684

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 한강교량 수중구조물에 대한 상시점검을 통해 수중 손상부를 조기에 발견하여 보수․보강함으로써 교량의 안전성과 내구성 확보

○ 위    치 : 동작대교, 서호교, 두모교, 청담2교, 아차산대교

○ 규    모 : 한강 교량 6개, 237기 수중구조물 청소 및 점검

○ 사업기간 : 2013. 5. 28 ~ 12.20

○ 총사업비 : 500백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정50%, 현재공정40%, 계획대비 실공정율 80%

- 부진사유 : 유례없는 중부지방 최장 장마기간으로 팔당댐 방류량 증가 및 한강의 탁도가 높아 수중 점검이 지연됨.

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
608	559	516	553	0	553	0	176	377	0	460

□ 추진실적

○`00년~`04년 : 1단계 점검 674기(한강횡단 19개 교량 점검 완료)

○`05년~`09년 : 2단계점검 1,027기(한강횡단 19개, 종단 5개 교량완료)

○`10년~`14년 : 3단계점검(`10년 312기, `11년 312기, `12년 301기 점검완료)

○ `13. 5. 30  : 용역 착수

○ `13. 9월말   : 서호교, 동작대교 95기 점검(점검율 40%)

□ 향후 추진계획

○ `13. 10월말 : 두모교, 청담2교 점검완료

○ `13. 11월말 : 아차산교 점검완료

○ `13. 12월말 : 용역 준공

□ 특이사항

○ 특이사항 없음

11. 동호대교 우물통 기초 정밀진단용역(완료)

담당부서	팀 장	(성명)	(전화번호)
도로시설과	담당자	전봉재	2133-1684

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 동호대교 우물통 기초의 안전성을 평가하고 손상부에 대한 보수보강 방안 등 대책을 수립하여 교량을 이용하는 시민의 안전을 보장

○ 위    치 : 동호대교 우물통기초부

○ 규    모 : 동호대교 우물통 기초 53기 정밀진단(수중조사 및 안전성 평가)

○ 사업기간 : 2012. 7. 23 ~ 2013. 5. 27

○ 총사업비 : 214백만원(“동호대교 기초구조물(우물통) 보수공사”에 포함된 예산임)

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 용역완료(100%)

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	214	0	-	214	214	0	214	214	0	0

□ 추진실적

○`12. 7. 23 : 용역 착수

○`12. 12월  : 사고이월

○`13. 3~4월 : 1,2,3차 자문회의

○`13. 5. 16 : 용역 결과 보고

○`13. 5. 27 : 용역 준공

○`13. 7.  5  : 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 관한 지침 개선 건의 요청(국토교통부)

☞ 현재의 세부지침상 교량 기초의 상태평가 기준의 문제점을 제기하고, 지침을 개선토록 건의함.

□ 향후 추진계획

○`14.상반기 : 교량 기초의 상태평가 세부지침 개정토록 국토교통부와 협의 및 건의

○`14. 3~7월 : 진단결과에 따라, 동호대교 우물통기초 보수공사 실시설계

○`14. 8~`12. 12 : 동호대교 우물통기초 보수공사 시행

□ 특이사항

○ 철도교 겸용교량임을 감안, 서울메트로와 협약 체결후 공사시행

12. 강교 용접결함부재 보수공사

담당부서	강구조물팀 장	박 장 규	2133-1658
도로시설과	담당자	이 우 근	2133-1685

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 강구조시설물 안전점검 지적사항 중 시급히 보수가 필요한 곳에 대하여 조속히 보수를 실시하여 시설물의 안전성을 높이고, 용접분야 결함을 점검자가 보수까지 직접 실시하여 효율성 증대 및 안전관리에 만전을 기하기 위함.

○ 위    치 : 서울시 전역(강구조로 설치된 한강교량, 일반교량, 고가차도, 입체교차)

○ 규    모 : 강구조시설물 132개

- 용접관련 손상부 및 구조적취약부 보수․보강

○ 사업기간 : 2013. 3. 22 ~ 2013. 12. 30

○ 총사업비 : 450백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정  70%, 현재공정 80%, 계획대비 실공정율 114%

- 부진사유 : 정상 추진 중

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
400	370	370	450	0	450	0	450	0	0	0

□ 추진실적

○ ‘13.2.27 : 발주설계서 작성(자체설계)     ○ ‘13.2.27 : 공사발주(4.5억)

○ ‘13.3.20 : 계약체결                        ○ ‘13.3.22 : 공사착공

○ ‘13. 3월 ~ 9월 : 공사 시행 중(8개 완료, 1개 보수 중)

□ 향후 추진계획

○ ‘13.9~13.12월 : 강구조시설물 안전점검시 발견된 결함사항 지속 보수 시행

○ ‘13.12.30 : 공사 준공

□ 특이사항

○ 없 음

13. 강교 부식부 도장보수공사

담당부서	강구조물팀 장	박 장 규	2133-1658
도로시설과	담당자	이 제 택	2133-1686

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 강구조시설물 안전점검 지적사항 중 신축이음하부 거더단부측 심한 부식 발생부에 대하여 조속히 보수를 실시하여 시설물의 안전성을 높이고 점검자가 보수까지 직접 실시하여 효율성 증대 및 안전관리에 만전을 기하기 위함.

○ 위    치 : 서울시 전역(강구조로 설치된 한강교량, 일반교량, 고가차도, 입체교차)

○ 규    모 : 강구조시설물 132개

- 신축이음하부 거더단부측 심한 부식부위 도장보수

○ 사업기간 : 2013. 3. 26  ~ 2013. 12. 30

○ 총사업비 : 350백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정 70%, 현재공정 70%, 계획대비 실공정율 100%

- 부진사유 :

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
	230	230	350	0	350	0	305	45	0	0

□ 추진실적

○ ‘13. 2.27 : 발주설계서 작성(자체설계)     ○ ‘13. 2.27 : 공사발주(3.5억)     ○ ‘13. 3.25 : 계약체결                       ○ ‘13. 3.26 : 공사착공

○ ‘13. 3월 ~ 9월 : 공사 시행 중(2개 완료, 1개 보수 중)

□ 향후 추진계획

○ ‘13.9~13.12월 : 강구조시설물 안전점검시 발견된 결함사항 지속 보수 시행

○ ‘13.12.30 : 공사 준공

□ 특이사항

○ 없 음

14. 사업(과업)명 : 2종 도로기전시설물 공공요금 및 일상유지보수

담당부서	팀 장	김중영	2133-1659
도로시설과	담당자	전성완	2133-1688

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 터널 및 지하차도 등 기전시설물에 대한 적기보수, 공공요금 납부로                    효율적인 유지관리 업무추진

○ 위    치 : 동부도로사업소 등 6개소

○ 규    모 : 2종 터널 19개소, 지하차도 60개소 기전시설물(가로등, 경관조명 등)

○ 사업기간 : 2013. 1. ～ 2014. 2.

○ 총사업비 : 5,007백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정 58%, 현재공정 55%, 계획대비 실공정율 95%

- 부진사유 : 해당없음

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	4,220	4,063	5,007	-	5,007	-	2,706	2,301	-	5,064

□ 추진실적

○ 2013. 1. : 2종 도로기전시설물 일상유지 보수비 재배정

○ 2013. 1. ～ 9. : 전기요금 등 공공요금 재배정 및 집행

○ 2013. 1. ～ 9. : 램프 및 안정기 등 보수자재 구매

○ 2013. 3. : 2종 도로기전시설물 일상유지 보수공사 시행

□ 향후 추진계획

○ 2013.10. ～ 12. : 전기요금 등 공공요금 집행

○ 2013.10. ～ 12. : 램프 및 안정기 등 보수자재 구매

○ 2014. 2. : 2종 도로기전시설물 일상유지 보수공사 준공

□ 특이사항

○ 사업소 재배정 예산

15. 사업(과업)명 : 2종 터널 및 지하차도 재방송설비 유지보수

담당부서	팀 장	김중영	2133-1659
도로시설과	담당자	전성완	2133-1688

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 터널 및 지하차도에 설치된 라디오 재방송설비에 대한 지속적인 유지보수로                원활한 방송청취, 각종사고․재해 등 비상시 자체방송기능 확보

○ 위    치 : 서부․남부․북부․성동․강서도로사업소

○ 규    모 : 2종 터널 및 지하차도 재방송설비 유지관리 21개소

○ 사업기간 : 2013. 3. ～ 2014. 2.

○ 총사업비 : 165백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정 58%, 현재공정 58%, 계획대비 실공정율 100%

- 부진사유 : 해당없음

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	165	149	165	-	165	-	63	102	-	172

□ 추진실적

○ 2013. 1. : 재방송설비 유지보수비 재배정

○ 2013. 2. : 재방송설비 유지보수 용역 발주

○ 2013. 3. : 재방송설비 유지보수 용역 시행

□ 향후 추진계획

○ 2013. 9. ～ 2013. 10. : 난곡터널 노후 동축케이블 교체 시행

○ 2014. 2. : 재방송설비 유지보수 용역 준공

□ 특이사항

○ 사업소 재배정 예산

16. 사업(과업)명 : 1종 도로기전시설물 공공요금 관리

담당부서	팀 장	김중영	2133-1659
도로시설과	담당자	전성완	2133-1688

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 터널, 지하차도, 교량, 고가차도의 가로등 및 관련 기전시설물의 이용에 따른                 공공요금 집행과 정기적인 안전점검으로 안전사고를 사전에 예방

○ 위    치 : 동부, 서부, 남부, 성동, 강서도로사업소

○ 규    모 : 총 85개소

- 터널 10개소, 지하차도 1개소, 한강교량 19개소, 일반교량 15개소, 고가차도 16개소,        경관조명 24개소

○ 사업기간 : 2013. 1. ～ 2013.12.

○ 총사업비 : 2,150백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정 75%, 현재공정 75%, 계획대비 실공정율 100%

- 부진사유 : 해당없음

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	1,867	1,863	2,150	-	2,150	-	1,288	862	-	2,150

□ 추진실적

○ 2013. 1. ～ 9. : 전기요금 등 공공요금 재배정 및 집행

□ 향후 추진계획

○ 2013.10. ～ 12. : 전기요금 등 공공요금 재배정 및 집행

□ 특이사항

○ 사업소 재배정 예산

17. 사업(과업)명 : 1종 도로기전시설물 일상유지보수

담당부서	팀 장	김중영	2133-1659
도로시설과	담당자	전성완	2133-1688

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 서울시 전 지역에 설치된 1종 도로 시설물(교량, 고가차도, 지하차도, 터널)의                 기전시설물에 대한 적기 정비로 도시경관 향상과 시민불편해소 및 안전사고 예방

○ 위    치 : 동부, 서부, 남부, 성동, 강서도로사업소

○ 규    모 : 총 61개소

- 터널 10개소, 지하차도 1개소, 한강교량 19개소, 일반교량 15개소, 고가차도 16개소

○ 사업기간 : 2013. 3. ～ 2014. 2.

○ 총사업비 : 1,000백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정 58%, 현재공정 58%, 계획대비 실공정율 100%

- 부진사유 : 해당없음

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	913	885	1,000	-	1,000	-	424	576	-	1,112

□ 추진실적

○ 2013. 1. : 1종 도로기전시설물 일상유지 보수비 재배정

○ 2013. 1. ～ 9. : 램프 및 안정기 등 보수자재 구매

○ 2013. 3. : 1종 도로기전시설물 일상유지 보수공사 시행

□ 향후 추진계획

○ 2013.10. ～ 12. : 램프 및 안정기 등 보수자재 구매

○ 2014. 2. : 1종 도로기전시설물 일상유지 보수공사 준공

□ 특이사항

○ 사업소 재배정 예산

18. 사업(과업)명 : 한강교량 및 1종시설물 경관조명 유지보수

담당부서	팀 장	김중영	2133-1659
도로시설과	담당자	전성완	2133-1688

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 한강교량 상에 설치된 경관조명을 처음 설치한 상태로 관리하여 관광객들과                 시민들에게 볼거리를 제공하고 서울의 야경을 국제적인 도시로 만들기 위함

○ 위    치 : 동부, 서부, 남부, 성동, 강서도로사업소

○ 규    모 : 총 8개소

○ 사업기간 : 2013. 3. ～ 2014. 2.

○ 총사업비 : 400백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정 58%, 현재공정 58%, 계획대비 실공정율 100%

- 부진사유 : 해당없음

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	380	361	400	-	400	-	65	335	-	420

□ 추진실적

○ 2013. 1. : 경관조명 일상유지 보수비 재배정

○ 2013. 1. ～ 9. : 램프 및 안정기 등 보수자재 구매

○ 2013. 3. : 경관조명 일상유지 보수공사 시행

□ 향후 추진계획

○ 2013.10. ～ 12. : 램프 및 안정기 등 보수자재 구매

○ 2014. 2. : 경관조명 일상유지 보수공사 준공

□ 특이사항

○ 사업소 재배정 예산

19. 사업(과업)명 : 1종 터널 및 지하차도 재방송설비 유지보수

담당부서	팀 장	김중영	2133-1659
도로시설과	담당자	전성완	2133-1688

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 터널 및 지하차도에 설치된 라디오 재방송설비에 대한 지속적인 유지보수로                원활한 방송청취, 각종사고․재해 등 비상시 자체방송기능 확보

○ 위    치 : 서부, 강서도로사업소

○ 규    모 : 남산1‧2‧3호 터널, 외발산지하차도

○ 사업기간 : 2013. 3. ～ 2014. 2.

○ 총사업비 : 48백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정 58%, 현재공정 58%, 계획대비 실공정율 100%

- 부진사유 : 해당없음

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	48	35	48	-	48	-	26	22	-	48

□ 추진실적

○ 2013. 1. : 재방송설비 유지보수비 재배정

○ 2013. 2. : 재방송설비 유지보수 용역 발주

○ 2013. 3. : 재방송설비 유지보수 용역 시행

□ 향후 추진계획

○ 2014. 2. : 재방송설비 유지보수 용역 준공

□ 특이사항

○ 사업소 재배정 예산

20. 사업(과업)명 : 구룡터널 외 5개소 방재설비 보완공사

담당부서	팀 장	김중영	2133-1659
도로시설과	담당자	이병일	2133-1687

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 노후화된 터널방재시설물을 개량하여 유사시 효과적 대응체재를                      구축하여 터널통행시민을 보다 안전하게 보호하고자 함.

○ 위    치 : 남산1,2,3호, 구룡, 홍지문, 정릉 터널

○ 규    모 :

- cctv 설비 개량 2개소 (남산 1, 3호 터널)

- 터널정보판(문자전광판)교체 5개소 (남산1, 남산2호, 구룡, 홍지문, 정릉터널)

- 자동화재탐지설비 교체 1식(남산 2호 터널)

○ 사업기간 : 2013. 2 ～ 2013 . 10. 20

○ 총사업비 : 2,170백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정  80%, 현재공정  80%, 계획대비 실공정율 100%

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	1,000	820	2,170	-	2,170	-	781	1,369	-	1,847

□ 추진실적

○ 2013. 2. ～ 3. : 공사설계

○ 2013. 3. ～ 4. : 공사발주

○ 2013. 5.       :  계약 및 착공

○ 2013. 5. ～ 9.30 현재 : 공사진행

□ 향후 추진계획

○ 2013.10. 1 ～ 10.10 : 공사진행

○ 2013.10.11 ～ 10.20 : 시운전 및 준공

□ 특이사항

○ 사업소 재배정 예산

21. 사업(과업)명 : 남산터널 노후방재시설 개량공사

담당부서	팀 장	김중영	2133-1659
도로시설과	담당자	명석용	2133-1689

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 장기간 사용 및 노후로 화재발생시 방재시스템 운영에 지장을 초래하고                 있는 설비에 대해 개량공사를 시행하여 안전한 도로터널 환경을 제공하고자 함

○ 위    치 : 남산1,3호 터널

○ 규    모

- 송풍기 및 풍도댐퍼 개량 2개소(남산 1·3호 터널)

- 원격제어설비 개량 2개소(남산 1·3호 터널), 소화전배관 교체 1식(남산1호 터널 상행)

○ 사업기간 : 2013. 5. ～ 2014. 1.

○ 총사업비 : 2,120백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정 46%, 현재공정 46%, 계획대비 실공정율 100%

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	1,200	1,164	2,120	-	2,120	-	143	1,977	-	1,898

□ 추진실적

○ 2013. 2. ∼ 4. : 공사설계

○ 2013. 4. ∼ 7. : 공사발주

○ 2013. 7. ∼ 8.  : 계약 및 착공

○ 2013. 7. ∼ 9.30 현재 : 공사 진행

□ 향후 추진계획

○ 2013.10. ∼ 2014. 1. : 공사진행

○ 2014. 1. : 시운전 및 준공

□ 특이사항

○ 사업소 재배정 예산

○ 실시설계용역 실시

○ 교통소통대책 수립 관련 용역으로 설계변경 예정

22. 사업(과업)명 : 동부간선도로 가로등 개량공사

담당부서	팀 장	김중영	2133-1659
도로시설과	담당자	이병일	2133-1687

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 중랑천변 동부간선도로의 침수로 인한 누전등 안전사고를 예방하고 노후 시설의 개량으로 밝고 쾌적한 도로환경조성으로 시민편의 제공

○ 위    치 : 동부간선도로(용비교~살곶이다리간)

○ 규    모 : 가로등 187등, 분전함 4면 교체

○ 사업기간 : 2013. 3 ~ 2013. 10. 31

○ 총사업비 : 820백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정 40%, 현재공정 40%, 계획대비 실공정율 100%

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	-	-	820	-	-	-	0	820	-	-

□ 추진실적

○ 2013. 3월 ~ 5월 자체설계 완료 및 디자인.빛공해심의 의결

○ 2013. 7. 5. 계약심사 통과 및 예산재배정, 공사발주

○ 2013. 8. 9. 공사계약 및 착공

○ 2013. 9. 2. 관급자재 7종 조달구매의뢰

□ 향후 추진계획

○ 2013. 10.  5. 관급자재 납품완료

○ 2013. 10. 31. 공사준공

□ 특이사항

○ 사업소 재배정 예산

○ 타공사 구간(응봉교 건설공사) 해당물량 정산설계변경이 불가피함

○ 공사준공시까지 감리2명(서울시설공단) 현장안전관리 및 공사품질 확보

23. 사업(과업)명 : 지하차도 노후기전시설 개량공사

담당부서	팀 장	김중영	2133-1659
도로시설과	담당자	명석용	2133-1689

□ 사업(과업)개요

○ 목    적 : 장기간 사용으로 제효율을 발휘지 못하고 있는 노후배수펌프 등에 대해                 교체 및 보완공사를 시행하여 우기시 지하차도 수방대책에 만전을 기하고자 함

○ 위    치 : 수서지하차도 등 5개소

○ 규    모 : 수중펌프 교체 2대, 비상발전설비 및 변압기 교체 1식

○ 사업기간 : 2013. 1. ～ 2013.12.

○ 총사업비 : 300백만원

○ 누계 공정율(9월30일 기준) : 계획공정 75%, 현재공정 75%, 계획대비 실공정율 100%

- 부진사유 : 해당없음

□ 예산투자 현황 - 2013. 9.30 기준

(단위 : 백만원)

기투자	2012		2013							2014년 예산안
	예산	결산	본예산	전년도 이월액	예산현액	이․전용(예비비)	지출액	현잔액	사고이월 예상액
-	300	269	300	-	300	-	187	113	-	441

□ 추진실적

○ 2013. 1. : 공사시행 방침

○ 2013. 2. : 현장조사 및 설계

○ 2013. 4. : 사업시행

□ 향후 추진계획

○ 2013.12. : 준   공

□ 특이사항

○ 사업소 재배정 예산