문서번호	도시철도설비부-7821
결재일자	2017.6.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	설비계획과장	도시철도설비부장		도시철도국장
협 조
	도시철도계획부장
	도시철도사업부장
	도시철도토목부장
	건축계획과장

도시철도 인터페이스

T/F팀 운영 및 분야별 업무분장 결과 보고

2017. 6

서울시도시기반시설본부

(도시철도설비부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

도시철도 인터페이스

T/F팀 운영 및 분야별 업무분장 결과 보고

도시철도 건설 설계 오류 최소화를 위한 인터페이스 T/F팀을 운영하고, 분야별 업무분장 결과를 보고 드림

※ 도시철도건설 인터페이스 T/F팀 운영계획 [도시철도설비부-3161(2017.3.13.)]

1		목 적

□ 분야별 업무분장을 미리 정하여 설계누락 최소화

□ 업무구분을 명확히하여 시공 시 분쟁 예방

□ 각 분야간 인터페이스 부조화 방지

2		T/F 운영결과

□ 운영기간 : ’17. 03월 ~ 6월(4개월)

□ 팀 구 성 : 팀장(설비계획과장)

○ 팀  원 : 토목, 궤도, 건축, 기계, 전기, 통신, 신호,차량 담당 및 감리사

※ T/F팀 명단 : “붙임 2”

□ 운영결과

○ 해당분야 인터페이스 항목조사 및 목록 작성

○ 해당 분야별 인터페이스 자료분석 및 검토

○ 인터페이스 항목조정 및 해당분야 협의 회의 5회

- 2007.3.21, 4.7, 4.21, 5.11, 5.26

3		추진현황

□ 인터페이스 항목 발굴 및 분야별 업무분장 : “붇임 1”

구 분	계	토목	궤도	건축	기계	송변전/ 전차선	전기	통신	신호	검수/ 차량
발 굴	691	33	9	49	95	118	107	50	94	136
중복등 제 외	198	0	0	4	14	64	38	27	8	43
확 정	493	33	9	45	81	54	69	23	86	93

4		업무분장 주요내용

□ 변전실 바닥 콘크리트 및 트랜치 설치

○ 마감도장(벽체, 천정, 바닥)            ⇒ 건축

○ 트랜치 앵글, 뚜껑설치(도장포함)       ⇒ 송변전

□ 방수턱 설치 (외벽에 면한 부위, 통로, 기능실)

○ 외벽 ⇒ 토목, 내측 ⇒ 건축

□ 천정 먹메김 및 타공 (SP, 등기구, 디퓨져, 덕트)

○ 철제, AL, PVC                       ⇒ 건축

○ 석고보드+도장, 텍스류  등기구         ⇒ 역사전기

○ 석고보드+도장, 텍스류  디퓨져등       ⇒ 기계설비

□ 승강설비 설치 공사

○ 승강설비 PIT 자연배수(배수관) 공사   ⇒ 토목

○ 엘리베이터(투시형)옥내, 옥외 철골공사 ⇒ 건축

○ 엘리베이터 TM 수평빔 설치           ⇒ 기계설비

□ 본선 환기실 설치 공사

○ 본선 송풍기 장비 기초, 배수구, 배수로 공사  ⇒ 토목

○ 지상환기구(골조)위 조형화 공사             ⇒ 건축

○ 본선송풍기 인버터 설치공사(기계에서 운전메뉴얼 제공) ⇒ 역사전기

□ 변전실 설치공사

○ 접지선과 변전실 구조체 철근 접속 (본선)    ⇒ 토목

○ 변전실 피트용 무근 콘크리트타설, 바닥마감   ⇒ 건축

○ 변전실내 통신단자함 RTU 배관공사          ⇒ 통신

○ 변전실내 통신단자함 RTU 제어케이블공사    ⇒ 송변전

□ 제어정보 및 프로토콜 인터페이스

○ 제어정보 및 프로토콜 신호 IP 공유수량 제공  ⇒ 신호

○ 제어정보 및 프로토콜 IP배정                ⇒ 통신

5		시 행 일

□ 2017. 7. 1 시행

붙임 : 1. 도시철도 분야별 인터페이스 업무분장 1부.

2. T/F팀 명단 1매

3. 인터폐이스 자료분석 및 검토회의 사진 1매. 끝.