투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	도시철도토목부장
(경유)
제목	도시철도 9호선 3단계 923공구 감리원 배치계획 변경요청 건.

1. 도시철도 9호선 3단계 923공구 건설공사 감리원 배치와 관련입니다

2. 상기 건설공사의 일정관리,품질 및 안전을 담당하는 감리원의 배치계획 중 일부

수정이 필요하여 하기와 같이 변경요청하오니 업무협조 바랍니다.

가. 변경요청 사유 : 준공전 감리원 공백상태 발생방지.

나. 변경요청사항

- 전기감리

구 분	현재	요청사항	비 고
성 명	조백기	조백기
배치기간	2017.08.26. ~2018.10.11	2017.08.26. ~2018.12.31	배치기간 연장
투입등급	감리사	감리사

- 소방감리

구 분	현재	요청사항	비 고
성 명	고문환	고문환
배치기간	2017.08.26. ~2018.05.31	2017.08.26. ~2018.12.31	배치기간 연장
투입등급	고급	고급

따로붙임: 923공구 감리배치계획서 자료  1부.  끝.

	도시철도설비부장
주무관			시설전기과장			도시철도설비부장
협조자	주무관			설비공사과장
시행	도시철도설비부-5635	(	2018.6.15.	)	접수	도시철도토목부-7119	(	2018.6.15.	)
우	04520	서울특별시 중구 천계천로 8(무교동96번지)프리미어플레이스 빌딩 8층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7282	/전송	02-772-7282	/	yongjoon.shin@seoul.go.kr	/	비공개(6)