서울도시철도그린환경(주)

청소근로자 휴게실 환경개선 시행계획(5차)

	추 진 배 경
서울도시철도그린환경(주) 현장 휴게실 환경개선 5차 계획을 수립,청소근로자 휴게실 환경개선을 통한 쾌적한 근로환경 제공으로 청소근로자 처우개선

		관련근거
1

○ 청소근로자 휴게시설 개선 협조요청 : 서울시 일자리정책과-10745(‘13.8.20)

- 산업안전보건법 제29조 제8항에 따른 청소근로자 휴게시설 개선 협조

○ 청소근로자 휴게실 환경개선 추진계획(안) : 구) 도철 기획조정실-12067(‘13.10.7)

- 청소미화원 휴게실 환경개선 공사 추진계획 수립 및 시행

○  청소근로환경시설 가이드라인 제정 알림 : 서울시 노동정책과-3136(‘14.4.7)

- 휴게실, 샤워실 등 청소근로환경 시설에 대한 종합적인 기준 마련

○ 청소근로자 휴게실 환경개선 공사 시행계획(4차) : 구) 도철 기획처-3098(‘16.08.12)

		휴게실 환경개선 현황
2

○ 근무인원 : 1,631명 (역사 1,303명, 전동차 258명, 청사 70명)

○ 연도별 환경개선 완료 및 2018년 이후 예정 개소 변경 반영

구분	계		’13년	’14년	’15년	’17년	예 정
개소	기존	179	7	15	43	58	56
	변경	177	7	15	43	58	54

※ 공사개소 변경 : 2개소 제외, 1개소 교체

․ 제외 : 석촌역(9호선공사 시행사에서 공사 예정), 가락시장역(기존 승무침실 대체 사용)

․ 교체 : 고덕차량 청사휴게실(그린환경 자체개선) → 장암본선 휴게실

○ 환경개선내용

- 휴게실 타일교체, 온수온돌·세면대 설치, 벽체·천장 페인트 도장

- 배선기구 교체, 환기설비 보완, 배수·급수배관 설치 등

		세부 추진계획
3

□ 추진방법

○ 각 분야별 현장실사 후 휴게실 여건에 따른 설계 및 공사시행

- 면적, 노후화 상태 등을 고려한 도색, 칸막이, 위생기구 설치 등

○ ’17년 공사 완료한 휴게실(58개소)을 표준모델로 공사

○ 휴게실 내 전기온수기 설치 기초시설 공사(‘15.4.16, 그린환경(주) 요청)

- 청소근로자 근로환경 개선을 위해 콘센트 등 전기온수기 설치 기초시설 구비

- 전기온수기는 그린환경(주) 부담으로 구매

□ 대상개소 및 개선범위

○ 개선대상  : 22개소(18년 이후 공사예정개소 54개소 중)

- 잔여 물량 예산범위 내에서 연차적으로 공사 시행

- 공사 시행부서 : 청소근로자 휴게실 개선공사 가능개소 22개소 선정

○ 연차별 개선대상                                     (단위: 개소)

구 분	계	완료 (’14~’17년)	향후 공사대상개소
			소계	′18년	′19년
개 소	177	123	54	22	32

○ 개선범위

분야	개선내용
건축	• 바 닥 : 타일교체, 온수온돌 설치(침상) • 벽 체 : 경량칸막이 설치, 도장 • 천 장 : 비닐페인트 도장․보수
위생급수 (기계)	• 기타 환기․설비 보완 : 디퓨저, 환풍기 등 • 위생설비 설치(세면기, 청소용수채 등) • 배수․급수배관 설치
소방	•유도등, 감지기 교체 및 신설, 스프링클러 헤드 위치 조정
전기	• 배선기구 교체설치 • 전기보일러 전원 신설, 전기온수기 전원 신설
통신	• 전화기, 스피커 이설 등

※ 주된 공종 주관부서 : 건축2사업소

□ 소요예산(추정) : 총 536,604천원 (예산처 협조)

○ 예산현액 : 700,000천원(예산처, 수선유지비)

○ 연도별 소요예산                             (단위 : 백만원, 개소)

구분	계	2013년	2014년	2015년	2017년	2018년	2019년	비고
금액 (개소)	2,701 (177)	46 (7)	142 (15)	403 (43)	714 (58)	537 (22)	859 (32)

※ 구)도철 기획조정실-11717(‘13.10.1) (청소근로자 휴게실 개선비 5,462백만원 감액)

※ 구)도철  기획조정실-12067(‘13.10.7) 최초계획수립시 소요예산(추정) 3,640백만원

○ 산출내역 : 536,604천원

= 300,208천원(건축) + 86,040천원(기계) + 19,223천원(소방)

+ 77,000천원(전기) + 48,500천원(정보통신)+ 5,633(기타)

- 도봉산역본선 휴게실 등 4개소 벽체 난연재 교체, 왕십리역 샤워장 공사 등에 따른 공사 비용 증가 : 분야별 소요예산 산출[붙임1]

		기타사항
4

○ 공사 기간 중 대체 휴게 공간 협조 : 역사지원처, 차량계획처, 차량운영처

※ 대체 휴게 공간 미확보시 대책 수립 : 서울도시철도그린환경(주)

○ 공사시행 부서 : 건축2사업소, 기계2사업소, 전기2사업소, 정보통신2사업소

- 공사 가능 개소 설계 및 공사 시행, 현장실사 후 대상개소․소요비용 재산정

※ 실제 설계시 여건변동으로 공사비용 증감에 따라 대상개소 및 우선순위 변경 가능

: 변경시 공사 시행부서간 협의 및 공사개소 변경사항 통보(건축2사업소→기획처)

○ 7호선 연장구간 휴게실 개선 관련 협의 및 정산 : 신교통사업처(연장노선팀)

- 대상 : 9개소(부천시 6개소, 인천시 3개소)

- ’19년도 청소근로자 휴게실 개선공사 여부 관계기관과 협의 후 회신 : ’18.9.30.까지

- ’19년도 청소근로자 휴게실 개선공사시 관련 예산 및 소요경비 정산

붙임  1. 분야별 소요예산 산출 내역서 1부.

2. 연도별 개선 대상 휴게실 현황 1부

3. 공사감독자 배치 적정성 검토의견서 1식.  끝.

[붙임2]

연도별 개선 대상 휴게실 현황

□ 2018년 이후 공사 대상

연번	구분		온수기 용량		근무 인원 (명)	위치	면적(㎡)		천정 마감	벽체 마감	바닥 마감	침상(O,X)		수도 인입 (O,X)	싱크대 (O,X)	유휴공간 (개선공사기간 중 임시 휴게실 협조)	공사 우선순위
							휴게실	침상				온수온돌	전기장판
1	군자서비스지원사업소	왕십리	200ℓ		13	B3	20	9	텍스	수성도장	비닐무석면타일	X	O	O	X	B4구식당	1
2		동대문역사		100ℓ	9	B2	34	12	텍스	수성도장	비닐무석면타일	X	O	O	X	B2구산악회사무실	2
3		신금호		100ℓ	8	B3	25	7	텍스	수성도장	비닐무석면타일	X	O	O	X	B3여직원갱의실	3
4	태릉서비스지원사업소	본선도봉역	200ℓ		14	2	26	9	텍스	수성도장	타일		O	O	X	1층.도봉산역청소근로자휴게실	4
5		장암		100ℓ	2	2	11	3	텍스	수성도장 및 판넬	비닐무석면타일		O	O	O	1층.본선대기실	5
6		장암본선		100ℓ	4	2	13	3	텍스	수성도장	비닐무석면타일		O	X	X	.장암역 청소근로자 휴게실	6
7		하계		100ℓ	8	B2	21	6	없음	수성도장 및 판넬	타일		O	O	O	B2공익대기실	7
8		태릉입구6		100ℓ	8	B1	39	10	텍스	수성도장	비닐무석면타일		O	X	X	B1.옆빈창고	8
9	이수서비스지원사업소	숭실대입구		100ℓ	9	B2	21	8	텍스	수성도장	아스타일		O	O	O	대기실옆(물품창고)	9
10		상도		100ℓ	8	B1	26	8	텍스	수성도장	아스타일		O	O	O	B1점포(장난감)	10
11		장승배기		100ℓ	8	B1	19	7	텍스	수성도장	아스타일		O	O	O	공익대기실 우측창고	11
12	신대방서비스지원사업소	본선온수역	200ℓ		6	B1	41	6	텍스	수성도장	비닐무석면타일		O	O	O	B1휴게실앞창고	12
13	천왕차량사업소	천왕기지(여)		100ℓ	6	1	24	6	텍스	수성도장	나무마루		O	X	X	검사고 사무실	13
14		천왕기지(남)	200ℓ		24	1	24	6	텍스	수성도장	나무마루		O	X	X	검사고 대기실	14
15		천왕청사(여)		100ℓ	6	후생동1층	18	14	텍스	수성도장	나무바닥		O	X	X	후생동 관리실	15
16	고덕차량사업소	고덕기지(남)	200ℓ		26	1	36	8	텍스	수성도장	비닐무석면타일		O	X	X	경정비 대기시	16
17		고덕기지(여)		100ℓ	7	1	61	11	텍스	수성도장	비닐무석면타일		O	X	X	팀장사무실	17
18	화곡서비스지원사업소	목동		100ℓ	8	B1	26	7	텍스	수성도장	비닐무석면타일		O	O	X	B1아이센터옆창고	18
19		개화산		100ℓ	9	1	42	5	텍스	수성도장	비닐무석면타일		O	O	O	B1구역무실	19
20		김포공항		100ℓ	8	B1	17	8	텍스	수성도장	비닐무석면타일		O	O	O	B2청원기계실	20
21		발산		100ℓ	9	B1	29	8	텍스	수성도장	비닐무석면타일		O	O	O	B1내(가)환기실입구(전실)좌측일부(칸막이)	21
22		오목교		100ℓ	9	B2	26	6	텍스	수성도장	비닐무석면타일		O	O	X	B2휴게실앞복도	22
23	광화문서비스지원사업소	영등포시장	200ℓ		11	B1	34	7	텍스	수성도장	비닐무석면타일		O	O	O	B1(구직원침실)	23
24		영등포구청		100ℓ	9	B4	23	7	텍스	수성도장	비닐무석면타일		O	O	X	B4구역무실	24
25		서대문		100ℓ	8	B2	25	6	텍스	수성도장	비닐무석면타일	X	O	O	X	B3공익대기실	25
26	강동서비스지원사업소	거여		100ℓ	8	B1	73	9	텍스	수성도장	비닐무석면타일		O	O	O	B1구판매실(역무실옆)	26
27		오금		100ℓ	7	B1	35	5	텍스	수성도장	비닐무석면타일		O	O	O	B1대기실옆창고	27
28		방이		100ℓ	8	B1	21	8	텍스	수성도장	비닐무석면타일		O	O	O	B1구역무실	28
29		고덕		100ℓ	7	B1	28	5	텍스	수성도장	비닐무석면타일		O	O	O	B1여자갱의실	29
30		굽은다리		100ℓ	7	B1	16	6	텍스	수성도장	비닐무석면타일		O	O	O	B1역무실옆창고	30
31		길동		100ℓ	7	B1	21	6	텍스	수성도장	비닐무석면타일		O	O	O	B2구역무실	31
32		고덕마천본선	200ℓ		10	B3	30	8	텍스	수성도장	비닐무석면타일		O	O	O	B3창고	32
33		고덕상일본선	200ℓ		8	B1	42	7	텍스	수성도장	비닐무석면타일		O	O	O	B1구아이센터	33
34	잠실서비스지원사업소	송파		100ℓ	7	B1	20	6	텍스	수성도장 및 판넬	아스타일		O	O	X	B1구역무실	34
35	모란서비스지원사업소	모란		100ℓ	9	B1	40	6	텍스	수성도장	아스타일		O	O	X	협조중	35
36	성산서비스지원사업소	DMC		100ℓ	9	B1	26	6	텍스	수성도장	비닐무석면타일		O	O	X	B1상가	36
37		월드컵		100ℓ	10	B2	45	6	텍스	수성도장	비닐무석면타일		O	O	X	B2보안관실	37
38		망원		100ℓ	7	B1	54	6	텍스	수성도장	비닐무석면타일		O	O	X	B1상가	38
39		합정		100ℓ	10	B4	21	6	텍스	수성도장	비닐무석면타일		O	O	X	B2탁구장	39
40		상수		100ℓ	7	B2	16	6	텍스	수성도장	비닐무석면타일		O	O	X	B2비품창고	40
41		광흥창		100ℓ	7	B2	28	6	텍스	수성도장	비닐무석면타일		O	O	X	B2비품창고	41
42	동묘서비스지원사업소	대흥		100ℓ	7	B1	28	6	텍스	수성도장	비닐무석면타일		O	O	X	B1자재창고	42
43		버티고개		100ℓ	7	B1	28	6	텍스	수성도장	비닐무석면타일		O	O	X	B2창고앞복도	43
44		창신		100ℓ	7	B1	25	11	텍스	수성도장	비닐무석면타일		O	O	X	B1,공익대기실	44
45	본사	한강진별관			2	2층	6						O	X	X	2층휴게실	45
46	부천서비스지원사업소	삼산체육관		100ℓ	7	B1	34	5	텍스	수성도장	아스타일		O	X	X	B1수유실	46
47		굴포천		100ℓ	7	B1	9	6	텍스	수성도장	아스타일		O	X	X	B1수유실	47
48		부평구청	200ℓ		14	B1	21	4	텍스	수성도장	아스타일		O	X	X	B4현업동	48
49		신중동		100ℓ	9	B1	11	5	텍스	수성도장	아스타일		O	O	O	B1수유실	49
50		부천시청		100ℓ	8	B1	15	5	텍스	수성도장	아스타일		O	O	O	B1수유실	50
51		상동		100ℓ	9	B1	19	6	텍스	수성도장	아스타일		O	O	O	B1수유실	51
52		까치울		100ℓ	8	B1	17	6	텍스	수성도장	아스타일		O	O	O	B1전실	52
53		부천종합운동장	200ℓ		11	B1	10	7	텍스	수성도장	아스타일		O	O	O	B1전실	53
54		춘의		100ℓ	8	B1	21	6	텍스	수성도장	아스타일		O	O	O	B1전실	54