문서번호	통계데이터담당관-13778
결재일자	2016.12.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	데이터서비스팀장	통계데이터담당관		정보기획관
협 조
	공간정보담당관

- 도시통계지도 및 정책지도 고도화를 통한 디지털 시민 시장실 구축 사업 -
부분준공 검사 결과보고

2016. 12.

정 보 기 획 관

(통계데이터담당관)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

- 도시통계지도 및 정책지도 고도화를 통한 디지털 시민 시장실 구축 사업 -

부분준공 검사 결과보고

도시통계지도 및 정책지도 고도화를 통한 디지털 시민 시장실 구축 사업의 부분준공 검사 결과를 보고드림

Ⅰ. 사업개요

❍ 사 업 명 : 도시통계지도 및 정책지도 고도화를 통한 디지털 시민 시장실 구축

❍ 계약업체 : ㈜한국정보공학디엔에스

❍ 계약금액 : 금478,000,000원

❍ 사업기간 :  `16. 8. 12 ~ `17. 2. 28. (`16.12.14 준공기한 변경)

Ⅱ. 부분준공 대상

❍ 총 부분준공금액 : 금170,800,000원

(선금 지급액 : 239,000,000원, 금회 부분준공금액 : 170,800,000원)

(단위:원)

세부사업	예산과목	계약 금액	선금 지급액	금회 준공금액	총 준공금액
소 계		502,528,770	239,000,000	170,800,000	409,800,000
시민체감형 도시통계지도 기능 개선 (통계데이터담당관)	전산개발비	331,728,770	239,000,000	0	239,000,000
서울 정책지도 서비스 구축 (공간정보담당관)	전산개발비	170,800,000	0	170,800,000	170,800,000

Ⅲ. 과업추진 현황

❍ 시정 및 도시현황 데이터 기초조사 결과 분석 : 완료

❍ 데이터 수집 및 현행화 관리방안 수립 : 부분완료

- 서비스 대상 데이터의 수집 및 분석을 통한 보유 목록 현행화 : 완료

- 보유데이터 현행화 및 데이터 품질 문제점 도출 및 개선방안 수립 : 진행

❍ 데이터, 콘텐츠 별 권한 분류 등 메타데이터 정의 : 완료

- 데이터, 콘텐츠 별 권한분류를 통한 시각화 서비스 대상 정의 : 완료

- 데이터, 콘텐츠 별 관련 데이터셋 및 연계 정보 상세 조사 : 완료

❍ 주요지표 선정 및 통합·연계·활용 방안 수립 : 부분완료

- 주요 시정데이터 지표 별 유형 분석 : 완료

- 주요 지표 관련 데이터셋 및 연계 정보 상세 조사 : 완료

- 주요 지표 시각화 유형 정의 및 DB유형별 조사 분석 : 진행

- 시스템 및 어플리케이션 아키텍처 설계/ 데이터 모델/ 프레임워크 및 공통모듈 설계 개발 : 완료

❍ 디지털 시민시장실 운영환경 설계 및 구축 : 부분완료

- 분석/설계 : 완료

- 아키텍처 및 데이터 연계 개발 : 완료

- 데이터 연계 개발 : 완료

- 주요 기능 개발 : 진행

- (추가)UI/X설계변경 - MOCK-UP 환경구축 : 진행

- (추가)UI/X설계변경 -- 모션인식키넥트 개발 : 진행

❍ 세부업무기능개발 : 진행

- 주요시책, 지표, 성과 등 주요사업점검 개발 : 진행

- 실시간 모니터링 도시현황 및 디지털 여론동향 연계 및 개발 : 진행

❍ 관리기능 개발 : 부분완료

- 메타데이터 및 연계 데이터 관리 : 완료

- 지표관리 및 모니터링 관리 : 진행

- 데이터연동, 관리자 및 사용자 권한 등 : 진행

❍ 시정데이터 관리, 표출, 공유방안연구 : 진행

- 자문회의(2회차 진행 완료) 및 시민관점 리뷰 : 진행

- 영문화 작업 및 부서의견 조회 : 진행

- (변경) 정책지도서비스 데이터 분석 및 정제 : 진행

❍ 디지털 시민시장실 시스템 환경 구축 : 진행

- (추가) DID 환경구축 지원 : 진행

- (추가) 시스템 개발 및 유지보수 환경 구축 지원 : 진행

Ⅳ. 검사시행

❍ 검사기간 : 2016.12.26.까지 (재무과-63807호,2016.12.15.)

❍ 검사원지정

- 검수총괄 : 데이터서비스팀장

- 준공검사자 : 데이터서비스팀장 , 조용현 주무관, 양규석 주무관, 한용희 주무관

※ 서울특별시 재무회계 규칙 용역검수(본청) 2억원 이상 : 담당사무관, 담당주무관 6급이하 1명

검 사 항 목	검 사 내 용
산출물 제출 확인	- 사업별 수행/구축 관련 산출물 - 각종 보고서 및 계획 설계서 산출물 - 부분준공 산출물(요약본) - 사업 수행/구축 관련 계획서 및 결과서 - 각종 보고서 및 회의록
과업수행 내역 및 이행여부 확인	- 과업수행 관리대상 내역서 - 과업 이행여부 완료 점검표

❍ 검사결과 : 과업내용서와 적합하게 추진 중

- 검사결과 확인서 : 붙임#1

- 준공성과폼 : 별첨

* 본문서 첨부외 문서는 첨부문서 용량제한으로 정보화사업관리시스템 내 보관

Ⅴ. 향후 일정

❍ 준공검사(감독)조서 결재 후 재무과로 송부 : 2016.12.26

❍ 준공검사 회계처리를 위해 공간정보담당관에 요청 : 2016.12.26

❍ 사업추진 : ~ 2017.2.28

□ 붙 임 1. 부분준공 검수결과 확인서 1부.

2. 부분준공 산출물 관리대상 점검표 1부.  끝.