◆ 자연과 인간의 공간창조 기업 도화 ◆
	(주) 도 화 엔 지 니 어 링 Dohwa Engineering Co.,LTD.

수   신 : 서울특별시 도시기반시설본부장

참   조 : 방재시설부장

제   목 : 2014년 10월 휴일 및 연장작업계획 승인 요청

1. 도시기반시설본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업(4차)과 관련하여 시공사로부터 2014년 10월 휴일 및 연장작업계획서가 제출됨에 따라 이를 검토하여 붙임과 같이 휴일작업계획을 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다

붙    임 : 1) 휴일작업 계획 검토서       1부.

2) 휴일작업승인요청서         1부

3) 시공사 공문 사본           1부. 끝.

서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업

전면책임감리용역 책임감리원 김  봉  주(인)

담당/부장 장순건(*************)                                  감리단장 : 김봉주

협조자

시  행 : 도화(서남)2014-330호(2014.09.30.)           접  수 :             (2014.   .   .)

우 157-845 서울특별시 강서구 방화3동 65-2                  / 홈페이지 www.dohwa.co.kr

전화 (02)2661-6435 /전송 (02)2661-6437                 / 이메일 ozzie@dohwa.co.kr/ 공개

검 토 의 견 서

용 역 명

서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업

검토 일자

2014. 09. 30.

용역 기간

2009. 11. 8 ~ 2015. 08. 9

검 토 자

보조감리원 장순건

검토 분야

■공통 □토목 □건축 □기계 □전기 □조경

확 인 자

책임감리원 김봉주

검 토 명

휴일 및 연장작업 계획 검토

■ 목 적

휴일작업계획서의 작업사항, 귀책사유, 근무자의 적정배치 등을 확인하여 휴일작업의 적정성을 검토.

■ 개 요

○ 위    치 : 서울시 강서구 마곡동 91일대(서남물재생센터)

○ 규    모 : 고도처리시설개량 115만톤/일, 시설현대화 36만톤/일,

○ 사업기간 : 2009. 11. 09 ~ 2015. 08. 09,

○ 계약방식 : 설계·시공 일괄입찰방식(T/K)

○ 시 공 사 : 대림산업(주)외 5개사

○ 감 리 사 : (주)도화엔지니어링, (주)유신

○ 총도급비 : 277,603백만원

■ 검토 내용

1. 휴일작업에 발주처 방침

1) 도시기반시설본부장 방침제(89)호 : 토목부-3059(2010.03.08.)

2) 휴일작업 현장관리 개선방안 : 도시철도토목부-10681(2013.11.14.)

2. 10월 휴일작업 및 연장작업 요청 현황

작업일	작업형태	귀책사유	사 유	비고
4, 11, 18, 25	토요일	발주청	입찰안내서 5장 14 공사불능일 예정공정상 작업일수에 포함
12, 26	일요일	시공사	9월 추석연휴 및 우천으로 인한 부분공정지연과 구조물공사의 연속성을 위해 작업 실시
3, 9	공휴일	시공사
1∼31	연장작업(월∼금) (18:00∼20:00)	시공사
				연장작업

3. 휴일 및 야간작업 요청 검토

1) 작업 내용

작업일	작 업 내 용	검토내용	비고
4, 11, 18, 25	- 시트파일천공 및 항타 - PHC파일 항타 - 비계 및 거푸집 설치 - 벽체 철근 조립 - 지반기초치환	예정공정으로 진행
12, 26	- 시트파일천공 및 항타 - PHC파일 항타 - 비계 및 거푸집 설치 - 벽체 철근 조립 - 지반기초치환	예정공정상 휴무일이나, 9월 추석연휴와 잦은 우기로 부분 공정만회와 기 수행중인 구조물공사의 연속적인 작업을 통하여 공정 추진함.
3, 9
1∼31	- 시트파일 천공 및 항타 - 벽체 철근 조립, 거푸집 설치 - 지반기초치환		연장작업

2) 휴일 근무자작업 내용

작업일	현장책임자	근무자	근무인원 적정 유무	감리단	비고
3	한상명	공사담당4인	적정	장순건
4	한상명	공사담당4인	적정	유택상
9	한상명	공사담당2인	적정	신관식
11	백종현	공사담당2인	적정	김정현
12	이병립	공사담당 2인	적정	권기오
18	한상명	공사담당 4인	적정	장순건
25	이병립	공사담당 2인	적정	권기오
26	백종현	공사담당 2인	적정	유택상
11∼30 (연장)	한상명	공사팀장 1인 공사담당 2인	-	-	18:00 ∼ 20:00

3) 귀책사유 및 감리비 부담여부

작업일	귀책사유		감리비 부담여부		비고
	시공사	감리단	시공사	감리단
4, 11, 18, 25	발주처	발주처	대체휴무	대체휴무
12, 26	시공사	시공사	시공사지급	시공사지급
3, 9	시공사	시공사	시공사지급	시공사지급
1∼31 (연장작업)	시공사	시공사	시공사지급	시공사지급

4. 감리단 의견

-  9월 추석연휴 및 집중호우로 인한 부분공정 지연 만회와 구조물공사중 철근조립작업의 연속성을 위하여 휴일작업 및 연장작업 신청사항은 후속공정의 원활한 수행을 위하여 필요하며,

- 휴일근무자중 현장책임자는 현장대리인과 공사팀장의 상호 보완 근무예정으로 적정함,

■ 검토 결론

작업일	작업형태	귀책사유	감리비 부담여부	작업 내용	근무 인원	승인 유무	비고
4, 11, 18, 25	토요일	발주처	대체휴무	가시설 및 구조물공사	적정	승인
12, 26	일요일	시공사	시공사	가시설 및 구조물공사	적정	승인
3, 9	공휴일	시공사	시공사	가시설 및 구조물공사	적정	승인
11∼30	연장작업 (월∼금) (18:00∼20:00)	시공사	시공사	가시설 및 구조물공사	적정	승인

- 상기와 같이 휴일작업 및 야간 작업 승인 요청에 대하여 검토 보고 하며,

- 토요일 감리원 근무에 따른 대체휴무 실시하고자 합니다.