독서근린공원 지하주차장 건설

아파트 및 다세대 주택 밀집지역으로 우리구에서 주차수급율이 가장 열악한 신월7동 지역 주민의 주차불편 해소를 위하여 지역내 공공시설을 활용하여 주차장을 건설하고자 함

□  사업목적

○  아파트 및 다세대 주택 밀집지역으로 우리구에서 주차수급율이 가장 열악한 신월7동지역 주민의 주차불편 해소를 위하여 지역내 공공시설을 활용하여 주차장을 건설하고자 함

□  사업근거

○  법령상 근거 : 주차장법 제21조 (보조 또는 융자)

○  기타 근거(방침, 지침 등)

- 서울시정 4개년계획(2012.10.28) 도심주택가 주차장 100% 확보

- 구청장 방침(2010.7.25) 독서근린공원 지하주차장 건설계획

□  사업내용

○  위    치 : 양천구 신월동 987

○  규    모 : 부지면적 3,980㎡(연면적 8,411.96㎡), 250면

○  사업기간 : 2010.7.~2015.11.

○  사업내용 : 지상공원, 지하 1~3층 주차장

○  총사업비 : 14,572.3백만원(시비 8,743백만원 (60%),  구비 5,829.3백만원 (40%))

□  추진경위

○ 2010.7.25. : 독서근린공원 지하주차장 건설계획 수립

○ 2010.10.20~11.2.18 : 기본계획 및 타당성 조사 용역 실시

○ 2012.7.27. : 시 도시공원위원회 자문 심의(조건부 동의)

○ 2012.9.27. : 시 투융자심사(조건부 추진)

○ 2013.1. 4. : 기본 및 실시 설계용역 발주

○  2013.12.23. : 기본 및 실시 설계용역 준공

○ 2014. 2.20 : 시 계약심사 완료

○ 2014. 3. 3 : 구 일상감사 완료

○ 2014. 3. 4 : 공사 발주

○  2014. 5. 7 : 공사계약

○  2014. 5.15 : 토목공사 착공

○  2014. 6.16 : 전기, 통신공사 착공

□  2015년도 예산(안)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계			2,000	3,220	3,523	△303
	독서근린공원 지하주차장 건설		2,000	3,220	3,523	△303
		자치단체자본보조	2,000	3,220	3,523	△303

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 주차장 건설공사 시행

○  추진일정(단위 : 백만원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		3,523
공사대상지 보상		-
주민·전문가 의견수렴 및 계약절차 이행		-
공사발주	2014.5.	-
공사시행	2014.5.~2015.10	3,523
공사준공	2015.11.	-

※ 총사업비 투자현황 및 계획(단위 : 백만원)

구분		계	2013	2014	2015	2015 이후	비고
소 계		8,743	2,000	3,220	3,523	-
시설비
	공사비	8,743	2,000	3,220	3,523	-

실․국	부서명	담당자
도시교통본부	주차계획과	주차시설팀장	김종상 (2133-2359)	주무관	금종융 (2133-2364)

참 고 자 료

□  위치도

사업부지

□  현황사진